АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ Красная ул., д. 8, Кемерово, 650000 http://www.kemerovo.arbitr.ru E-mail: info@kemerovo.arbitr.ru ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ резолютивная часть

Дело № А27-21532/2022

город Кемерово

07 февраля 2023 года

Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Беляевой Л.В.,  

при ведении протокола и аудиозаписи секретарем судебного заседания Кадушкиной  А.П.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению  Администрации города Кемерово, г.Кемерово (ОГРН: 1034205011610, ИНН:  4207023869)  

к обществу с ограниченной ответственностью Производственно-строительная  компания "Континент", г.Кемерово (ОГРН: 1075405028390, ИНН: 5405358869)  

об обязании исполнить гарантийные обязательства при участии: от истца – Черемнова Д.Н., доверенность № 01-32/2728 от 29.11.2022; от ответчика – не явились; 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180-181 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

р е ш и л:

Исковые требования удовлетворить. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью Производственно-строительная компания «Континент» до 01.06.2023 устранить недостатки выполненных  работ в рамках гарантийных обязательств по муниципальному контракту от 04.07.2017   № Ф.2017.252481 на выполнение работ по благоустройству (капитальному ремонту)  дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Кемерово,  ул. Аллейная, Д. 9, а именно:  

1. устранить продольную трещину асфальто-бетонного покрытия на  проезжей части с торца подъезда № 1 длиной 7,9 м.;  

2. устранить разрушение асфальто-бетонного покрытия по окружности  колодца с торца дома у подъезда № 1;  

3. устранить трещину асфальто-бетонного покрытия на парковке возле  подъезда № 1 длиной 9,4 м.;  

4. устранить трещину асфальто-бетонного покрытия проезжей части у  подъезда № 1 длиной 6,5 м.;  

5. устранить трещину асфальто-бетонного покрытия проезжей части у  подъезда № 1 длиной 6,2 м.;  

6. устранить провал асфальто-бетонного покрытия на входной группе  подъезда № 1 (верхняя ступень);  

7. устранить 3 (три) провала асфальто-бетонного покрытия на примыкании к  дому между подъездами № 1 и № 2;  

8. устранить трещины асфальто-бетонного покрытия тротуара между  подъездами № 3 и № 4 длиной 1 м.;  

9. устранить зазор между асфальто-бетонным покрытием тротуара и  бордюрным камнем между подъездами № 3 и № 4;  

10. устранить провал на асфальто-бетонном покрытии входной группы  подъезда № 4;  

11. устранить зазор между асфальто-бетонным покрытием тротуара и  бордюрным камнем между подъездами № 4 и № 5 длиной 9,9 м.;  

12. устранить трещину асфальто-бетонного покрытия тротуара с левой  стороны от подъезда № 5 длиной 1м.;  

13. устранить трещину асфальто-бетонного покрытия на проезжей части с  левой стороны от подъезда № 5 длиной 6,15 м.;  

14. устранить трещину асфальто-бетонного покрытия тротуара с левой  стороны от подъезда № 6 длиной 5,9 м.;  

15. устранить трещину асфальто-бетонного покрытия тротуара с левой  стороны от подъезда № 6 длиной 3,5 м.;  

16. устранить трещину асфальто-бетонного покрытия на проезжей части  перед подъездом № 7 длиной 4,7 м.;  

17. устранить трещину асфальто-бетонного покрытия проезжей части с угла  дома с правой стороны подъезда № 7 длиной 5,45 м.;  

18. устранить трещину асфальто-бетонного покрытия на проезжей части с  задней части дома возле подъезда № 7;  

19. устранить трещины асфальто-бетонного покрытия отмостки 2 (две)  длиной 0,96 м. и 4 (четыре) длиной 0,97 м, 1 (одна) длиной 0,98 м.;  

20. устранить 4 (четыре) трещины асфальто-бетонного покрытия с торца  здания в районе тротуара подъезда № 1 длиной 1,67 м. каждая;  

21. устранить трещины асфальто-бетонного покрытия на пешеходной  дорожке длиной 1,51 м.;  

22. устранить зазор между асфальто-бетонным покрытием и бордюрным  камнем по всей длине пешеходной дорожки с двух сторон.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Производственно-строительная компания "Континент" государственную пошлину в размере 6000 руб. в  доход федерального бюджета.  

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции  в течение одного месяца с момента его принятия (изготовления его в полном объеме).  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его  принятия, если не подана апелляционная жалоба в Седьмой арбитражный  апелляционный суд.  

Решение может быть обжаловано в срок, не превышающий двух месяцев со дня  вступления в законную силу, в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа при  условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной  инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного  срока подачи апелляционной жалобы.  

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд  Кемеровской области.  

Судья Л.В. Беляева