АРБИТРАЖНЫЙ СУД  САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

И М Е Н Е М   Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А59-449/2019

г. Южно-Сахалинск

12 апреля 2019 года

Резолютивная часть решения объявлена 12 апреля 2019 года.

Полный текст решения изготовлен 12 апреля 2019 года.

Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи              Портновой О. А., при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Сахалинэнерго» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к Областному автономному учреждению «Спортивно-туристический комплекс «Горный воздух» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) об урегулировании разногласий при заключении дополнительного соглашения № 1 от 25.12.2018 к договору оказания услуг от 25.07.2017 № САХ-17/0757,

третье лицо - Министерство спорта и молодежной политики Сахалинской области,

при участии представителей:

от истца – ФИО2 по доверенности от 09.01.2019 года, ФИО3 по доверенности от 12.02.2019 года,

от ответчика – ФИО4 по доверенности от 01.01.2019 года,

от третьего лица – не явился, уведомлен 03.04.2019 года,

У С Т А Н О В И Л :

Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Сахалинэнерго» (далее – Истец) обратилось в суд с иском к Областному автономному учреждению «Спортивно-туристический комплекс «Горный воздух» (далее – Ответчик) об урегулировании разногласий при заключении дополнительного соглашения № 1 от 25.12.2018 к договору оказания услуг от 25.07.2017 № САХ-17/0757.

В обоснование иска указано, что  сторонами заключен договор оказания услуг №САХ-17/0757 от 25.07.2017 (далее Договор), в связи с необходимостью перевода в кабель участка воздушных линий BЛ С-11, С-12, принадлежащих ПАО «Сахалинэнерго».

По условиям Договора Исполнитель (ПАО «Сахалинэнерго») обязуется оказать Заказчику (ОАУ «СТК «Горный воздух») услуги по объекту «развитие спортивного комплекса СТК «Горный воздух», в том числе: разработка проектно-сметной документации, проектно-изыскательские работы, государственная экспертиза проектов (подготовка объекта Заказчика к строительству путем переноса (реконструкции), принадлежащих Исполнителю объектов: BЛ С-11, BЛ С-12 в границы земельного участка или земельных участков, на которых будет осуществляться строительство (реконструкция) (далее по тексту -Зона застройки).

Согласно п.2.1. Цена настоящего Договора ориентировочно составляет 433 000 000 рублей, в том числе НДС 66 050 847,46 копеек и может быть скорректирована после разработки проектно-сметной документации и утверждения госэкспертизой не более чем на 10%.

Пункт 2.2. Договора предусматривает, что в течение 20 дней после разработки проектно-сметной документации и утверждения госэкспертизой. Исполнитель направляет Заказчику оферту дополнительного соглашения к настоящему договору об изменении стоимости в случае такой необходимости.

Во исполнение Договора ПАО «Сахалинэнерго» направило ОАУ «СТК «Горный воздух» Дополнительное соглашение №1 к Договору. 

25 декабря 2018 года Заказчик ОАУ «Горный воздух» подписал дополнительное соглашение№1 и приложения к нему с Протоколом разногласий. В протоколе разногласий от 25.12.2018 года Заказчик принял Пункт 2, Пункт 6 Дополнительного соглашения №1 в редакции Исполнителя, остальные пункты отклонил. 

ПАО «Сахалинэнерго» не согласно с протоколом разногласий Заказчика, о чем поставило в известность ОАУ «СТК Горный Воздух» путем подписания Протокола разногласий с пометкой «Согласовано в редакции Исполнителя ПАО «Сахалинэнерго». 

Таким образом, не все пункты Дополнительного соглашения №1 к Договору сторонами согласованы.

Возникшие между сторонами разногласия по пункту 3 дополнительного соглашения № 1 от 25.12.2018 переданы на рассмотрение в суд в рамках настоящего спора.

Истец указывает, что пункт 2.2. Договора предусматривает необходимость установления цены Договора после проведения проектно-изыскательских работ.

Согласно калькуляции расчета стоимости строительства (Приложение №1 к дополнительному соглашению №1) цена договора оказания услуг № САХ-17/0757 составляет 285 239 727,94 рублей.

Цена сформирована на основе сводного сметного расчета стоимости строительства (перенос ВЛ С-11, С-12), получившей положительное заключение государственной экспертизы, по которой стоимость работ по реконструкции опор составила 190 524 991,53 рублей без НДС. 

Для определения цены договора оказания услуг №САХ-17/0757 от 25.07.2017 на стоимость работ по смете подлежит начислению рентабельность ПАО «Сахалинэнерго» и налог на прибыль, в связи с чем истец настаивает на установлении цены договора в размере  285 239 727 рубля 94 копейки, в том числе НДС 43 511 144  рубля 94 копейки.

В судебном заседании представители истца поддержали иск по основаниям, изложенным выше.

Представитель ответчика иск не признал, указав на то, что стоимость услуг, определенная экспертизой, составила 190 524 991,53 рубля, с учетом НДС 18% стоимость услуг по договору должна составлять 224 819 490 рублей.

Полагает включение в цену договора рентабельности и налога на прибыль необоснованно, так как по условиям договора его цена определяется по результатам экспертизы проектно-сметной документации и должна соответствовать цене работ, указанной в ней.

Представитель третьего лица не явился, уведомлен надлежаще, отзыв на иск не представил, в соответствии со ст. 156 АПК РФ суд рассматривает дело в отсутствие третьего лица.

Выслушав пояснения представителей истца и ответчика, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

Из материалов дела судом установлено, что 12.07.2017 года на сайте http://zakupki.gov.ru/ размещено Извещение о проведении закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) №1061200000317000004 .

Объект закупки - Оказание услуг по объекту «Развитие спортивного комплекса СТК "Горный воздух", в том числе: разработка проектно-сметной документации, проектно-изыскательские работы, государственная экспертиза проектов, реконструкция и строительство сопутствующей инфраструктуры комплекса, строительство горнолыжных трасс горы "Большевик", горы "Красная", трассы "Спортивная", западного склона горы "Большевик", канатных дорог, экстрим арены» (подготовка объекта Заказчика к строительству путем переноса (реконструкции), принадлежащих Исполнителю энергообъектов: BЛ С-11: участок опор № 50-55; BЛ С-12: участок опор № 34-37 (инв. № 055-30347, 055-30348) - район Динамо, в границы земельного участка или земельных участков, на которых будет осуществляться строительство (реконструкция).

По результатам закупки 25.07.2017 года истцом и ответчиком заключен договор оказания услуг № САХ-17/0757, по условиям которого Исполнитель (истец) обязуется оказать Заказчику (ответчику)  услуги по объекту «Развитие спортивного комплекса СТК "Горный воздух", в том числе: разработка проектно-сметной документации, проектно-изыскательские работы, государственная экспертиза проектов, реконструкция и строительство сопутствующей инфраструктуры комплекса, строительство горнолыжных трасс горы "Большевик", горы "Красная", трассы "Спортивная", западного склона горы "Большевик", канатных дорог, экстрим арены» (подготовка объекта Заказчика к строительству путем переноса (реконструкции), принадлежащих Исполнителю энергообъектов: ВЛ С-11: участок опор № 50- 55; BJI С-12: участок опор № 34-3 7 (une.Ns 055-30347, 055-30348) - район Динамо (далее по тексту - Энергообъект), в границы земельного участка или земельных участков, на которых будет осуществляться строительство (реконструкция) (далее по тексту - Зона застройки), на условиях предусмотренных настоящим Договором), далее – Договор.

В п. 1.1 Договора стороны согласовали цену Договора, указав, что цена настоящего Договора ориентировочно составляет: 433 000 000 (четыреста тридцать три миллиона рублей) 00 копеек, в том числе НДС 66 050 847 (шестьдесят шесть миллионов пятьдесят тысяч восемьсот сорок семь рублей) 46 копеек и может быть скорректирована после разработки проектно-сметной документации и утверждения госэкспертизой не более чем на 10%. 

Источник финансирования - средства, выделенные в соответствии с Соглашением № 5-СКВ/2017 от 22.02.2017г. «на предоставление субсидии на финансирование капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Сахалинской области».

В течение 20 дней после разработки проектно-сметной документации и утверждения госэкспертизой, Исполнитель направляет Заказчику оферту дополнительного соглашения к настоящему договору об изменении стоимости в случае такой необходимости (п. 2.2 Договора).

21.12.2018 года ОАУ «Управление государственной экспертизы Сахалинской области» выданы положительные заключения № 65-1-0259-18 и № 65-1-0260-18 о достоверности сметной стоимости реконструкции объектов капитально строительства:

1. «Перенос (реконструкция) энергообъектов: BЛ С-11: участок опор № 49-56 (инв. № 055-30348) - район Динамо, в границы земельного участка или земельных участков, на которых будет осуществляться строительство (реконструкция).

2. «Перенос (реконструкция) энергообъектов: BЛ С-12: участок опор № 33-38 (инв. № 055-30347) - район Динамо, в границы земельного участка или земельных участков, на которых будет осуществляться строительство (реконструкция).

Предметом государственной экспертизы были сводные сметные расчеты (л. д. 87,-94), согласно которым стоимость строительства работ по объектам составила:

-BЛ С-11: участок опор № 49-56 (инв. № 055-30348) - район Динамо, в границы земельного участка или земельных участков, на которых будет осуществляться строительство (реконструкция) - 93 727,42 тыс. рублей (сумма глав 1-12 + непредвиденные расходы).

-BЛ С-12: участок опор № 33-38 (инв. № 055-30347) - район Динамо, в границы земельного участка или земельных участков, на которых будет осуществляться строительство (реконструкция)  - 96 797,56 тыс. рублей.

25.12.2018 года истец составил Дополнительное соглашение № 1 к Договору, предложив в нем изложить условия Договора в следующей редакции:

Пункт 1.1. раздела 1 Договора принять в следующей редакции:

«1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по объекту «Развитие спортивного комплекса СТК «Горный воздух», в том числе: разработка проектно-сметной документации, проектно-изыскательские работы, государственная экспертиза проектов, реконструкция и строительство сопутствующей инфраструктуры комплекса, строительство горнолыжных трасс горы «Большевик», горы «Красная», трассы «Спортивная», западного склона горы «Большевик», канатных дорог, экстрим арены» (подготовка объекта Заказчика к строительству путём переноса (реконструкции), принадлежащих Исполнителю энергообъектов:

«Перенос (реконструкции) энергообъектов: BJI С-11: участок опор № 49-56 (инв. Л? 055- 30348) - район Динамо, (далее по тексту - Энергообъект), в границы земельного участка или участков, на которых будет осуществляться строительство (реконструкция)», (далее по тексту-Зона застройки), на условиях, предусмотренных настоящим Договором;

«Перенос (реконструкции) энергообъектов: ВЛ С-12; участок опор № 33-38 (инв. № 055- район Динамо, (далее по тексту - Энергообъект), в границы земельного участка или участков, на которых будет осуществляться строительство (реконструкция)», (далее по тексту - Зона застройки), на условиях, предусмотренных настоящим Договором).

2. Исключить п. 1.3.2. раздела 1 Договора и Приложение №1 к Договору.

3. Пункт 2.1. раздела 2 Договора принять в следующей редакции:

«2.1. Цена настоящего договора составляет: 285 239 727 (Двести восемьдесят пять миллионов двести тридцать девять тысяч семьсот двадцать семь рублей) 94 копейки, в том числе НДС 43 511 144 (сорок три миллиона пятьсот одиннадцать тысяч сто сорок четыре рубля) 94 копеек» согласно калькуляции расчёта стоимости строительства (Приложение N5 1 к настоящему дополнительному соглашению) и может быть скорректирована не более чем на 10 % по фактически сложившимся затратам. Источник финансирования - средства, выделенные в соответствии с соглашением № 5-СКВ/2017 от 22.02.2017 года «на предоставление субсидии на финансирование капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Сахалинской области».

4. Наименование Графика оказания услуг (Приложение № 3 к Договору) и Схемы трассировки переустройства энергообъектов (Приложение № 4 к Договору) принять в редакции Приложения № 2 и Приложения № 3 соответственно настоящего дополнительного соглашения.

5. Пункт 4.1. раздела 4 Договора принять в редакции: 

Срок выполнения работ: начало - июнь 2017 г.

окончание - июль 2019г.

6.  Пункт 5.3.1. раздела 5 договора принять в редакции:

Авансовый платёж в размере 129 900 000,00 (сто двадцать девять миллионов девятьсот тысяч рублей) 00 копеек, с учётом НДС 18% вносится в течении 30 банковских дней со дня заключения настоящего договора и получения документов на оплату (счёт на предоплату).

7. Пункт 5.3.2. раздела 5 договора принять в редакции:

Сумма в размере 155 102 160 (сто пятьдесят пять миллионов сто две тысячи сто шестьдесят рублей) 78 копеек, с учётом НДС 18% вносится в течении 3 банковских дней со дня передачи Заказчику проектно-сметной документации, получившей положительное заключение госэкспертизы и прошедшей оценку достоверности сметной стоимости, выполнении строительно-монтажных и демонтажных работ и подписанного Исполнителем Акта приема передачи проектно-сметной документации и Акта оказания услуг по первому этапу (Приложение № 4 и Приложение №5 к настоящему дополнительному соглашению).

8. Пункт 5.3.3. раздела 5 договора принять в редакции:

Оставшуюся часть цены Договора в размере 237 567 (двести тридцать семь тысяч пятьсот шестьдесят семь рублей) 16 копеек, с учётом НДС 18%, Заказчик перечисляет Исполнителю в течение 10 банковских дней с момента получения счёт-фактуры и подписанного Исполнителем Акта о выполнении договорных обязательств (Приложение № 6) к настоящему дополнительному соглашению.

К дополнительному соглашению оформлено Приложение № 1, которым определена Калькуляция расчёта стоимости строительства объектов: «Перенос (реконструкции) энергообъектов: В Л С-11: участок опор Х° 49-56 (инв. Ха 055-30348) район Динамо, в границы земельного участка или участков, на которых будет осуществляться строительство (реконструкция)», «Перенос (реконструкции) энергообъектов: ВЛ С-12: участок опор Ха 33-38 (инв. Ха 055-30347) район Динамо, в границы земельного участка или участков, на которых будет осуществляться строительство (реконструкция)»:

Наименование

Стоимость

Сводный сметный расчет стоимости строительства 

"Перенос (реконструкции) энергообъектов: BJI С-11: 

участок опор 49-56 (инв. Ха 055-30348)- район Динамо, 

в границы земельного участка или участков, на которых 

будет осуществляться строительство (реконструкция)"

93 727 423,73

Сводный сметный расчет стоимости строительства 

"Перенос (реконструкции) энергообъектов: ВЛ С-12: 

участок опор Ха 33-38 (инв. Ха 055-30347) район Динамо,

в границы земельного участка или участков, на которых 

будет осуществляться строительство (реконструкция)"

96 797 567,80

ИТОГО затрат согласно сводных сметных расчетов без НДС

190 524 991,53

Рентабельность 1,5%

2 857 874,87

ИТОГО затрат с учетом рентабельности

193 382 866,40

Налог на прибыль 20%

48 345 716,60

ИТОГО с налогом на прибыль

241 728 583,00

НДС 18 %

43 511 144,94

ИТОГО затраты с НДС

285 239 727,94

Ответчик подписал указанное Дополнительное соглашение с протоколом разногласий от 25.12.2018 года, в котором п. 1, 4, 5, 7, 8 Дополнительного соглашения предложил исключить, п. 2, 6 – принять в редакции истца (исполнителя), п. 3 изложил в следующей редакции: «2.1. Цена настоящего договора составляет: 224 819 490 (Двести двадцать четыре миллиона восемьсот девятнадцать тысяч четыреста девяносто) рублей, в том числе НДС 34 294 510 (тридцать четыре миллиона двести девяносто четыре тысячи пятьсот десять) рублей» согласно калькуляции расчёта стоимости строительства (Приложение № 1 к настоящему дополнительному соглашению) и может быть скорректирована не более чем на 10 % по фактически сложившимся затратам. Источник финансирования - средства, выделенные в соответствии с соглашением № 5-СКВ/2017 от 22.02.2017 года «на предоставление субсидии на финансирование капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Сахалинской области».

Поскольку стороны при подписании Дополнительного соглашения № 1 к Договору согласия по п. 3 Дополнительного соглашения не достигли, истец заявил настоящий иск об урегулировании разногласий при заключении договора в части п. 3 Дополнительного соглашения, касающегося п. 2.1 Договора о цене Договора.

В соответствии со ст. 432, 446 Гражданского кодекса РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

В случаях передачи разногласий, возникших при заключении договора, на рассмотрение суда на основании статьи 445 настоящего Кодекса либо по соглашению сторон условия договора, по которым у сторон имелись разногласия, определяются в соответствии с решением суда.

В соответствии со ст. 424 Гражданского кодекса РФ исполнение договора оплачивается по цене, установленной соглашением сторон.

Изменение цены после заключения договора допускается в случаях и на условиях, предусмотренных договором, законом либо в установленном законом порядке.

Как установлено судом и не оспаривается сторонами, Договор от 25.07.2017 года в п. 2.1 определяет ориентировочную стоимость Договора и содержит ссылку на возможность ее корректировки после разработки проектной документации и утверждения ее госэкспертизой.

По общему правилу, установленному в ст. 34 Закона № 44-ФЗ изменение цены Контракта не допускается.

В п. 2 ст. 34 Закона № 44-ФЗ установлено, что при заключении контракта указывается, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, а в случаях, установленных Правительством Российской Федерации, указываются ориентировочное значение цены контракта либо формула цены и максимальное значение цены контракта, установленные заказчиком в документации о закупке. При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей и статьей 95 настоящего Федерального закона.

Постановлением Правительства РФ от 13.01.2014 N 19 «Об установлении случаев, в которых при заключении контракта в документации о закупке указываются формула цены и максимальное значение цены контракта" установлено, что при заключении контракта в документации о закупке указываются формула цены и максимальное значение цены контракта в случае заключения контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, в порядке и на основаниях, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 12 мая 2017 г. N 563 "О порядке и об основаниях заключения контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации".

Таким образом, условие п. 2.1 Договора о возможности изменения цены Договора после изготовления проектно-сметной документации и прохождения государственной экспертизы не противоречит закону, в связи с чем необходимость заключения дополнительного соглашения в данном случае правомерно установлена условиями Договора.

Судом установлено, что по условиям Договора истец фактически обязался выполнить работы по разработке проектно-сметной документации, проектно-изыскательским работам, государственной экспертизе проектов, реконструкции и строительству сопутствующей инфраструктуры комплекса,, то есть выполнить подготовку объекта Заказчика к строительству путем переноса (реконструкции), принадлежащих Исполнителю энергообъектов в границы земельного участка или земельных участков, на которых будет осуществляться строительство (реконструкция).

Определяя характер возникших между сторонами договорных отношений, учитывает, что в силу статьи 421 ГК РФ юридические лица свободны в заключении договора. Стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами.

Стороны могут заключить договор, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами (смешанный договор). К отношениям сторон по смешанному договору применяются в соответствующих частях правила о договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре, если иное не вытекает из соглашения сторон или существа смешанного договора (пункт 3 статьи 421 ГК РФ).

Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (статья 422 ГК РФ).

Согласно статье 431 ГК РФ, при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом.

Если правила, содержащиеся в части первой настоящей статьи, не позволяют определить содержание договора, должна быть выяснена действительная общая воля сторон с учетом цели договора. При этом принимаются во внимание все соответствующие обстоятельства, включая предшествующие договору переговоры и переписку, практику, установившуюся во взаимных отношениях сторон, обычаи делового оборота, последующее поведение сторон.

В соответствии с пунктом 1 статьи 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

По условиям Договора, заключенного сторонами, истец осуществляет работы по подготовке объекта Заказчика к строительству путем переноса (реконструкции), принадлежащих Исполнителю энергообъектов в границы земельного участка или земельных участков, на которых будет осуществляться строительство (реконструкция), то есть между сторонами имеют место отношения по договору возмездного оказания услуг. 

Согласно пункту 1 статьи 781 ГК РФ заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.

Изложенное означает, что в связи с совершением истцом действий по переносу (реконструкции), принадлежащих Исполнителю энергообъектов в границы земельного участка или земельных участков, на которых будет осуществляться строительство (реконструкция), истец понесет соответствующие расходы на совершение указанных действий (оказание услуг ответчику).

Согласно прошедшему государственную экспертизы сводному сметному расчету, стоимость таких расходов истца составит 190 524 991, 53 рубля.

Указанная сумма компенсации, полученная истцом от ответчика за оказанные услуги по Договору, является доходом истца, учитываемым при определении налоговой базу по налогу на прибыль по правилам гл. 25 Налогового кодекса РФ.

При этом произведенные истцом расходы по переносу сетей не включаются в состав расходов, уменьшающих налоговую базу по налогу на прибыль, так как являются расходами, связанными с реконструкцией основных средства (п. 5 ст. 270 Налогового кодекса РФ).

Изложенное означает, что истец, в силу положений гл. 25 Налогового кодекса РФ, при получении от ответчика компенсации за оказанные услуги в размере 190 524 991,53 рубля, обязан будет уплатить налог на прибыль с суммы компенсации (за минусом НДС).

Размер налога на прибыль составит 20 % или 47 631 247,47  рублей (190 524 991,53 / 0,8 = 238 156 239, разница 20 % = 47 631 247,47  рублей).

Поскольку необходимость уплаты истцом налога обусловлена заключением Договора с ответчиком, постольку данная сумма подлежит включению в состав затрат, подлежащих возмещению ответчиком по Договору.

С учетом изложенного, сумма затрат по Договору составит 238 156 239, 41 рубль.

Спора о размере подлежащего учету в цене Договора размера НДС (18 %) у сторон не имеется.

С учетом изложенного, НДС, применительно к стоимости компенсации за оказанные услуги, составит 42 868 123,09 рублей (18 % от 238 156 239).

Доводы ответчика о неправомерности включения в цену Договора размера налога на прибыль суд признает необоснованными, так как по смыслу ст. 781  Гражданского кодекса РФ на заказчика возложена обязанность компенсировать исполнителю понесенные им в связи с оказанием услуг расходы, обязанность по уплате налога на прибыть (как и НДС) установлена для истца ФИО5 кодексом РФ и ее исполнение истцом обусловлено заключением им Договора с ответчиком, в связи с чем такие расходы истца являются связанными с оказанием услуг по договору.

При таких обстоятельствах подлежит согласованию в рамках урегулирования разногласий цена договора в размере 281 024 362, 51 рубль.

С учетом изложенного, суд согласовывает п. 2.1 Дополнительного соглашения в следующей редакции:

«2.1. Цена настоящего договора составляет: 281 024 362 (двести восемьдесят один миллион двадцать четыре тысячи триста шестьдесят два)  рубля 51 копейку, в том числе НДС 42 868 123 (сорок два миллиона восемьсот шестьдесят восемь тысяч сто двадцать три) рубля 09 копеек согласно калькуляции расчёта стоимости строительства (Приложение № 1 к настоящему дополнительному соглашению) и может быть скорректирована не более чем на 10 % по фактически сложившимся затратам. Источник финансирования - средства, выделенные в соответствии с соглашением № 5-СКВ/2017 от 22.02.2017 года «на предоставление субсидии на финансирование капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Сахалинской области».

Поскольку п. 2.1 Дополнительного соглашения имеет отсылку к Приложению № 1 к нему, постольку в приложении № 1 дополнительному соглашению подлежит указанию калькуляция расчета стоимости строительства в следующей редакции:

№

nn

Наименование

Стоимость

1

Сводный сметный расчет стоимости строительства "Перенос (реконструкции) энергообъектов: BJI С-11: участок опор Ха 49-56 (инв. Ха 055-30348)- район Динамо, в границы земельного участка или участков, на которых будет осуществляться строительство (реконструкция)"

93 727 423,73

2

Сводный сметный расчет стоимости строительства "Перенос (реконструкции) энергообъектов: ВЛ С-12: участок опор Ха 33-38 (инв. Ха 055-30347) район Динамо, в границы земельного участка или участков, на которых будет осуществляться строительство (реконструкция)"

96 797 567,80

3

ИТОГО затрат согласно сводных сметных расчетов без НДС

190 524 991,53

4

Налог на прибыль 20%

47 631 247,47

5

ИТОГО с налогом на прибыль

238 156 239, 41

6

НДС 18 %

42 868 123,09

7

ИТОГО затраты с НДС

281 024 362, 51

В то же время суд не находит оснований для включения цену Договора рентабельности в размере 1,5 %, что в денежном эквиваленте составляет 2 857 874, 87 рублей, так как указанная категория не является услугой, а истец никаких действий по ее «оказанию» по условиям Договора не осуществляет.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 167-176 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд 

Р Е Ш И Л :

Иск удовлетворить.

Урегулировать разногласия, возникшие между истцом ПАО «Сахалинэнерго» и ответчиком «ОАУ «Спортивно-туристический комплекс «Горный воздух» при заключении Дополнительного соглашения №1 от 25.12.2018 к Договору оказания услуг по подготовке объекта к строительству путем переноса инженерных коммуникаций от 25.07.2017 года № САХ-17/0757.

Принять пункта 3 Дополнительного соглашения № 1 от 25.12.2018 в следующей редакции: 

«Пункт 2.1. раздела 2 Договора принять в следующей редакции:

2.1. Цена настоящего договора составляет: 281 024 362 (двести восемьдесят один миллион двадцать четыре тысячи триста шестьдесят два)  рубля 51 копейку, в том числе НДС 42 868 123 (сорок два миллиона восемьсот шестьдесят восемь тысяч сто двадцать три) рубля 09 копеек согласно калькуляции расчёта стоимости строительства (Приложение № 1 к настоящему дополнительному соглашению) и может быть скорректирована не более чем на 10 % по фактически сложившимся затратам. Источник финансирования - средства, выделенные в соответствии с соглашением №5-СКВ/2017 от 22.02.2017 года «на предоставление субсидии на финансирование капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Сахалинской области».

Приложение 1 к дополнительному соглашению согласовать в следующей редакции:

№

nn

Наименование

Стоимость

1

Сводный сметный расчет стоимости строительства "Перенос (реконструкции) энергообъектов: BJI С-11: участок опор Ха 49-56 (инв. Ха 055-30348)- район Динамо, в границы земельного участка или участков, на которых будет осуществляться строительство (реконструкция)"

93 727 423,73

2

Сводный сметный расчет стоимости строительства "Перенос (реконструкции) энергообъектов: ВЛ С-12: участок опор Ха 33-38 (инв. Ха 055-30347) район Динамо, в границы земельного участка или участков, на которых будет осуществляться строительство (реконструкция)"

96 797 567,80

3

ИТОГО затрат согласно сводных сметных расчетов без НДС

190 524 991,53

4

Налог на прибыль 20%

47 631 247,47

5

ИТОГО с налогом на прибыль

238 156 239, 41

6

НДС 18 %

42 868 123,09

7

ИТОГО затраты с НДС

281 024 362, 51

Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Сахалинской области в течение одного месяца.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия (изготовления в полном объеме), если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

СудьяО. ФИО6