АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ  

ул. Коммунистическая, 52, г. Улан-Удэ, 670001 

e-mail: info@buryatia.arbitr.ru, web-site: http://buryatia.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А10-775/2022

26 июня 2024 года

г. Улан-Удэ

 

Арбитражный суд Республики Бурятия в составе судьи Богданова А. В.,  

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Исковые требования федерального казенного учреждения «Управление  федеральных автомобильных дорог «Южный Байкал» Федерального дорожного  агентства» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) удовлетворить.  

Обязать акционерное общество «Дорожник» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) в течение трех месяцев в период устойчивых положительных температур с  момента вступления решения суда в законную силу исполнить в натуре гарантийные  обязательства по государственному контракту № 18-16-ф от 26.04.2016 в соответствии с  проектной документацией, путем выполнения за свой счет мероприятий по устранению  следующих дефектов:  

1. По объекту «Ремонт моста через ручей на км 158+200 по а/д Р-258 Иркутск —  Улан-Удэ - Чита, Иркутская область»:  

- разрушение бетона насадки опоры № 1, № 3 - 0,7 м2 глубиной до 3 см;  - коррозия конструктивной арматуры на ригелях береговых опор № 1 и № 3;  

2. По объекту «Ремонт моста через ручей на км 154+900 а/д А-333 ФИО1 –  ФИО2 граница с Монголией, Республика Бурятия:  

- выщелачивание цементного камня: в швах омоноличивания балок пролетного  строения БЗ, Б4 (общей площадью – 4 м2); на крайней балке Б8 справа (площадью 0,01  

- разрушение бетонного конуса опоры № 1 общей площадью - 1,4 м2 глубиной до  10 см;  

- пролом монолитного конуса со стороны опоры № 1 слева 0,2 м2 глубиной до 30  см;  

- сетка трещин в монолитном конусе со стороны опоры № 1 слева; 

3. По объекту «Ремонт моста через р. Тугнуй на км 542+600 по а/д Р-258 Иркутск -  Улан-Удэ - Чита, Республика Бурятия»:  

- коррозия точечная на пролетном строении № 2; 

- выщелачивание цементного камня с отложением солей на поверхности бетона  (общей площадью 1,5 м2): на пролетных строениях № 2 и № 1 в зоне сопряжения  пролетных строений и опор № 1 и № 3; на пролетном строении № 1 между плитами № 7, 8 и  плитами № 1, 2;  

- протечки на опорах № 1, 2, 3 через конструкцию деформационного шва; 

4. По объекту «Ремонт моста через р. Сухара на км 556+680 а/д Р-258 Иркутск -  Улан-Удэ - Чита, Республика Бурятия»:  

- выщелачивание цементного камня с отложением солей на поверхности бетона  (общей площадью 1 м2): на пролетном строении № 1 в зоне деформационного шва № 1; на  пролётном строении № 3 в зоне деформационного шва № 4; между плитами № 1, 2  пролетного строения  № 1;  

- протечки на опорах № 1, 3, 4 через конструкцию деформационного шва. 

Взыскать с акционерного общества «Дорожник» в доход федерального бюджета  государственную пошлину в размере 6000 руб.  

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного  срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи  апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в  законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной  инстанции.  

Решение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд в  течение месяца с даты принятия (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный  суд Республики Бурятия.  

Судья А.В. Богданова