Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

Дело № А40-189531/19-68-1214

17 февраля 2020 года

г. Москва

Резолютивная часть решения объявлена 21 января 2020 года

Решение в полном объеме изготовлено 17 февраля 2020 года

Судья   Абрамова Е.А. 

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление 

ООО "ОЖСК" (460507, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 07.04.2014, ИНН: 

<

***>) к ответчику АО "ГУОВ" (119021, МОСКВА ГОРОД, ПРОСПЕКТ КОМСОМОЛЬСКИЙ, ДОМ 18, СТРОЕНИЕ 3, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 08.07.2009, ИНН: 

<

***>, КПП: 770401001) о взыскании 17 878 500,08 рублей

при участии:

от истца: ФИО2 дов. от 10.01.2020г.

от ответчика: ФИО3 дов. от 07.11.2019г.

УСТАНОВИЛ:

Первоначальный иск заявлен о взыскании с ответчика в пользу истца, с учётом принятого судом уточнения в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суммы основного долга в размере 9 306 665,91 руб.

Определением от 01.10.2019 г. к совместному производству принят встречный иск, с учётом принятого судом уточнения в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса РФ, о взыскании неустойки за нарушение срока окончания работ в размере 4 542 073,28 руб.; процентов за пользование авансом как коммерческим кредитом в размере 746 476,19 руб.

Истец на первоначальных исковых требованиях настаивал по доводам, изложенным в исковом заявлении, ссылался на представленные доказательства; против удовлетворения встречного иска возражал.

Ответчик с первоначальными исковыми требованиями не согласен по доводам отзыва на иск, на требованиях встречного иска настаивал в полном объёме.

Выслушав доводы представителей сторон, исследовав материалы дела, оценив доказательства в их совокупности и взаимосвязи, суд пришёл к следующим выводам.

Как следует из представленных в материалы дела документов, между Акционерным обществом «Главное управление обустройства войск» (далее - генподрядчик) и ООО «Оренбургская Жилищно-строительная Компания» (далее - подрядчик) был заключен Договор от 24 июля 2017 г.№ 1515187380352090942000000/2017/2-1807 на завершение строительства объекта: «Жилой дом на 134 квартиры в г. Оренбурге» (шифр объекта Ц-57/15-11) (далее - Договор).

Согласно пункту 3.1 Договора цена составляет 95 721 587 рублей, в т.ч. НДС18 % - 14 604 598,02 руб.

Согласно Дополнительного соглашения № 2 от 14 марта 2019 г. к Договору стороны пришли к соглашению о внесении изменений в Договор в части согласования выполнения дополнительных работ, не предусмотренных договором, в т.ч. Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору).

Согласно п. 4 Дополнительного соглашения абзац 1 пункта 3.1 Договора изложить в следующей редакции:

«3.1. Цена Договора составляет 99 978 014,44 рублей, в т.ч. НДС, исчисленный по ставке, установленной ст. 164 НК РФ на даты выполнения работ.».

В соответствии с п. 6 Дополнительного соглашения пункт 18.1 Договора изложить в следующей редакции:

«18.1. Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до 31 декабря 2019 г.».

 Между сторонами подписаны без замечаний следующие акты о приёмке выполненных работ по Форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по Форме КС-3: акт о приёмке выполненных работ от 26.07.2017 г. № 1 на сумму369 326,54 руб.; акты о приёмке выполненных работ от 26.07.2017 г. № 2 на сумму5 299 832,64 руб.; акты о приёмке выполненных работ от 26.07.2017 г. № 3 на сумму440 204,2 руб.; акты о приёмке выполненных работ от 26.06.2017  г.№ 4 на сумму1 589 892,15 руб.; справка о стоимости выполненных работ и затрат от 26.07.2017 г. № 1 на сумму 7 699 255,53 руб.; акт о приёмке выполненных работ от 02.10.2017 г. № 5 на сумму 657 925,52 руб.; акт о приёмке выполненных работ от 02.10.2017 г. № 6 на сумму89 769,68 руб.; акт о приёмке выполненных работ от 02.10.2017 г. № 7 на сумму114 675,94 руб.; акт о приёмке выполненных работ от 02.10.2017 г. № 8 на сумму33 369,22 руб.; акт о приёмке выполненных работ от 02.10.2017 г. № 9 на сумму2 346 301,38 руб.; акт о приёмке выполненных работ от 02.10.2017 г. № 10 на сумму4 177 482,02 руб.; акт о приёмке выполненных работ от 02.10.2017 г. № 11 на сумму131 582,98 руб.; акт о приёмке выполненных работ от 02.10.2017 г. № 12 на сумму1 463 050,14 руб.; акт о приёмке выполненных работ от 02.10.2017 г. № 13 на сумму20 019,88 руб.; акт о приёмке выполненных работ от 02.10.2017 г. № 14 на сумму3 236 925,26 руб.; справка о стоимости выполненных работ и затрат от 02.10.2017 г. № 2 на сумму 12 271 102,02 руб.; акт о приёмке выполненных работ от 25.11.2017 г. № 15 на сумму 350471,8 руб.; акт о приёмке выполненных работ от 25.11.2017 г. № 16 на сумму 3 407 329,06 руб.; акт о приёмке выполненных работ от 25.11.2017 г. № 17 на сумму 949 904,72 руб.; акт о приёмке выполненных работ от 25.11.2017 г. № 19 на сумму 3 797 029,96 руб.; акт о приёмке выполненных работ от 25.11.2017 г. № 20 на сумму 1 126,9 руб.; акт о приёмке выполненных работ от 25.11.2017 г. № 21 на сумму561 517,16 руб.; акт о приёмке выполненных работ от 25.11.2017 г. № 22 на сумму225 785,92 руб.; акт о приёмке выполненных работ от 25.11.2017 г. № 23 на сумму318 959,9 руб.; акт о приёмке выполненных работ от 25.11.2017 г. № 24 на сумму 3 320 573,1 руб.; акт о приёмке выполненных работ от 25.11.2017 № 25 на сумму 191 226,08 руб.; акт о приемке выполненных работ от 25.11.2017 № 26 на сумму 57 277,2 руб.; акт о приемке выполненных работ от 25.11.2017 № 27 на сумму 258 782,26 руб.; акт о приемке выполненных работ от 25.11.2017 № 28 на сумму 2 742 522,96 руб.; акт о приемке выполненных работ от 25.11.2017 № 29 на сумму 1 045 221,58 руб.; акт о приемке выполненных работ от 25.11.2017 № 30 на сумму 769 404,84 руб.; акт о приемке выполненных работ от 25.11.2017 № 31 на сумму 2 750 693,28 руб.; акт о приемке выполненных работ от 25.11.2017 № 32 на сумму 1126,9 руб.; акт о приемке выполненных работ от 25.11.2017 № 33 на сумму 1 130 167,42 руб.; акт о приемке выполненных работ от 25.11.2017 № 34 на сумму 233 627,02 руб.; акт о приемке выполненных работ от 25.11.2017 № 35 на сумму 368 689,82 руб.; акт о приемке выполненных работ от 25.11.2017 № 36 на сумму 1 209 896,48 руб.; акт о приемке выполненных работ от 25.11.2017 № 37 на сумму 23878,48 руб.; справка о стоимости выполненных работ и затрат от 25.11.2017 № 3 на сумму 26 932 905,28 руб.; акт о приемке выполненных работ от 18.12.2017 № 60 на сумму 112 849,3 руб.; акт о приемке выполненных работ от 18.12.2017 № 59 на сумму 40 089,32 руб.; акт о приемке выполненных работ от 18.12.2017 № 58 на сумму 28364,84 руб.; акт о приемке выполненных работ от 18.12.2017 № 57 на сумму 98801,4 руб.; акт о приемке выполненных работ от 18.12.2017 № 55 на сумму 140 330,32 руб.; акт о приемке выполненных работ от 18.12.2017 № 54 на сумму 4 832 180,24 руб.; акт о приемке выполненных работ от 18.12.2017 № 53 на сумму 109496,92 руб.; акт о приемке выполненных работ от 18.12.2017 № 52 на сумму 326 830,5 руб.; акт о приемке выполненных работ от 18.12.2017 № 51 на сумму 96 712,8 руб.; акт о приемке выполненных работ от 18.12.2017 № 50 на сумму 533 345,84 руб.; акт о приемке выполненных работ от 18.12.2017 № 49 на сумму 130 301,5 руб.; акт о приемке выполненных работ от 18.12.2017 № 48 на сумму 4 903 467,58 руб.; акт о приемке выполненных работ от 18.12.2017 № 47 на сумму 106 561,08 руб.; акт о приемке выполненных работ от 18.12.2017 № 46 на сумму 1 802 565,64 руб.; справка о стоимости выполненных работ и затрат от 18.12.2017 № 4 на сумму 13 796 832,58 руб.;   акт о приемке выполненных работ от 25.01.2018 № 66 на сумму 1 247 920,8 руб.; акт о приемке выполненных работ от 25.01.2018 № 65 на сумму 43 765,02 руб.; акт о приемке выполненных работ от 25.01.2018 № 64 на сумму 257 429,98 руб.; акт о приемке выполненных работ от 25.01.2018 № 63 на сумму 1 560 128,74 руб.; акт о приемке выполненных работ от 25.01.2018 № 62 на сумму 734 168,86 руб.; акт о приемке выполненных работ от 25.01.2018 № 61 на сумму 5 705 121,82 руб.; справка о стоимости выполненных работ и затрат от 25.01.2018 № 5 на сумму 9 548 535,22 руб.; акт о приемке выполненных работ от 10.04.2018 № 64 на сумму 87 219,7 руб.; акт о приемке выполненных работ от 10.04.2018 № 67 на сумму 67 880,68 руб.; акт о приемке выполненных работ от 10.04.2018 № 66 на сумму 621533,14 руб.; акт о приёмке выполненных работ от 10.04.2018 № 66/1 на сумму 561 100,62 руб.; акт о приемке выполненных работ от 10.04.2018 № 70 на сумму 7 833 539,74 руб.;  акт о приемке выполненных работ от 10.04.2018 № 70/1 на сумму 98 445,04 руб.; акт о приемке выполненных работ от 10.04.2018 № 71 на сумму 1 122 437,24 руб.; акт о приемке выполненных работ от 10.04.2018 № 71/1 на сумму 1027,78 руб.; акт о приемке выполненных работ от 10.04.2018 № 72 на сумму 1 708 039,38 руб.; акт о приемке выполненных работ от 10.04.2018 № 73 на сумму 277231,56 руб.; акт о приемке выполненных работ от 10.04.2018 № 77 на сумму 624 736,84 руб.; акт о приемке выполненных работ от 10.04.2018 № 77/1 на сумму 561 100,62 руб.; акт о приемке выполненных работ от 10.04.2018 № 76 на сумму 621533,14 руб.; акт о приемке выполненных работ от 10.04.2018 № 77 на сумму 1 360 440,88 руб.; справка о стоимости выполненных работ и затрат от 10.04.2018 № 6 на сумму 12 555 799,44 руб.; акт о приемке выполненных работ от 07.05.2018 № 78 на сумму 405 001, 96 руб.; акт о приемке выполненных работ от 07.05.2018 № 79 на сумму 11 991,16 руб.; акт о приемке выполненных работ от 07.05.2018 № 80 на сумму 110 811, 44 руб.; акт о приемке выполненных работ от 07.05.2018 № 81 на сумму 342307,38 руб.; акт о приемке выполненных работ от 07.05.2018 № 82 на сумму 11991, 16 руб.; акт о приемке выполненных работ от 07.05.2018 № 83 на сумму 119344, 02 руб.; акт о приемке выполненных работ от 07.05.2018 № 84 на сумму 32996,34 руб.; акт о приемке выполненных работ от 07.05.2018 № 85 на сумму 17039,2 руб.; акт о приемке выполненных работ от 07.05.2018 № 86 на сумму 43 933,76 руб.; акт о приемке выполненных работ от 07.05.2018 № 87 на сумму - 287, 92 руб.; акт о приемке выполненных работ от 07.05.2018 № 88 на сумму 105 582,86 руб.; акт о приемке выполненных работ от 07.05.2018 № 89 на сумму 17 295, 26 руб.; акт о приемке выполненных работ от 07.05.2018 № 91 на сумму 292 540,88 руб.; акт о приемке выполненных работ от 07.05.2018 № 92 на сумму 314623, 4 руб.; акт о приемке выполненных работ от 07.05.2018 № 93 на сумму 87707, 04 руб.; акт о приемке выполненных работ от 07.05.2018 № 93/1 на сумму 26 334,06 руб.; справка о стоимости выполненных работ и затрат от 07.05.2018 № 7 на сумму 1 860 052,88 руб.; акт о приемке выполненных работ от 11.05.2018 № 94 на сумму 894 952,12 руб.; справка о стоимости выполненных работ и затрат от 11.05.2018 № 8 на сумму 894 952,12 руб.; акт о приемке выполненных работ от 20.05.2018 № 97 на сумму 74 999,97 руб.; справка о стоимости выполненных работ и затрат от 20.05.2018 № 9 на 74 . 999,97 руб.; акт о приемке выполненных работ от 06.06.2018 № 98 на сумму 664 794,3 руб.; акт о приемке выполненных работ от 06.06.2018 № 99 на сумму 727127,8 руб.; справка о стоимости выполненных работ и затрат от 06.06.2018 № 10 на 1 391 922,10 руб.; акт о приемке выполненных работ от 16.07.2018 № 96 на сумму 429 038,58 руб.; справка о стоимости выполненных работ и затрат от 16.07.2018 № 11 на 506 265,52 руб.; акт о приемке выполненных работ от 04.09.2018 № 103 на сумму 1 126 943,66 руб.; акт о приемке выполненных работ от 29.06.2018 № 104 на сумму 1 811 273,01 руб.; справка о стоимости выполненных работ и затрат от 04.09.2018 № 12 на 2 938 216,67 руб.; акт о приемке выполненных работ от 25.12.2018 № 107 на сумму 349 780,32 руб.; акт о приемке выполненных работ от 25.12.2018 № 106 на сумму 600 498,46 руб.; акт о приемке выполненных работ от 25.12.2018 № 105 на сумму 553 055,38 руб.; акт о приемке выполненных работ от 25.12.2018 № 108 на сумму 377 728,62 руб.; справка о стоимости выполненных работ и затрат от 25.12.2018 № 13 на 1 988 763,74 руб.; акт о приемке выполненных работ от 25.12.2018 № 110 на сумму 2 192 196,93 руб.; справка о стоимости выполненных работ и затрат от 25.12.2018 № 14 на 2 192 196,93 руб.; акт о приемке выполненных работ от 25.12.2018 № 112 на сумму 463 185,25 руб.; справка о стоимости выполненных работ и затрат от 25.12.2018 № 15 на 463 185,25 руб.; акт о приемке выполненных работ от 17.04.2019 № 113 на сумму 2 651 856, 96 руб.; справка о стоимости выполненных работ и затрат от 17.04.2019 № 16 на 2 651 856,96 руб.

Всего работы выполнены на сумму 97 766 842,21 руб.

В соответствии с частью 2 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде любой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в суде соответствующей инстанции, отказаться от иска полностью или частично.

В материалы дела от истца по первоначальным требованиям поступили уточнения исковых требований до  9 306 665,91 руб. в связи с погашением ответчиком долга в размере 8 571 834,17 руб.

При изложенных обстоятельствах, уточнения истца приняты судом в порядке ст. 49 АПК РФ.

Требование о взыскании задолженности в оставшейся части истец поддержал.

Статьей 307 ГК РФ, в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в Гражданском кодексе.

Как следует из п. 1 ст. 702 ГК РФ, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно ч. 1 ст. 711 ГК РФ установлена обязанность заказчика уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работ при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Согласно положениям ст. 753 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику. Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

По смыслу гражданско-правового регулирования отношений сторон в сфере подряда и согласно сложившейся в правоприменительной практике правовой позиции, основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику (пункт 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24 января 2000 г. № 51).

Согласно позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в Определении от 30 июля 2015 г. по делу № А40-46471/2014, акты выполненных работ, хотя и являются наиболее распространенными в гражданском обороте документами, фиксирующими выполнение подрядчиком работ, в то же время не являются единственным средством доказывания соответствующих обстоятельств. Законом не предусмотрено, что факт выполнения работ подрядчиком может доказываться только актами выполненных работ.

Согласно доводов встречного искового заявления,  п.п. 2.2 и 2.3 Договора предусмотрено, что подрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с условиями Договора и не имеет замечаний, увеличивающих цену Договора и сроки выполнения работ по Договору.

Пунктом 5.2 Договора согласованы следующие сроки выполнения работ:

1.Выполнение строительно-монтажных работ - 30.11.2017 г.;

2.Подписание Итогового акта приёмки выполненных работ - 30.12.2017 г.

Кроме того, Дополнительным соглашением от 14.03.2019 № 2 к договору подрядчик принял на себя обязательство выполнить дополнительные работы выполнение строительно-монтажных работ10 дней с даты заключения Дополнительного соглашения, т.е. по 24.03.2019 г.

Как указывает истец по встречным исковым требованиям, по состоянию на 03.07.2019 г. работы, предусмотренные Договором, в полном объёме не выполнены и генподрядчику для приёмки не переданы, что является основанием для уплаты подрядчиком неустойки и процентов за пользование коммерчески кредитом.

Согласно условиям Договора, результат выполненных работ передается заказчику по итоговому акту приёмки выполненных работ.

В пункте 11.1 Договора стороны отдельно оговорили, что к заказчику не переходит риск случайной гибели или случайного повреждения результатов работ.

В силу ст. 705 Гражданского кодекса РФ риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки заказчиком несет подрядчик.

Согласно п. 12.12 Договора выполнение всех обязательств подрядчиком (за исключением гарантийных) подтверждается итоговым актом приёмки выполненных работ, с момента подписания указанного акта начинает течь гарантийный срок и у заказчика возникает обязанность по окончательной оплате.

Согласно п. 12.13 Договора заказчик в течение 10 рабочих дней с момента получения итогового акта приёмки выполненных работ рассматривает его и направляет подрядчику подписанный со своей стороны итоговый акт или предоставляет подрядчику мотивированный отказ от его подписания и приёмки результата выполненных работ.

Итоговый акт истец подготовил и направил ответчику не ранее 29.05.2019, который был подписан АО "ГУОВ" 11.12.2019. Таким образом, утверждение истца о направлении итогового акта в адрес ответчика 12.10.2018 несостоятельно.

В случае нарушения подрядчиком сроков окончания работ, предусмотренных Договором, подрядчик уплачивает генподрядчику неустойку в размере: 

- за первые 90 дней просрочки - 0,05 % от цены Договора за каждый день просрочки до даты фактического завершения выполнения работ (п. 17.4.1 Договора);

- начиная с 91 дня просрочки, пени начисляются в размере 0,1  % от цены Договора за каждый день просрочки до даты фактического завершения исполнения работ (п. 17.4.2 Договора).

Кроме того, в случае нарушения подрядчиком сроков, устаноавленных п.5.2 договора более, чем на 5 рабочих дней, он лишается права на экономическое стимулирование, и к авансу (или его соответствующей части) применяются правила ст. 823 ГК РФ. 

В материалы дела от истца по встречным требованиям поступили уточнения исковых требований в части расчета цены иска, согласно которым, размер неустойки за нарушение срока окончания работ составляет 4.542.073,28 руб.; проценты за пользование авансом как коммерческим кредитом в размере 746 476,19 руб.

Согласно ст. 71 АПК РФ суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. 

Ответчик ссылается на то обстоятельство, на то, что работы ответчику не сданы в установленном порядке и не подлежат оплате в связи с этим.  

Судом установлено, что в соответствии с п. 12.8, 12.9, 12.10 Договора сдача законченного строительством (реконструкции) объекта подрядчиком и его приёмка, осуществляется в разумный срок, необходимый для приемки, и оформляется актом    приемки   законченного   строительством   объекта   (форма   КС-14), подписанным всеми членами приёмочной комиссии, указанной в Договоре.

Акт приёмки законченного строительством объекта (форма КС-14) составляется генподрядчиком в 5 экземплярах.

В акте приёмки законченного строительством объекта приёмочная комиссия выносит решение о приёмке объекта капитального строительства и его готовности к вводу в эксплуатацию.

17.04.2019 г. между сторонами подписан акт № 1 сдачи приёмки-выполненных проектно-изыскательных работ на строительство объекта Жилой дом на 134 квартиры в г. Оренбурге.

В дальнейшем между сторонами подписан акт приёмки законченного строительством объекта приёмочной комиссии, в котором указано, что окончание работ — июнь 2018 г.

09.06.2018 г. было получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 56-56301000-1183-2018-153.

Между сторонами подписан акт приёмки выполненных работ от 29.05.2019 г.

Представленный истцом акт содержит исправление в дате его подписание (дата 29.05.2019 перечеркнуто и стоит дата 11.12.2019). Однако исправления носят односторонний характер, внесены только АО "ГУОВ". Экземпляр акта, представленного истцом таких исправлений не содержит. 

Сроки выполнения работ по объекту указаны 24.07.2017-17.04.2019, стоимость работ 97.766.842 руб. 21 коп. Настоящий акт подтверждает, что все работы по контракту  выполнены (за исключением гарантийных). Настоящий акт является основанием дл окончательного расчета за выполненные работы.   

Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений (ст. 65 АПК РФ).

В соответствии со ст.ст. 8 и 9 АПК РФ судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Доказательств оплаты работ в полном объеме ответчик не представил. Доказательств того, что к выполненной истцом работе имеются замечания, не представлено. При изложенных обстоятельствах, первоначальный иск  о взыскании задолженности с учетом уточнения подлежит удовлетворению как обоснованный и документально подтвержденный.

Встречный иск удовлетворению не подлежит как необоснованный. 

Возражая против удовлетворения встречных требований, истец сослался на то, что Проектная и сметная документация по разделам OB, ТМ и ТС, прошедшая государственную экспертизу, была  выполнена  по условиям  подключения, выданным ПАО «Т-ТТлюс» 28.12.2015. Работы на объекте выполнены в полном соответствии с проектом.

Однако между РУЗКС и ПАО «Т-ТТлюс» 29.05.2017 был заключен новый договор о технологическом присоединении, с выдачей новых условий подключения, отличных от УП от 28.12.2015 (температурный график 95/70 вместо 105/70, зависимая схема по отоплению вместо независимой).

В связи с этим потребовалось вносить изменения во вновь выданные УП и Технические условия на организацию узла учета, чтобы привести в соответствии договором о технологическом присоединении с фактически выполненными работами и проектно-сметной документацией.В связи с этим сроки подачи теплоносителя на объекте были сдвинуты (заявка на подключение от 10.10.2017, фактический пуск — 05.12.2017).

В связи с тем, что при производстве работ по устройству наружных сетей водоснабжения, было выявлено несоответствие диаметра трубопровода в месте врезки (согласно проектной документации) в действующий магистральный трубопровод (300 мм  по  проекту,  100 мм фактически), ООО «Оренбург водоканал» не согласовывал врезку на данном участке. Подводящие сети водоснабжения к объекту были выполнены силами ООО «Оренбург-Водоканал», точка врезки находилась на пересечении улиц Одесская и Ваана Теряна, приблизительно в 600 метрах от места врезки по проекту Ц-57/15-11-НВК. В вязи с этим срок подачи водоснабжения был сдвинут (заявка на подключение от 0.10.2017, фактический пуск на объекте — 12.12.17).

То, что срок сдачи объекта был сдвинут не по вине ООО «ОЖСК» подтверждается письмом самого АО «ГУОВ» от 22.12.2017 № 4993/4130 в адрес Начальника 134 отдела Государственного архитектурно-строительного надзора.

Таким образом, вины истца в нарушении срока выполнения работ не имеется. Все работы им выполнены и результатом работ ответчиком воспользовался. В связи с чем, нет оснований дл применения к истцу заявленных штрафных санкций и процентов, аванс полностью отработан, напротив, у ответчика имеется долг перед истцом.   

Расчет процентов по задолженности, возникшей 01.12.2017 в течении 90 дней, ставка 0,05% не обоснован, исходя из письма АО «ГУОВ» от 22.12.2017 № 4993/4130.

Расчет процентов по задолженности, возникшей 01.03.2018 (т.е. свыше 90 дней), ставка 0,1%, также ошибочен, так как объект введен в эксплуатацию 09.06.2018, следовательно необходимо исключить из расчета суммы: 347 809,19 руб. 409 448,22 руб. 588 083,74 руб. -47 921,54 руб.

Кроме того, данный расчет не применяется, исходя из письма АО «ГУОВ» от 22.12.2017 № 4993/4130

По дополнительному соглашению работы должны быть выполнены 24.03.2019, согласно дополнительному соглашению № 2, следовательно начала срока с 25.03.2019, а не с 15.03.2019.  Работы были выполнены на сумму 2 651 856,96 руб. Подписан акт № 1 от 17.04.2019 на 2 651 856,96 руб. Следовательно, на оставшуюся сумму работы не требовалось выполнять.  Доказательств того, что смещением сроков выполнения работ ответчику были причинены убытки, не представлено. 

При указанных обстоятельствах оснований для удовлетворения встречного иска не имеется. 

Расходы по уплате государственной пошлины распределены в соответствии со ст. 110 АПК РФ.

На основании изложенного и, руководствуясь ст.ст. 8, 9, 10, 307-310, 329, 330, 395, 401, 420, 421, 431, 702, 711, 746, 753 ГК РФ, ст. ст. 41, 65, 66, 71, 75, 82, 87, 110-112, 176, 177, 180-182 АПК РФ, суд 

 

РЕШИЛ:

Взыскать с АО "ГУОВ" в пользу ООО "ОЖСК" задолженность в сумме 9.306.665 руб. 91 коп. и расходы по уплате государственной пошлины в сумме 69.533 руб. 33 коп. 

Возвратить истцу из федерального бюджета РФ излишне уплаченную государственную пошлину в сумме 42.859 руб. 67 коп., перечисленную по платежному поручению от 17.07.2019 № 440.

 В удовлетворении встречного иска отказать. 

 Возвратить АО «ГУОВ» из федерального бюджета РФ излишне уплаченную государственную пошлину в сумме 1.165 руб. 25 коп., перечисленную по платежному поручению от 26.09.2019 № 65758. 

 Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Девятом арбитражном апелляционном суде.

            Судья                                                                                   Е.А. Абрамова