АРБИТРАЖНЫЙ СУД АЛТАЙСКОГО КРАЯ

656015, г. Барнаул, пр. Ленина, д. 76, тел.: (3852) 29-88-01

http:// www.altai-krai.arbitr.ru, е-mail: а03.info@arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А03-6440/2024

г. Барнаул

31 июля 2024 года

Резолютивная часть решения вынесена 22 июля 2024 года

Решение в полном объеме изготовлено 31 июля  2024 года

 

Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Кребеля Д.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем Андрющенко А.С. без использования средств аудиозаписи, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску 

индивидуального предпринимателя ФИО1, г. Барнаул Алтайского края (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Экогенез», г. Барнаул Алтайского края (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании 2 586 640,00 руб. задолженности по договору подряда № 1-К от 09.08.2022,

У С Т А Н О В И Л:

индивидуальный предприниматель ФИО1 (далее – истец) обратился в Арбитражный суд Алтайского края с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Экогенез» (далее – ответчик) о взыскании                                  2 586 640,00 руб. задолженности по договору подряда № 1-К от 09.08.2022.

Исковые требования со ссылками на статьи 702, 711, 719 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) мотивированы ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по оплате фактически выполненных работ по договору подряда № 1-к от 09.08.2022, что привело к возникновению задолженности и необходимостью обращения истца в Арбитражный суд Алтайского края.

В судебное заседание истец и ответчик явку представителей не обеспечили, о времени и месте рассмотрения дела извещены. 

Истец о времени и месте рассмотрения дела извещен, о чем свидетельствуют материалы дела. 

Заказное письмо, направленное в адрес ответчика, указанный в исковом заявлении и соответствующий выписке из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, вернулось в Арбитражный суд Алтайского края с отметкой «Истек срок хранения», что в соответствии с п. 2 ч. 4 ст. 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является надлежащим извещением. 

На основании ч. 3 ст. 156 АПК РФ суд перешел к рассмотрению дела в отсутствие представителей истца и ответчика. 

Ответчик мотивированный отзыв на исковое заявление в материалы дела не представил, исковые требования не оспорил.

Исследовав материалы дела, суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявленных требований.

Как следует из материалов дела, 09.08.2022 между индивидуальным предпринимателем ФИО1 (подрядчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Экогенез» (заказчик) заключен договор подряда № 1-К, по условиям которого заказчик поручает, а подрядчик принимает па себя обязательство своими силами выполнить комплекс работ по строительству (далее по тексту - работы) дома по проекту на земельном участке заказчика, расположенном но адресу: 

<

...>, в соответствии с локальным сметным расчетом (Приложение № 1), техническим заданием (Приложение № 2), заказчик принимает надлежащим образом выполненные подрядчиком работы и оплачивает их в порядке и сроки, предусмотренные договором (п. 1.1 договора).

В силу п. 1.2 договора перечень и объем выполняемых подрядчиком работ, являющихся предметом договора, определяются утвержденными заказчиком локальными сметными расчетами (Приложение № 1), Техническим заданием (Приложение № 2).

Пунктом 2.1 договора предусмотрено, что стоимость работ по договору определяется договорной ценой, согласованной сторонами в соответствии с локальным сметным расчетом (Приложение № 1) и составляет 11 476 050,00 руб. (НДС не предусмотрен).

Согласно п. 2.2 договора в стоимость работ по договору включены все налоги, сборы, обязательные платежи, расходы и издержки, связанные с выполнением подрядных работ, в том числе стоимость необходимых для выполнения подрядных работ материалов, расходных материалов, конструкций, комплектующих изделий, строительной техники.

Стороны договорились о поэтапной оплате:

1.                      Авансовый платеж в размере 1 000 000,00 руб. в течении 3-х дней после подписания договора для приобретения части материалов.

2.                      Промежуточный платеж № 1 - 20.08.2022 в размере 700 000,00 руб. в течении 2-х дней после выполнения работ по устройству фундамента для цокольного помещения для приобретения материалов и оплаты работ.

3.                      Промежуточный платеж № 2 - 01.09.2022 в размере 1 300 000,00 руб. в течении 2-х дней после выполнения работ по возведению бетонных степ цокольного помещения для приобретения материалов и оплаты работ.

4.                      Промежуточный платеж № 3 - 01.10.2022 в размере 1 500 000,00 руб. в течении 2-х дней после выполнения работ по устройству бетонной подушки фундамента дома для приобретения материалов и оплаты работ.

5.                      Промежуточный платеж № 4 - 12.11.2022 в размере 1 500 000,00 руб. в течении 2-х дней после выполнения работ по устройству кирпичных стен 1-го этажа на отметке +3,00 для приобретения материалов и оплаты работ.

6.                      Промежуточный платеж № 5 - 25.11.2022 в размере 600 000,00 руб. в течении 2- х дней после выполнения работ по устройству монолитного перекрытия 1-го этажа для приобретения материалов и оплаты работ.

7.                      Промежуточный платеж № 6 - 20.12.2022 в размере 1 500 000,00 руб. в течении 2-х дней после выполнения работ по устройству кирпичных стен 2-го этажа на отметке +6,00 для приобретения материалов и оплаты работ.

8.                      Промежуточный платеж - № 7 - 15.01.2023 в размере 600 000,00 руб. в течении 2-х дней после выполнении работ по устройству монолитного покрытия 2-го этажа для приобретения материалов и оплаты работ.

9.                      Промежуточный платеж № 8 - 28.01.2023 в размере 1 000 000,00 руб. в течении 2-х дней после выполнения работ по устройству кирпичных фронтонов и венттруб для приобретения материалов и оплаты работ.

10.                  Промежуточный платеж № 9 - 08.02.2023 в размере 1 000 000,00 руб. в течении 2-х дней после выполнении работ по устройству стропильной системы крыши для приобретения материалов и оплаты работ

11.                  Окончательный расчет производится Заказчиком в течении 5-ти дней после завершения работ и подписании акта выполненных работ по форме КС-2.

Оплата по договору осуществляется заказчиком поэтапно безналичным платежом на расчетный счет подрядчика (п. 2.3 договора). 

Приемка работ осуществляется заказчиком в течении двух дней с момента получения уведомления об окончании работ, этапа работ. Подрядчик уведомляет заказчика о необходимости приемки работ (в т. ч. скрытых работ) за 2 (два) дня письменно или по электронной почте, указанной в реквизитах договора.  Сдача и приемка работ оформляется актами выполненных работ по форме КС-2, КС-3 (п. 4.1-4.2 договора).

Во исполнение принятых на себя обязательств по договору подрядчик выполнил, а заказчик принял работы по устройству нулевого цикла (бетонной подушки), устройство свайно-ростверкового фундамента бани и хозблока, устройство цокольного помещения, устройство стен и перегородок 1-го этажа дома, бани и хозблока, устройство бетонного перекрытия 1-го этажа, о чем свидетельствует подписанный акт о приемке выполненных работ № 1 от 08.02.2023 (КС-2) за период с 09.08.2022 по 08.02.2023, а также подписанная сторонами справка о стоимости выполненных работ № 1 от 08.02.2023 (КС-3) за период с 09.08.2022 по 08.02.2023. Всего выполнено работ на сумму 7 386 640,00 руб.

Заказчик была произведена оплата выполненных работ на сумму 4 800 000,00 руб., по платежным поручениям, представленным в материалы дела. Задолженность заказчика перед подрядчиком составляет 2 586 640,00 руб.

В связи с отсутствием средств финансирования заказчиком, уведомлением от 08.02.2023 работы по договору были приостановлены подрядчиком.

При нарушении сроков оплаты этапов, включая задержку или частичную оплату аванса, указанных в п. 2.2 договора. Подрядчик имеет право приостановить работы до полного погашения задолженности и не приступать к выполнению следующего этапа работ. Сроки выполнения всех последующих этапов сдвигаются на срок задержки оплаты (п. 2.4 договора).

В силу п. 6.5 договора если заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные разделами 3, 4 и 5 настоящего договора, то подрядчик вправе приостановить выполнение работ или отказаться от договора и требовать возмещения убытков в полном объеме.

Претензионным письмом от 01.06.2023 подрядчик уведомил заказчика о расторжении договора подряда № 1-К от 09.08.2022, а также потребовал выплатить образовавшуюся задолженность в размере 2 586 640,00 руб. неудовлетворение которой явилось основанием для обращения истца в Арбитражный суд Алтайского края с настоящим исковым заявлением.

В соответствии со ст. 307, 309 ГК РФ договор является одним из оснований возникновения обязательства, которые должны исполняться надлежащим образом в порядке, установленном договором или законом.

В соответствии со п. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. 

Согласно п. 1 ст. 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Основанием для возникновения у заказчика обязательства по оплате выполненных работ в порядке, установленном договором подряда, является сдача подрядчиком и принятие заказчиком результатов работы в установленном законом и договором порядке (ст. 711, 746 ГК РФ). Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляется актом, подписанным обеими сторонами (п. 4 ст. 753 ГК РФ).

Пунктом 1 ст. 450.1 ГК РФ предусмотрено, что предоставленное настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено ГК РФ, другими законами, иными правовыми актами или договором.

Факт этапного выполнения работ по договору № 1-К от 09.08.2022 подтверждается материалами дела и ответчиком не оспорен. Доказательств обратного ответчиком в материалы дела не представлено. 

На основании требований части 1 статьи 64 и статей 71, 168 АПК РФ арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств.

Согласно части 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

Часть 3.1 статьи 70 АПК РФ предусматривает, что обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

В силу статьи 9 АПК РФ судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий.

Ответчик в материалы дела не представил доказательств оплаты оказанных ему услуг по договору № 1-К от 09.08.2022 на сумму 2 586 640,00 руб.

Таким образом, оценив совокупность представленных в материалы дела доказательств, арбитражный суд приходит к выводу о том, что требования истца о взыскании с ответчика 2 586 640,00 руб. задолженности подлежат удовлетворению в полном объеме. 

При подаче искового заявления истцам была уплачена государственная пошлина в размере 35 933,00 руб. 

В соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ расходы истца по уплате государственной пошлины суд относит на ответчика, поскольку решение принято не в его пользу.

Руководствуясь статьей 307, 309, 330, 706, 740, 746 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Экогенез» (ИНН 

<

***>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 

<

***>) задолженность по договору подряда № 1-К от 09.08.2022 в размере 2 586 640,00 руб. и 35 933,00 руб. в счёт возмещения расходов по оплате государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Алтайского края в апелляционную инстанцию - Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения, либо в кассационную инстанцию - Арбитражный суд Западно-Сибирского округа, в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

 

Судья                                                                                                                          Д.А. Кребель