Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-37405/2018

29 октября 2018 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена  12 октября 2018 года.

Полный текст решения изготовлен  29 октября 2018 года.

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Коросташова А.А.

 

при ведении протокола судебного заседания: ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Дирекция транспортного строительства" (адрес:  Россия 194044, 

<

...>; ИНН: 

<

***>; ОГРН:  

<

***>; Дата присвоения ОГРН 06.02.2003; Дата регистрации до 1 июля 2002 года 25.08.1997);

ответчик: Общество с ограниченной ответственностью "Лайнер" (адрес:  Россия 195273, 

<

...>, лит АК; ИНН: 

<

***>; ОГРН:  

<

***>; Дата регистрации: 31.10.2008);

о взыскании, 

 

при участии

- от истца: ФИО2 по доверенности от 26.12.2017;

- от ответчика: ФИО3, по доверенности от 25.09.2018; 

 

установил:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Дирекция транспортного строительства" (далее - Учреждение) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Лайнер" (далее - Общество) о взыскании 351 847 руб. 38 коп. неустойки по государственному контракту от 03.08.2016 № КР-60.

В судебном заседании представитель Истца исковые требования поддержал в полном объёме, представитель Ответчика возражал против удовлетворения иска, заявил об уменьшении размера неустойки на основании ст. 333 Гражданского кодекса РФ. 

Исследовав материалы дела, выслушав объяснения представителей сторон, арбитражный суд установил следующее. 

Как следует из материалов дела, между СПб ГКУ Дирекция транспортного строительства» (далее – Заказчик) и ООО «Лайнер» (далее – Подрядчик) 03.08.2016 заключен государственный контракт №КР-60 на выполнение работ на объекте «Остновки городского пассажирского транспорта в Калининском районе» для нужд Санкт-Петербурга.

Цена работ составляет 23 420 729 руб. 00 коп. (п. 3.1 контракта). 

Согласно п. 2.1 контракта сроки выполнения работ: начало с момента заключения Контракта; окончание – не позднее 30.09.2017.

На основании дополнительного соглашения № 3-КР-26 от 27.03.2017 к Контракту Общество обязалось произвести работы в следующие сроки: - контрольно-исполнительная съемка в срок до 10.08.2017; - дорожные работы по строительству остановок пассажирского транспорта на пр. Блюхера в срок до 10.08.2017; - дорожные работы по строительству остановок пассажирского транспорта на пр. Луначарского в срок до 31.08.2017; - дорожные работы по строительству остановок пассажирского транспорта на пр. Мечникова в срок до 31.08.2017; - технические средства организации дорожного движения в срок до 31.08.2017; - контактная сеть на пр. Мечникова в срок до 31.08.2017.

В адрес ООО «Лайнер»  направлена претензия от 24.01.2018 № 09/07-КР об уплате неустойки в связи с нарушением  сроков выполнения работ. 

Неисполнение Обществом указанного требования послужило поводом для обращения Учреждения в арбитражный суд с настоящим иском.

В силу пункта 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Согласно п. 6.2 контракта пеня начисляется за каждый день просрочки Подрядчиком исполнения обязательств, предусмотренного контрактом, и устанавливается а размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком. 

Доказательств своевременного выполнения работ Общество не представило.

С учётом изложенного Учреждение правомерно начислило неустойку за период с 19.12.2017 по 18.01.2018  в размере 351 847 руб. 38 коп. 

В силу положений статьи 333 ГК РФ если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.

Суд первой инстанции не усмотрел основания для снижения размера неустойки. 

Доводы ответчика об отсутствии вины в нарушении сроков выполнения работ не нашли своего документального подтверждения. 

При таких обстоятельствах иск подлежит удовлетворению в полном объёме. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Лайнер" в пользу Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения "Дирекция транспортного строительства" 351 847 руб. 38 коп. неустойки.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Лайнер" в доход федерального бюджета 10 037 руб. 00 коп. государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.

 

Судья                                                                            Коросташов А.А.