Арбитражный суд Челябинской области

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А76-7324/2022

31 августа 2022 г.

г. Челябинск

 

Резолютивная часть решения вынесена 24 августа 2022 г.

Решение в полном объеме изготовлено 31 августа 2022 г.

Судья Арбитражного суда Челябинской области Малыхина В.В., при ведении протокола предварительного судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Альянс», ОГРН 

<

***>, г. Челябинск, к муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строительства», ОГРН 

<

***>, г. Магнитогорск Челябинской области, при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Администрации города Магнитогорска, ОГРН 

<

***>, г. Магнитогорск, о взыскании 850 242 руб. 90 коп.,

при участии в судебном заседании:

от ответчика: представитель ФИО2, паспорт, диплом о высшем юридическом образовании, доверенность № 3 от 10.01.2022; 

от третьего лица: представитель ФИО3, паспорт, диплом о высшем юридическом образовании, доверенность от 01.11.2021.

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Альянс» (далее – истец, ООО «Альянс»), 11.03.2022 обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строительства» (далее – ответчик, МКУ «УКС») о взыскании задолженности по муниципальному контракту № 68/20 на выполнение работ по объекту: «Ремонт тротуаров» в размере 850 242 руб. 90 коп.

Определением суда от 18.03.2022 исковое заявление принято, возбуждено производство по делу, предварительное судебное заседание назначено на 16.05.2022.

Определением от 16.05.2022 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Администрации города Магнитогорска, ОГРН 

<

***>, г. Магнитогорск. 

Определением от 21.07.2022 судебное заседание назначено на 18.08.2022.

В судебном заседании в соответствии со ст. 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) объявлялся перерыв с 18.08.2022 по 24.08.2022. Сведения об объявленном перерыве были размещены на сайте Арбитражного суда Челябинской области.

В обоснование заявленных требований истец ссылается на статьи 309, 310, 330, 702 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) и на то обстоятельство, что ответчик не произвел оплату выполненных работ по муниципальному контракту № 68/20 на выполнение работ по объекту: «Ремонт тротуаров».

Ответчик представил отзыв на исковое заявление (л.д. 54-58), в удовлетворении исковых требований просил отказать, указав на отсутствие задолженности, представил контррасчет задолженности.

Истец представил письменные возражения на отзыв ответчика (л.д. 114-118), в которых пояснил, что работы сданы заказчику 22.07.2020, дополнительным соглашением от 21.09.2020 была снижена цена контракта до 12 929 496 руб. 32 коп., представил контррасчет пени, указав, что в период просрочки исполнения обязательства не подлежат включению дни, которые потребовались заказчику для приемки выполненной работы и оформления итогов такой приемки. Кроме того, истец пояснил, что за выявленные нарушения не может быть одновременно наложены штраф и пени, полагает, обоснованным начисление неустойки, а не штрафа, как считает третье лицо. Истец пояснил об исполнении работ в полном объеме, сослался негативное влияние антиковидных мер и рекомендации Министерства дорожного хозяйства и транспорта о приостановке работ в связи с аномальным температурным режимом на нормальное хозяйственное функционирование подрядчика. Истец ходатайствовал о применении ст. 333 ГК РФ.

Администрация г. Магнитогорска Челябинской области представила отзыв на возражения истца (л.д. 122-124), указав, что ответчиком были обоснованно применены санкции к истцу в виде штрафа и пени, что соответствует условиям контракта и не противоречит закону, просила отказать в удовлетворении исковых требований в полном объеме.

Исследовав и оценив доказательства, представленные в материалы дела в соответствии со статьями 71, 162 АПК РФ, арбитражный суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований частично по следующим основаниям.  

Как следует из материалов дела, 30.03.2020 между МКУ «УКС» (далее – муниципальный заказчик) и ООО «Альянс» (далее - подрядчик) согласован муниципальный контакт № 68/20 на выполнение работ (далее – контракт, л.д. 8-11), по условиям которого подрядчик обязуется по заданию заказчика выполнить работы по объекту: «ремонт тротуаров» и сдать результат заказчику, а заказчик принять и оплатить выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом. 

Объем и содержание работ определены в соответствии со сметой (приложение № 3 к контракту), расчетом цены муниципального контракта (приложение № 2 к контракту), являющимися неотъемлемой частью настоящего контракта (п. 1.3 контракта).

Место выполнения работ: Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, в соответствии с перечнем адресов (приложение № 6 к контракту) (п. 1.4 контракта).

Согласно п. 1.5 контракта начало выполнения работ: с 20.04.2020, окончание выполнения работ: по 31.07.2020.

Начальный и конечный сроки выполнения работ по настоящему контракту определяются в соответствии с графиком выполнения работ, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта  (приложение № 1 к контракту) (п. 1.6 контракта).

Источник финансирования контракта: местный бюджет (п. 1.7 контракта).

Цена контракта согласно протоколу № 0169300000320000247 составляет 12 935 981 рубль 51 копейка, НДС не облагается. Цена контракта включает в себя: стоимость работ, материалов, в соответствии со сметой  (приложение № 3) и расчетом цены контракта (приложение № 2), расходы на доставку результатов работы, транспортные расходы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иные расходы подрядчика, связанные с исполнением контракта.

После определения победителя электронного аукциона, «муниципальный заказчик» рассчитывает коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта к цене контракта, предложенной победителем в ходе проведения электронного аукциона. При этом применение коэффициента снижения к общей сумме начальной (максимальной) цены муниципального контракта в расчете стоимости цены муниципального контракта по итогам проведения процедуры закупки, подразумевает снижение стоимости каждой статьи затрат пропорционально (п. 2.1 контракта).

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком (п. 2.2 контракта).

Стоимость контракта установлена в рублях Российской Федерации (п.2.3 контракта).

Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением случаев, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ (п. 2.4 контракта). 

Оплата фактически выполненных работ производится заказчиком в течении 30 дней с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, на основании выставленных подрядчиком акта выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), на основании выставленных подрядчиком счета (счета – фактуры), в которых должны быть указаны номер, дата контракта и наименование объекта согласно предмету контракта, а также реквизиты необходимые для оплаты (п. 2.5 контракта).

Обязательство заказчика по оплате выполненных работ считается исполненным после списания денежных средств с расчетного счета заказчика (п. 2.7 контракта).

В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком предусмотренных контрактом обязательств, оплата производится по факту выполненных работ, за вычетом начисленных штрафа и (или) пени (п. 2.8 контракта).

Работы, выполненные сверх предусмотренных и установленных графиком выполнения работ (приложение № 1) и локальной сметой (приложение № 3)  не принимаются и оплате не подлежат (п. 2.9 контракта).

Приемка работ по контракту, приемка объекта осуществляются сторонами в соответствии с графиком выполнения работ (п. 4.1 контракта).

Согласно п. 4.2 контракта, ежемесячно до 01 числа следующего за отчетным подрядчик обязан письменно уведомить заказчика, лицо, осуществляющее строительный контроль от имени заказчика, об их завершении (далее – уведомление о завершении работ) с приложением документов в объеме, необходимом для сдачи-приемки выполненных работ (оригиналы в 5 экземплярах), в которых должны быть указаны номер, дата контракта и наименование объекта согласно предмету контракта, а также реквизиты необходимые для оплаты, в том числе:

- подписанного со своей стороны акта сдачи-приемки выполненных работ в отношении вида или этапа работ (форма № КС-2);

- справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), составленная на основании актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2);

- исполнительной документации на выполненные работы в составе и объеме, предусмотренном законодательством и Контрактом, (в том числе на электронном носителе, с приложением перечня входящих в ее состав документов;

- счета на оплату работ (счета-фактуры).

В соответствии с п. 4.3 контракта, заказчик в срок не позднее 15 рабочих дней со дня получения от подрядчика уведомления о завершении работ и прилагаемых документов, указанных в пункте 4.2. настоящего контракта:

- осуществляет осмотр выполненных работ при участии подрядчика;

- осуществляет проверку сведений о видах и объемах фактически выполненных работ, содержащихся в представленных документах, на соответствие сметной (проектной) документации;

- подписывает представленный акт сдачи-приемки выполненных работ, либо направляет подрядчику почтовым отправлением (либо с использованием иных средств связи и доставки корреспонденции) письменные возражения и (или) замечания с требованием об устранении выявленных недостатков (дефектов) работ и (или) документации.

Подрядчик за свой счет и в указанный заказчиком срок устраняет выявленные при приемке выполненных работ недостатки (дефекты) работ и (или) недостатки (дефекты) документации и (или) обеспечивает их устранение третьими лицами. В случае если заказчиком такой срок не указан, то устранение недостатков (дефектов) осуществляется в срок не более 3 (трех) рабочих дней со дня получения от заказчика уведомления (п. 4.4 контракта).

После устранения недостатков (дефектов) подрядчик повторно в порядке, предусмотренном пунктом 4.2 контракта, представляет к приемке работы (результат работ) и документы, подтверждающие устранение выявленных заказчиком недостатков (дефектов). Представленные подрядчиком работы (результат работ) и документы в срок и в порядке, предусмотренном пунктом 4.3.контракта, (повторно рассматриваются заказчиком) (п. 4.5 контракта).

Все представляемые подрядчиком отчетные документы должны содержать подписи и расшифровки подписей представителей подрядчика, оттиск печати подрядчика (при наличии) и дату их составления (п. 4.6 контракта).

К моменту передачи заказчику любого отчетного документа (в том числе акта сдачи-приемки выполненных работ, актов скрытых работ, актов испытаний, акта приемки законченного строительством объекта и других документов) подрядчик обязан заблаговременно подписать документы, а также получить письменное согласование таких документов от лица, осуществляющего от имени Заказчика строительный контроль (при его наличии). Документы, не согласованные с лицом, осуществляющим строительный контроль от имени заказчика (при его наличии), и (или) документы, не подписанные сторонами, заказчиком не принимаются (п. 4.7 контракта).

В случае несоответствия результатов работ сметной (проектной) документации, требованиям строительных норм и правил, с нарушением сроков выполнения работ, стороны составляют комиссионный акт осмотра объекта, с указанием выявленных недостатков. Подрядчик обязан устранить все указанные недостатки без дополнительной оплаты, в сроки, согласованные с заказчиком (п. 4.8 контракта). 

В случае если подрядчик нарушит срок устранения недостатков (дефектов) работ, заказчик вправе своими силами устранить такие недостатки или поручить их устранение третьим лицам и потребовать от подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) работ (п. 4.9 контракта).

Согласно п. 4.10 контракта, подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество выполненных им работ.  

Подрядчик обязуется соблюдать график и сроки выполнения работ, предусмотренные настоящим контрактом (п. 4.11 контракта).

Оформление акта сдачи-приемки выполненных работ, осуществляется после предоставления подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств по контракту в порядке и в сроки, которые установлены контрактом (п. 4.12 контракта).

За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего контракта стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего контракта (п. 6.1 контракта).

В случае неисполнения подрядчиком условий контракта заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении настоящего контракта (п. 6.2 контракта).

В случае полного (частичного) неисполнения условий настоящего контракта одной из сторон эта сторона обязана возместить другой стороне причиненные убытки в части непокрытой неустойкой (п. 6.3 контракта).

В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, подрядчик уплачивает заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных «подрядчиком», рассчитываемую в соответствии с Правилам утвержденными Постановлением Правительства РФ № 1042 от 30.08.2017г. (далее – «Правила») (п. 6.4 контракта).

Согласно п. 6.5 договора, за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, подрядчик уплачивает заказчику штраф. Размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 6.6., 6.7., 6.8., 6.9., 6.10) и равен 5% цены контракта (этапа), что составляет 646 799 рублей 08 копеек.

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта  (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта  (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, заключенным по результатам определения подрядчика в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 30 Федерального закона № 44-ФЗ, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей (п. 6.6 контракта).

В соответствии с п. 6.7 контракта, за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей, что составляет 5000 рублей.

Согласно п. 6.8 контракта, за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа рассчитывается и устанавливается в следующем порядке:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно)

В случае если Контрактом предусмотрено исполнение требований Постановление Правительства РФ № 570 от 15 мая 2017 г., за ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ (п. 6.9 контракта).

Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту (п. 6.13 контракта).

Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта (п. 6.14 контракта).

В случае просрочки со стороны подрядчика исполнения настоящего контракта на срок более чем один месяц, в том числе по отдельным этапам исполнения обязательств по контракту, заказчик имеет право обратиться к подрядчику с предложением о расторжении контракта, и уплате штрафных санкций, а при несогласии подрядчика - обратиться в суд с соответствующим иском (п. 6.16 контракта).

В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом стороны от исполнения контракта другая сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта (п. 6.17 контракта).

В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный настоящими правилами, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации (п. 6.19 контракта).

Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует по 21.09.2020 г. Окончание срока действия контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств сторон по контракту, в том числе гарантийных обязательств подрядчика (п. 10.1 контракта).

Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, в условия контракта осуществляется путем заключения сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к контракту, которые являются его неотъемлемой частью (п. 11.2 контракта).

Согласно п. 11.3 контракта, изменение условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением следующих случаев предусмотренных статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ:

- при снижении цены контракта без изменения, предусмотренного контрактом объема работы и качества выполняемой работы, и иных условий контракта (п.11.3.1 контракта).

- если по предложению заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему выполняемых работ исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении, предусмотренного контрактом объема выполняемых работ стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работ (п.11.3.2 контракта).

- в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом (11.3.3 контакта).

- в иных случаях, предусмотренных статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ (11.3.4 контракта).

Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством в порядке,  предусмотренном частями 9-23 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ (п. 11.8 контракта).

В соответствии с п. 11.9 договора, заказчик вправе отказаться от исполнения контракта в одностороннем порядке в случаях:

- если подрядчик не приступает своевременно к исполнению контракта или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным (11.9.1 контракта).

- если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения контракта (11.9.2 контракта).

- если отступления от условий контракта или иные недостатки результата выполнения работ в установленный заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения причиненных убытков (11.9.3 контракта).

- если иное не предусмотрено контрактом, заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения контракта, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения контракта. Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением контракта подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу (11.9.4 контракта).

В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения направить подрядчику уведомление о принятом решении по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу подрядчика, указанному в настоящем контракте, а также телеграммой либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении подрядчику (п. 11.10 контракта).

Сторонами согласовано и подписано соглашение о расторжении № 113/21-с/л к муниципальному контракту № 68/20 от 30.03.2020 от 10.02.2021 (л.д. 12), согласно которому стороны договорились расторгнуть муниципальный контракт № 68/20 от 30.03.2020 по соглашению сторон на сумму 7 438 703 рубля 75 копеек. Цена муниципального контракта составляет 5 490 792 рубля 57 копеек (п. 1 соглашения).

Согласно п. 2 соглашения, подписание настоящего соглашения не влечет прекращения гарантийных обязательств по муниципальному контракту № 68/20 от 30.03.2020 г.

Действительность и заключенность контракта сторонами не оспариваются (часть 3.1. статьи 70 АПК РФ).

В соответствии с подписанными сторонами актами выполненных работ по форме КС-2 № 1 от 08.10.2020 на сумму 100 549 руб. 94 коп., № 2 от 08.10.2020 на сумму 85 730  руб. 14 коп., № 3 от 08.10.2020 на сумму 7 173 руб. 53 коп., № 4 от 08.10.2020 на сумму 1 084 руб. 17 коп., № 5 от 08.10.2020 на сумму 523 267 руб. 93 коп., № 6 от 08.10.2020 на сумму 29 081 руб. 90 коп., № 7 от 08.10.2020 на сумму 395 700 руб. 56 коп., № 9 от 08.10.2020 на сумму 130 189 руб. 87 коп., № 10 от 08.10.2020 на сумму 94 135 руб. 67 коп., № 11 от 08.10.2020 на сумму 51 649 руб. 46 коп., № 1 от 11.10.2020 на сумму 409 166 руб. 62 коп., № 2 от 11.10.2020 на сумму 271 699 руб. 71 коп., № 3 от 11.10.2020 на сумму 295 239 руб. 95 коп., № 4 от 11.10.2020 на сумму 30 051 руб. 30 коп., № 5 от 11.10.2020 на сумму 25 800 руб. 15 коп., № 6 от 11.10.2020 на сумму 452 931 руб. 69 коп., № 7 от 11.10.2020 на сумму 283 186 руб. 72 коп., № 8 от 11.10.2020 на сумму 3 252 руб. 53 коп., № 9 от 11.10.2020 на сумму 24 234 руб. 91 коп., № 10 от 11.10.2020 на сумму 72 170 руб. 68 коп., № 11 от 11.10.2020 на сумму 326 502 руб. 74 коп., № 12 от 11.10.2020 на сумму 393 420 руб. 47 коп., № 13 от 11.10.2020 на сумму 3 252 руб. 53 коп., № 14 от 11.10.2020 на сумму 20 163 руб. 45 коп., № 1 от 14.10.2020 на сумму 368879 руб. 75 коп., № 1 от 09.12.2020 на сумму 59 428 руб. 94 коп., № 2 от 09.12.2020 на сумму 309 271 руб. 78 коп., № 3 от 09.12.2020 на сумму 233 874 руб. 48 коп. , всего заказчиком были приняты выполненные работы на сумму 5 490 792 руб. 57 коп. (л.д. 13-44).

МКУ «УКС» платежными поручениями № 200134 от 30.10.2020 на сумму 1131905 руб. 43 коп., № 207868 от 12.11.2020 на сумму 2604557 руб. 75 коп., № 221688 от 26.11.2020 на сумму 365305 руб. 43 коп., № 267397 от 30.12.2020 на сумму 538 781 руб. 06 коп. перечислило ООО «Альянс» денежные средства на общую сумму 4 640 549 руб. 67 коп. в счет оплаты работ по договору (л.д. 46-49).

Таким образом, ответчиком не оплачены работы на сумму  850 242 руб. 90 коп.

В связи с нарушением сроков выполнения работ истец в адрес ответчика направил претензию от 20.01.2021 № 7 с требованием оплаты задолженности. (л.д. 6), которая оставлена без удовлетворения, что послужило основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим иском.

Отсутствие оплаты выполненных работ послужило основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим иском.

Между сторонами сложились подрядные отношения, которые регулируются нормами гл. 37 ГК РФ.

В силу ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона; односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

В силу пункта 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии со статьей 711 ГК РФ заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Таким образом, основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является факт передачи результата работ подрядчиком заказчику.

Заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте либо в ином документе, удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении (пункты 1, 2 статьи 720 ГК РФ).

В силу п. 4 ст. 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами; при отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.

Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

Пунктом 6 статьи 753 ГК РФ специально предусмотрены основания, по которым заказчик вправе уклониться от приемки: если обнаруженные недостатки исключают возможность использовать результат работы для цели, которая указана в договоре, и к тому же ни подрядчик, ни сам заказчик не могут устранить недостатки. При этом под невозможностью устранить недостатки заказчиком подразумеваются случаи, когда не только он сам или подрядчик не могут произвести соответствующие работы, но и те, при которых ему не удается найти третью сторону, готовую принять на себя устранение недостатков.

В силу части 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В подтверждение факта выполнения работ истец представил в материалы дела подписанный сторонами акты о приемке выполненных работ КС-2.

Данное обстоятельство ответчиком не оспорено.

В соответствии с частью 3.1. статьи 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Вместе с тем в отзыве на исковое заявление ответчик указывает на отсутствие задолженности в связи с произведенным зачетом по взысканию неустойки, начисленной истцу за нарушение сроков выполнения работ и ненадлежащее исполнение обязательств по контракту.  

В силу ч. 4 ст. 34 Закона №44-ФЗ, в контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика и подрядчика (поставщика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.

В соответствии с ч. 6 ст. 34 Закона №44-ФЗ в случае просрочки исполнения подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет подрядчику (поставщику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Согласно п. 6.1. Контракта, Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

На основании положений ст. 309, 310, 314 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства сторон договорных правоотношений должны исполняться надлежащим образом в соответствии с требованиями законодательства и условиями договора. Односторонний отказ от исполнения обязательств не допускаются.

В силу ст. 330 ГК РФ, неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения обязательств.

В соответствии с п. 6.4. Контракта, пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Штрафы, согласно п. 8 ст. 34 Закона №44-ФЗ, начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

В связи с нарушением сроков выполнения (Приложение № 1 к Контракту) работ, что подтверждается Актами выполненных работ по форме КС-2, а также Справками о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, с указанием отчетного периода, которые в свою очередь не соответствуют срокам выполнения работ в соответствии с утвержденным сторонами Графиком выполнения работ, а также ненадлежащим исполнением Подрядчиком условий муниципального контракта за что условиями муниципального контракта предусмотрен штраф (п. 6.5. Контракта) (претензия от 07.08.2020 исх. № 01-25/1991), что подтверждается Актами осмотра объекта от 21.08.2020, а также от 26.08.2020 , в которых зафиксировано, что Подрядчик к работам в сроки установленные Контрактом не приступил, строительный мусор с площадки не вывез, асфальтовое покрытие на вырубку не уложил, газоны не оформил, в связи с чем Муниципальным заказчиком выставлялись претензии.

Указанные претензии соответствии с п. 2.8. Контракта, при оплате выполненных работ вычитались из стоимости выполненных работ.

Так, п. 2.8. Контракта установлено, что в случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств,  предусмотренных Контрактом,  а также  в  иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком предусмотренных Контрактом обязательств, оплата производится по факту выполненных работ, за вычетом начисленных штрафа и (или) пени.

За нарушение сроков выполнения работ заказчиком подрядчику начислена пени по п. 6.4 контракта за период с 01.08.2020 по 06.08.2020 в размере 10 995 руб. 58 коп., за период с 07.08.2020 по 07.10.2020 в размере 113 564 руб. 08 коп., за период с 09.10.2020 по 11.10.2020 в размере 6 515 руб. 70 коп., за период с 12.10.2020 по 19.11.2020 в размере 44 584 руб. 84 коп., за период с 20.11.2020 по 09.12.2020 в размере 22 783 руб. 62 коп., а также начислен штраф в соответствии с п. 6.5 контракта за ненадлежащее выполнение работ по контракту в размере 646 799 руб. 08 коп. и с п. 6.7 контракта за ненадлежащее выполнение работ по контракту в размере 5 000 руб. 

Ответчик в таблице привел выставление претензий и произведение зачета.  

 

№

Претензия (дата, номер)

Сумма претензии, (пени)

руб

(штраф)

Погашено согласно платежных поручений

Зачет согласно    п. 2.8.           из стоимости выполнения

1

01-25/1991    от 07.08.2020

10 995,58

651799,08

п/п № 204979 09.11.2020 п/п   204980 09.11.2020

от от

Выполнение 1 (справка о стоимости вып.работ  и затрат №   1 от 08.10.2020)

2

01-25/2957    от 12.10.2020

113 564,08

п/п   204981 09.11.2020

от

Выполнение 2       (сумма вычета 6 515,70 руб)

3

01-25/3478    от 10.11.2020

6515,7

п/п   227658 09.11.2020

от

 

4

01-25/3628    от 20.11.2021

44 584,84

п/п   227658 09.11.2020 п/п   267398 30.12.2020

от от

Выполнение 3        (сумма вычета 3574,32 руб)

5

01-25/4295    от 30.12.2020

22 783,62

п/п   267398 30.12.2020

от

Выполнение 4        (сумма вычета      63 794,14 руб)

6

итого

198 443,82

651799,08

850 242,90

850 242,90

Исследовав представленные в материалы дела доказательства, суд приходит к выводу, что ответчиком правомерно начислены пени за нарушение сроков выполнение работ и штраф за ненадлежащее выполнение работ в размере 646 799 руб. 08 коп. 

Вместе с тем, штраф в размере 5 000 руб. по п. 6.7 контракта ответчиком начислен неправомерно, поскольку за ненадлежащее исполнение обязательств по контракт, выразившее в невыполнение работ на дату выполнения работ, ответчиком уже начислен штраф по п. 6.5 контракта. За одно и тоже нарушение начисление штрафа является неправомерным. 

Доводы истца о неверном расчета неустойки, приведенные в возражениях на отзыв, судом отклоняются, поскольку основаны на неверном толковании норм права и контракта. 

Вместе с тем, довод истца о списании 50% начисленной неустойки на основании Постановления Постановление Правительства РФ от 04.07.2018 № 783 «Об осуществлении заказчиком списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением в 2015, 2016 и 2020 годах обязательств, предусмотренных контрактом» (далее – Постановление № 783) заслуживает внимание суда. 

Согласно пункту 2 Правил списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) осуществляется по контрактам, обязательства по которым исполнены в полном объеме, за исключением контрактов, по которым

а) в 2015, 2016 и 2020 годах изменены по соглашению сторон условия о сроке исполнения контракта, и (или) цене контракта, и (или) цене единицы товара, работы, услуги, и (или) количестве товаров, объеме работ, услуг, предусмотренных контрактами;

б) в 2020 году обязательства не были исполнены в полном объеме в связи с возникновением не зависящих от поставщика (подрядчика, исполнителя) обстоятельств, повлекших невозможность исполнения контракта в связи с распространением новой коронавирусной инфекции;

в) в 2021 и 2022 годах обязательства не были исполнены в полном объеме в связи с существенным увеличением в 2021 и 2022 годах цен на строительные ресурсы, повлекшем невозможность исполнения контракта поставщиком (подрядчиком, исполнителем);

г) обязательства не были исполнены в полном объеме по причине возникновения при исполнении контракта не зависящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения без изменения условий, в связи с введением политических или экономических санкций иностранными государствами, совершающими недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц (далее - санкции), и (или) с введением иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов мер ограничительного характера (далее - меры ограничительного характера).

В соответствии с пунктом 3 Правил списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) осуществляется заказчиком в следующих случае и порядке:

а) если общая сумма начисленных и неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) не превышает 5 процентов цены контракта, заказчик осуществляет списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) за исключением случаев, предусмотренных подпунктами «в» - «д» настоящего пункта;

б) если общая сумма начисленных и неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) превышает 5 процентов цены контракта, но составляет не более 20 процентов цены контракта, заказчик осуществляет списание 50 процентов начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) при условии уплаты 50 процентов начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней), за исключением случаев, предусмотренных подпунктами «в» - «д» настоящего пункта;

в) если неуплаченные неустойки (штрафы, пени) начислены вследствие неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по контракту в связи с возникновением не зависящих от него обстоятельств, повлекших невозможность исполнения контракта в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, заказчик осуществляет списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней);

г) если неуплаченные неустойки (штрафы, пени) начислены вследствие неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по контракту в связи с существенным увеличением в 2021 и 2022 годах цен на строительные ресурсы, повлекшем невозможность исполнения контракта поставщиком (подрядчиком, исполнителем), заказчик осуществляет списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) в период с даты заключения контракта до даты представления предусмотренного абзацем пятым подпункта «а» пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 г. № 1315 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» предложения поставщика (подрядчика, исполнителя) об изменении существенных условий контракта в связи с существенным увеличением цен на строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию при исполнении такого контракта, с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение;

д) если неуплаченные неустойки (штрафы, пени) начислены вследствие неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по контракту в связи с возникновением не зависящих от него обстоятельств, повлекших невозможность исполнения контракта в связи с введением санкций и (или) мер ограничительного характера, заказчик осуществляет списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней).

Возражая против списания неустойки, ответчик ссылается на неполное выполнение истцом работ по контракту и на подписание соглашения к контракту об уменьшении объема выполненных работ. 

Рассматривая вопрос о неполном исполнении работ по Контракту, суд изучив условия контракту и приложения к нему, отмечает, что Приложением № 6 к Контракту установлен адресный перечень объектов выполнения работ с указанием количества квадратных метров ремонта тротуара по каждому объекту. По условиям указанного Контракта Подрядчик взял на себя обязательства по ремонту тротуаров площадью 3 352,76 м2.

Исходя из подписанных актов выполненных работ по форме КС-2, суммарный объем устройства покрытия подрядчиком исполнен в полном объеме.

Согласно пояснениям истца, смета к Контракту рассчитана в объеме, исходя из единицы работы, в частности, сметой было предусмотрено осуществление демонтажа и монтажа бортовых камней в количестве 6 705,52 шт. на заявленных объемах квадратных метров (3 352,76 м2), что по факту не представлялось возможным осуществить, поскольку Заказчиком не были учтены параметры тротуаров, установленных адресным перечнем, иными словами установка указанного количества бортовых камней возможна лишь при параметре тротуара шириной 1 м и общей протяженностью 3 352,76 м.

Например при ширине тротуара 2 м и общей протяженности тротуара 1 676,38 м площадь ремонта такого тротуара окажется также 3 352,76 м2, однако количество бортовых камней, которое можно демонтировать и монтировать на указанный тротуар будет равным лишь 3 352,76 шт. (по 1 676,38 шт. с каждой стороны).

Между тем, стоимость демонтажа и монтажа всего объема бортового камня в количестве 6 705,52 штук, который фактически неоткуда демонтировать и некуда уложить по смете составляет 7 577 237,60 рублей, то есть практически 60 % от всего объема работ

Так, 06.05.2020 письмом № 132/И Подрядчик пригласил Заказчика для осуществления контрольных измерений по объектам с целью установления их соответствия объекту закупки и заключенному контракту, однако, Заказчик своего представителя не направил.

08.05.2020 письмом № 135/И Подрядчик уведомил Заказчика об отсутствии представителя со стороны Заказчика.

Также Подрядчик сообщил Заказчику, что при фактическом выполнении работ параметры тротуаров имели иные значения, отсутствовала возможность демонтажа и монтажа бортовых камней в объеме, предусмотренном Контрактом письмом от 10.12.2020 №888/И.

В данном случае Подрядчик полагает, что неисполнение Контракта в полном объеме произошло не по его вине, а вследствие неверного определения необходимого объема работ Заказчиком при планировании закупки (фактические параметры тротуаров не соответствовали документации о закупке).

Согласно экспертному заключению от 29.12.2020, утвержденного МКУ «УКС» г. Магнитогорск работы выполнены в полном объеме (л.д.45).

Сторонами согласовано и подписано соглашение о расторжении № 113/21-с/л к муниципальному контракту № 68/20 от 30.03.2020 от 10.02.2021 (л.д. 12), согласно которому стороны договорились расторгнуть муниципальный контракт № 68/20 от 30.03.2020 по соглашению сторон на сумму 7 438 703 рубля 75 копеек. Цена муниципального контракта составляет 5 490 792 рубля 57 копеек (п. 1 соглашения).

При этом соглашение о расторжении №113/21-ср от 10.02.2021 не содержит условие об изменении объеме работ по контракту, а только об уменьшении цены контракта. Данное соглашение подписано после принятия работ по контракту.  

На основании приведенных обстоятельств, суд приходит к выводу, что подрядчик работы по контракту, заключенному в 2020 года, выполнены в полном объеме в 2020 году.

Общая сумма пени и штраф составляет 845 242 руб. 90 коп. (за исключением штрафа в размере 5000 руб. признанного судом необоснованным). 

В соответствии с подпунктом «б» пункта 3 Правил списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) осуществляется заказчиком в следующих случае и порядке если общая сумма начисленных и неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) превышает 5 процентов цены контракта, но составляет не более 20 процентов цены контракта, заказчик осуществляет списание 50 процентов начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) при условии уплаты 50 процентов начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней), за исключением случаев, предусмотренных подпунктами «в» - «д» настоящего пункта.

Сумма неустоек 845 242 руб. 90 коп. составляет 6,53% от цены контракта 12 935 981 руб. 51 коп. до расторжения, и составляет 15,39%  от цены по соглашению о расторжении 5 490 792 руб. 57 коп.

Таким образом, сумма неустоек 845 242 руб. 90 коп. подлежит списанию в размере 50%, что составляет 422 621 руб. 45 коп. 

Учитывая, что пунктом 2.8. Контракта установлено, что в случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком предусмотренных Контрактом обязательств, оплата производится по факту выполненных работ, за вычетом начисленных штрафа и (или) пени, то с ответчика в пользу истца подлежит взысканию задолженность в размере 427 621 руб. 45 коп. (850 242 руб. 90 коп. – 422 621 руб. 45 коп.).

Следовательно, исковые требования подлежат удовлетворению частично в размере 427 621 руб. 45 коп. (50,29%).

В соответствии с ч.1 ст. 112 АПК РФ вопросы распределения судебных расходов, отнесения судебных расходов на лицо, злоупотребляющее своими процессуальными правами, и другие вопросы о судебных расходах разрешаются арбитражным судом соответствующей судебной инстанции в судебном акте, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, или в определении.

В соответствии с ч. 1 ст. 110 АПК РФ судебные расходы по уплате государственной пошлины, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

При цене иска 850 242 руб. 90 коп. в соответствии с п. 1 ст. 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации размер государственной пошлины составляет 20 005 руб. 

Истцом при подаче искового заявления уплачена государственная пошлина в размере 20 005 руб., что подтверждается платежным поручением от 09.03.2022 № 50 (л.д. 5).

Учитывая, что исковые требования удовлетворены частично (50,29%), то с ответчика в пользу истца подлежат взысканию расходы по уплате государственной пошлины в размере 10 060 руб. 51 коп. (20005*50,29%).

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Альянс» задолженность в размере 427 621 руб. 45 коп., расходы по уплате государственной пошлины в размере 10 060 руб. 51 коп.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать. 

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в апелляционную инстанцию – Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи жалобы через Арбитражный суд Челябинской области. 

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Судья                                                              В.В. Малыхина

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы можно получить на Интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда http://18aas.arbitr.ru.