АРБИТРАЖНЫЙ СУД КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

248000, г. Калуга, ул. Ленина, д. 90; тел: 8 (4842) 505-902, 8-800-100-23-53; факс: 8 (4842) 599-457 

http://kaluga.arbitr.ru; е-mail: kaluga.info@arbitr.ru 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

Дело № А23-5980/2022

19 октября 2022 года

г. Калуга

Арбитражный суд Калужской области в составе судьи Пашковой Е.А., 

руководствуясь ст.ст. 104, 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

удовлетворить иск полностью. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью Строительно-промышленная  компания "Век" устранить недостатки работ, выполнив гарантийный ремонт фасада,  цоколя, отмостки и балконных плит многоквартирного жилого дома № 42 по ул. Маршала  Жукова г. Калуги, предусмотренный муниципальным контрактом от 25.10.2018   № 0137300043318001012-0350126-02, а именно:  

1. Восстановить штукатурный и окрасочный слой низа балконных плит кв.   № 7, кв. № 11, кв. № 15, кв. № 19, кв. № 39 (п. 30-34 акта № 8 о приемке выполненных  работ от 29.12.2020 по форме КС-2).  

2. Произвести ремонт (бетонирование) верхнего слоя отмостки площадью  38,4 кв.м. (п. 10 акта № 7 о приемке выполненных работ от 29.12.2020 по форме КС-2).  

3. Произвести зачистку и окраску цоколя площадью 25 кв.м. (п. 10-11 акта № 9  о приемке выполненных работ от 29.12.2020 по форме КС-2).  

4. Произвести зачистку и окраску низа карнизных плит площадью 39 кв.м.  (п. 23, п. 40 акта № 9 о приемке выполненных работ от 29.12.2020 по форме КС-2).  

5. Выполнить герметизацию примыканий по периметру дымовентиляционных  каналов в объеме 96,54 м.п. (п. 37 акта № 2 о приемке выполненных работ от 29.12.2020  по форме КС-2).  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  Строительно-промышленная компания "Век" в пользу муниципального казенного  учреждения "Центр по повышению энергетической эффективности" 1 800 руб. расходов  на уплату государственной пошлины.  

Возвратить муниципальному казенному учреждению "Центр по повышению  энергетической эффективности" 4 200 руб. государственной пошлины, перечисленной по  платежному поручению от 05.07.2022 № 221.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в  Двадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через  Арбитражный суд Калужской области.  

Судья Е.А. Пашкова