10488_10973066  

 

 АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ

Дело № А53-16159/2022

07 сентября 2023 года

г. Ростов-на-Дону

 

Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Запорожко Е.В., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело № А53-16159/2022 

по исковому заявлению Управления капитального строительства города Таганрога (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «ДСК» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>)  

о взыскании пени в размере 308 213 руб. за период с 30.11.2020 по 13.04.2022 по договору   № ф.2018.113653 от 30.03.2018, обязании устранить недостатки выполненных работ,  

руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,   

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить частично.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ДСК» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Управления капитального строительства  

города Таганрога (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 10 347,20 руб. неустойки за  

период с 01.12.2020 по 31.03.2022. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью «ДСК» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в течение 30 календарных дней с даты вступления  

ренения суда по настоящему делу в законную силу выполнить своими силами и за свой  

счет работы по устранению недостатков выполненных по договору № ф.2018.113653 от  

30.03.2018 работ, а именно: В блоке № 1: - устранить намокание потолка в коридоре около пом. 1407; - устранить намокание потолка в коридоре около пом. 1413 и 1421; В блоке № 3: - осуществить ремонт подъемника для МГН; В блоке № 4: 

- в коридоре около пом. 4404, 4418, в пом. 4421 устранить намокание потолка;  

- устранить просадку асфальтового покрытия около 15 м2 отдельными участками  от 0,5 м2 до 2 м2;  

- устранить смещение фасадной плитки вентилируемого фасада здания  относительно крепежных элементов;  

- провести проверку работ по устранению протечек кровли. В остальной части иска отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ДСК» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход бюджета Российской Федерации 6 307,67 руб.  государственной пошлины по иску.  

Взыскать с Управления капитального строительства города Таганрога (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью  «ДСК» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 29 411,76 руб. судебных расходов по  оплате экспертизы.  

Произвести зачет встречных требований сторон. 

В результате зачета взыскать с Управления капитального строительства города  Таганрога (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной  ответственностью «ДСК» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 19 064,56 руб.  

Решение суда по настоящему делу вступает в законную силу по истечении  месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае  подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в  законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной  инстанции.  

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в апелляционном  порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты  принятия решения через суд, принявший решение, а также в кассационном порядке в  Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев со дня вступления в  законную силу решения через суд, принявший решение, при условии, что оно было  предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд  апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи  апелляционной жалобы.  

Судья Е.В. Запорожко 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 27.03.2023 4:20:00

Кому выдана Запорожко Екатерина Владимировна