64_14464595 

Арбитражный суд Московской области 

107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва 

http://asmo.arbitr.ru/ Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть в порядке ст. 176 АПК РФ)

Дело № А41-88945/22

07 сентября 2023 года

г. Москва

 

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Арешкиной И.Д., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Клочковым А.И.,  рассмотрев в открытом судебном заседании дело  

по иску Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов  (ОГРН:1137799018081, ИНН:7701169833) к Обществу с ограниченной ответственностью  «Фибробетон» (ОГРН:5147746343949, ИНН:7721852318) об обязании безвозмездно  устранить недостатки работ, выполненных по договору подряда, и взыскании 213 528, 99  руб. неустойки,  

при участии в заседании: 

от истца – Ложкомоева Е.Г. по дов. от 23.12.2022 № 280, паспорт, диплом,  от ответчика – не явился, извещен  

Руководствуясь статьями 110, 167, 174, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Обязать ООО «Фибробетон» в месячный срок после вступления в силу решения  Арбитражного суда Московской области по настоящему делу безвозмездно устранить  выявленные недостатки (дефекты), указанные в Рекламационном акте от 22.06.2022, на  фасаде и балконных плитах многоквартирного дома, расположенного по адресу: Московская  область, г. Электросталь, пр-т Ленина, д. 38/7, а именно:  

- устранить отслоение, частичное разрушение штукатурно-окрасочного слоя цоколя и  выступающих частей локальными участками по всему периметру многоквартирного дома  (30 %);  

- устранить отслоение окрасочного слоя фасада в районе 2-го подъезда со стороны  проезжей части (2 места);  

- устранить отслоение штукатурно-окрасочного слоя балконных плит (16 мест). 

Взыскать с ООО «Фибробетон» в пользу Фонда капитального ремонта общего  имущества многоквартирных домов неустойку за нарушение сроков устранения недостатков  работ, определенных в Рекламационном акте, в размере 380 154,66 руб. за период с  26.07.2022 по 20.10.2022, а также неустойку в размере 1/130 действующей на день уплаты  неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости работ (7 573 962,49 руб.) за  нарушение сроков устранения недостатков работ, определенных в Рекламационном акте, за  период с 21.10.2022 по дату фактического исполнения обязательства по устранению  недостатков (дефектов) капитального ремонта, и 16 603 руб. расходов по уплате  государственной пошлины.  

В случае просрочки исполнения решения Арбитражного суда Московской области  взыскать с ООО «Фибробетон» в пользу Фонда капитального ремонта общего имущества  

многоквартирных домов судебную неустойку в размере 1000 руб. за каждый день, начиная  со следующего дня, следующего за днем вступления настоящего решения суда в законную  силу.  

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в  месячный срок со дня принятия.  

Судья И.Д. Арешкина