Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-87286/2021

13 октября 2022 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена 16 сентября 2022 года. Полный текст решения изготовлен 13 октября 2022 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи Рагузиной П.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: Общество с ограниченной ответственностью «Стройкомплекс-95 Управление Начальника Работ» (188340, Ленинградская область, Гатчинский район, Тайцы городской поселок, Юного Ленинца 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 13.05.2004, ИНН: 

<

***>)

ответчик: Общество с ограниченной ответственностью «Мерка» (190005, 

<

...>, литер Б, комната 402, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 26.04.2017, ИНН: 

<

***>) 

при участии

от истца: ФИО2 (доверенность от 11.01.2019) 

от ответчика: ФИО3 (доверенность от 15.11.2021) 

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «Стройкомплекс-95 Управление Начальника Работ» (далее – ООО «СК-95УНР») обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Мерка» (далее – ООО «Мерка») о взыскании 2410988 руб. 76 коп. задолженности и 375994 руб. 89 коп. неустойки за период с 18.12.2021 по 31.03.2022 (с учетом уточнения требований, принятого судом).

В судебном заседании от 16.09.2022 истец под роспись представителя в протоколе судебного заседания истца отказался от требования о взыскания 375994 руб. 89 коп. неустойки.

Частичный отказ от иска заявлен уполномоченным лицом, не противоречит закону и не нарушает прав других лиц, поэтому принимается судом.

Доверенность представителя истца, в которой специально оговорено право представителя на полный или частичный отказ от исковых требований, приобщена к материалам настоящего дела.

Ответчик возражал против удовлетворения иска.

Исследовав материалы настоящего дела, оценив собранные по делу доказательства в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд установил следующее.

Между ООО «СК-95УНР» (генеральный подрядчик), ООО «Сэтл Строй» (подрядчик) и ООО «Мерка» (субподрядчик) были заключены договоры: договор субподряда № ВТ15-11/19-ВСП от 05.11.2019 (далее - договор-1), а также договор субподряда № ВТ15-10/19-СС1 от 28.10.2019 (далее - договор-2), в соответствии с которыми подрядчик поручил, а субподрядчик принял на себя обязательства в установленные договорами сроки выполнить полный комплекс строительных работ, перечисленных в пункте 1.2 договоров, генеральный подрядчик обязался создать субподрядчику необходимые условия для выполнения работ, а подрядчик обязался принять их результат и уплатить обусловленную договором цену. Генеральный подрядчик обязался оказывать субподрядчику услуги по общей организации и координации работ на объекте, перечень которых указан в разделе 9 договора, а субподрядчик обязался принять оказанные услуги и уплатить обусловленную договором цену оказания услуг.

В соответствии с пунктом 4.5 договоров субподрядчик обязуется возмещать генеральному подрядчику в порядке, установленном пунктом 4.7 договоров, расходы за потребленные субподрядчиком электроэнергию от постоянных источников электроснабжения, водоснабжение и водоотведение (пункт 4.5.1 договоров), а также компенсирует генеральному подрядчику расходы по вывозу отходов в размере стоимости передачи отходов различных классов опасности на использование или размещение (пункт 4.5.2 договоров). В случае немотивированного отказа субподрядчика от подписания акта, указанный акт подписывается в одностороннем порядке генеральным подрядчиком и будет иметь полную юридическую силу.

Согласно 4.6 договоров генеральный подрядчик оказывает субподрядчику услуги по предоставлению электроэнергии, вырабатываемой от арендуемых подрядчиком и предоставляемых генеральному подрядчику ДЭС, а также от других источников электроэнергии. 

В силу пункта 4.7 договоров расходы генерального подрядчика, подлежащие возмещению согласно пункту 4.5 договора, а также услуги генерального подрядчика/подрядчика, предусмотренные пунктом 4.6 договора, оплачиваются субподрядчиком с учетом следующего: оплата производится в период с даты начала выполнения работ по договору до подписания акта о полном выполнении обязательств по договору подряда, оформляемого согласно пункту 6.3.7 договоров; оплата производится ежемесячно на основании актов об оказании услуг, подписанных сторонами, и счетов, выставляемых генеральным подрядчиком/подрядчиком. Акт об оказании услуг, представляемый генеральным подрядчиком/подрядчиком субподрядчику, должен быть подписан последним в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения. В случае не подписания акта об оказании услуг субподрядчиком и не представления обоснованных возражений в указанный срок, акт об оказании услуг считается подписанным и подлежит оплате. Оплата производится субподрядчиком не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания акта об оказании услуг. 

В соответствии с пунктом 4.8 договоров услуги генерального подрядчика, перечисленные в пунктах 9.1-9.18, 9.20 договора, подлежат оплате субподрядчиком с момента начала выполнения работ по настоящему договору до даты фактического окончания выполнения субподрядчиком работ по договору в следующем порядке: субподрядчик ежемесячно оплачивает услуги генерального подрядчика в размере 1,5% от стоимости выполненных субподрядчиком работ по договору, указанной в подписанных справках о стоимости выполненных работ по форме № КС-3 за отчетный месяц без учета стоимости дорогостоящего оборудования: ГРЩ, трансформаторов трансформаторных подстанций (пункт 4.8.1); генеральный подрядчик обязуется не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, предоставить заказчику и субподрядчику акт об оказанных услугах и счет-фактуру. Субподрядчик обязуется не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов подписать акт об оказанных услугах, либо направить мотивированный отказ. В случае мотивированного отказа генеральный подрядчик корректирует указанные в акте об оказанных услугах сведения и направляет откорректированный акт субподрядчику для подписания. В случае не подписания акта об оказанных услугах и не представления обоснованных возражений в указанный срок, акт считается подписанным и подлежит оплате (пункт 4.8.2).

Согласно пункту 5.2 договоров услуги генерального подрядчика, перечисленные в пунктах 9.1-9.18, 9.20 договора, оплачиваются субподрядчиком ежемесячно на основании актов об оказанных услугах, счетов-фактур и счетов, выставляемых генеральным подрядчиком, не позднее 15 рабочих дней с даты предоставления генеральными подрядчиком счета-фактуры и подписания акта об оказанных услугах (в зависимости от того, какое событие наступит позднее).

В соответствии с абзацем 2 пункта 4.7 договоров субподрядчик компенсирует генеральному подрядчику расходы по использованию механизмов, не указанных в пункте 4.5.2, пункте 4.5.3 договора, а также затраты по оказанию услуг (за исключением услуг, обозначенных в пунктах 9.1-9.18 договоров) на основании отдельного договора, заключенного между генеральным подрядчиком и субподрядчиком, который субподрядчик и генеральный подрядчик обязуются заключить в течение 5 дней с момента заключения договора подряда.

Во исполнение указанного пункта договоров между ООО «СК-95УНР» (исполнитель) и ООО «Мерка» (заказчик) был заключен договор возмездного оказания услуг № СК-14 от 01.01.2020 (договор-3), в соответствии с которым исполнитель обязался оказать заказчику услуги, перечисленные в приложении № 1 к договору-3, а заказчик обязался оплатить эти услуги.

Согласно пункту 1.4 договора-3 услуги оказывались на объекте строительства жилой комплекс со встроенными коммерческими помещениями, встроенно-пристроенными подземными автостоянками и отдельно стоящим объектом дошкольного и начального образования по адресу: Санкт-Петербург, Витебский пр., д. 15, лит. А. 

Согласно пункту 3.2 договора-3 услуги считаются оказанными с момента подписания сторонами акта приемки-сдачи оказанных услуг.

В соответствии с пунктом 3.4 договора-3 в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения акта приемки-сдачи оказанных услуг субподрядчик обязан подписать его и направить один экземпляр генеральному подрядчику либо при наличии недостатков в качестве оказываемых услуг и (или) в их результате представить генеральному подрядчику мотивированный отказ от его подписания.

В силу пункта 3.7 договора-3 в случае уклонения или немотивированного отказа субподрядчика от подписания акта приемки-сдачи оказываемых услуг генеральный подрядчик по истечении 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания последнего срока, установленного для рассмотрения, подписания и направления этого документа, вправе составить односторонний акт приемки-сдачи оказанных услуг.

В силу пункта 4.1 договора-3 заказчик оплачивает услуги в течение 20 рабочих дней после подписания сторонами акта приемки-сдачи оказанных услуг.

Помимо этого между истцом и ответчиком заключен договор субподряда № СВ2-СС от 21.09.2020 (договор-4), по условиям которого подрядчик (ООО «Сэтл Строй») поручил, а субподрядчик принял на себя обязательство в установленный договором срок выполнить полный комплекс строительных работ по устройству внутренних слаботочных сетей (без подземной автостоянки), перечень которых указан в пункте 1.2 договора, на объекте строительства «многоквартирные жилые дома со встроенными помещениями и встроенно - пристроенной подземной автостоянкой», расположенном по адресу: Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Светлановское, проспект Энгельса, участок 4, на земельном участке с кадастровым номером 78:36:0005354:1684, (далее именуемый «Объект»), генеральный подрядчик обязался создать субподрядчику необходимые условия для выполнения работ, а подрядчик обязался принять их результат и уплатить обусловленную договором цену; генеральный подрядчик обязался оказывать субподрядчику услуги по общей организации и координации работ на объекте, перечень которых указан в разделе 9 договора, а субподрядчик обязался принять оказанные услуги и уплатить обусловленную договором цену оказания услуг.

В соответствии с пунктом 4.5 договора-4 субподрядчик обязуется возмещать генеральному подрядчику в порядке, установленном пунктом 4.7 договора, расходы за потребленные субподрядчиком электроэнергию от постоянных источников электроснабжения, водоснабжение и водоотведение (пункт 4.5.1), а также компенсирует генеральному подрядчику расходы по вывозу отходов в размере стоимости передачи отходов различных классов опасности на использование или размещение (пункт 4.5.2). В случае немотивированного отказа субподрядчика от подписания акта, указанный акт подписывается в одностороннем порядке генеральным подрядчиком и будет иметь полную юридическую силу.

Согласно 4.6 договора-4 генеральный подрядчик оказывает субподрядчику услуги по предоставлению электроэнергии, вырабатываемой от арендуемых подрядчиком и предоставляемых генеральному подрядчику ДЭС, а также от других источников электроэнергии. 

В силу пункта 4.7 договора-4 расходы генерального подрядчика, подлежащие возмещению согласно пункту 4.5 договора, а также услуги генерального подрядчика/подрядчика, предусмотренные пунктом 4.6 договора, оплачиваются субподрядчиком с учетом следующего: оплата производится в период с даты начала выполнения работ по договору до подписания акта о полном выполнении обязательств по договору подряда, оформляемого согласно пункту 6.3.7 договора; оплата производится ежемесячно на основании актов об оказании услуг, подписанных сторонами, и счетов, выставляемых генеральным подрядчиком/подрядчиком. Акт об оказании услуг, представляемый генеральным подрядчиком/подрядчиком субподрядчику, должен быть подписан последним в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения. В случае не подписания акта об оказании услуг субподрядчиком и не представления обоснованных возражений в указанный срок, акт об оказании услуг считается подписанным и подлежит оплате. Оплата производится субподрядчиком не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания акта об оказании услуг. 

В соответствии с пунктом 4.8 договора-4 услуги генерального подрядчика, перечисленные в пунктах 9.1-9.18, 9.20 договора, подлежат оплате субподрядчиком с момента начала выполнения работ по настоящему договору до даты фактического окончания выполнения субподрядчиком работ по договору в следующем порядке: субподрядчик ежемесячно оплачивает услуги генерального подрядчика в размере 1,5% от стоимости выполненных субподрядчиком работ по договору, указанной в подписанных справках о стоимости выполненных работ по форме № КС-3 за отчетный месяц без учета стоимости дорогостоящего оборудования: ГРЩ, трансформаторов трансформаторных подстанций (пункт 4.8.1 договора-4); генеральный подрядчик обязуется не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, предоставить заказчику и субподрядчику акт об оказанных услугах и счет-фактуру. Субподрядчик обязуется не позднее 5 рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов подписать акт об оказанных услугах, либо направить мотивированный отказ. В случае мотивированного отказа генеральный подрядчик корректирует указанные в акте об оказанных услугах сведения и направляет откорректированный акт субподрядчику для подписания. В случае не подписания акта об оказанных услугах и не представления обоснованных возражений в указанный срок, акт считается подписанным и подлежит оплате (пункт 4.8.2 договора-4).

Согласно пункту 5.2 договора-4 услуги генерального подрядчика, перечисленные в пунктах 9.1-9.18, 9.20 договора, оплачиваются субподрядчиком ежемесячно на основании актов об оказанных услугах, счетов-фактур и счетов, выставляемых генеральным подрядчиком, не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты предоставления генеральными подрядчиком счета-фактуры и подписания акта об оказанных услугах (в зависимости от того, какое событие наступит позднее).

Ответчик не опроверг требования истца, которые подтверждаются материалами дела.

В материалы дела представлены подтверждающие обязательства ответчика документы, реестры передачи документов.

Иск подлежит удовлетворению.

В соответствии со статьями 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов; односторонний отказ от исполнения своих обязательств не допускается.

В соответствии с частью 5 статьи 15, часть 1 статьи 177 и частью 1 статьи 186 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебный акт, выполненный в форме электронного документа, подписанного судьей усиленной квалифицированной электронной подписью, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа.

Руководствуясь статьями 150, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

р е ш и л:

Принять отказ от иска в части требований о взыскании 375994 руб. 89 коп. неустойки и прекратить производство по делу в указанной части.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Мерка» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Стройкомплекс-95 Управление Начальника Работ» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) 2410988 руб. 76 коп. задолженности и 35055 руб. судебных расходов по государственной пошлине. 

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Стройкомплекс-95 Управление Начальника Работ» из федерального бюджета 1298 руб. государственной пошлины, излишне уплаченной по платежному поручению от 19.08.2021 № 2757.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения.

Судья Рагузина П.Н.