9013/2020-33452(1) 

  АРБИТРАЖНЫЙ СУД НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации 

Резолютивная часть решения

 Дело № А43 – 7535/2019 

г. Нижний Новгород  объявлена 12 февраля 2020 года  

Арбитражный суд Нижегородской области в составе  

судьи Верховодова Евгения Владимировича (шифр дела 40-275), при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, 

рассмотрев дело по иску акционерного общества «Головное производственно-техническое  предприятие «Гранит» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к акционерному обществу «Нижегородское научно-производственное объединение имени  М.В. Фрунзе» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

о взыскании 3 735 008 руб. 95 коп., 

а также по встречному исковому заявлению акционерного общества «Нижегородское  научно-производственное объединение имени М.В. Фрунзе»  

к акционерному обществу «Головное производственно-техническое предприятие «Гранит» о взыскании 4 111 261 руб. 91 коп. при участии представителей: от истца – ФИО2 по доверенности от 09.01.2020, от ответчика – ФИО3 по доверенности от 24.12.2019, 

от третьего лица – ФИО4 по доверенности от 06.12.2018.  

Руководствуясь статьями 110, 112, 167-171, 176, 180, 181, 319 Арбитражного   процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

требования акционерного общества «Головное производственно-техническое  

предприятие «Гранит» удовлетворить. 

Расторгнуть контракт от 27.04.2015 № 1517187313351050120001606/СВ-15-119с.  

Взыскать с акционерного общества «Нижегородское научно-производственное  

объединение имени М.В. Фрунзе» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу  

акционерного общества «Головное производственно-техническое предприятие «Гранит»  

(ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) - 2 575 494.50 руб. неотработанного аванса, 

- 791 084.60 руб. процентов за пользование авансом за период с 10.10.2015 по  10.01.2019 и далее с 11.01.2019 до даты погашения задолженности, исчисленных из расчета  1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ на дату выплаты долга за каждый день просрочки,  

- 541 497.70 руб. неустойки за нарушение сроков выполнения работ по состоянию на  12.02.2020 (дата расторжения контракта),  

- 47 675 руб. судебных расходов, понесенных на оплату государственной пошлины.  

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по  ходатайству взыскателя.  

В удовлетворении встречного иска – отказать. 

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия,  если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение,  если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия  постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд в г. Владимир, через Арбитражный суд Нижегородской области. 

Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа при  условии, что оно было предметом рассмотрения Первого арбитражного апелляционного   суда или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока  подачи апелляционной жалобы.  

Судья Е.В.Верховодов