ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А40- 129179/22-67-1016

г. Москва

07 сентября 2022 г.

Резолютивная часть решения оглашена 02 сентября 2022 года

Полный текст решения изготовлен 07 сентября 2022 года

 

Арбитражный суд в составе:                                                                                                                                                    

Судья В.Г. Джиоев (единолично)

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале 10011

дело по исковому заявлению Федерального государственного унитарного предприятия "РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (105064, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 19.12.2002, ИНН: 

<

***>), 

к Обществу с ограниченной ответственностью " ТОРГОВЫЙ ДОМ М1" (214020, Смоленская область, Смоленск город, ФИО2 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 06.09.2018, ИНН: 

<

***>)

о взыскании 151 693 396,24 руб.

При участии:

От истца: ФИО3 по дов-ти № 84/2022 от 27.06.2022 г., диплом

От ответчика: неявка, извещен

УСТАНОВИЛ:

Федеральное государственное унитарное предприятие "РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к Обществу с ограниченной ответственностью "ТОРГОВЫЙ ДОМ М1" (далее – ответчик) о взыскании неотработанного аванса по договору от 26.04.2021 №21КС-203 в размере 101 463 201 руб. 28 коп., суммы по возмещению коммунальных услуг по Договору от 26.04.2021 №21КС-203 в размере 131 256 руб. 97 коп., неотработанного аванса по договору от 21.04.2021 №21КР-205 в размере 25 725 880 руб. 02 коп., неустойки за нарушение сроков выполнения работ по Договору от 26.04.2021 №21КС-203 в размере 15 521 302 руб. 02 коп.,  неустойки за нарушение сроков выполнения работ по Договору от 21.04.2021 №21КР-205 в размере 5 504 480 руб. 80 коп., неустойки за нарушение сроков выполнения работ по Договору от 20.07.2021 №>21КР-419 в размере 2 150 812 руб. 79 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами на сумму неосновательного денежного обогащения по Договору от 26.04.2021 №21КС-203 за период с 18.05.2022 по 15.06.2022 в размере 954 709 руб. 57 коп., а так же с 16.06.2022 по дату фактического исполнения обязательства, процентов за пользование чужими денежными средствами на сумму неосновательного денежного обогащения по Договору от 21.04.2021 №21КР-205 за период с 18.05.2022 по 15.06.2022 в размере 241 752 руб. 79 коп., а так же с 16.06.2022 по дату фактического исполнения обязательства.

Исковые требования мотивированы неисполнением ответчиком своих обязательств по договору строительного подряда в установленные сроки.

Истец заявленные требования поддержал в полном объеме. 

Ответчик возражал против удовлетворения заявленных требований, письменный отзыв не представил.

Исследовав и оценив, имеющиеся в деле доказательства, суд считает исковые требования подлежащими удовлетворению в полном объеме, исходя из следующего.

Как усматривается из материалов дела, между Федеральным государственным унитарным предприятием «Ремонтно-строительное управление» Управления делами Президента Российской Федерации (далее - ФГУП «РСУ», Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «ТОРГОВЫЙ ДОМ М1» (далее ООО «ТД М1», Подрядчик) заключен договор от 26.04.2021 №21КР-203 (Далее - Договор 1) на капитальный ремонт недвижимого имущества - спального корпуса (кадастровый номер 90:25:030104:295), расположенного на земельном участке (кадастровый номер 90:25:030104:373), расположенного по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт. Гурзуф, ул. Ленинградская, 1 (Далее - Объект).

Общая стоимость работ по Договору 1 согласно п. 3.1 составляет 164 449 606,40 руб.

В период с 04.06.2021 по 27.10.2021 Заказчиком были произведены авансовые платежи в размере 101 463 201,28 руб. (Платежные поручения № 5144 от 04.06.2021, № 5110 от 04.06.2021, №5540 от 16.06.2021, № 7254 от 27.07.2021, № 7973 от 13.08.2021, № 8118 от 18.08.2021, № 8259 от 23.08.2021, №8644 от 08.08.2021, № 9242 от 27.10.2021).

В соответствии с п. 1.3. Договора 1 срок выполнения работ до 01 сентября 2021 г., с даты передачи Заказчиком Подрядчику пригодной для производства работ строительной площадки и проектно-сметной документации, подписанной сторонами.

Дополнительные соглашения о продлении сроков выполнения работ по Договору стороны не заключали.

Строительная площадка и проектно-сметная документация переданы Подрядчику по Актам от 28.04.2021.

На текущую дату работы, предусмотренные Договором 1, Подрядчиком не сданы.

Просрочка выполнения работ по состоянию на дату расторжения Договора 1 (18.05.2022) составляет 260 дней.

Пунктом 10.3. Договора 1 предусмотрено расторжение Договора в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств.

Воспользовавшись своим правом, Заказчик направил в адрес Подрядчика Уведомление от 04.04.2022 № РСУ-1273 (далее - Уведомление) об одностороннем отказе от исполнения Договора 1.

Согласно п. 1 ст. 450.1 ГК РФ предоставленное ГК РФ, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено ГК РФ, другими законами, иными правовыми актами или договором.

Пунктом 10.4 Договора 1 предусмотрено, что о решении расторгнуть Договор, Заказчик уведомляет Подрядчика не менее чем за 10 (десять) дней до момента расторжения. В таком случае Договор считается расторгнутым по истечении указанного (десяти) дневного срока при условии уведомления Подрядчика.

В соответствии с п. 2 ст. 450.1 ГК РФ, в случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным.

Согласно Отчету с официального сайта Почты России об отслеживании отправления с почтовым идентификатором 10506463047861, Уведомление, направленное по адресу, указанному в Договоре и в Едином Государственном Реестре Юридических лиц, не было получено Подрядчиком.

Следовательно, Уведомление Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора 1 вступает в силу, и Договор считается расторгнутым и прекращенным с 18.05.2022.

С учетом того, что Договор 1 считается расторгнутым по истечении 10 (десяти) дневного срока при условии получения настоящего Уведомления, удержание денежных средств, перечисленных Заказчиком Подрядчику в период действия договора без встречного удовлетворения на указанную сумму, является неосновательным обогащением получателя и подлежит возврату.

На момент направления указанного уведомления размер неотработанного аванса составляет 101 463 201,28 руб.

Согласно п.4.3.39 Договора 1 Подрядчик компенсирует Заказчику затраты за коммунальные услуги (водоотведение, водоснабжение, электроэнергия), необходимые для проведения работ по Договору.

Задолженность Подрядчика перед Заказчиком по возмещению коммунальных услуг по состоянию на 18.05.2022, согласно акту от 01.08.2021 № 3271, акту от 31.08.2021 № 3273 составляет 131 256, 97 руб.

Между Федеральным государственным унитарным предприятием «Ремонтно-строительное управление» Управления делами Президента Российской Федерации (далее - ФГУП «РСУ», Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «ТОРГОВЫЙ ДОМ М1» (далее ООО «ТД М1», Подрядчик) заключен договор от 21.04.2021 №21КР-205 (Далее - Договор 2) на капитальный ремонт здания корпуса люкс, лит. «А» инв. № 410112003768 (Спальный корпус №2), расположенного по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт. Ореанда, 12. Общая площадь здания 4667,5 м2. Кадастровым номером 90:25:050702:835 (Далее - Объект).

Общая стоимость работ по Договору 2 согласно п. 3.1 составляет 77 474 111, 00 руб.

Заказчиком были произведены платежи в размере 51 748 230,97 руб. (Платежные поручения № 3741 от 23.04.2021, № 6918 от 20.07.2021, № 7286 от 29.07.2021, № 7287 от 29.07.2021, № 8571 от 31.08.2021, № 8572 от 31.08.2021).

По состоянию на 18.05.2022 согласно подписанных сторонами по Договору Актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, Подрядчиком выполнены работы на сумму 26 022 350,95 руб.

 По состоянию на 18.05.2022 размер неотработанного аванса Подрядчиком по Договору 2 составляет 25 725 880,02 руб.

В соответствии с п. 1.5. Договора 2 срок выполнения работ: до 01 июля 2021 года с даты передачи Подрядчику строительной площадки, пригодной для производства работ и проектно-сметной документации, получивший положительное заключение Главгосэкспертизы, со штампом «В производство работ», переданных по Акту приемки-передачи, подписанного Сторонами.

Строительная площадка и проектно-сметная документация переданы Подрядчику по Актам от 22.04.2021.

На текущую дату работы, предусмотренные Договором 2, Подрядчиком не сданы.

Пунктом 10.3.1. Договора 2 установлено, что Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном в случае задержки Подрядчиком начала и/или окончания работ более чем на 10 (десять) рабочих дней.

Воспользовавшись своим правом, Заказчик направил в адрес Подрядчика Уведомление от 04.04.2022 № РСУ-1272 (далее - Уведомление) об одностороннем отказе от исполнения Договора 2.

Согласно п. 1 ст. 450.1 ГК РФ предоставленное ГК РФ, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено ГК РФ, другими законами, иными правовыми актами или договором.

Пунктом 10.4 Договора 2 предусмотрено, что о решении расторгнуть Договор, Заказчик уведомляет Подрядчика не менее чем за 10 (десять) дней до момента расторжения. В таком случае Договор считается расторгнутым по истечении указанного (десяти) дневного срока при условии уведомления Подрядчика.

В соответствии с п. 2 ст. 450.1 ГК РФ, в случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным.

Согласно Отчету с официального сайта Почты России об отслеживании отправления с почтовым идентификатором 10506463047837, Уведомление, направленное по адресу, указанному в Договоре и в Едином Государственном Реестре Юридических лиц, не было получено Подрядчиком.

Следовательно, Уведомление Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора 2 вступает в силу, и Договор считается расторгнутым и прекращенным с 18.05.2022.

С учетом того, что Договор 2 считается расторгнутым по истечении 10 (десяти) дневного срока при условии получения настоящего уведомления, удержание денежных средств, перечисленных Заказчиком Подрядчику в период действия договора без встречного удовлетворения на указанную сумму, является неосновательным обогащением получателя и подлежит возврату.

На момент направления указанного уведомления размер неотработанного аванса составляет 25 725 880,02 руб.

Между Федеральным государственным унитарным предприятием «Ремонтно-строительное управление» Управления делами Президента Российской Федерации (далее - ФГУП «РСУ», Заказчик) и Обществом с ограниченной   ответственностью   «ТОРГОВЫЙ   ДОМ   М1»    (далее ООО «ТД М1», Подрядчик) заключен договор от 20.07.2021 №21КР-419 (Далее - Договор 3) на капитальный ремонт объекта «Корпус-Люкс», лит. А (корпус № 2), инв. № 410112003768 по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт. Ореанда, 12 с кадастровым номером 90:25:050702:835 (Далее - Объект).

Общая стоимость работ по Договору 3 согласно п. 3.1 составляет 30 000 000,00 руб.

В соответствии с п. 1.7. Договора 3, срок выполнения работ - с даты заключения Договора до 15 сентября 2021 г.

На текущую дату работы, предусмотренные Договором 3, Подрядчиком не сданы.

По состоянию на текущую дату согласно подписанных сторонами по Договору 3 Актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, Подрядчиком выполнены работы на сумму 6 450 954,97 руб.

Пунктом 10.3.1. Договора 3 установлено, что Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном в случае задержки Подрядчиком начала и/или окончания работ более чем на 10 (десять) рабочих дней.

Пунктом 10.4 Договора 3 предусмотрено, что в случае принятия Заказчиком решения расторгнуть Договор 3, Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление, Договор считается расторгнутым с даты получения такого Уведомления Подрядчиком. Уведомление вручается в письменном виде под роспись уполномоченному представителю Подрядчика или направляется в письменном виде почтой по адресу, указанного в настоящем Договоре. При этом указанное уведомление будет считаться полученными стороной получателя также в случаях, если их вручение оказалось невозможным в связи с отсутствием получателя по адресу, указанному в Договоре, либо адрес оказался неверным, либо несуществующим.

Подрядчик в течение 10 (десяти) дней момента получения соответствующего требования предоставляет Заказчику к приемке акты приемки фактически выполненных на момент расторжения Договора 3 работ, а также иную документацию, подтверждающую объем и стоимость фактически выполненных работ.

Согласно п. 1 ст. 450.1 ГК РФ предоставленное ГК РФ, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено ГК РФ, другими законами, иными правовыми актами или договором.

В соответствии с п. 2 ст. 450.1 ГК РФ, в случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным.

Воспользовавшись своим правом, Заказчик направил в адрес Подрядчика Уведомление от 04.04.2022 № РСУ-1271 (далее - Уведомление) об одностороннем отказе от исполнения Договора 3.

Согласно Отчету с официального сайта Почты России об отслеживании отправления с почтовым идентификатором 10506463047844, Уведомление, направленное по адресу, указанному в Договоре 3 и в Едином Государственном Реестре Юридических лиц, не было получено Подрядчиком.

Следовательно, Уведомление Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора 3 вступает в силу, и Договор 3 считается расторгнутым и прекращенным с 18.05.2022.

Расторжение Договора 3 влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение/ненадлежащее исполнение договорных обязательств, в том числе гарантийных, которые имели место до расторжения Договора 3.

Согласно п. 1 ст. 708 ГК РФ, если иное не установлено законом, иными правовыми   актами  или   не   предусмотрено  договором,   подрядчик  несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения.

В соответствии с п. 4.3.1 Договора 3 Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п. 1.1 Договора 3 в сроки, установленные условиями Договора, в полном соответствии с техническим заданием, проектно-сметной документацией, строительными нормами, правилами, техническими регламентами.

Срок окончания работ по Договору 3 - до 15 сентября 2021 г.

Дополнительные соглашения о продлении сроков выполнения работ стороны не заключали.

Просрочка выполнения работ по Договору 3 на 18.05.2022 составляет 246 дней.

Вышеназванные договоры, по правовым признакам, являются договорами строительного подряда и регулируются нормами материального права, содержащимися в параграфах 1, 3 главы 37 ГК РФ (ст. ст. 702 - 729, 740 - 757).

В соответствии с пунктом 1 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

В силу положений статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями, при том, что односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

В пункте 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации определено, что в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно (пункт 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Право заказчика на отказ от исполнения договора подряда предусмотрено положениями статей 715, 717 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью или частично, когда такой отказ допускается законом или соглашением сторон, договор считается соответственно расторгнутым или измененным (пункт 3 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно пункту 2 статьи 453 Гражданского кодекса Российской Федерации при расторжении договора обязательства сторон прекращаются. Полученные до расторжения договора денежные средства, если встречное удовлетворение получившей их стороной не было предоставлено и обязанность его предоставить отпала, являются неосновательным обогащением получателя (пункт 1 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.01.2000 №49 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением норм о неосновательном обогащении»).

В соответствии со статьей 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Принимая во внимание совокупность изложенных обстоятельств дела, учитывая отсутствие в материалах дела доказательств выполнения ответчиком работ в установленный договором срок на сумму перечисленных денежных средств, установленный факт расторжения договора подряда и отсутствие правовых оснований для удержания ответчиком денежных средств, требования истца о взыскании неотработанного аванса по договору от 26.04.2021 №21КС-203 в размере 101 463 201 руб. 28 коп., суммы по возмещению коммунальных услуг по Договору от 26.04.2021 №21КС-203 в размере 131 256 руб. 97 коп., неотработанного аванса по договору от 21.04.2021 №21КР-205 в размере 25 725 880 руб. 02 коп. подлежит удовлетворению в полном объеме.

Истцом также заявлено требование о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ по Договору от 26.04.2021 №21КС-203 в размере 15 521 302 руб. 02 коп.,  неустойки за нарушение сроков выполнения работ по Договору от 21.04.2021 №21КР-205 в размере 5 504 480 руб. 80 коп., неустойки за нарушение сроков выполнения работ по Договору от 20.07.2021 №21КР-419 в размере 2 150 812 руб. 79 коп.

В соответствии с 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Пеня, согласно п. 13.7 Договора 1, начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорционально объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Подрядчиком.

Пеня, согласно п. 8.6 Договора 2, начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорционально объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Подрядчиком.

Пеня, согласно п. 8.6 Договора 3, начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором 3, в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорционально объему обязательств, предусмотренных Договором 3 и фактически исполненных Подрядчиком.

Представленный истцом расчет подлежащей взысканию неустойки, а также период её начисления и размер, проверен судом, является правильным и не оспорен по существу ответчиком.

Таким образом, требование истца о взыскании с ответчика неустойки за нарушение сроков выполнения работ по Договору от 26.04.2021 №21КС-203 в размере 15 521 302 руб. 02 коп.,  неустойки за нарушение сроков выполнения работ по Договору от 21.04.2021 №21КР-205 в размере 5 504 480 руб. 80 коп., неустойки за нарушение сроков выполнения работ по Договору от 20.07.2021 №21КР-419 в размере 2 150 812 руб. 79 коп. подлежит удовлетворению в полном объеме.

Истцом заявлено требования о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами на сумму неосновательного денежного обогащения по Договору от 26.04.2021 №21КС-203 за период с 18.05.2022 по 15.06.2022 в размере 954 709 руб. 57 коп., а так же с 16.06.2022 по дату фактического исполнения обязательства, процентов за пользование чужими денежными средствами на сумму неосновательного денежного обогащения по Договору от 21.04.2021 №21КР-205 за период с 18.05.2022 по 15.06.2022 в размере 241 752 руб. 79 коп., а так же с 16.06.2022 по дату фактического исполнения обязательства.

В силу п. 2 ст. 1107 на сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами (статья 395) с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств.

В соответствии с ч. 1 ст. 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды.

Представленный истцом расчет подлежащих взысканию процентов, проверен судом, является правильным и не оспорен по существу ответчиком.

В соответствии с п.48 Постановления Пленума Верховного суда от 24 марта 2016 г. № 7 сумма процентов, подлежащих взысканию по правилам статьи 395 ГК РФ, определяется на день вынесения решения судом исходя из периодов, имевших место до указанного дня. Проценты за пользование чужими денежными средствами по требованию истца взимаются по день уплаты этих средств кредитору. Одновременно с установлением суммы процентов, подлежащих взысканию, суд при наличии требования истца в резолютивной части решения указывает на взыскание процентов до момента фактического исполнения обязательства (пункт 3 статьи 395 ГК РФ). При этом день фактического исполнения обязательства, в частности уплаты задолженности кредитору, включается в период расчета процентов.

Согласно п. 7 Постановления Пленума ВС РФ от 24.12.2020 № 44 в период действия моратория проценты за пользование чужими денежными средствами (ст. 395 ГК РФ), неустойка (ст. 330 ГК РФ) а также иные санкции не начисляются на требования, возникшие до введения моратория, к лицу, подпадающему под его действие (пп. 2, п. 3 ст. 9.1, абз. 10, п. 1 ст. 63 Закона о банкротстве). В частности, это означает, что не подлежит удовлетворению предъявленное в общеисковом порядке заявление кредитора о взыскании с такого лица финансовых санкций, начисленных за период действия моратория.

В силу Постановления Правительства РФ от 28.03.2022 № 497 с 01.04.2022, на территории РФ сроком на 6 месяцев введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами в отношении юридических лиц, граждан, индивидуальных предпринимателей.

В связи с тем, что обязанность по возврату неотработанного аванса возникла после введения моратория, его положения в данном случае не применимы.

С учетом изложенного, требования истца о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами на сумму неосновательного денежного обогащения по Договору от 26.04.2021 №21КС-203 за период с 18.05.2022 по 15.06.2022 в размере 954 709 руб. 57 коп., а так же с 16.06.2022 по дату фактического исполнения обязательства, процентов за пользование чужими денежными средствами на сумму неосновательного денежного обогащения по Договору от 21.04.2021 №21КР-205 за период с 18.05.2022 по 15.06.2022 в размере 241 752 руб. 79 коп., а так же с 16.06.2022 по дату фактического исполнения обязательства.  подлежат удовлетворению в полном объеме. 

В силу ч. 4 ст. 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае, если в установленный судом срок ответчик не представит отзыв на исковое заявление, арбитражный суд вправе рассмотреть дело по имеющимся в деле доказательствам.

В силу положений ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами и никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, статьей 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью " ТОРГОВЫЙ ДОМ М1" (ИНН: 6732167672) в пользу Федерального государственного унитарного предприятия "РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ИНН: 7704008538) сумму неотработанного аванса по договору от 26.04.2021 №21КС-203 в размере 101 463 201 (сто один миллион четыреста шестьдесят три тысячи двести один) руб. 28 коп., сумму по возмещению коммунальных услуг по Договору от 26.04.2021 №21КС-203 в размере 131 256 (сто тридцать одна тысяча двести пятьдесят шесть) руб. 97 коп., сумму неотработанного аванса по договору от 21.04.2021 №21КР-205 в размере 25 725 880 (двадцать пять миллионов семьсот двадцать пять тысяч восемьсот восемьдесят) руб. 02 коп., неустойку за нарушение сроков выполнения работ по Договору от 26.04.2021 №21КС-203 в размере 15 521 302 (пятнадцать миллионов пятьсот двадцать одна тысяча триста два) руб. 02 коп.,  неустойку за нарушение сроков выполнения работ по Договору от 21.04.2021 №21КР-205 в размере 5 504 480 (пять миллионов пятьсот четыре тысячи четыреста восемьдесят) руб. 80 коп., неустойку за нарушение сроков выполнения работ по Договору от 20.07.2021 №21КР-419 в размере 2 150 812 (два миллиона сто пятьдесят тысяч восемьсот двенадцать) руб. 79 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами на сумму неосновательного денежного обогащения по Договору от 26.04.2021 №21КС-203 за период с 18.05.2022 по 15.06.2022 в размере 954 709 (девятьсот пятьдесят четыре тысячи семьсот девять) руб. 57 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами в порядке ст. 395 ГК РФ за период с 16.06.2022 по дату фактического исполнения обязательств, начисляемые на сумму долга в размере 101 463 201 руб. 28 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами на сумму неосновательного денежного обогащения по Договору от 21.04.2021 №21КР-205 за период с 18.05.2022 по 15.06.2022 в размере 241 752 (двести сорок одна тысяча семьсот пятьдесят два) руб. 79 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами в порядке ст. 395 ГК РФ за период с 16.06.2022 по дату фактического исполнения обязательств, начисляемые на сумму долга в размере 25 725 880 руб. 02 коп., а также расходы по уплате госпошлины в размере 200 000 (двести тысяч) руб. 00 коп.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья                                                                                            В.Г. Джиоев