АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89, 

факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru

сайт http://ufa.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А07-9885/2020

г. Уфа

17 ноября 2020 года

Резолютивная часть решения объявлена 16.11.2020

Полный текст решения изготовлен 17.11.2020

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Касьяновой С.С., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев дело по иску

ООО "АСТРО-ЛИФТ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к  ООО "ТЕРРА СТРОЙ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

о взыскании 480 000 руб.,

ООО "АСТРО-ЛИФТ"  (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Республики Башкортостан с иском к ООО "ТЕРРА СТРОЙ"  (далее – ответчик) о взыскании  задолженности в сумме 480 000 руб.

Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 10.07.2020  судом было указано на возможность завершения предварительного судебного заседания и перехода в  стадию судебного разбирательства в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции при отсутствии возражений сторон.

Признав дело подготовленным к судебному разбирательству,  в отсутствие возражений истца и ответчика,  суд считает целесообразным завершить предварительное судебное заседание и перейти к рассмотрению дела по существу в данном судебном заседании (ст. ст. 136, 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Дело рассматривается в судебном заседании.

Ответчик отзыв в материалы дела не направил,  явку  в судебное заседание не обеспечил, извещен надлежащим образом, по правилам ст.123 АПК РФ (судебная корреспонденция возвращена почтовым отделением с отметкой о причинах невручения).

По правилам ч. 3 ст. 156 АПК РФ дело рассмотрено в отсутствие  истца и ответчика по имеющимся в деле доказательствам.

Исследовав материалы дела,  суд 

 

УСТАНОВИЛ:

Между ООО «АСТРО-ЛИФТ» (далее - подрядчик) и "ТЕРРА СТРОЙ" (далее - генподрядчик) заключен договор на поставку, монтаж и пуско-наладку 4-х грузопассажирских лифтов № 2-06/19 от 17.06.2019, по условиям которого, генподрядчик поручает, а подрядчик обязуется выполнить поставку, монтажные и пуско-наладочные работы, сдачу в эксплуатацию 4-х грузопассажирских лифтов, согласно приложения №1, принять участие в комиссии по сдаче лифтов в эксплуатацию и сдать лифты аккредитованной лаборатории в соответствии с условиями настоящего договора, а генподрядчик обязуется создать необходимые условия для выполнения работ подрядчиком, принять и оплатить их результат (п. 2.1 договора).

Согласно п. 3.1 договора общая стоимость работ по договору составляет 5 760 000 руб., в том числе НДС 20% 960 000 руб. и включает в себя работы согласно приложению №1. 

Согласно п.4.1 договора расчеты с подрядчиком по настоящему договору осуществляются в следующем порядке:

-  предоплата в размере 41,49% от стоимости работ, указанной в п.3.1 настоящего договора, в сумме 2 390 000 рублей в т.ч. НДС 18%- 398 333,33 рублей перечисляется Генподрядчиком в течение 2-х банковских дней с момента подписания настоящего договора, выставления подрядчиком и получения генподрядчиком счета на оплату.

- сумма в размере 41,49% от стоимости работ, указанной в п.3.1 настоящего договора, в сумме 2 390 000 рублей в т.ч. НДС 18%- 398 333,33 рублей перечисляется Генподрядчиком в течение 5  банковских дней с момента получения от подрядчика письменного уведомления о готовности к отгрузке оборудования с завода-изготовителя с приложением подтверждающих документов.

- сумма в размере 12,5% от стоимости работ, указанной в п.3.1 настоящего договора, в сумме 720 000 рублей в т.ч. НДС 18%- 120 000 рублей перечисляется Генподрядчиком в течение 15  банковских дней с момента завершения монтажных работ 4-х лифтов.

- сумма в размере 4,51% от стоимости работ, указанной в п.3.1 настоящего договора, в сумме 260 000 рублей в т.ч. НДС 18%- 43 333,33 рублей, перечисляется генподрядчиком в течение 5 банковских дней с момента завершения пуско-наладочных работ и сдачиаккредитованной лаборатории с получением декларации о соответствии 4-х лифтов. 

Выполнение работ по договору производится в период: начало работ – июнь 2019, окончание работ – сентябрь 2019 года (п. 5.1 договора).

Подрядчик представляет генподрядчику 25 числа текущего месяца акты  выполненных работ за текущий месяц по формам КС-2 и КС-3 с визой куратора.

Генподрядчик до 1-го числа текущего месяца рассматривает и возвращает подрядчику формы КС-2 и КС-3 для оформления. В случае несоответствия объемов выполненных работ или расценок,генподрядчик возвращает формы КС-2 и КС-3 подрядчику для внесения изменений. 

Одновременно с представленными актами выполненных работ по форме КС-2 и КС-3, подрядчик обязан предоставить генподрядчику затребованные им документы, подтверждающее качество выполненных СМР.

В случае задержки подрядчиком передачи генподрядчику форм КС-2 и КС-3 документации, необходимой для подтверждения объемов и качества, выполненных СМР, расчеты за выполненные работы по договору увеличиваются на количество дней задержки передачи документации (п. 5.2 договора).

Свои обязательства по поставке, монтажу, пуско-наладке и сдаче в эксплуатацию 4-х лифтов истец исполнил на сумму 5 760 000 руб., что подтверждается актами КС-2 и КС-3 № 1 от 30.09.2019, №2 от 29.11.2019.

Как указывает истец, ответчик в полном объеме денежные обязательства не исполнил.

По расчету истца задолженность ответчика по договору № 2-06/19 от 17.06.2019 составляет 480 000 руб. 

Претензия истца, полученная ответчиком 26.03.2020г., оставлена последним без удовлетворения, в связи с чем истец обратился в суд с настоящим иском.

Изучив и оценив представленные доказательства, выслушав представителей сторон, суд находит требования подлежащими удовлетворению ввиду следующего.

Согласно статье 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии с частью 1 статьи 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

По своей правовой природе заключенный договор является смешанным, между сторонами сложились отношения в рамках договора подряда, регулируемые главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации, и договора поставки, регулируемые главой 30 (параграф 3) Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно п. 1 ст. 486 Гражданского кодекса Российской Федерации товар должен быть ответчиком оплачен непосредственно до или после передачи ему товара, если иное не предусмотрено законом или договором купли продажи. В накладных указан срок оплаты товара, следовательно, в указанный в накладных срок товар должен быть оплачен.

В соответствии со  статьей 506 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

        Согласно п. 1 ст. 516 Гражданского кодекса Российской Федерации покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки. Если соглашением сторон порядок и форма расчетов не определены, то расчеты осуществляются платежными поручениями.

В силу п. 2 ст. 516 Гражданского кодекса Российской Федерации  если договором поставки предусмотрено, что оплата товаров осуществляется получателем (плательщиком) и последний неосновательно отказался от оплаты либо не оплатил товары в установленный договором срок, поставщик вправе потребовать оплаты поставленных товаров от покупателя.

Согласно ст. 702 Гражданского кодекса Российской Федерации  по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. 

В соответствии со ст. 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

В соответствии со ст. 8 Гражданского кодекса Российской Федерации, гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

В соответствии со ст. 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации  обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства, требованиями закона либо в соответствии с обычаями делового оборота.

Истец выполнил все свои обязательства и сдал выполненные по договору работы своевременно и в полном объеме, что подтверждается актами о приемке выполненных работ № 1 от 30.09.2019,№ 2 от 29.11.2019  на общую сумму 5 760 000 руб. 

Претензий по качеству и срокам выполнения работ от ответчика не поступило, акты подписаны ответчиком без разногласий.

Выполненные работы ответчиком оплачены не в полном объеме, задолженность по указанным актам составляет  480 000 руб. 

В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые ссылается как на основание своих требований и возражений.

При этом лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий, в том числе представления доказательств обоснованности и законности своих требований и возражений (ч. 2 ст. 9, ч. 1 ст. 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Ответчик в нарушение ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  доказательств полной оплаты  выполненных работ в материалы дела не представил, доводы истца не опроверг, контррасчет долга не представил. 

Принимая во внимание изложенное, требования истца о взыскании задолженности с ответчика в сумме 480 000 руб. по договору на поставку, монтаж и пуско-наладку 4-х грузопассажирских лифтов № 2-06/19 от 17.06.2019 подлежат удовлетворению.

В соответствии с ч. 1 ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. 

Руководствуясь ст.ст. 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ООО "АСТРО-ЛИФТ" удовлетворить.

Взыскать с ООО "ТЕРРА СТРОЙ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу ООО "АСТРО-ЛИФТ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 480 000 руб. суммы долга, 12 600 руб. суммы возмещения судебных расходов по оплате госпошлины.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по ходатайству взыскателя. 

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.

Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Уральского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.

Судья С.С. Касьянова