Арбитражный суд Московской области

   107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва 

http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А41-42049/20

16 ноября 2020 года

г.Москва

Резолютивная часть объявлена 27 октября 2020 года.

Полный текст решения изготовлен 16 ноября 2020 года.

Арбитражный суд Московской области в составе судьи О.С. Гузеевой, при ведении протокола секретарем судебного заседания Лобовой А.Д., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению ООО "КОНТИНЕНТАЛЬ" (ИНН 5032203130, ОГРН 1155032004214) к ООО "ЭНЕРГОСТРОЙМЕХ" (ИНН 5032266179, ОГРН 1165024061003) о взыскании по договору подряда денежных средств в размере 2 940 119,29 руб., 

при участии в судебном заседании сторон согласно протоколу от 27.10.2020

УСТАНОВИЛ:

ООО "КОНТИНЕНТАЛЬ" обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском к ООО "ЭНЕРГОСТРОЙМЕХ" о взыскании стоимости выполненных и неоплаченных работ в размере 2 827 309 руб. 66 коп., неустойки за период с 30.04.2019 по 01.06.2020 в размере 112 809 руб. 63 коп., расходов по оплате государственной пошлины в размере 37 701 руб.

Исковые требования мотивированы ненадлежащим исполнением ответчиком своих обязательств по оплате выполненных истцом работ по договору подряда № 03СМР/19 от 04.02.2019 г. 

Истец поддержал исковые требования в соответствии с правовой позицией, изложенной в исковом заявлении.

Представитель ответчика в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом, каких-либо возражений, письменного отзыва не представил.

Исходя из статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, лицо, не реализовавшее свои процессуальные права, несет риск неблагоприятных последствий не совершения им соответствующих процессуальных действий.

В соответствии с частью 1 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации непредставление отзыва на исковое заявление или дополнительных доказательств, которые арбитражный суд предложил представить лицам, участвующим в деле, не является препятствием к рассмотрению дела по имеющимся в деле доказательствам.

 Дело рассмотрено в соответствии со статьями 121-124, 153, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие представителей сторон, извещенных надлежащим образом о месте и времени рассмотрения дела, что подтверждается информацией официального сайта «Почта России» - http://почтароссии.рф/ - отслеживание почтовых отправлений, в том числе публично путем размещения информации на официальном сайте  http://kad.arbitr.ru/. 

Рассмотрев материалы дела, заслушав доводы истца, полно и всесторонне исследовав представленные доказательства, изучив их в совокупности, суд находит исковые требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Гражданского кодекса Российской Федерации арбитражный суд осуществляет защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав.

Согласно части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном названным Кодексом. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену. 

Между ООО "ЭНЕРГОСТРОЙМЕХ" (заказчик) и ООО "КОНТИНЕНТАЛЬ" (подрядчик) заключен подряда № 03СМР/19 от 04.02.2019, согласно которому заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательство выполнить следующие виды строительно-монтажных работ: «Строительство непроходного канала (подземной части) реконструкции тепловой сети на территории Московского насосного завода». Объект расположен по адресу: 

<

...>. Содержание и объем работ определяется согласованной обеими сторонами сметой, являющимися неотъемлемой частью договора (п.1.1 договора).

Стоимость работ, выполняемых в соответствии с п.1.1 договора, определяется сметой (Приложение №1 к договору), являющейся неотъемлемой частью договора и составляет 8 127 309 ,66 руб., в том числе НДС 20% (п.2.1 договора).

Оплата выполненных работ должна производиться заказчиком по факту выполненных работ, зафиксированных в акте сдачи-приемки выполненных работ за минусом пропорциональной части аванса (п.2.4 договора) не позднее 10 календарных дней с момента подписания актов по форме КС-2 (п.2.5 договора).

Как усматривается из материалов дела, истец обязательство по договору выполнил в полном объеме и с надлежащим качеством, что подтверждается актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 18.04.2019 г., справкой о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 25.04.2019 по форме КС-3, подписанными сторонами без разногласий и замечаний. Работы сданы подрядчиком на сумму 8 127 309 руб. 66 коп.

Однако, ответчик обязательств по оплате исполнил лишь частично, оплатив выполненные работы в следующих суммах и следующими платежными поручениями: 4 500 000 руб. 00 коп. по платежному поручению №300 от 28.06.2019, 600 000 руб. 00 коп. по платежному поручению №480 от 17.09.2019, 200 000 руб. 00 коп. по платежному поручению №519 от 08.10.2019. В результате чего, у ООО "ЭНЕРГОСТРОЙМЕХ" образовалась задолженность за выполненные истцом и принятые ответчиком работы в размере 2 827 309 руб. 66 коп.

Истец направил ответчику предарбитражное уведомление исх. № 20/1 от 20.01.2020 с требованием оплатить образовавшуюся задолженность.

В ответ на него ответчик направил истцу письмо исх. №05 от 21.01.2020, в котором ответчик согласился с заявленными требованиями и просил истца направить исполнительную документацию по указанному договору. 

В ответ истец направил ответчику письмо исх. № 24/01 от 24.01.2020, в котором представил соответствующие пояснения, сообщив о готовности передать требуемую документацию и еще раз указал на необходимость оплаты образовавшейся задолженности за выполненные работы.

Оставление ответчиком претензии без удовлетворения послужило основанием для обращения истца в суд с исковым заявлением.

Сложившиеся между сторонами отношения, возникшие в связи с заключением  указанных договоров, по своей правовой природе, являются подрядными, регулируемые, помимо общих норм об обязательствах, положениями главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно части 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии со статьей 709 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения. При отсутствии в договоре таких указаний цена определяется в соответствии с частью 3 статьи 424 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В силу статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда (статья 746 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Из положений статей 702, 740, 746 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что основанием для возникновения у заказчика денежного обязательства по оплате работ по договору является совокупность следующих обстоятельств: выполнение работ и передача их результата заказчику. 

Основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате обусловленных договором работ является сдача работ заказчику путем подписания акта выполненных работ (пункт 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 №51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда» (далее - информационное письмо №51). 

В силу пункта 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными. 

На основании статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения принятых на себя обязательств не допускается.            

Статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается, как на основании своих требований или возражений.

Обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований (часть 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В соответствии с пунктом 1 статьи 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном настоящим Кодексом и другими федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела.

В качестве доказательств допускаются письменные и вещественные доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы. 

Арбитражный суд принимает только те доказательства, которые имеют отношение к рассматриваемому делу (статья 67 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). 

Обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами (статья 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). 

В соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. 

Факт выполнения работ по указанному договору ответчиком не оспорен, однако, они не были оплачены в полном объеме.

В рамках рассмотрения судом настоящего дела доказательств оплаты заявленной к взысканию суммы задолженности ответчик не представил. Принятие работ свидетельствует о потребительской ценности произведенных работ для заказчика и желании ими воспользоваться. Таким образом, при приемке работ без разногласий ответчик обязан произвести ее оплату. 

Поскольку доказательств погашения спорной задолженности по оплате выполненных истцом работ в предусмотренный договором срок ответчиком не представлено, требования иска о взыскании 2 827 309 руб. 66 коп. задолженности по договору подряда № 03СМР/19 от 04.02.2019 подлежат удовлетворению в полном объеме.

В рамках рассмотрения судом настоящего дела ответчик в установленном законом порядке о фальсификации имеющихся в материалах дела документов не заявил, каких-либо доказательств оплаты задолженности в полном объеме не представил. 

Частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий. 

Требование о взыскании неустойки также подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

В силу части 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться, в том числе неустойкой, предусмотренной законом или договором.

В силу статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Пунктом 5.10 договора при несоблюдении сроков оплаты за выполненные работы с заказчика взимаются пени, в размере 0,01% от стоимости выполненных работ за каждый день просрочки.

Истец представил письменный расчет неустойки за период с 30.04.2019 по 01.06.2020 на сумму 112 809 руб. 63 коп. 

Расчет ответчиком в порядке статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не оспорен, судом проверен, соответствует условиям договора и действующему законодательству. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. Если обязательство нарушено лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, суд вправе уменьшить неустойку при условии заявления должника о таком уменьшении. 

Согласно пункту 71 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 №7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», если должником является коммерческая организация, индивидуальный предприниматель, а равно некоммерческая организация при осуществлении ей приносящей доход деятельности, снижение неустойки судом допускается только по обоснованному заявлению такого должника, которое может быть сделано в любой  форме. 

Между тем доказательств, подтверждающих явную несоразмерность заявленной к взысканию суммы неустойки последствиям нарушения своих обязательств ответчик не представил, каких-либо ходатайств (заявлений) о применении к спорным правоотношениям положений статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации не заявил. 

Принимая во внимание обстоятельства настоящего дела, длительность неисполнения ответчиком своих обязательств, отсутствие признаков явной несоразмерности подлежащей взысканию неустойки нарушенному обязательству, суд не находит предусмотренных законом бесспорных оснований для снижения суммы неустойки согласно положениям статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Таким образом, заявленное требование истца о взыскании с ответчика неустойки следует признать правомерным и удовлетворить в заявленной сумме. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.  

Руководствуясь статьями ст. 110,167-170, 176, 211 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить.

Взыскать с ООО "ЭНЕРГОСТРОЙМЕХ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу ООО "КОНТИНЕНТАЛЬ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) задолженность в размере 2 827 309 руб. 66 коп., неустойку за период с 30.04.2019 по 01.06.2020 в размере 112 809 руб. 63 коп., расходы по оплате государственной пошлины в размере 37 701 руб.

Решение может быть обжаловано в течение месяца в Десятый арбитражный апелляционный суд, вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.

Судья                                                                                             О.С. Гузеева