АРБИТРАЖНЫЙ СУД УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 432017, г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, 14 

Тел.(8422)33-46-09 Факс (8422)32-54-54 E-mail: info@ulyanovsk.arbitr.ru 

 Сайт суда: www.ulyanovsk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А72-8507/2021

г. Ульяновск

24 августа 2021 года

Арбитражный суд Ульяновской области в составе судьи Котельникова А.Г.,  Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 181 Арбитражного процессуального  

кодекса РФ, арбитражный суд   

Р Е Ш И Л :

Принять от истца заявление об уточнении исковых требований.  

В удовлетворении ходатайства ответчика о снижении размера неустойки – отказать.   Исковые требования удовлетворить.  

 Обязать общество с ограниченной ответственностью «Стройгаз» в течение десяти  календарных дней с даты вступления в законную силу настоящего решения суда  устранить недостатки работ, выполненных в рамках контракта № 00017 от 12.08.2019 по  строительству внутрипоселкового газопровода с. Румянцево Ленинского городского  поселения Барышского района Ульяновской области, а именно:  

- установить таблички на ГРПШ с указанием обозначения на табличках (привязки  газопровода) в соответствии с проектом;  

- выполнить покрасочные работы ограждения ГРПШ, крановых узлов и наружного  газопровода в соответствии с проектом;  

- осуществить монтаж освещения ГРПШ в соответствии с проектом;  

- осуществить щебеночное покрытие подъездных путей и площадок ГРПШ в соответствии  с проектом;  

- осуществить бетонирование стоек ограждения ГРПШ в соответствии с проектом;  - заменить профильный лист С 35 на профильный лист НС 35;  

- выполнить песчаное основание под бетонной площадкой ГРПШ;  - выполнить заземление ГРПШ в соответствии с нормативными требованиями.  

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Стройгаз» в пользу  областного государственного казённого предприятия «Агентство стратегического  консалтинга»:  

- 1 049 436 (один миллион сорок девять тысяч четыреста тридцать шесть) руб. – штраф за  ненадлежащее исполнение обязательств по контракту № 00017 от 12.08.2019;  

- 198 988 (сто девяносто восемь тысяч девятьсот восемьдесят восемь) руб. 84  коп. – пени за период с 02.10.2020 по 24.08.2021 за нарушение сроков выполнения работ  по контракту № 00017 от 12.08.2019;  

- 30 928 (тридцать тысяч девятьсот двадцать восемь) - расходы по оплате государственной  пошлины.  

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Стройгаз» в доход  федерального бюджета государственную пошлину в размере 556 (пятьсот пятьдесят  шесть) руб.  

 Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в  порядке и сроки, установленные статьями 257-260 АПК РФ.  

 Судья А.Г. Котельников