АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  КРАСНОДАРСКОГО  КРАЯ

350063, г. Краснодар, ул. Постовая, 32

E-mail: info@krasnodar.arbitr.ru

http://krasnodar.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

арбитражного суда первой инстанции

дело №А32-36534/2022

г. Краснодар   «28» февраля 2023 года.

Резолютивная часть решения объявлена 14 февраля 2023 года. 

Решение суда в полном объеме изготовлено 28 февраля 2023 года.

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Миргородской О.П., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Н.Ю. Гоовым, рассмотрев в открытом судебном заседании дело №А32-36534/2022

по исковому заявлению МКУ «УЖКХ города» муниципального образования город Новороссийск

к АО «НЭСК – Электросети» (ИНН 

<

***>) г. Краснодар

3-е лицо: ООО «Росгорссервис» (ИНН 

<

***>) г. Новороссийск.

о взыскании неустойки, 

при участии:

от истца представитель по доверенности ФИО1,

от ответчика представитель по доверенности ФИО2,

от третьего лица представитель по доверенности,

УСТАНОВИЛ:

МКУ «УЖКХ города» муниципального образования город Новороссийск обратилось в суд с иском к АО «НЭСК – Электросети» о взыскании неустойки за период с 30.12.2021 по 01.06.2022 в размере 3 361 566 рублей.

В судебное заседание третье лицо явку представителя не обеспечило, о времени и месте заседания уведомлено надлежащим способом в порядке статьи 123 АПК РФ.

Судебное заседание проведено в порядке статьи 156 АПК РФ в отсутствие представителя третьего лица.

Суд, заслушав пояснения сторон, изучив и исследовав материалы дела, считает требования не подлежащими удовлетворению на основании следующего.

Между МКУ «УЖКХ города», АО «НЭСК - Электросети» и ООО «Росгоссервис» заключен договор № 4-55-20-4220 от 28 декабря 2020 года «Об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям» многоквартирного дома по адресу г. Новороссийск, 

<

...> (далее - Договор) на сумму 6 620 300,44 рублей (приложение №1).

В соответствии с пунктом 2 дополнительного соглашения от 15.01.2021г. к договору № 4-55-20-4220 от 28.12.2020 года (приложение № 2), сумма договора была изменена на 8 731 340,44 рублей

Пунктом 5 Договора предусмотрено, что сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий, предусмотренных договором обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0.25% от указанного общего размера платы за каждый день просрочки.

В соответствии с п. 5 Договора, выполнение работ осуществляется с даты заключения контракта, в течение 365 календарных дней (до 29 декабря 2021 года).

Истец исчислил неустойку за просрочку мероприятий по технологическому присоединению за период с 30.12.2021 по 01.06.2022 в размере 3 361 566 рублей, сумму которой составила 3 361 566 рублей.

В порядке досудебного урегулирования возникшего спора подрядной организации АО «НЭСК - Электросети» направлены претензии. Однако, входящим письмом № 22-02-03/75 от 19.01.2022 подрядная организация АО «НЭСК - Электросети» предоставила информацию, что планируемый срок исполнения строительно-монтажных работ 01.02.2022.

Таким образом, допущена просрочка выполнения мероприятий по технологическому подключению.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца с настоящими требованиями в суд.

При решении вопроса об обоснованности требований суд руководствуется следующим.

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике", пунктом 6 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 N 861 (далее - Правила N 861), технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором ТУ, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики). В свою очередь, заказчик вносит сетевой организации плату по договору об осуществлении технологического присоединения с возможным условием об оплате выполнения отдельных мероприятий по технологическому присоединению, а также разрабатывает проектную документацию в границах своего земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным ТУ, и выполняет ТУ, касающиеся обязательств заказчика (пункт 1 статьи 26 Закона об электроэнергетике, пункты 16, 17 Правил N 861).

Договор о технологическом присоединении по всем своим существенным условиям соответствует договору о возмездном оказании услуг; к правоотношениям сторон по договору технологического присоединения применяются помимо специальных норм положения главы 39 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), а также общие положения об обязательствах и о договоре (раздел III Гражданского кодекса Российской Федерации).

В пункте 7 Правил N 861 предусмотрено, что технологическое присоединение - это состоящий из нескольких этапов процесс, целью которого является создание условий для получения электрической энергии потребителем через энергоустановки сетевой организации, завершающийся фактической подачей напряжения и составлением акта разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и разграничения эксплуатационной ответственности сторон и акта об осуществлении технологического присоединения.

В силу пункта 15 Правил N 861 договор технологического присоединения считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра договора в сетевую организацию. К правоотношениям сторон по договору технологического присоединения применяются помимо специальных норм положения главы 39 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также общие положения об обязательствах и о договоре (раздел III Гражданского кодекса Российской Федерации).

По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик - оплатить эти услуги (пункт 1 статьи 779 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В силу пункта 1 статьи 781 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.

Соответственно, оплата стоимости услуг, если иное не предусмотрено договором производится по факту их оказания (факт технологического присоединения).

В соответствии со статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Истец просит взыскать неустойку за нарушение пункта 5 договора, согласно которого установлен годичный срок со дня заключения договора для выполнения мероприятий по технологическому присоединению.

В силу пункта 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Статьей 330 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Ответчик против удовлетворения требований возражал, доводы ответчика основаны на невыполнении истцом встречных обязательств по оплате за услуги по подключению.

В силу пункта 3 статьи 405 ГК РФ, должник не считается просрочившим, пока обязательство не может быть исполнено вследствие просрочки кредитора.

В соответствии с пунктом 1 статьи 406 ГК РФ, кредитор считается просрочившим, если он отказался принять предложенное должником надлежащее исполнение или не совершил действий, предусмотренных законом, иными правовыми актами или договором либо вытекающих из обычаев или из существа обязательства, до совершения которых должник не мог исполнить своего обязательства.

Согласно пункту 1 статьи 328 ГК РФ, встречным признается исполнение обязательства одной из сторон, которое обусловлено исполнением другой стороной своих обязательств.

Согласно абзацу 2 пункта 5 договора, в случае нарушения плательщиком порядка внесения платы за технологическое присоединение установленного пунктом 11 договора, выразившееся в несвоевременной оплате/или оплате в неполном размере по любому из этапов, срок исполнения мероприятий по технологическому присоединению со стороны сетевой организации продлевается на количество дней равных количеству дней просрочки исполнения обязательства со стороны заявителя.

 Согласно пункту 11 договора внесение платы за технологическое присоединение осуществляется плательщиком в следующем порядке:

- 10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня заключения договора;

- 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 60 дней со дня заключения договора;

- 20 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 180 дней со дня заключения договора;

- 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня фактического присоединения;

- 10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения.

Оплату мероприятий технологического присоединения истец осуществлял с нарушением установленного договором порядка, что подтверждается платежными поручениями: №30 от 25.01.2021, № 122 от 11.03.2021, № 524 от 25.06.2021, № 743 от 16.08.2022, № 744 от 16.08.2022, № 745 от 16.08.2022.

По расчету суда истец задержал оплату по договору более 190 дней.

Таким образом, просроченное обязательство возникает после 01.06.2022 и неустойка за заявленный истцом период предъявлена не правомерно, требования подлежат отклонению.

Руководствуясь ст. ст. 65, 68, 71, 167-170 АПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении исковых требований – отказать.

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в порядке апелляционного производства и в порядке кассационного производства в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу решения, через принявший решение в первой инстанции Арбитражный суд Краснодарского края.

Вступившее в законную силу решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в кассационном порядке, если было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья                                                                                                             О. П. Миргородская