АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Бульвар Гагарина, 70, Иркутск, 664025, тел. (3952)24-12-96; факс (3952) 24-15-99 

дополнительное здание суда: ул. Дзержинского, 36А, Иркутск, 664011, 

тел. (3952) 261-709; факс: (3952) 261-761 http://www.irkutsk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А19-4638/2018

28 августа 2019 года

г. Иркутск

 

Арбитражный суд Иркутской области в составе судьи Кириченко С.И.,  

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению МУНИЦИПАЛЬНОГО  КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДИРЕКЦИЯ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И  РЕМОНТА» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БРАТСКА (ОГРН:  

<

***>, ИНН: 

<

***>, адрес: 665708, Иркутская область, город Братск,  Центральный, проспект Ленина, 37)  

к МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ "ДИРЕКЦИЯ КАПИТАЛЬНОГО  СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА  БРАТСКА (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, адрес: 665708, ОБЛАСТЬ  ИРКУТСКАЯ, ГОРОД БРАТСК, ЖИЛОЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛЬНЫЙ, ПРОСПЕКТ  ЛЕНИНА, ДОМ 37, ОФИС 13)  

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора -  Общество с ограниченной ответственностью «Стройком» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>, адрес: 308036, 

<

...>)  

об обязании устранить недостатки 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить. 

 Обязать МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДИРЕКЦИЯ КАПИТАЛЬНОГО  СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА  БРАТСКА в течение месяца с момента вступления в силу решения суда безвозмездно  

устранить на объекте: Иркутская область г. Братск, ж.р. Центральный, ул. Гагарина, д.83,  в рамках выполнения обязательств по муниципальным контрактам № Ф.2016.167591 от  18.07.2016 и № Ф.2016.171515 от 19.07.2016 следующие недостатки (дефекты): 

 № и/и 

 № кв.(помещение,  территория)  

Необходимые мероприятии  

1 

Квартира № 1  

Провести работы по замене стеклопакетов в квартире  

Провести работы по замене стеклопакетов в квартире  

Отрегулировать механизм балконной двери в большой комнате  

3 

Квартира № 13  

Провести работы по устранению трещины в маленькой комнате от  окна  

4 

Квартира № 17  

Устранить скол на раковине на кухне 

5 

Квартира № 23  

Отрегулировать механизм балконной двери в большой комнате  

Провести работы по закреплению отопительных радиаторов на  кухне  

Заменить унитаз 

7 

Квартира № 38  

Закрепить плинтус в коридоре 

8 

Квартира № 41  

Провести регулировку механизмов межкомнатных дверей 

9 

Квартира № 42  

Провести работы по закреплению отопительных радиаторов в  квартире  

10 

Квартира № 56  

Устранить пятно либо заменить дверь в ванной комнате 

 №  

и/ и  

 № кв.(помещение,  территория)  

Необходимые мероприятия 

Закрепить розетки и выключатели в квартире  

11 

Квартира № 57 

Провести ремонтные работы по устранению последствий от 

затопления во всей квартире 

12 

Квартира № 63 

Провести работы по закреплению отопительных радиаторов на  кухне  

Привести в рабочее состояние бачок унитаза  

Обязать заменить подоконник на кухне 

Закрепить обналичник на кухне 

13 

Устранить протечки с потолка в комнате и кухне 

Установить декор на верхнюю петлю окна 

14 

Квартира № 95 

Устранить течь с кровли над окном но всему периметру в зале,  выполнить работы по проклеиванию обоев  

Провести ремонтные работы по устранению протечки в углу 

комнаты 

15 

Квартира № 98 

Отрегулировать и очистить балконную дверь в большой комнате  

16 

Квартира № 101 

Провести ремонтные работы по устранению течи с потолка со  стороны лифтовой шахты в кухне  

17 

Квартира № 105 

Провести ремонтные работы по устранению протечки с крыши (в 

туалете с потолка) 

Провести ремонтные работы по устранению следов протечек на  потолке во всей квартире  

18 

Квартиры №№  

2,3,11,13,14,20,23,25 ,26,32,35,37,38,  

44,47,49,50,56,59,61, 62,68,71,73,74,80,  

83,85,86,92,95,97,98, 104,  

Квартиры №№  

4,5,8,9,10,18,19,22,3 

0,31,34,42,43,46,5  4,55,58,66,67,70,78,7 

9,82,90,91,94,102,  103,106.  

Провести ремонтные работы по отделке стен ванной комнаты  керамической плиткой - фартук над ванной высотой 1.6 м,  

согласно технического задания (Приложение № 1 к  

Муниципальному контракту Ф.2016.171515 от 19.07.2019г.) и  проектной документации.  

Провести ремонтные работы по отделке стен ванной комнаты  керамической плиткой -фартук над ванной высотой 1.6 м,  

согласно технического задания (Приложение № 1 к  

Муниципальному контракту Ф.2016.167591 от 18.07.2019г.) и  проектной документации.  

Взыскать с МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "ДИРЕКЦИЯ  

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА" МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БРАТСКА в доход федерального бюджета государственную  пошлину в сумме 6 000 руб.  

Решение

 может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд,  через Арбитражный суд Иркутской области, в течение месяца со дня его принятия.  

Судья С.И. Кириченко