1000071_1726274  

АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Народный бульвар, д.135, г. Белгород, 308000 Тел./ факс (4722) 35-60-16, 32-85-38 Сайт: http://belgorod.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации резолютивная часть Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А08-2489/2017

г. Белгород

06 июля 2017 года

Арбитражный суд Белгородской области  

в составе судьи Ивановой Л. Л. 

при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи и  системы видео протоколирования помощником судьи Закурдаевой О.Ю.  

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению ООО  "СветСтройСервис" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к ООО "УниверсалСтрой" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

об обязании завершить работы, указанные в ведомостях незавершенных работ,  устранить недостатки выполненных работ и восстановить лотки,  

при участии в судебном заседании: от истца: не явился, извещен, от ответчика: не явился, извещен, 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

1.Исковые требования ООО "СветСтройСервис" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) удовлетворить. 

2.Обязать ООО "УниверсалСтрой" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в  

течение 30 дней с момента вступления решения суда в законную силу завершить  

работы, указанные в ведомостях незавершенных работ, при строительстве: 

 На Объекте «Сети наружного освещения автодороги «Белгород-Шебекино- 

Волоконовка» на участке км 46+500 – км 88+300 Белгородской области, а именно: 

- Восстановить водоотводной лоток на участке ПК 310+78;  

-Установить недостающее а/ц кольцо на месте соединения опоры с фундаментом на  

1опоре на участке ПК 311+33; 

-Восстановить (произвести досыпку и планировку) обочин на участке ПК 289+00 –  

ПК 311+88 (Максимовка-Крепацкий) и (ПК 141+09 - ПК 165+48) Белянка-Сурково; 

- Произвести благоустройство территории в районе остановочного кармана (ПК  

303+10 право, Шемраевка); - Смонтировать видимое заземление шкафов НО; - Прикрепить бирки кабеля в шкафах НО; 

- Нанести диспетчерское наименования на шкафы НО;  

- Выполнить нумерацию опор, нанесение обозначения последних опор в фидере  

(два красных кольца); 

На Объекте «Сети наружного освещения автодороги «Томаровка-Красная  

Яруга-граница Украины» км +192 - км 25+192 Белгородской области, а именно:  

-установить недостающие а/ц кольца на местах соединения опоры с фундаментов  

на 9-ти опорах; 

- Засыпать цементно-песчаной смесью защитные а/ц кольца на местах соединения  

опоры с фундаментом; - Смонтировать видимое заземление шкафов НО; - Прикрепить бирки кабеля в шкафах НО; 

- Нанести диспетчерское наименования на шкафы НО;  

- Выполнить нумерацию опор, нанесение обозначения последних опор в фидере  

(два красных кольца); 

- Устранить повреждения в 4-х кабельных линиях 0,4кВ НО от шкафа НО на КТП- 

911 ПС «Томаровка». 

3.Обязать ООО "УниверсалСтрой" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в  

течение 30 дней с момента вступления решения суда в законную силу устранить  

следующие недостатки выполненных работ: -по КТП 911 ПС ТОМАРОВКА: 

- Подключить кабели 0,4кВ между шкафом № 1 и первыми опорами КЛ-0,4кВ;  - Подключить второй кабель 0,4кВ между шкафом № 2 и первыми опорами КЛ- 0,4кВ;  

- Восстановить повреждения кабеля между опорами (возле КТП-911 между 2 и 3  опорой, если считать от КТП в сторону Белгорода по стороне дороги, где стоит КТП)  (перезапитано от КТП-217);  

- Произвести подключение (при необходимости отыскание и устранение  повреждения или замену) кабелей между шкафами № 1,2 и первыми опорами отходящих  от них КЛ-0,4кВ;  

- Устранить повреждение кабеля между опорами возле КТП-911;  - Восстановить нормальную схему работы КЛ-0,4кВ от КТП-911 и КТП-217.  

-по КТП 906 ПС ТОМАРОВКА: 

- Проложить кабели от шкафа № 2 возле КТП на проектную глубину. Выход  прокола КЛ-0,4кВ под дорогой проложить на проектную глубину;  

- по КТП 508 ПС Дмитриевка шкаф освещения № 2: 

- Проложить кабель на проектную глубину в пролете опор № 8-9.  

4.Обязать ООО "УниверсалСтрой" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в  

течение 30 дней с момента вступления решения суда в законную силу восстановить лотки  

из телескопических железобетонных блоков Б-6 в количестве 133 штук, проходящие по  

откосу насыпи земляного полотна автомобильной дороги «Томаровка-Красная Яруга- 

граница Украины» на участке км 23 – км 25. 

5.Взыскать с ООО "УниверсалСтрой" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в  

пользу ООО "СветСтройСервис" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 12 000 рублей  

00 копеек расходов по оплате государственной пошлины. 

6.Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу.  

7.Решение может быть обжаловано в месячный срок в Девятнадцатый  

арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Белгородской области.  

Судья Иванова Л. Л.