РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-223852/22-110-1675

г. Москва

03 апреля 2023 г.

Резолютивная часть решения объявлена 15 марта 2023 года 

Решение в полном объеме изготовлено 03 апреля 2023 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи Мищенко А.В. /единолично/, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Милкиной К.А.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (123317, ГОРОД МОСКВА, ПРЕСНЕНСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, ДОМ 10, СТРОЕНИЕ 2, ОГРН: 1047796323123,) к акционерному обществу "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ "ФЕРРИТ-ДОМЕН" (196006, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПЕТЕРГОФ ГОРОД, ЦВЕТОЧНАЯ УЛИЦА, ДОМ 25, КОРПУС 3 ЛИТЕР Б, ПОМЕЩЕНИЕ 417, ОГРН: 1037821019631) о взыскании 64 107 000 руб.,

при участии:

от истца – Каирова А.О. по дов.  от  21.12.2022,

от ответчика- не явился,

УСТАНОВИЛ:

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации обратилось с иском к акционерному обществу "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ "ФЕРРИТ-ДОМЕН" о взыскании 64 107 000 руб. пеней по государственному контракту №16411.4432017.11.126 от 28.11.2016.

Ответчик в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом о времени и месте судебного заседания. С учетом своевременного размещения информации о времени и месте судебного заседания на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет, суд   рассмотрел спор в их отсутствие на основании ст.ст.121, 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, п.5 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011г. №12 «О некоторых вопросах применения АПК РФ в редакции Федерального закона от 27.07.2010 №228-ФЗ «О внесении изменений в АПК РФ». Иск не признал, по мотивам, изложенным в отзыве.

Заслушав представителя истца, исследовав и оценив представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам.

Как усматривается из материалов дела, 28.11.2016 между Минпромторгом России (далее - Заказчик, Истец) и АО «НИИ Феррит-Домен» (далее - Исполнитель, Ответчик) был заключен государственный контракт № 16411.4432017.11.126 (далее - государственный контракт), по условиям которого Исполнитель обязался выполнить опытно-конструкторскую работу «Разработка и освоение серийного производства на отечественном предприятии полосковых ферритовых приборов сверхвысоких частот», шифр «Феррит-И1-РК» (далее - ОКР, работа), а Заказчик обязался принять и оплатить надлежащим образом выполненную работу (пункты 1.1-1.2 государственного контракта).

В соответствии с пунктом 3.1 государственного контракта (с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением № 4 от 18.12.2020 к государственному контракту) его цена составляет 142 000 000,00 руб.

Источником финансирования государственного контракта согласно пункту 3.2 государственного контракта является федеральный бюджет.

В соответствии с пунктами 3.5 и 3.6 государственного контракта оплата по государственному контракту производится с авансовым платежом в размере 80 % цены этапа работы; расчеты с Исполнителем осуществляются с учетом произведенного авансового платежа и в пределах цены этапа выполненной работы в течение 30 календарных дней с подписания сторонами акта сдачи-приемки работы по отдельному этапу государственного контракта.

Во исполнение принятых на себя обязательств Заказчик перечислил аванс и оплатил выполненные работы (платежные поручения №№ 446997 от 23.12.2016, 830049 от 31.05.2017, 830053 от 31.05.2017, 583901 от 13.12.2017, 847960 от 26.03.2018).

В соответствии с пунктом 6.2.1 государственного контракта Исполнитель обязан своевременно и надлежащим образом выполнить работу и представить Заказчику результаты и документацию, предусмотренные техническим заданием, в предусмотренный государственным контрактом срок.

В соответствии с пунктом 1.5 государственного контракта сроки выполнения работы, последовательность действия Исполнителя при выполнении работы, изложенная в хронологическом порядке по дате завершения каждого отдельного этапа (вида работ), устанавливаются в календарном плане.

Согласно пунктам 2.1.4-2.1.5 государственного контракта работа должна быть выполнена в полном объеме и в сроки, предусмотренные государственным контрактом. Датой начала выполнения работы является дата подписания государственного контракта сторонами, если иное не установлено в техническом задании и календарном плане. Окончание выполнения работы - 30.06.2019.

Пунктом 2.1.7 государственного контракта установлено, что датой окончания выполнения работы по государственному контракту (отдельного этапа работы по государственному контракту) является дата подписания сторонами акта сдачи-приемки работы по государственному контракту либо акта сдачи-приемки работы по отдельному этапу государственного контракта. Дата окончания выполнения работы по государственному контракту (отдельного этапа работы по государственному контракту) не может быть позднее даты, указанной в техническом задании и календарном плане.

В соответствии с пунктом 4.2 государственного контракта за 20 календарных дней до окончания срока выполнения работы (отдельного этапа работы) Исполнитель обязан в письменной форме уведомить Заказчика о готовности выполняемой работы (отдельного  этапа  выполняемой  работы)  к  сдаче.  Вместе   с  уведомлением Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки работы (отдельного этапа работы) с приложением отчетных документов.

Согласно пункту 4.3 государственного контракта Заказчик в течение 20 календарных дней со дня получения акта сдачи-приемки работы (отдельного этапа работы) по государственному контракту и отчетных документов, указанных в пункте 4.2 государственного контракта, осуществляет проверку выполненной Исполнителем работы (отдельного этапа работы) по государственному контракту на предмет соответствия выполненной работы требованиям и условиям государственного контракта, принимает выполненную работу, передает Исполнителю подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки работы (отдельного этапа работы) по государственному контракту или отказывает в приемке, направляя мотивированный отказ от приемки работы.

Календарным планом установлен период выполнения 3 этапа государственного контракта с 01.12.2017 по 30.11.2018.

Согласно акту сдачи-приемки 3 этапа ОКР от 05.04.2021 фактический срок выполнения 3 этапа ОКР: с 01.12.2017 по 17.03.2021.

Таким образом, период просрочки сдачи Исполнителем 3 этапа работы составил 838 дней (период с 01.12.2018 по 17.03.2021).

Календарным планом установлен период выполнения 4 этапа государственного контракта с 01.12.2018 по 30.06.2019.

Уведомление о готовности 4 этапа ОКР и отчетные документы поступили в адрес Заказчика 28.06.2021.

Акт сдачи-приемки 4 этапа ОКР подписан 19.07.2021, в акте указано, что фактические сроки выполнения 4 этапа-с 01.12.2018 по 28.06.2021.

Таким образом, период просрочки сдачи Исполнителем 4 этапа работы составил 729 дней (период с 01.07.2019 по 28.06.2021).

В соответствии с пунктом 9.1 государственного контракта за невыполнение или ненадлежащее выполнение государственного контракта стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями государственного контракта.

Согласно части 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором.

В соответствии с частью 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Согласно пункту 9.3 государственного контракта в случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных государственным контрактом, Исполнитель уплачивает Заказчику пени в размере, рассчитанном в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных государственным контрактом и фактически исполненных Исполнителем.

Таким образом, за просрочку сдачи 3 этапа ОКР с Ответчика подлежит взысканию 64 107 000,00 руб.

В соответствии с дополнительным соглашением № 4 от 18.12.2020 к государственному контракту цена 4 этапа ОКР составляет 0,00 руб., в связи с чем пени за просрочку 4 этапа ОКР не начисляется.

Согласно статьям 309 и 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона и иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

Вместе с тем, в соответствии с календарным планом к Контракту срок выполнения:

-  3 этапа работ: с 01.12.2017 по 31.11.2018. Фактически сроки выполнения этапа 3 составили с 01.12.2017 по 17.03.2021. Акт приемки этапа 3 подписан сторонами и утвержден 31.03.2021 заместителем директора Департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга России Смазновым К.А.

-  4 этапа работ: с 01.12.2018 по 30.06.2019. Фактически сроки выполнения этапа 4 составили с 01.12.2018 по 28.06.2021. Акт приемки этапа 4 подписан сторонами и утвержден 19.07.2021 заместителем директора Департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга России Смазновым К.А.

Согласно пунктам 5.2.1, 5.2.2 Контракта Заказчик обязан передавать исполнителю необходимую для выполнения работ информацию в соответствии с условиями Технического задания и календарного плана, своевременно сообщить в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работы или приемки исполненных обязательств.

Пунктами 5.2.4 и 5.2.5 Контракта предусмотрено, что Заказчик обязан осуществлять согласования, предусмотренные Техническим заданием, осуществлять взаимодействие с Исполнителем в соответствии с условиями Контракта.

В соответствии со ст. 773 ГК РФ Исполнитель в договорах на выполнение опытно-конструкторских работ обязан, в том числе, незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты.

На основании п. 1 ст. 777 ГК РФ исполнитель несет ответственность перед заказчиком за нарушение договора на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ, если не докажет, что такое нарушение произошло не по вине исполнителя (п. 1 ст. 401).

В ходе выполнения работ АО «НИИ Феррит-Домен» установлено, что в техническом задании указан параметр – ток управления со значением не более 3А с примечанием уточнить значение данного параметра по согласованию с организацией, определяемой Заказчиком.

На этапе 2 «Разработка рабочих КД и ТД» для изготовления опытных образцов» в соответствии с примечанием 2 к таблице 1 Технического задания (далее – ТЗ), согласно которому параметр должен быть уточнен на этапе разработки рабочих КД и ТД по согласованию с организацией, определяемой Заказчиком, был согласован с АО «РКС» (заинтересованная организация) и ФГУП «МНИИРИП» параметр изделия типа 1 ТЗ ток управления.

В результате изготовления опытных образцов и проведения измерений, уточненное значение тока управления не подтвердилось.

В этой связи Общество повторно согласовало с заинтересованной организацией АО «РКС» значения тока управления (протокол согласования от 27.03.2019) и направило соответствующее письмо от 13.05.2019 исх. № Адм-1063 в Минпромторг России о подтверждении возможности уточнения значений, согласно полученным результатам измерений. 

В связи с неполучением ответа от Заказчика в нарушение пунктов  5.2.1, 5.2.4 и 5.2.5 Контракта Обществом направлено повторное письмо в адрес Минпромторга от 11.06.2019 исх. № АДМ-1306.

В связи с невозможностью  согласовать программу предварительных испытаний из-за отсутствия ответа Заказчика ОКР по вопросу согласования тока управления типа 1 разрабатываемых изделий Истец 28.06.2019 (исх. № Адм-1443) направил во ФГУП «МНИИРИП» уведомление о невозможности завершения работ и условиях при которых работы могут быть завершены, в том числе: после согласования программы  предварительных испытаний  и завершения предварительных испытаний. 

Из ответного письма Минпромторга России от 21.06.2019 № 41396/11 «Об уточнении требований ТЗ ОКР «Феррит-И1-РК», поступившего в Общество 02.07.2019 (вх. № 2549) следует, что Заказчиком подтверждена возможность уточнения данного параметра в установленном порядке.

Таким образом, учитывая необходимость изменения конструкторской документации согласование всех технических параметров работы 3-го этапа выполнены с просрочкой по независящим от Ответчика обстоятельствам.  

Согласно ч. 3 ст. 769 ГК РФ если иное не предусмотрено законом или договором, риск случайной невозможности исполнения договоров на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ несет Заказчик.

Кроме того, как следует из п. 13 Постановления ВАС РФ от 15.07.2014 №5467/14, Определение Верховного Суда РФ от 14.12.2020 № 305-ЭС20-18939 по делу № А40-273429/2019 неустойка подлежит исчислению исходя из стоимости конкретного этапа, предусмотренного условиями договора и не может превышать стоимости конкретного этапа, что подтверждается сложившейся судебной практикой (например, решение Арбитражного суда г. Москвы от 11.09.2019 дело № А40-137376/19-110-1183, постановление Тринадцатого Арбитражного апелляционного суда  от 04.02.2022 дело №А56-22317/2021).

Дополнительным соглашением № 1 от 01.03.2017 к Контракту стоимость этапа 3 составляла 42 500 000,00 рублей.

Дополнительным соглашением № 4 от 18.12.2020 к Контракту стоимость работ по 3 этапу уменьшена Истцом до 34 000 000, 00 рублей. Работы стоимостью 8 500 000 рублей, необходимые для завершения этапа 3 ОКР Ответчиком выполнены за счет собственных  средств.

Таким образом, штрафная неустойка за просрочку сдачи этапа 3 ОКР в размере 68 380 800 (Шестьдесят восемь миллионов триста восемьдесят тысяч восемьсот) рублей является явно несоразмерной, поскольку превышает стоимость этапа в 2 раза.

Дополнительным соглашением № 4 от 18.12.2020 к Контракту стоимость этапа 4 ОКР определена в размере 0,00 (ноль) рублей. Указанные обстоятельства подтверждены также актом сдачи приемки 4 этапа ОКР  от 19.07.2021, согласно которому стоимость выполненных работ за счет средств федерального бюджета  составила 0,00 (ноль) рублей, сумма аванса перечисленного Исполнителю – 0,00 (ноль) рублей. Согласно калькуляции фактических затрат на этап 4 ОКР «Феррит-И1-РК» (приложение № 1 к акту от 19.07.2021), указанный этап выполнен за счет собственных средств АО «НИИ «Феррит-Домен» в размере 4 411 000 (четыре миллиона четыреста одиннадцать тысяч) рублей.

Таким образом, штрафная неустойка за просрочку сдачи этапа 4 ОКР не начисляется, поскольку все работы выполнены за счет средств Исполнителя. 

Конституционный Суд Российской Федерации в определении от 21.12.2000 № 263-О разъяснил, что предоставленная суду возможность снижать размер неустойки в случае ее чрезмерности по сравнению с последствиями нарушения обязательств является одним из правовых  способов, предусмотренных в законе, которые направлены против злоупотребления правом свободного определения размера неустойки.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, сформулированной в постановлении от 13.01.2011 № 11680/10, ставка рефинансирования, по существу, представляет собой наименьший размер платы за пользование денежными средствами в российской экономике.  

Разделом IX Контракта установлена ответственность Сторон за невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств. Так, п. 9.3 Контракта устанавливает ответственность Исполнителя за нарушение срока выполнения обязательств по государственному контракту в виде пени в размере не менее чем 1/300 действующая на дату уплаты пени ставка рефинансирования Центрального банка РФ от цены государственного контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных государственным контрактом и фактически выполненных Исполнителем.

Кроме того, АО «НИИ «Феррит-Домен» имеет право встречных требований в связи с допущенными Заказчиком нарушениями условий договора. 

Частью 1 ст. 328 ГК РФ установлено, что встречным признается исполнение обязательства одной из сторон, которое в соответствии с договором обусловлено исполнением своих обязательств другой стороной. В случае непредставления обязанной стороной обусловленного договором исполнения обязательства либо наличия обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства либо отказаться от исполнения этого обязательства и потребовать возмещения убытков.

Согласно п. 3.5 Контракта оплата по настоящему контракту производиться Истцом авансовым платежом в размере 80 процентов цены этапа работы, стоимость 3 этапа   составляла 42 500 000,00 рублей.

По условиям п. 3.5  Контракта  авансовый платеж выплачивается в течение 30 дней с даты подписания акта  сдачи-приемки  выполненных работ по предыдущему этапу при наличии лимитов бюджетных обязательств  по государственному контракту  или не позднее 30 календарных дней  с даты подписания  дополнительного соглашения, указанного в п. 3.1 Контракта.

Акт приемки этапа 2 подписан Сторонами 30.11.2017 в установленный календарным планом срок, в связи с чем оплата аванса за 3 этап работ должна быть произведена Заказчиком не позднее 30.12.2017 года. Фактически оплата проведена 26.03.2018 г. платежным поручением № 847960.

Пунктом 9.5 Контракта предусмотрено, что в случае просрочки исполнения  обязательств Заказчиком, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату пени в размере 1/300 на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации  от неуплаченной в срок суммы.

Таким образом, сумма пени за несвоевременную выплату аванса Заказчиком составила:

Задолженность

Период просрочки

Ставка

Формула

Неустойка

 

с

по

дней

 

34 000 000,00

31.12.2017

Новая задолженность на 34 000 000,00 руб.

34 000 000,00

31.12.2017

11.02.2018

43

7.75

34 000 000,00 × 43 × 1/300 × 7.75%

377 683,33 р.

34 000 000,00

12.02.2018

25.03.2018

42

7.5

34 000 000,00 × 42 × 1/300 × 7.5%

357 000,00 р.

34 000 000,00

26.03.2018

26.03.2018

1

7.25

34 000 000,00 × 1 × 1/300 × 7.25%

8 216,67 р.

Сумма основного долга: 34 000 000,00 руб.

Сумма неустойки: 742 900,00 руб.

Согласно ч. 1, ч. 3  ст. 406 ГК РФ кредитор считается просрочившим, если он не совершил действий, предусмотренные законом или договором либо вытекающих из  существа обязательства, до совершения которых должник не мог исполнить своего обязательства. По денежному обязательству должник не обязан платить проценты за время просрочки кредитора.

Исходя из изложенного, полагаем, что указанный в претензии период просрочки выполнения  обязательств по завершению 3 этапа (838 дней) подлежит уменьшению на количество дней просрочки, допущенной Заказчиком при выполнении обязательств по авансированию работ (86 дней).

Задолженность

Период просрочки

Ставка

Формула

Неустойка

 

с

по

дней

 

34 000 000,00

25.02.2019

Новая задолженность на 34 000 000,00 руб.

34 000 000,00

25.02.2019

16.06.2019

112

7.75

34 000 000,00 × 112 × 1/300 × 7.75%

983 733,33 р.

34 000 000,00

17.06.2019

28.07.2019

42

7.5

34 000 000,00 × 42 × 1/300 × 7.5%

357 000,00 р.

34 000 000,00

29.07.2019

08.09.2019

42

7.25

34 000 000,00 × 42 × 1/300 × 7.25%

345 100,00 р.

34 000 000,00

09.09.2019

27.10.2019

49

7

34 000 000,00 × 49 × 1/300 × 7%

388 733,33 р.

34 000 000,00

28.10.2019

15.12.2019

49

6.5

34 000 000,00 × 49 × 1/300 × 6.5%

360 966,67 р.

34 000 000,00

16.12.2019

09.02.2020

56

6.25

34 000 000,00 × 56 × 1/300 × 6.25%

396 666,67 р.

34 000 000,00

10.02.2020

26.04.2020

77

6

34 000 000,00 × 77 × 1/300 × 6%

523 600,00 р.

34 000 000,00

27.04.2020

21.06.2020

56

5.5

34 000 000,00 × 56 × 1/300 × 5.5%

349 066,67 р.

34 000 000,00

22.06.2020

26.07.2020

35

4.5

34 000 000,00 × 35 × 1/300 × 4.5%

178 500,00 р.

34 000 000,00

27.07.2020

17.03.2021

234

4.25

34 000 000,00 × 234 × 1/300 × 4.25%

1 127 100,00 р.

Сумма основного долга: 34 000 000,00 руб.

Сумма неустойки: 5 010 466,67 руб.

В соответствии с ч.1 ст. 404 ГК РФ если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства произошло по вине обеих сторон, суд соответственно уменьшает размер ответственности должника.

Принимая во внимание указанные обстоятельства, период просрочки работ по 3 и 4 этапу, факт исполнения обязательств АО «НИИ «Феррит-Домен» по Контракту в полном объеме, в том числе с оплатой работ за счет собственных средств 3 этапа в размере 8 500 000  рублей и 4 этапа в размере 4 411 000  рублей, а также отсутствие наступления негативных последствий для Заказчика, полагаем, что сумма пени, подлежащая взысканию должна составлять  1 902 900,00 (Один  миллион девятьсот две тысячи девятьсот) руб., рассчитанная по  формуле:  5 010 466,67 руб.(сумма пени, рассчитанная за общий период просрочки) - 742 900,00 руб. (неустойка за неисполнение Истцом встречных обязательств) - 1 654 666,67 руб. (неустойка, начисленная Истцом в период моратория) – 710 000,00 (штраф за ненадлежащее исполнение Истцом обязательств по Контракту) = 1 902 900, 00 руб.

В ходе судебного разбирательства ответчиком заявлено о пропуске срока исковой давности в соответствии со ст. 195, 199 ГК РФ к расчету неустойки за нарушение 3 этапа договора, срок исполнения по которому предусмотрен – 30.11.2018.

О нарушении своих прав Заказчику стало известно 01.12.2018 г., при этом с иском он обратился 06.10.2022, в связи с чем неустойка за нарушение исполнения основного обязательства подлежит взысканию за период в пределах трех лет, предшествующих дате предъявления иска о взыскании неустойки.

Таким образом, принимая во внимание указанные обстоятельства, период просрочки работ по 3 этапу за период, предшествующий дате предъявления иска о взыскании неустойки, составляет с 06.10.2019 по 17.03.2021:

Задолженность

Период просрочки

Ставка

Формула

Неустойка

 

с

по

дней

 

34 000 000,00

06.10.2019

Новая задолженность на 34 000 000,00 руб.

34 000 000,00

06.10.2019

27.10.2019

22

7

34 000 000,00 × 22 × 1/300 × 7%

174 533,33 р.

34 000 000,00

28.10.2019

15.12.2019

49

6.5

34 000 000,00 × 49 × 1/300 × 6.5%

360 966,67 р.

34 000 000,00

16.12.2019

09.02.2020

56

6.25

34 000 000,00 × 56 × 1/300 × 6.25%

396 666,67 р.

34 000 000,00

10.02.2020

26.04.2020

77

6

34 000 000,00 × 77 × 1/300 × 6%

523 600,00 р.

34 000 000,00

27.04.2020

21.06.2020

56

5.5

34 000 000,00 × 56 × 1/300 × 5.5%

349 066,67 р.

34 000 000,00

22.06.2020

26.07.2020

35

4.5

34 000 000,00 × 35 × 1/300 × 4.5%

178 500,00 р.

34 000 000,00

27.07.2020

17.03.2021

234

4.25

34 000 000,00 × 234 × 1/300 × 4.25%

1 127 100,00 р.

Сумма основного долга: 34 000 000,00 руб.

Сумма неустойки: 3 110 433,34 руб.

По расчету истца  сумма пени, подлежащая взысканию с Ответчика должна составлять:  

3 110 433,34 руб. (сумма пени, рассчитанная за период просрочки) - 742 900,00 руб. (неустойка за неисполнение Истцом встречных обязательств) - 1 654 666,67 руб. (неустойка, начисленная Истцом в период моратория) – 710 000,00 (штраф за ненадлежащее исполнение Истцом обязательств по Контракту) = 2 866,67 (Две тысячи восемьсот шестьдесят шесть рублей шестьдесят семь копеек) рублей.

Вместе с тем  мораторий на неустойку за нарушение срока  выполнения работ не распространяется.

Следовательно, размер неустойки подлежащей взысканию с ответчика составляет 1 657 533,34 руб.

При указанных обстоятельствах иск подлежит частичному удовлетворению.

На основании  изложенного, руководствуясь ст.ст.  110, 123, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

Взыскать с  акционерного общества "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ "ФЕРРИТ-ДОМЕН" (ОГРН: 1037821019631)  в пользу  Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (ОГРН: 1047796323123,) 1 657 533 руб.  34  коп. неустойки.

В удовлетворении остальной части иска отказать. 

Взыскать с  акционерного общества "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ "ФЕРРИТ-ДОМЕН" (ОГРН: 1037821019631)  в федеральный бюджет госпошлину в размере  5 171  руб.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение  месяца с даты его принятия.

Судья:

А.В. Мищенко