version

"1.0"

encoding

"utf

8"

standalone

"yes"?

 

application

progid

"Word.Document"?

 

xmlns:w

"http://schemas.microsoft.com/office/word/2003/wordml"

xmlns:v

"urn:schemas

microsoft

com:vml"

xmlns:w10

"urn:schemas

microsoft

com:office:word"

xmlns:sl

"http://schemas.microsoft.com/schemaLibrary/2003/core"

xmlns:aml

"http://schemas.microsoft.com/aml/2001/core"

xmlns:wx

"http://schemas.microsoft.com/office/word/2003/auxHint"

xmlns:o

"urn:schemas

microsoft

com:office:office"

xmlns:dt

"uuid:C2F41010

65B3

11d1

A29F

00AA00C14882"

xmlns:wsp

"http://schemas.microsoft.com/office/word/2003/wordml/sp2"

w:macrosPresent

"no"

w:embeddedObjPresent

"no"

w:ocxPresent

"no"

xml:space

"preserve"

 

Generated

by

Aspose.Words

for

.NET-

 

Farizf

 

Аджиева

 

127

 

551

 

2017

01

06T17:52:00Z

 

2024

05

17T13:05:00Z

 

2024

05

21T15:44:00Z

 

10

 

5912

 

33702

 

Microsoft

 

280

 

79

 

39535

 

12.0000

 

 

w:ascii

"Calibri"

w:fareast

"Calibri"

w:h

ansi

"Calibri"

w:cs

"Times

New

Roman"/

 

w:name

"Times

New

Roman"

 

1

w:val

"02020603050405020304"/

 

w:val

"CC"/

 

w:val

"Roman"/

 

w:val

"variable"/

 

w:usb

0

"E0002AFF"

w:usb

1

"C0007841"

w:usb

2

"00000009"

w:usb

3

"00000000"

w:csb

0

"000001FF"

w:csb

1

"00000000"/

 

w:name

"Symbol"

 

1

w:val

"05050102010706020507"/

 

w:val

"02"/

 

w:val

"Roman"/

 

w:val

"variable"/

 

w:usb

0

"00000000"

w:usb

1

"10000000"

w:usb

2

"00000000"

w:usb

3

"00000000"

w:csb

0

"80000000"

w:csb

1

"00000000"/

 

w:name

"Arial"

 

1

w:val

"020B0604020202020204"/

 

w:val

"CC"/

 

w:val

"Swiss"/

 

w:val

"variable"/

 

w:usb

0

"E0002AFF"

w:usb

1

"C0007843"

w:usb

2

"00000009"

w:usb

3

"00000000"

w:csb

0

"000001FF"

w:csb

1

"00000000"/

 

w:name

"Calibri"

 

1

w:val

"020F0502020204030204"/

 

w:val

"CC"/

 

w:val

"Swiss"/

 

w:val

"variable"/

 

w:usb

0

"E00002FF"

w:usb

1

"4000ACFF"

w:usb

2

"00000001"

w:usb

3

"00000000"

w:csb

0

"0000019F"

w:csb

1

"00000000"/

 

w:name

"Tahoma"

 

1

w:val

"020B0604030504040204"/

 

w:val

"CC"/

 

w:val

"Swiss"/

 

w:val

"variable"/

 

w:usb

0

"E1002EFF"

w:usb

1

"C000605B"

w:usb

2

"00000029"

w:usb

3

"00000000"

w:csb

0

"000101FF"

w:csb

1

"00000000"/

 

w:name

"Courier

New"

 

1

w:val

"02070309020205020404"/

 

w:val

"CC"/

 

w:val

"Modern"/

 

w:val

"fixed"/

 

w:usb

0

"E0002AFF"

w:usb

1

"C0007843"

w:usb

2

"00000009"

w:usb

3

"00000000"

w:csb

0

"000001FF"

w:csb

1

"00000000"/

 

w:name

"Wingdings"

 

1

w:val

"05000000000000000000"/

 

w:val

"02"/

 

w:val

"Auto"/

 

w:val

"variable"/

 

w:usb

0

"00000000"

w:usb

1

"10000000"

w:usb

2

"00000000"

w:usb

3

"00000000"

w:csb

0

"80000000"

w:csb

1

"00000000"/

 

w:name

"Cambria

Math"

 

1

w:val

"02040503050406030204"/

 

w:val

"CC"/

 

w:val

"Roman"/

 

w:val

"variable"/

 

w:usb

0

"E00002FF"

w:usb

1

"420024FF"

w:usb

2

"00000000"

w:usb

3

"00000000"

w:csb

0

"0000019F"

w:csb

1

"00000000"/

 

 

w:listDefId

"0"

 

w:val

"FFFFFF7C"/

 

w:val

"SingleLevel"/

 

w:val

"D954006E"/

 

w:ilvl

"0"

 

w:val

"1"/

 

w:val

"%1."/

 

w:val

"left"/

 

 

w:val

"list"

w:pos

"1492"/

 

w:left

"1492"

w:hanging

"360"/

 

 

w:listDefId

"1"

 

w:val

"FFFFFF7D"/

 

w:val

"SingleLevel"/

 

w:val

"B82E4ADC"/

 

w:ilvl

"0"

 

w:val

"1"/

 

w:val

"%1."/

 

w:val

"left"/

 

 

w:val

"list"

w:pos

"1209"/

 

w:left

"1209"

w:hanging

"360"/

 

 

w:listDefId

"2"

 

w:val

"FFFFFF7E"/

 

w:val

"SingleLevel"/

 

w:val

"0290C29A"/

 

w:ilvl

"0"

 

w:val

"1"/

 

w:val

"%1."/

 

w:val

"left"/

 

 

w:val

"list"

w:pos

"926"/

 

w:left

"926"

w:hanging

"360"/

 

 

w:listDefId

"3"

 

w:val

"FFFFFF7F"/

 

w:val

"SingleLevel"/

 

w:val

"938CDC3C"/

 

w:ilvl

"0"

 

w:val

"1"/

 

w:val

"%1."/

 

w:val

"left"/

 

 

w:val

"list"

w:pos

"643"/

 

w:left

"643"

w:hanging

"360"/

 

 

w:listDefId

"4"

 

w:val

"FFFFFF80"/

 

w:val

"SingleLevel"/

 

w:val

"4482898C"/

 

w:ilvl

"0"

 

w:val

"1"/

 

w:val

"23"/

 

w:val

""/

 

w:val

"left"/

 

 

w:val

"list"

w:pos

"1492"/

 

w:left

"1492"

w:hanging

"360"/

 

 

w:ascii

"Symbol"

w:h

ansi

"Symbol"

w:hint

"default"/

 

 

w:listDefId

"5"

 

w:val

"FFFFFF81"/

 

w:val

"SingleLevel"/

 

w:val

"A23446C0"/

 

w:ilvl

"0"

 

w:val

"1"/

 

w:val

"23"/

 

w:val

""/

 

w:val

"left"/

 

 

w:val

"list"

w:pos

"1209"/

 

w:left

"1209"

w:hanging

"360"/

 

 

w:ascii

"Symbol"

w:h

ansi

"Symbol"

w:hint

"default"/

 

 

w:listDefId

"6"

 

w:val

"FFFFFF82"/

 

w:val

"SingleLevel"/

 

w:val

"F44478AC"/

 

w:ilvl

"0"

 

w:val

"1"/

 

w:val

"23"/

 

w:val

""/

 

w:val

"left"/

 

 

w:val

"list"

w:pos

"926"/

 

w:left

"926"

w:hanging

"360"/

 

 

w:ascii

"Symbol"

w:h

ansi

"Symbol"

w:hint

"default"/

 

 

w:listDefId

"7"

 

w:val

"FFFFFF83"/

 

w:val

"SingleLevel"/

 

w:val

"C3401980"/

 

w:ilvl

"0"

 

w:val

"1"/

 

w:val

"23"/

 

w:val

""/

 

w:val

"left"/

 

 

w:val

"list"

w:pos

"643"/

 

w:left

"643"

w:hanging

"360"/

 

 

w:ascii

"Symbol"

w:h

ansi

"Symbol"

w:hint

"default"/

 

 

w:listDefId

"8"

 

w:val

"FFFFFF88"/

 

w:val

"SingleLevel"/

 

w:val

"F55EC52E"/

 

w:ilvl

"0"

 

w:val

"1"/

 

w:val

"%1."/

 

w:val

"left"/

 

 

w:val

"list"

w:pos

"360"/

 

w:left

"360"

w:hanging

"360"/

 

 

w:listDefId

"9"

 

w:val

"FFFFFF89"/

 

w:val

"SingleLevel"/

 

w:val

"7BA4ADC4"/

 

w:ilvl

"0"

 

w:val

"1"/

 

w:val

"23"/

 

w:val

""/

 

w:val

"left"/

 

 

w:val

"list"

w:pos

"360"/

 

w:left

"360"

w:hanging

"360"/

 

 

w:ascii

"Symbol"

w:h

ansi

"Symbol"

w:hint

"default"/

 

 

w:listDefId

"10"

 

w:val

"29957F26"/

 

w:val

"HybridMultilevel"/

 

w:val

"4A760B16"/

 

w:ilvl

"0"

 

w:val

"1"/

 

w:val

"23"/

 

w:val

""/

 

w:val

"left"/

 

w:left

"1429"

w:hanging

"360"/

 

 

w:ascii

"Symbol"

w:h

ansi

"Symbol"

w:hint

"default"/

 

 

w:ilvl

"1"

w:tentative

"on"

 

w:val

"1"/

 

w:val

"23"/

 

w:val

"o"/

 

w:val

"left"/

 

w:left

"2149"

w:hanging

"360"/

 

 

w:ascii

"Courier

New"

w:h

ansi

"Courier

New"

w:cs

"Courier

New"

w:hint

"default"/

 

 

w:ilvl

"2"

w:tentative

"on"

 

w:val

"1"/

 

w:val

"23"/

 

w:val

""/

 

w:val

"left"/

 

w:left

"2869"

w:hanging

"360"/

 

 

w:ascii

"Wingdings"

w:h

ansi

"Wingdings"

w:hint

"default"/

 

 

w:ilvl

"3"

w:tentative

"on"

 

w:val

"1"/

 

w:val

"23"/

 

w:val

""/

 

w:val

"left"/

 

w:left

"3589"

w:hanging

"360"/

 

 

w:ascii

"Symbol"

w:h

ansi

"Symbol"

w:hint

"default"/

 

 

w:ilvl

"4"

w:tentative

"on"

 

w:val

"1"/

 

w:val

"23"/

 

w:val

"o"/

 

w:val

"left"/

 

w:left

"4309"

w:hanging

"360"/

 

 

w:ascii

"Courier

New"

w:h

ansi

"Courier

New"

w:cs

"Courier

New"

w:hint

"default"/

 

 

w:ilvl

"5"

w:tentative

"on"

 

w:val

"1"/

 

w:val

"23"/

 

w:val

""/

 

w:val

"left"/

 

w:left

"5029"

w:hanging

"360"/

 

 

w:ascii

"Wingdings"

w:h

ansi

"Wingdings"

w:hint

"default"/

 

 

w:ilvl

"6"

w:tentative

"on"

 

w:val

"1"/

 

w:val

"23"/

 

w:val

""/

 

w:val

"left"/

 

w:left

"5749"

w:hanging

"360"/

 

 

w:ascii

"Symbol"

w:h

ansi

"Symbol"

w:hint

"default"/

 

 

w:ilvl

"7"

w:tentative

"on"

 

w:val

"1"/

 

w:val

"23"/

 

w:val

"o"/

 

w:val

"left"/

 

w:left

"6469"

w:hanging

"360"/

 

 

w:ascii

"Courier

New"

w:h

ansi

"Courier

New"

w:cs

"Courier

New"

w:hint

"default"/

 

 

w:ilvl

"8"

w:tentative

"on"

 

w:val

"1"/

 

w:val

"23"/

 

w:val

""/

 

w:val

"left"/

 

w:left

"7189"

w:hanging

"360"/

 

 

w:ascii

"Wingdings"

w:h

ansi

"Wingdings"

w:hint

"default"/

 

 

w:listDefId

"11"

 

w:val

"6A3546C1"/

 

w:val

"Multilevel"/

 

w:val

"B3F684F2"/

 

w:ilvl

"0"

 

w:val

"1"/

 

w:val

"1.%1."/

 

w:val

"left"/

 

w:ascii

"Times

New

Roman"

w:fareast

"Times

New

Roman"

w:h

ansi

"Times

New

Roman"

w:cs

"Times

New

Roman"/

 

w:val

"off"/

 

cs

w:val

"off"/

 

w:val

"off"/

 

cs

w:val

"off"/

 

w:val

"off"/

 

w:val

"off"/

 

w:val

"000000"/

 

w:val

"0"/

 

w:val

"100"/

 

w:val

"0"/

 

w:val

"27"/

 

cs

w:val

"27"/

 

w:val

"none"/

 

 

w:ilvl

"1"

 

w:val

"0"/

 

w:val

"left"/

 

w:ilvl

"2"

 

w:val

"0"/

 

w:val

"left"/

 

w:ilvl

"3"

 

w:val

"0"/

 

w:val

"left"/

 

w:ilvl

"4"

 

w:val

"0"/

 

w:val

"left"/

 

w:ilvl

"5"

 

w:val

"0"/

 

w:val

"left"/

 

w:ilvl

"6"

 

w:val

"0"/

 

w:val

"left"/

 

w:ilvl

"7"

 

w:val

"0"/

 

w:val

"left"/

 

w:ilvl

"8"

 

w:val

"0"/

 

w:val

"left"/

 

 

w:ilfo

"1"

 

w:val

"9"/

 

w:ilfo

"2"

 

w:val

"7"/

 

w:ilfo

"3"

 

w:val

"6"/

 

w:ilfo

"4"

 

w:val

"5"/

 

w:ilfo

"5"

 

w:val

"4"/

 

w:ilfo

"6"

 

w:val

"8"/

 

w:ilfo

"7"

 

w:val

"3"/

 

w:ilfo

"8"

 

w:val

"2"/

 

w:ilfo

"9"

 

w:val

"1"/

 

w:ilfo

"10"

 

w:val

"0"/

 

w:ilfo

"11"

 

w:val

"10"/

 

w:ilfo

"12"

 

w:val

"11"/

 

 

w:val

"7"/

 

w:defLockedState

"off"

w:latentStyleCount

"267"/

 

w:type

"paragraph"

w:default

"on"

w:styleId

"Normal"

 

w:val

"Normal"/

 

wx:val

"Обычный"/

 

w:val

"00AB7F70"/

 

w:ascii

"Times

New

Roman"

w:fareast

"Times

New

Roman"

w:h

ansi

"Times

New

Roman"/

 

w:val

"24"/

 

w:val

"RU"

w:fareast

"RU"

w:bidi

"AR

SA"/

 

 

w:type

"paragraph"

w:styleId

"Heading1"

 

w:val

"heading

1"/

 

wx:val

"Заголовок

1"/

 

w:val

"Normal"/

 

w:val

"Normal"/

 

w:val

"1"/

 

w:val

"00AB7F70"/

 

w:val

"Heading1"/

 

w:val

"0"/

 

 

w:val

"26"/

 

 

w:type

"character"

w:default

"on"

w:styleId

"DefaultParagraphFont"

 

w:val

"Default

Paragraph

Font"/

 

wx:val

"Основной

шрифт

абзаца"/

 

w:type

"table"

w:default

"on"

w:styleId

"TableNormal"

 

w:val

"Normal

Table"/

 

wx:val

"Обычная

таблица"/

 

 

w:w

"0"

w:type

"dxa"/

 

w:w

"0"

w:type

"dxa"/

 

w:w

"108"

w:type

"dxa"/

 

w:w

"0"

w:type

"dxa"/

 

w:w

"108"

w:type

"dxa"/

 

 

w:type

"list"

w:default

"on"

w:styleId

"NoList"

 

w:val

"No

List"/

 

wx:val

"Нет

списка"/

 

 

w:type

"character"

w:styleId

"1"

 

w:val

"Заголовок

1

Знак"/

 

w:val

"Heading1"/

 

w:val

"00AB7F70"/

 

w:ascii

"Times

New

Roman"

w:fareast

"Times

New

Roman"

w:h

ansi

"Times

New

Roman"

w:cs

"Times

New

Roman"/

 

w:val

"26"/

 

cs

w:val

"20"/

 

w:fareast

"RU"/

 

 

w:type

"paragraph"

w:styleId

"BalloonText"

 

w:val

"Balloon

Text"/

 

wx:val

"Текст

выноски"/

 

w:val

"Normal"/

 

w:val

"a"/

 

w:val

"00AB7F70"/

 

w:val

"BalloonText"/

 

 

w:ascii

"Tahoma"

w:h

ansi

"Tahoma"/

 

w:val

"16"/

 

cs

w:val

"16"/

 

 

w:type

"character"

w:styleId

"a"

 

w:val

"Текст

выноски

Знак"/

 

w:val

"BalloonText"/

 

w:val

"00AB7F70"/

 

w:ascii

"Tahoma"

w:fareast

"Times

New

Roman"

w:h

ansi

"Tahoma"

w:cs

"Tahoma"/

 

w:val

"16"/

 

cs

w:val

"16"/

 

w:fareast

"RU"/

 

 

w:type

"paragraph"

w:styleId

"Header"

 

w:val

"header"/

 

wx:val

"Верхний

колонтитул"/

 

w:val

"Normal"/

 

w:val

"a0"/

 

w:val

"00872DBF"/

 

w:val

"Header"/

 

w:val

"center"

w:pos

"4677"/

 

w:val

"right"

w:pos

"9355"/

 

 

w:type

"character"

w:styleId

"a0"

 

w:val

"Верхний

колонтитул

Знак"/

 

w:val

"Header"/

 

w:val

"00872DBF"/

 

w:ascii

"Times

New

Roman"

w:fareast

"Times

New

Roman"

w:h

ansi

"Times

New

Roman"/

 

w:val

"24"/

 

 

w:type

"paragraph"

w:styleId

"Footer"

 

w:val

"footer"/

 

wx:val

"Нижний

колонтитул"/

 

w:val

"Normal"/

 

w:val

"a1"/

 

w:val

"00872DBF"/

 

w:val

"Footer"/

 

w:val

"center"

w:pos

"4677"/

 

w:val

"right"

w:pos

"9355"/

 

 

w:type

"character"

w:styleId

"a1"

 

w:val

"Нижний

колонтитул

Знак"/

 

w:val

"Footer"/

 

w:val

"00872DBF"/

 

w:ascii

"Times

New

Roman"

w:fareast

"Times

New

Roman"

w:h

ansi

"Times

New

Roman"/

 

w:val

"24"/

 

 

w:type

"character"

w:styleId

"PageNumber"

 

w:val

"page

number"/

 

wx:val

"Номер

страницы"/

 

w:val

"DefaultParagraphFont"/

 

w:val

"00E94D27"/

 

w:type

"paragraph"

w:styleId

"List"

 

w:val

"List"/

 

wx:val

"Список"/

 

w:val

"Normal"/

 

w:val

"003F0909"/

 

w:val

"List"/

 

w:left

"283"

w:hanging

"283"/

 

 

w:val

"28"/

 

 

w:type

"paragraph"

w:styleId

"BodyText"

 

w:val

"Body

Text"/

 

wx:val

"Основной

текст"/

 

w:val

"Normal"/

 

w:val

"a2"/

 

w:val

"007A3F34"/

 

w:val

"BodyText"/

 

w:val

"both"/

 

 

w:val

"26"/

 

 

w:type

"character"

w:styleId

"a2"

 

w:val

"Основной

текст

Знак"/

 

w:val

"BodyText"/

 

w:val

"007A3F34"/

 

w:ascii

"Times

New

Roman"

w:fareast

"Times

New

Roman"

w:h

ansi

"Times

New

Roman"/

 

w:val

"26"/

 

 

w:type

"paragraph"

w:styleId

"BodyTextIndent2"

 

w:val

"Body

Text

Indent

2"/

 

wx:val

"Основной

текст

с

отступом

2"/

 

w:val

"Normal"/

 

w:val

"2"/

 

w:val

"00FA6A6E"/

 

w:val

"BodyTextIndent2"/

 

w:after

"120"

w:line

"480"

w:line

rule

"auto"/

 

w:left

"283"/

 

 

w:type

"character"

w:styleId

"2"

 

w:val

"Основной

текст

с

отступом

2

Знак"/

 

w:val

"BodyTextIndent2"/

 

w:val

"00FA6A6E"/

 

w:ascii

"Times

New

Roman"

w:fareast

"Times

New

Roman"

w:h

ansi

"Times

New

Roman"/

 

w:val

"24"/

 

 

w:type

"character"

w:styleId

"Hyperlink"

 

w:val

"Hyperlink"/

 

wx:val

"Гиперссылка"/

 

w:val

"00E807EE"/

 

w:val

"0000FF"/

 

w:val

"single"/

 

 

w:type

"paragraph"

w:styleId

"BodyText2"

 

w:val

"Body

Text

2"/

 

wx:val

"Основной

текст

2"/

 

w:val

"Normal"/

 

w:val

"20"/

 

w:val

"006257A9"/

 

w:val

"BodyText2"/

 

w:after

"120"

w:line

"480"

w:line

rule

"auto"/

 

 

cs

w:val

"24"/

 

 

w:type

"character"

w:styleId

"20"

 

w:val

"Основной

текст

2

Знак"/

 

w:val

"BodyText2"/

 

w:val

"006257A9"/

 

w:ascii

"Times

New

Roman"

w:fareast

"Times

New

Roman"

w:h

ansi

"Times

New

Roman"/

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

w:type

"paragraph"

w:styleId

"NormalWeb"

 

w:val

"Normal

(Web)"/

 

wx:val

"Обычный

(веб)"/

 

w:val

"Normal"/

 

w:val

"007479D4"/

 

w:val

"NormalWeb"/

 

w:before

"100"

w:before

autospacing

"on"

w:after

"100"

w:after

autospacing

"on"/

 

 

cs

w:val

"24"/

 

 

w:type

"character"

w:styleId

"21"

 

w:val

"Основной

текст

(2)_"/

 

w:val

"22"/

 

w:val

"00C7789C"/

 

w:ascii

"Times

New

Roman"

w:h

ansi

"Times

New

Roman"/

 

w:val

"26"/

 

cs

w:val

"26"/

 

w:val

"clear"

w:color

"auto"

w:fill

"FFFFFF"/

 

 

w:type

"paragraph"

w:styleId

"22"

 

w:val

"Основной

текст

(2)"/

 

w:val

"Normal"/

 

w:val

"21"/

 

w:val

"00C7789C"/

 

w:val

"22"/

 

w:val

"clear"

w:color

"auto"

w:fill

"FFFFFF"/

 

w:line

"322"

w:line

rule

"exact"/

 

w:val

"both"/

 

 

w:fareast

"Calibri"/

 

w:val

"26"/

 

cs

w:val

"26"/

 

 

w:type

"paragraph"

w:styleId

"Default"

 

w:val

"Default"/

 

w:val

"0031718F"/

 

w:val

"Default"/

 

w:val

"off"/

 

w:val

"off"/

 

w:val

"off"/

 

 

w:ascii

"Times

New

Roman"

w:fareast

"Times

New

Roman"

w:h

ansi

"Times

New

Roman"/

 

w:val

"000000"/

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

w:val

"RU"

w:fareast

"RU"

w:bidi

"AR

SA"/

 

 

w:type

"paragraph"

w:styleId

"ConsPlusNormal"

 

w:val

"ConsPlusNormal"/

 

w:val

"00FD7D2F"/

 

w:val

"ConsPlusNormal"/

 

w:val

"off"/

 

w:val

"off"/

 

w:val

"off"/

 

w:val

"off"/

 

w:first

line

"720"/

 

 

w:ascii

"Arial"

w:fareast

"Times

New

Roman"

w:h

ansi

"Arial"

w:cs

"Arial"/

 

w:val

"RU"

w:fareast

"RU"

w:bidi

"AR

SA"/

 

 

w:type

"paragraph"

w:styleId

"NoSpacing"

 

w:val

"No

Spacing"/

 

wx:val

"Без

интервала"/

 

w:val

"a3"/

 

w:val

"008102AB"/

 

w:val

"NoSpacing"/

 

 

w:val

"22"/

 

cs

w:val

"22"/

 

w:val

"RU"

w:fareast

"RU"

w:bidi

"AR

SA"/

 

 

w:type

"character"

w:styleId

"a3"

 

w:val

"Без

интервала

Знак"/

 

w:val

"NoSpacing"/

 

w:val

"008102AB"/

 

w:val

"22"/

 

cs

w:val

"22"/

 

w:val

"RU"

w:fareast

"RU"

w:bidi

"AR

SA"/

 

 

w:type

"table"

w:styleId

"TableGrid"

 

w:val

"Table

Grid"/

 

wx:val

"Сетка

таблицы"/

 

w:val

"TableNormal"/

 

w:val

"00520070"/

 

w:ascii

"Calibri"

w:fareast

"Times

New

Roman"

w:h

ansi

"Calibri"

w:cs

"Times

New

Roman"/

 

w:val

"22"/

 

cs

w:val

"22"/

 

 

w:val

"single"

w:sz

"4"

wx:bdrwidth

"10"

w:space

"0"

w:color

"000000"/

 

w:val

"single"

w:sz

"4"

wx:bdrwidth

"10"

w:space

"0"

w:color

"000000"/

 

w:val

"single"

w:sz

"4"

wx:bdrwidth

"10"

w:space

"0"

w:color

"000000"/

 

w:val

"single"

w:sz

"4"

wx:bdrwidth

"10"

w:space

"0"

w:color

"000000"/

 

w:val

"single"

w:sz

"4"

wx:bdrwidth

"10"

w:space

"0"

w:color

"000000"/

 

w:val

"single"

w:sz

"4"

wx:bdrwidth

"10"

w:space

"0"

w:color

"000000"/

 

 

w:type

"paragraph"

w:styleId

"BodyTextIndent"

 

w:val

"Body

Text

Indent"/

 

wx:val

"Основной

текст

с

отступом"/

 

w:val

"Normal"/

 

w:val

"a4"/

 

w:val

"00C7734A"/

 

w:val

"BodyTextIndent"/

 

w:after

"120"/

 

w:left

"283"/

 

 

cs

w:val

"24"/

 

 

w:type

"character"

w:styleId

"a4"

 

w:val

"Основной

текст

с

отступом

Знак"/

 

w:val

"BodyTextIndent"/

 

w:val

"00C7734A"/

 

w:ascii

"Times

New

Roman"

w:fareast

"Times

New

Roman"

w:h

ansi

"Times

New

Roman"/

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

w:type

"character"

w:styleId

"a5"

 

w:val

"Сноска_"/

 

w:val

"a7"/

 

w:val

"00CD1E68"/

 

w:ascii

"Times

New

Roman"

w:fareast

"Times

New

Roman"

w:h

ansi

"Times

New

Roman"/

 

w:val

"clear"

w:color

"auto"

w:fill

"FFFFFF"/

 

 

w:type

"character"

w:styleId

"a6"

 

w:val

"Основной

текст_"/

 

w:val

"23"/

 

w:val

"00CD1E68"/

 

w:ascii

"Times

New

Roman"

w:fareast

"Times

New

Roman"

w:h

ansi

"Times

New

Roman"/

 

w:val

"27"/

 

cs

w:val

"27"/

 

w:val

"clear"

w:color

"auto"

w:fill

"FFFFFF"/

 

 

w:type

"character"

w:styleId

"2pt"

 

w:val

"Основной

текст+

Интервал

2

pt"/

 

w:val

"00CD1E68"/

 

w:ascii

"Times

New

Roman"

w:fareast

"Times

New

Roman"

w:h

ansi

"Times

New

Roman"/

 

w:val

"50"/

 

w:val

"27"/

 

cs

w:val

"27"/

 

w:val

"clear"

w:color

"auto"

w:fill

"FFFFFF"/

 

 

w:type

"character"

w:styleId

"11pt"

 

w:val

"Основной

текст+

11

pt;Полужирный"/

 

w:val

"00CD1E68"/

 

w:ascii

"Times

New

Roman"

w:fareast

"Times

New

Roman"

w:h

ansi

"Times

New

Roman"/

 

cs/

 

w:val

"22"/

 

cs

w:val

"22"/

 

w:val

"clear"

w:color

"auto"

w:fill

"FFFFFF"/

 

 

w:type

"paragraph"

w:styleId

"a7"

 

w:val

"Сноска"/

 

w:val

"Normal"/

 

w:val

"a5"/

 

w:val

"00CD1E68"/

 

w:val

"a7"/

 

w:val

"clear"

w:color

"auto"

w:fill

"FFFFFF"/

 

w:line

"226"

w:line

rule

"exact"/

 

 

w:val

"20"/

 

 

w:type

"paragraph"

w:styleId

"23"

 

w:val

"Основной

текст2"/

 

w:val

"Normal"/

 

w:val

"a6"/

 

w:val

"00CD1E68"/

 

w:val

"23"/

 

w:val

"clear"

w:color

"auto"

w:fill

"FFFFFF"/

 

w:after

"180"

w:line

"331"

w:line

rule

"exact"/

 

w:val

"both"/

 

 

w:val

"27"/

 

cs

w:val

"27"/

 

 

 

w:val

"print"/

 

w:percent

"150"/

 

w:val

""/

 

w:val

"708"/

 

w:val

"120"/

 

w:val

"2"/

 

w:val

"DontCompress"/

 

 

 

 

 

 

wsp:val

"00AB7F70"/

 

wsp:val

"000018CA"/

 

wsp:val

"0000243E"/

 

wsp:val

"000107E9"/

 

wsp:val

"00010848"/

 

wsp:val

"00011132"/

 

wsp:val

"00011A32"/

 

wsp:val

"00012157"/

 

wsp:val

"00014708"/

 

wsp:val

"00014A15"/

 

wsp:val

"000175B7"/

 

wsp:val

"00020248"/

 

wsp:val

"0002056F"/

 

wsp:val

"000207B0"/

 

wsp:val

"00020FD3"/

 

wsp:val

"0002129D"/

 

wsp:val

"0002270B"/

 

wsp:val

"00024D03"/

 

wsp:val

"00026AC7"/

 

wsp:val

"00026EC3"/

 

wsp:val

"00030E81"/

 

wsp:val

"0003103B"/

 

wsp:val

"0003592B"/

 

wsp:val

"00037C74"/

 

wsp:val

"00041E90"/

 

wsp:val

"000422A8"/

 

wsp:val

"0004349A"/

 

wsp:val

"00043EBA"/

 

wsp:val

"00047452"/

 

wsp:val

"000517C3"/

 

wsp:val

"00051DEA"/

 

wsp:val

"00051E8D"/

 

wsp:val

"000528D5"/

 

wsp:val

"000558B1"/

 

wsp:val

"00056869"/

 

wsp:val

"000571E2"/

 

wsp:val

"00057D7E"/

 

wsp:val

"00062AED"/

 

wsp:val

"0006473B"/

 

wsp:val

"00065295"/

 

wsp:val

"00066C55"/

 

wsp:val

"00066E2F"/

 

wsp:val

"00071337"/

 

wsp:val

"00074108"/

 

wsp:val

"000741B7"/

 

wsp:val

"00076220"/

 

wsp:val

"00080FA8"/

 

wsp:val

"00083644"/

 

wsp:val

"00084664"/

 

wsp:val

"00086315"/

 

wsp:val

"00091575"/

 

wsp:val

"00091E09"/

 

wsp:val

"00092508"/

 

wsp:val

"000949E6"/

 

wsp:val

"00094B2F"/

 

wsp:val

"000A28C6"/

 

wsp:val

"000A430A"/

 

wsp:val

"000A5688"/

 

wsp:val

"000B3DEA"/

 

wsp:val

"000B51B2"/

 

wsp:val

"000B6914"/

 

wsp:val

"000B6BE3"/

 

wsp:val

"000C11A7"/

 

wsp:val

"000C11C9"/

 

wsp:val

"000C1A4E"/

 

wsp:val

"000C3A01"/

 

wsp:val

"000C6E48"/

 

wsp:val

"000C6F4E"/

 

wsp:val

"000D2785"/

 

wsp:val

"000D3A4A"/

 

wsp:val

"000D4110"/

 

wsp:val

"000D6110"/

 

wsp:val

"000E0428"/

 

wsp:val

"000E12F8"/

 

wsp:val

"000E28EA"/

 

wsp:val

"000E2D7B"/

 

wsp:val

"000E5A4D"/

 

wsp:val

"000E64DC"/

 

wsp:val

"000F080E"/

 

wsp:val

"000F6124"/

 

wsp:val

"000F6CC2"/

 

wsp:val

"000F72DC"/

 

wsp:val

"000F7341"/

 

wsp:val

"000F7E9E"/

 

wsp:val

"00100F88"/

 

wsp:val

"00102331"/

 

wsp:val

"001035E3"/

 

wsp:val

"00103C56"/

 

wsp:val

"00105F95"/

 

wsp:val

"00107722"/

 

wsp:val

"001125DE"/

 

wsp:val

"00117C78"/

 

wsp:val

"00120EF7"/

 

wsp:val

"0012292E"/

 

wsp:val

"00124989"/

 

wsp:val

"00124D0A"/

 

wsp:val

"00127650"/

 

wsp:val

"00127F1A"/

 

wsp:val

"00130F98"/

 

wsp:val

"00134F52"/

 

wsp:val

"001360FF"/

 

wsp:val

"00136AF6"/

 

wsp:val

"00136EAF"/

 

wsp:val

"00143FAE"/

 

wsp:val

"0014558F"/

 

wsp:val

"00155CC1"/

 

wsp:val

"00155E65"/

 

wsp:val

"00156F61"/

 

wsp:val

"001577B5"/

 

wsp:val

"00163F79"/

 

wsp:val

"0016469E"/

 

wsp:val

"0016778F"/

 

wsp:val

"001702F1"/

 

wsp:val

"001778A0"/

 

wsp:val

"001833B2"/

 

wsp:val

"001863A8"/

 

wsp:val

"00186D58"/

 

wsp:val

"00191A30"/

 

wsp:val

"00191A69"/

 

wsp:val

"001926B8"/

 

wsp:val

"0019329F"/

 

wsp:val

"001944FE"/

 

wsp:val

"00194935"/

 

wsp:val

"00196130"/

 

wsp:val

"00197D54"/

 

wsp:val

"001A1062"/

 

wsp:val

"001A1D71"/

 

wsp:val

"001A57F5"/

 

wsp:val

"001A6315"/

 

wsp:val

"001B440C"/

 

wsp:val

"001B5B5C"/

 

wsp:val

"001B7651"/

 

wsp:val

"001C56B9"/

 

wsp:val

"001D1E18"/

 

wsp:val

"001D47A2"/

 

wsp:val

"001D7385"/

 

wsp:val

"001E0A85"/

 

wsp:val

"001E221B"/

 

wsp:val

"001E26BA"/

 

wsp:val

"001E4D51"/

 

wsp:val

"001F19A1"/

 

wsp:val

"001F4AA0"/

 

wsp:val

"001F5620"/

 

wsp:val

"002056C9"/

 

wsp:val

"00205A7C"/

 

wsp:val

"002064AB"/

 

wsp:val

"00211A5D"/

 

wsp:val

"00212D4A"/

 

wsp:val

"0021408E"/

 

wsp:val

"0021711D"/

 

wsp:val

"002177B8"/

 

wsp:val

"002217B6"/

 

wsp:val

"002217CB"/

 

wsp:val

"002219A2"/

 

wsp:val

"002224A5"/

 

wsp:val

"0022416C"/

 

wsp:val

"00226976"/

 

wsp:val

"00233277"/

 

wsp:val

"00234449"/

 

wsp:val

"00235D99"/

 

wsp:val

"00236677"/

 

wsp:val

"002405E2"/

 

wsp:val

"00240681"/

 

wsp:val

"00243A7D"/

 

wsp:val

"00246391"/

 

wsp:val

"00247DAF"/

 

wsp:val

"00255BA6"/

 

wsp:val

"0025715B"/

 

wsp:val

"00260F61"/

 

wsp:val

"00261198"/

 

wsp:val

"00262CF8"/

 

wsp:val

"00262DF8"/

 

wsp:val

"00263BB4"/

 

wsp:val

"002677E2"/

 

wsp:val

"00270475"/

 

wsp:val

"002706AE"/

 

wsp:val

"002712F9"/

 

wsp:val

"00272FBD"/

 

wsp:val

"002735C2"/

 

wsp:val

"00274850"/

 

wsp:val

"002773ED"/

 

wsp:val

"002778E2"/

 

wsp:val

"00280E76"/

 

wsp:val

"00280F97"/

 

wsp:val

"0028189E"/

 

wsp:val

"002818B2"/

 

wsp:val

"00281FF3"/

 

wsp:val

"00283BAC"/

 

wsp:val

"0028587F"/

 

wsp:val

"00285CE5"/

 

wsp:val

"002869DA"/

 

wsp:val

"00287251"/

 

wsp:val

"002900F6"/

 

wsp:val

"00291EED"/

 

wsp:val

"0029219A"/

 

wsp:val

"00293C6F"/

 

wsp:val

"00294E97"/

 

wsp:val

"002A034A"/

 

wsp:val

"002A1540"/

 

wsp:val

"002A28A5"/

 

wsp:val

"002A298A"/

 

wsp:val

"002A351C"/

 

wsp:val

"002B0935"/

 

wsp:val

"002B2FDC"/

 

wsp:val

"002B40B3"/

 

wsp:val

"002B44D4"/

 

wsp:val

"002B5FB6"/

 

wsp:val

"002B6C56"/

 

wsp:val

"002B6F96"/

 

wsp:val

"002B70AE"/

 

wsp:val

"002C7467"/

 

wsp:val

"002C7699"/

 

wsp:val

"002D0C23"/

 

wsp:val

"002D2D25"/

 

wsp:val

"002D2DC0"/

 

wsp:val

"002D33D0"/

 

wsp:val

"002D59DB"/

 

wsp:val

"002D5B6D"/

 

wsp:val

"002D6BD2"/

 

wsp:val

"002E0C9D"/

 

wsp:val

"002E3A9F"/

 

wsp:val

"002E459D"/

 

wsp:val

"002E714D"/

 

wsp:val

"002E7A51"/

 

wsp:val

"002E7A7A"/

 

wsp:val

"002F04A6"/

 

wsp:val

"002F0F96"/

 

wsp:val

"002F2624"/

 

wsp:val

"002F511B"/

 

wsp:val

"00303084"/

 

wsp:val

"00305972"/

 

wsp:val

"003073E8"/

 

wsp:val

"00307ACC"/

 

wsp:val

"00310F08"/

 

wsp:val

"00311B29"/

 

wsp:val

"00311E98"/

 

wsp:val

"003125A5"/

 

wsp:val

"00314DA4"/

 

wsp:val

"00316054"/

 

wsp:val

"00316E8D"/

 

wsp:val

"0031718F"/

 

wsp:val

"00320FE5"/

 

wsp:val

"00321CDD"/

 

wsp:val

"003222F5"/

 

wsp:val

"003241C5"/

 

wsp:val

"00325793"/

 

wsp:val

"00326C11"/

 

wsp:val

"00327FC4"/

 

wsp:val

"00332EEF"/

 

wsp:val

"00336020"/

 

wsp:val

"0033648D"/

 

wsp:val

"003364D8"/

 

wsp:val

"00337C4C"/

 

wsp:val

"00340172"/

 

wsp:val

"003401B4"/

 

wsp:val

"0034141E"/

 

wsp:val

"00347AB7"/

 

wsp:val

"00350165"/

 

wsp:val

"00350B15"/

 

wsp:val

"00355C05"/

 

wsp:val

"00355C59"/

 

wsp:val

"0036205B"/

 

wsp:val

"00362961"/

 

wsp:val

"00362DEF"/

 

wsp:val

"00363D4C"/

 

wsp:val

"00365E6B"/

 

wsp:val

"00367642"/

 

wsp:val

"00371561"/

 

wsp:val

"00373ACA"/

 

wsp:val

"003753C4"/

 

wsp:val

"00375F0A"/

 

wsp:val

"00376F80"/

 

wsp:val

"00385BE6"/

 

wsp:val

"00385EEC"/

 

wsp:val

"00385F3E"/

 

wsp:val

"0038712E"/

 

wsp:val

"003900FD"/

 

wsp:val

"00391565"/

 

wsp:val

"00392482"/

 

wsp:val

"003932B1"/

 

wsp:val

"003A04D7"/

 

wsp:val

"003A18D0"/

 

wsp:val

"003A547F"/

 

wsp:val

"003B010D"/

 

wsp:val

"003B2245"/

 

wsp:val

"003B75E8"/

 

wsp:val

"003B7EEA"/

 

wsp:val

"003C58AF"/

 

wsp:val

"003C6766"/

 

wsp:val

"003C7658"/

 

wsp:val

"003C783E"/

 

wsp:val

"003D016A"/

 

wsp:val

"003D0214"/

 

wsp:val

"003D2207"/

 

wsp:val

"003D3353"/

 

wsp:val

"003D53B3"/

 

wsp:val

"003D6364"/

 

wsp:val

"003D7F3C"/

 

wsp:val

"003E7C87"/

 

wsp:val

"003F059B"/

 

wsp:val

"003F0909"/

 

wsp:val

"003F230A"/

 

wsp:val

"003F2989"/

 

wsp:val

"003F35D2"/

 

wsp:val

"003F43FB"/

 

wsp:val

"003F45B7"/

 

wsp:val

"003F6053"/

 

wsp:val

"00403E34"/

 

wsp:val

"004042FA"/

 

wsp:val

"00406685"/

 

wsp:val

"00407528"/

 

wsp:val

"00415DFD"/

 

wsp:val

"00415F14"/

 

wsp:val

"004205ED"/

 

wsp:val

"00422910"/

 

wsp:val

"00424012"/

 

wsp:val

"0042462E"/

 

wsp:val

"004249AA"/

 

wsp:val

"0043532A"/

 

wsp:val

"00435968"/

 

wsp:val

"00436CC5"/

 

wsp:val

"00441E62"/

 

wsp:val

"00442900"/

 

wsp:val

"004431B6"/

 

wsp:val

"00443A0E"/

 

wsp:val

"004459CE"/

 

wsp:val

"0045426A"/

 

wsp:val

"004552C1"/

 

wsp:val

"0045712C"/

 

wsp:val

"00460F1C"/

 

wsp:val

"00461135"/

 

wsp:val

"00470242"/

 

wsp:val

"0047275B"/

 

wsp:val

"00472C60"/

 

wsp:val

"00473895"/

 

wsp:val

"00474915"/

 

wsp:val

"004760C5"/

 

wsp:val

"004761D9"/

 

wsp:val

"00476BDE"/

 

wsp:val

"004804E1"/

 

wsp:val

"00482D21"/

 

wsp:val

"00483477"/

 

wsp:val

"004844B0"/

 

wsp:val

"00485DEE"/

 

wsp:val

"00486E9C"/

 

wsp:val

"00487D50"/

 

wsp:val

"00494DD7"/

 

wsp:val

"00495DAD"/

 

wsp:val

"00496648"/

 

wsp:val

"0049794D"/

 

wsp:val

"00497D61"/

 

wsp:val

"00497EAC"/

 

wsp:val

"00497F63"/

 

wsp:val

"004A1767"/

 

wsp:val

"004A1917"/

 

wsp:val

"004A53BC"/

 

wsp:val

"004A6AAC"/

 

wsp:val

"004A7398"/

 

wsp:val

"004A79A2"/

 

wsp:val

"004A7FBA"/

 

wsp:val

"004B2EE5"/

 

wsp:val

"004B3CC1"/

 

wsp:val

"004B4CBD"/

 

wsp:val

"004B6F96"/

 

wsp:val

"004B7791"/

 

wsp:val

"004C16A3"/

 

wsp:val

"004C1CF0"/

 

wsp:val

"004C47C6"/

 

wsp:val

"004C7C20"/

 

wsp:val

"004D0281"/

 

wsp:val

"004D098F"/

 

wsp:val

"004D25C7"/

 

wsp:val

"004D374E"/

 

wsp:val

"004D78B5"/

 

wsp:val

"004E0963"/

 

wsp:val

"004E19F7"/

 

wsp:val

"004E1BF1"/

 

wsp:val

"004E1D1E"/

 

wsp:val

"004E7433"/

 

wsp:val

"004F057E"/

 

wsp:val

"004F05A6"/

 

wsp:val

"004F0DA7"/

 

wsp:val

"004F0DD3"/

 

wsp:val

"004F235C"/

 

wsp:val

"004F46CE"/

 

wsp:val

"004F5A18"/

 

wsp:val

"004F62D7"/

 

wsp:val

"00500014"/

 

wsp:val

"00502442"/

 

wsp:val

"0050345A"/

 

wsp:val

"005037EA"/

 

wsp:val

"00506BB3"/

 

wsp:val

"00506E2F"/

 

wsp:val

"0051227B"/

 

wsp:val

"0051477A"/

 

wsp:val

"00514DC6"/

 

wsp:val

"00520070"/

 

wsp:val

"00520EE1"/

 

wsp:val

"005245C4"/

 

wsp:val

"00524B71"/

 

wsp:val

"0052568F"/

 

wsp:val

"00525738"/

 

wsp:val

"00527933"/

 

wsp:val

"00530E82"/

 

wsp:val

"00532EAD"/

 

wsp:val

"00534615"/

 

wsp:val

"00534A62"/

 

wsp:val

"00534FB9"/

 

wsp:val

"00542514"/

 

wsp:val

"00543637"/

 

wsp:val

"0054535E"/

 

wsp:val

"005464D6"/

 

wsp:val

"00546CA6"/

 

wsp:val

"00551818"/

 

wsp:val

"0055421C"/

 

wsp:val

"00557F8A"/

 

wsp:val

"0056183C"/

 

wsp:val

"0056399E"/

 

wsp:val

"005676F5"/

 

wsp:val

"005710D4"/

 

wsp:val

"00575970"/

 

wsp:val

"005802C0"/

 

wsp:val

"00581079"/

 

wsp:val

"005810CA"/

 

wsp:val

"00581BEE"/

 

wsp:val

"0058230A"/

 

wsp:val

"00586EDA"/

 

wsp:val

"00596FE2"/

 

wsp:val

"005A1794"/

 

wsp:val

"005A2D19"/

 

wsp:val

"005A3512"/

 

wsp:val

"005A4581"/

 

wsp:val

"005A5B3D"/

 

wsp:val

"005A5EDB"/

 

wsp:val

"005A78DB"/

 

wsp:val

"005B01CE"/

 

wsp:val

"005B11D0"/

 

wsp:val

"005B2E4C"/

 

wsp:val

"005B419C"/

 

wsp:val

"005B5ABB"/

 

wsp:val

"005B66B5"/

 

wsp:val

"005C08A2"/

 

wsp:val

"005C4432"/

 

wsp:val

"005C648A"/

 

wsp:val

"005C736F"/

 

wsp:val

"005D720D"/

 

wsp:val

"005D7359"/

 

wsp:val

"005E1B88"/

 

wsp:val

"005E3486"/

 

wsp:val

"005F12B5"/

 

wsp:val

"005F3E0D"/

 

wsp:val

"005F73D2"/

 

wsp:val

"00601294"/

 

wsp:val

"00601A4E"/

 

wsp:val

"00603A3B"/

 

wsp:val

"00603D50"/

 

wsp:val

"00605058"/

 

wsp:val

"0060579F"/

 

wsp:val

"00606752"/

 

wsp:val

"00606F15"/

 

wsp:val

"00607C88"/

 

wsp:val

"00616721"/

 

wsp:val

"00617931"/

 

wsp:val

"00620710"/

 

wsp:val

"00621B22"/

 

wsp:val

"006253B0"/

 

wsp:val

"006253D2"/

 

wsp:val

"006257A9"/

 

wsp:val

"00626D03"/

 

wsp:val

"006276DE"/

 

wsp:val

"00632641"/

 

wsp:val

"006347E4"/

 

wsp:val

"00635580"/

 

wsp:val

"00636675"/

 

wsp:val

"00641E5D"/

 

wsp:val

"006432E5"/

 

wsp:val

"00644C34"/

 

wsp:val

"006456D6"/

 

wsp:val

"006460D0"/

 

wsp:val

"00647E26"/

 

wsp:val

"00650691"/

 

wsp:val

"0065219E"/

 

wsp:val

"006544F2"/

 

wsp:val

"00654631"/

 

wsp:val

"0065706D"/

 

wsp:val

"00663E97"/

 

wsp:val

"0067215D"/

 

wsp:val

"006727FA"/

 

wsp:val

"00674D30"/

 

wsp:val

"00677384"/

 

wsp:val

"00677D01"/

 

wsp:val

"006819DC"/

 

wsp:val

"006913F3"/

 

wsp:val

"00694A06"/

 

wsp:val

"00695734"/

 

wsp:val

"006958D3"/

 

wsp:val

"006A2796"/

 

wsp:val

"006A28D6"/

 

wsp:val

"006A33C1"/

 

wsp:val

"006A3872"/

 

wsp:val

"006A58F7"/

 

wsp:val

"006A5CE7"/

 

wsp:val

"006B07AB"/

 

wsp:val

"006B158A"/

 

wsp:val

"006B56BE"/

 

wsp:val

"006B5D95"/

 

wsp:val

"006B7B3F"/

 

wsp:val

"006C03DD"/

 

wsp:val

"006C30EB"/

 

wsp:val

"006C715C"/

 

wsp:val

"006D209E"/

 

wsp:val

"006D32FD"/

 

wsp:val

"006D37B7"/

 

wsp:val

"006D4EBC"/

 

wsp:val

"006D72DB"/

 

wsp:val

"006E1814"/

 

wsp:val

"006E1A1E"/

 

wsp:val

"006E7792"/

 

wsp:val

"006F2C3B"/

 

wsp:val

"006F5043"/

 

wsp:val

"006F695E"/

 

wsp:val

"007015B2"/

 

wsp:val

"007038FA"/

 

wsp:val

"007059F4"/

 

wsp:val

"007145E7"/

 

wsp:val

"00722345"/

 

wsp:val

"00722EB5"/

 

wsp:val

"00724460"/

 

wsp:val

"00725461"/

 

wsp:val

"00726B63"/

 

wsp:val

"00726D02"/

 

wsp:val

"007312D0"/

 

wsp:val

"00732B3F"/

 

wsp:val

"0073441C"/

 

wsp:val

"0073501E"/

 

wsp:val

"00740A28"/

 

wsp:val

"00740C00"/

 

wsp:val

"00744A69"/

 

wsp:val

"00745071"/

 

wsp:val

"007479D4"/

 

wsp:val

"00750469"/

 

wsp:val

"00750611"/

 

wsp:val

"007522E1"/

 

wsp:val

"00752C96"/

 

wsp:val

"00756160"/

 

wsp:val

"00757B2A"/

 

wsp:val

"00761A07"/

 

wsp:val

"00761BEF"/

 

wsp:val

"00763E3B"/

 

wsp:val

"00766E8F"/

 

wsp:val

"00766FFD"/

 

wsp:val

"00767F61"/

 

wsp:val

"00773BE3"/

 

wsp:val

"00776A3E"/

 

wsp:val

"00777B55"/

 

wsp:val

"007803BE"/

 

wsp:val

"00784E0D"/

 

wsp:val

"007853C4"/

 

wsp:val

"007855DD"/

 

wsp:val

"00785E99"/

 

wsp:val

"007864B6"/

 

wsp:val

"007876AB"/

 

wsp:val

"00787850"/

 

wsp:val

"007908B1"/

 

wsp:val

"00791D42"/

 

wsp:val

"007926EB"/

 

wsp:val

"007938F6"/

 

wsp:val

"00793D94"/

 

wsp:val

"00793F43"/

 

wsp:val

"0079418D"/

 

wsp:val

"007951C8"/

 

wsp:val

"007956AD"/

 

wsp:val

"00795CB1"/

 

wsp:val

"007976C6"/

 

wsp:val

"007A039C"/

 

wsp:val

"007A0C93"/

 

wsp:val

"007A3F34"/

 

wsp:val

"007A6098"/

 

wsp:val

"007A6875"/

 

wsp:val

"007A6CAA"/

 

wsp:val

"007B158C"/

 

wsp:val

"007B1F20"/

 

wsp:val

"007B1FA9"/

 

wsp:val

"007B6F53"/

 

wsp:val

"007C4B0D"/

 

wsp:val

"007D04D4"/

 

wsp:val

"007D2F2E"/

 

wsp:val

"007D3C82"/

 

wsp:val

"007D44B8"/

 

wsp:val

"007E2406"/

 

wsp:val

"007E2C4C"/

 

wsp:val

"007E49CA"/

 

wsp:val

"007F0813"/

 

wsp:val

"007F0BC5"/

 

wsp:val

"007F52E7"/

 

wsp:val

"00803032"/

 

wsp:val

"00804E73"/

 

wsp:val

"008053A8"/

 

wsp:val

"008077E2"/

 

wsp:val

"008102AB"/

 

wsp:val

"008127C4"/

 

wsp:val

"00812A54"/

 

wsp:val

"008130A2"/

 

wsp:val

"00813B0D"/

 

wsp:val

"00814032"/

 

wsp:val

"00814FF5"/

 

wsp:val

"008151B1"/

 

wsp:val

"00816285"/

 

wsp:val

"00822042"/

 

wsp:val

"00822E0F"/

 

wsp:val

"008236CF"/

 

wsp:val

"00826D6E"/

 

wsp:val

"008278B2"/

 

wsp:val

"00830537"/

 

wsp:val

"00831320"/

 

wsp:val

"00833B47"/

 

wsp:val

"008368D3"/

 

wsp:val

"00837D02"/

 

wsp:val

"0084521F"/

 

wsp:val

"00850C51"/

 

wsp:val

"008517BC"/

 

wsp:val

"00852C1E"/

 

wsp:val

"00852D31"/

 

wsp:val

"008549A9"/

 

wsp:val

"00855FE3"/

 

wsp:val

"008567F6"/

 

wsp:val

"008615EF"/

 

wsp:val

"00862FBA"/

 

wsp:val

"00863F20"/

 

wsp:val

"00866F50"/

 

wsp:val

"008715FF"/

 

wsp:val

"00872DBF"/

 

wsp:val

"00880168"/

 

wsp:val

"0088234D"/

 

wsp:val

"00883776"/

 

wsp:val

"00884F5B"/

 

wsp:val

"0088757F"/

 

wsp:val

"0089058A"/

 

wsp:val

"00894104"/

 

wsp:val

"008941E7"/

 

wsp:val

"008968A5"/

 

wsp:val

"008A3A59"/

 

wsp:val

"008A6ABD"/

 

wsp:val

"008B042F"/

 

wsp:val

"008B0671"/

 

wsp:val

"008B11B9"/

 

wsp:val

"008B4732"/

 

wsp:val

"008B4A4A"/

 

wsp:val

"008B51DC"/

 

wsp:val

"008B6D06"/

 

wsp:val

"008B7021"/

 

wsp:val

"008B73EC"/

 

wsp:val

"008B776D"/

 

wsp:val

"008C013D"/

 

wsp:val

"008C0EF9"/

 

wsp:val

"008C1617"/

 

wsp:val

"008C3DA2"/

 

wsp:val

"008C4772"/

 

wsp:val

"008C51D3"/

 

wsp:val

"008C5D16"/

 

wsp:val

"008C6043"/

 

wsp:val

"008D6C33"/

 

wsp:val

"008E080C"/

 

wsp:val

"008E51B0"/

 

wsp:val

"008F0223"/

 

wsp:val

"008F3A6C"/

 

wsp:val

"008F592C"/

 

wsp:val

"009003B9"/

 

wsp:val

"00900CFF"/

 

wsp:val

"00901D8F"/

 

wsp:val

"009027C6"/

 

wsp:val

"00902B99"/

 

wsp:val

"009035A3"/

 

wsp:val

"009040C2"/

 

wsp:val

"009112CC"/

 

wsp:val

"009147C1"/

 

wsp:val

"0091758E"/

 

wsp:val

"0092033B"/

 

wsp:val

"00924E7C"/

 

wsp:val

"00925881"/

 

wsp:val

"009269F8"/

 

wsp:val

"00926CF3"/

 

wsp:val

"009303AC"/

 

wsp:val

"00930CAA"/

 

wsp:val

"009311A0"/

 

wsp:val

"00940729"/

 

wsp:val

"00944B91"/

 

wsp:val

"009459DC"/

 

wsp:val

"00945E0A"/

 

wsp:val

"009474A1"/

 

wsp:val

"00947C61"/

 

wsp:val

"009520C2"/

 

wsp:val

"00952D02"/

 

wsp:val

"00953685"/

 

wsp:val

"0095395B"/

 

wsp:val

"009556E9"/

 

wsp:val

"00956FFE"/

 

wsp:val

"0096200D"/

 

wsp:val

"00962826"/

 

wsp:val

"00966955"/

 

wsp:val

"00966EBF"/

 

wsp:val

"0097032B"/

 

wsp:val

"00972485"/

 

wsp:val

"00975787"/

 

wsp:val

"00977E78"/

 

wsp:val

"0098312D"/

 

wsp:val

"009867D9"/

 

wsp:val

"00987C99"/

 

wsp:val

"00990AE3"/

 

wsp:val

"00991DB9"/

 

wsp:val

"00993919"/

 

wsp:val

"00994ABC"/

 

wsp:val

"009955E1"/

 

wsp:val

"00996C4B"/

 

wsp:val

"009A0043"/

 

wsp:val

"009A09D2"/

 

wsp:val

"009A27A2"/

 

wsp:val

"009A3C1B"/

 

wsp:val

"009A4016"/

 

wsp:val

"009A5975"/

 

wsp:val

"009A6E1A"/

 

wsp:val

"009C05E2"/

 

wsp:val

"009C1595"/

 

wsp:val

"009C39D3"/

 

wsp:val

"009C4542"/

 

wsp:val

"009C4D75"/

 

wsp:val

"009C705E"/

 

wsp:val

"009D068C"/

 

wsp:val

"009D1C10"/

 

wsp:val

"009D26B3"/

 

wsp:val

"009D2A3B"/

 

wsp:val

"009D3145"/

 

wsp:val

"009D4191"/

 

wsp:val

"009D4EEF"/

 

wsp:val

"009D5369"/

 

wsp:val

"009D61D3"/

 

wsp:val

"009E2B31"/

 

wsp:val

"009E311A"/

 

wsp:val

"009E5161"/

 

wsp:val

"009E62C7"/

 

wsp:val

"009E7579"/

 

wsp:val

"009E7A4B"/

 

wsp:val

"009F1F10"/

 

wsp:val

"009F2AE0"/

 

wsp:val

"009F395B"/

 

wsp:val

"009F4FD4"/

 

wsp:val

"009F65A3"/

 

wsp:val

"009F65C1"/

 

wsp:val

"00A0098B"/

 

wsp:val

"00A0346C"/

 

wsp:val

"00A055F9"/

 

wsp:val

"00A10133"/

 

wsp:val

"00A1256F"/

 

wsp:val

"00A14473"/

 

wsp:val

"00A162BF"/

 

wsp:val

"00A21CBF"/

 

wsp:val

"00A21F0A"/

 

wsp:val

"00A22D0D"/

 

wsp:val

"00A24A2F"/

 

wsp:val

"00A25588"/

 

wsp:val

"00A27133"/

 

wsp:val

"00A31375"/

 

wsp:val

"00A3200D"/

 

wsp:val

"00A334F1"/

 

wsp:val

"00A35090"/

 

wsp:val

"00A36226"/

 

wsp:val

"00A37B21"/

 

wsp:val

"00A37B59"/

 

wsp:val

"00A41D17"/

 

wsp:val

"00A439A1"/

 

wsp:val

"00A45E79"/

 

wsp:val

"00A4658F"/

 

wsp:val

"00A47BEE"/

 

wsp:val

"00A50528"/

 

wsp:val

"00A509DF"/

 

wsp:val

"00A521A2"/

 

wsp:val

"00A601CC"/

 

wsp:val

"00A6067B"/

 

wsp:val

"00A6103E"/

 

wsp:val

"00A6675A"/

 

wsp:val

"00A674B0"/

 

wsp:val

"00A6775F"/

 

wsp:val

"00A7579B"/

 

wsp:val

"00A7606F"/

 

wsp:val

"00A77836"/

 

wsp:val

"00A8539B"/

 

wsp:val

"00A85B93"/

 

wsp:val

"00AA1FE9"/

 

wsp:val

"00AA4291"/

 

wsp:val

"00AA4876"/

 

wsp:val

"00AA6F99"/

 

wsp:val

"00AB1DAC"/

 

wsp:val

"00AB226C"/

 

wsp:val

"00AB29CA"/

 

wsp:val

"00AB3869"/

 

wsp:val

"00AB7F70"/

 

wsp:val

"00AC4524"/

 

wsp:val

"00AC748B"/

 

wsp:val

"00AC7F97"/

 

wsp:val

"00AD2140"/

 

wsp:val

"00AD2576"/

 

wsp:val

"00AD6764"/

 

wsp:val

"00AD7A8C"/

 

wsp:val

"00AE1A54"/

 

wsp:val

"00AE6CCE"/

 

wsp:val

"00AF0192"/

 

wsp:val

"00AF24DF"/

 

wsp:val

"00AF2E58"/

 

wsp:val

"00AF3060"/

 

wsp:val

"00AF3534"/

 

wsp:val

"00AF4A8A"/

 

wsp:val

"00AF53CC"/

 

wsp:val

"00AF5CC0"/

 

wsp:val

"00AF60C9"/

 

wsp:val

"00AF60E7"/

 

wsp:val

"00AF765A"/

 

wsp:val

"00B00249"/

 

wsp:val

"00B0295D"/

 

wsp:val

"00B06283"/

 

wsp:val

"00B0646F"/

 

wsp:val

"00B0723D"/

 

wsp:val

"00B1338F"/

 

wsp:val

"00B15AE4"/

 

wsp:val

"00B166CF"/

 

wsp:val

"00B20C3D"/

 

wsp:val

"00B2101A"/

 

wsp:val

"00B23FB7"/

 

wsp:val

"00B2523E"/

 

wsp:val

"00B257F4"/

 

wsp:val

"00B304A8"/

 

wsp:val

"00B30B9F"/

 

wsp:val

"00B30DBB"/

 

wsp:val

"00B33CE4"/

 

wsp:val

"00B34F4A"/

 

wsp:val

"00B35F96"/

 

wsp:val

"00B37140"/

 

wsp:val

"00B3796A"/

 

wsp:val

"00B42383"/

 

wsp:val

"00B43081"/

 

wsp:val

"00B46910"/

 

wsp:val

"00B5345E"/

 

wsp:val

"00B6144C"/

 

wsp:val

"00B61CE6"/

 

wsp:val

"00B65508"/

 

wsp:val

"00B701B2"/

 

wsp:val

"00B7229C"/

 

wsp:val

"00B74D4C"/

 

wsp:val

"00B77EB8"/

 

wsp:val

"00B81565"/

 

wsp:val

"00B823D4"/

 

wsp:val

"00B8720C"/

 

wsp:val

"00B8748F"/

 

wsp:val

"00B87DBB"/

 

wsp:val

"00B92037"/

 

wsp:val

"00B956CD"/

 

wsp:val

"00B966F5"/

 

wsp:val

"00B97A01"/

 

wsp:val

"00BA500D"/

 

wsp:val

"00BA6CD2"/

 

wsp:val

"00BA7582"/

 

wsp:val

"00BA7621"/

 

wsp:val

"00BB030E"/

 

wsp:val

"00BB049E"/

 

wsp:val

"00BB12D6"/

 

wsp:val

"00BB1DE0"/

 

wsp:val

"00BB34B4"/

 

wsp:val

"00BB35CE"/

 

wsp:val

"00BB3658"/

 

wsp:val

"00BB646A"/

 

wsp:val

"00BB6D5A"/

 

wsp:val

"00BC0940"/

 

wsp:val

"00BC22EA"/

 

wsp:val

"00BC3486"/

 

wsp:val

"00BC4998"/

 

wsp:val

"00BC7092"/

 

wsp:val

"00BD090A"/

 

wsp:val

"00BD3184"/

 

wsp:val

"00BD38DF"/

 

wsp:val

"00BD3E8C"/

 

wsp:val

"00BD4F86"/

 

wsp:val

"00BD70E3"/

 

wsp:val

"00BD7823"/

 

wsp:val

"00BE011F"/

 

wsp:val

"00BE3571"/

 

wsp:val

"00BE4BEB"/

 

wsp:val

"00BE6A0D"/

 

wsp:val

"00BE7834"/

 

wsp:val

"00BF0574"/

 

wsp:val

"00BF16C9"/

 

wsp:val

"00BF289E"/

 

wsp:val

"00BF3B8A"/

 

wsp:val

"00BF642B"/

 

wsp:val

"00BF7AC5"/

 

wsp:val

"00C00174"/

 

wsp:val

"00C019BF"/

 

wsp:val

"00C01A82"/

 

wsp:val

"00C029A0"/

 

wsp:val

"00C04039"/

 

wsp:val

"00C046BF"/

 

wsp:val

"00C0797B"/

 

wsp:val

"00C11F4C"/

 

wsp:val

"00C14969"/

 

wsp:val

"00C20963"/

 

wsp:val

"00C20FF0"/

 

wsp:val

"00C23533"/

 

wsp:val

"00C26BAB"/

 

wsp:val

"00C309E9"/

 

wsp:val

"00C31183"/

 

wsp:val

"00C31A5B"/

 

wsp:val

"00C323AD"/

 

wsp:val

"00C3284D"/

 

wsp:val

"00C33368"/

 

wsp:val

"00C363BE"/

 

wsp:val

"00C3702B"/

 

wsp:val

"00C4091A"/

 

wsp:val

"00C4347A"/

 

wsp:val

"00C4361C"/

 

wsp:val

"00C43850"/

 

wsp:val

"00C43978"/

 

wsp:val

"00C470E4"/

 

wsp:val

"00C47C1B"/

 

wsp:val

"00C47E01"/

 

wsp:val

"00C504D7"/

 

wsp:val

"00C52521"/

 

wsp:val

"00C626A6"/

 

wsp:val

"00C62A7B"/

 

wsp:val

"00C62DC9"/

 

wsp:val

"00C63CCC"/

 

wsp:val

"00C63E82"/

 

wsp:val

"00C64035"/

 

wsp:val

"00C65439"/

 

wsp:val

"00C66262"/

 

wsp:val

"00C70614"/

 

wsp:val

"00C70BA7"/

 

wsp:val

"00C717F2"/

 

wsp:val

"00C72276"/

 

wsp:val

"00C725A4"/

 

wsp:val

"00C7331E"/

 

wsp:val

"00C73583"/

 

wsp:val

"00C737D7"/

 

wsp:val

"00C73E79"/

 

wsp:val

"00C74864"/

 

wsp:val

"00C748E1"/

 

wsp:val

"00C7557A"/

 

wsp:val

"00C77001"/

 

wsp:val

"00C7734A"/

 

wsp:val

"00C7789C"/

 

wsp:val

"00C80DBB"/

 

wsp:val

"00C82016"/

 

wsp:val

"00C82322"/

 

wsp:val

"00C8263A"/

 

wsp:val

"00C85461"/

 

wsp:val

"00C86258"/

 

wsp:val

"00C9011E"/

 

wsp:val

"00C90C93"/

 

wsp:val

"00C92835"/

 

wsp:val

"00C92A57"/

 

wsp:val

"00C94172"/

 

wsp:val

"00C9467F"/

 

wsp:val

"00C949E9"/

 

wsp:val

"00C96078"/

 

wsp:val

"00C961C4"/

 

wsp:val

"00CA0E4C"/

 

wsp:val

"00CA7F5C"/

 

wsp:val

"00CB510C"/

 

wsp:val

"00CB61C6"/

 

wsp:val

"00CB6E4E"/

 

wsp:val

"00CC1BCE"/

 

wsp:val

"00CC2F2F"/

 

wsp:val

"00CC4270"/

 

wsp:val

"00CC52E6"/

 

wsp:val

"00CC6EB3"/

 

wsp:val

"00CD1E68"/

 

wsp:val

"00CD52C4"/

 

wsp:val

"00CD5751"/

 

wsp:val

"00CD729E"/

 

wsp:val

"00CD783C"/

 

wsp:val

"00CE1192"/

 

wsp:val

"00CE286E"/

 

wsp:val

"00CE592E"/

 

wsp:val

"00CE6810"/

 

wsp:val

"00CE7583"/

 

wsp:val

"00CE78DF"/

 

wsp:val

"00CF0087"/

 

wsp:val

"00CF02EF"/

 

wsp:val

"00CF487A"/

 

wsp:val

"00CF608E"/

 

wsp:val

"00CF7E7D"/

 

wsp:val

"00D003A0"/

 

wsp:val

"00D023B4"/

 

wsp:val

"00D053C7"/

 

wsp:val

"00D05D2A"/

 

wsp:val

"00D062EE"/

 

wsp:val

"00D07672"/

 

wsp:val

"00D1190D"/

 

wsp:val

"00D12242"/

 

wsp:val

"00D131DC"/

 

wsp:val

"00D13C5C"/

 

wsp:val

"00D15471"/

 

wsp:val

"00D1639B"/

 

wsp:val

"00D167E3"/

 

wsp:val

"00D20156"/

 

wsp:val

"00D21476"/

 

wsp:val

"00D22252"/

 

wsp:val

"00D24C9D"/

 

wsp:val

"00D27634"/

 

wsp:val

"00D27688"/

 

wsp:val

"00D325A5"/

 

wsp:val

"00D335FA"/

 

wsp:val

"00D3417C"/

 

wsp:val

"00D3477A"/

 

wsp:val

"00D355E1"/

 

wsp:val

"00D40244"/

 

wsp:val

"00D40AB4"/

 

wsp:val

"00D45A7A"/

 

wsp:val

"00D47D96"/

 

wsp:val

"00D516B5"/

 

wsp:val

"00D53C25"/

 

wsp:val

"00D54ACA"/

 

wsp:val

"00D56C12"/

 

wsp:val

"00D6328F"/

 

wsp:val

"00D73BE5"/

 

wsp:val

"00D762F5"/

 

wsp:val

"00D81F51"/

 

wsp:val

"00D8253F"/

 

wsp:val

"00D83078"/

 

wsp:val

"00D843E0"/

 

wsp:val

"00D844FE"/

 

wsp:val

"00D84552"/

 

wsp:val

"00D84A0F"/

 

wsp:val

"00D86949"/

 

wsp:val

"00D91FC2"/

 

wsp:val

"00D94CA2"/

 

wsp:val

"00D96C07"/

 

wsp:val

"00D9790C"/

 

wsp:val

"00DA2C6D"/

 

wsp:val

"00DA35B5"/

 

wsp:val

"00DA3735"/

 

wsp:val

"00DA59B4"/

 

wsp:val

"00DA5BD6"/

 

wsp:val

"00DA65D3"/

 

wsp:val

"00DA663A"/

 

wsp:val

"00DA67C7"/

 

wsp:val

"00DA7508"/

 

wsp:val

"00DB2FA1"/

 

wsp:val

"00DB516B"/

 

wsp:val

"00DB5899"/

 

wsp:val

"00DC0C8F"/

 

wsp:val

"00DC1605"/

 

wsp:val

"00DC5BCA"/

 

wsp:val

"00DC78BD"/

 

wsp:val

"00DD1A03"/

 

wsp:val

"00DD20B7"/

 

wsp:val

"00DD26FB"/

 

wsp:val

"00DD3B3F"/

 

wsp:val

"00DD55D6"/

 

wsp:val

"00DD5DB5"/

 

wsp:val

"00DD68C9"/

 

wsp:val

"00DE1E07"/

 

wsp:val

"00DE2A46"/

 

wsp:val

"00DE2D61"/

 

wsp:val

"00DE51D6"/

 

wsp:val

"00DE5D4C"/

 

wsp:val

"00DF0553"/

 

wsp:val

"00DF06D5"/

 

wsp:val

"00DF1EC8"/

 

wsp:val

"00DF34E9"/

 

wsp:val

"00DF35E7"/

 

wsp:val

"00DF5709"/

 

wsp:val

"00E00528"/

 

wsp:val

"00E00DAF"/

 

wsp:val

"00E018D3"/

 

wsp:val

"00E01BED"/

 

wsp:val

"00E03011"/

 

wsp:val

"00E056FB"/

 

wsp:val

"00E06068"/

 

wsp:val

"00E106A7"/

 

wsp:val

"00E16A16"/

 

wsp:val

"00E20254"/

 

wsp:val

"00E21770"/

 

wsp:val

"00E2496C"/

 

wsp:val

"00E26430"/

 

wsp:val

"00E319A6"/

 

wsp:val

"00E344F3"/

 

wsp:val

"00E34A8F"/

 

wsp:val

"00E356EB"/

 

wsp:val

"00E35FED"/

 

wsp:val

"00E4083A"/

 

wsp:val

"00E41552"/

 

wsp:val

"00E422E5"/

 

wsp:val

"00E47D28"/

 

wsp:val

"00E51CF7"/

 

wsp:val

"00E52D1F"/

 

wsp:val

"00E52DB0"/

 

wsp:val

"00E53AE5"/

 

wsp:val

"00E559AF"/

 

wsp:val

"00E562D1"/

 

wsp:val

"00E573DF"/

 

wsp:val

"00E57796"/

 

wsp:val

"00E60533"/

 

wsp:val

"00E60704"/

 

wsp:val

"00E71068"/

 

wsp:val

"00E7134D"/

 

wsp:val

"00E745C4"/

 

wsp:val

"00E77576"/

 

wsp:val

"00E77EC4"/

 

wsp:val

"00E80153"/

 

wsp:val

"00E807EE"/

 

wsp:val

"00E81749"/

 

wsp:val

"00E8232F"/

 

wsp:val

"00E83828"/

 

wsp:val

"00E84FD3"/

 

wsp:val

"00E869CD"/

 

wsp:val

"00E90126"/

 

wsp:val

"00E94D27"/

 

wsp:val

"00E9518D"/

 

wsp:val

"00EA0AD7"/

 

wsp:val

"00EA4560"/

 

wsp:val

"00EA4A68"/

 

wsp:val

"00EA50CC"/

 

wsp:val

"00EA70DB"/

 

wsp:val

"00EB0C87"/

 

wsp:val

"00EB1A66"/

 

wsp:val

"00EB1F4C"/

 

wsp:val

"00EB5B22"/

 

wsp:val

"00EB653C"/

 

wsp:val

"00EB6FA1"/

 

wsp:val

"00EC2265"/

 

wsp:val

"00EC5499"/

 

wsp:val

"00EC7E5D"/

 

wsp:val

"00ED19E6"/

 

wsp:val

"00ED5A7A"/

 

wsp:val

"00ED7EB0"/

 

wsp:val

"00EE13B7"/

 

wsp:val

"00EE365B"/

 

wsp:val

"00EE39A4"/

 

wsp:val

"00EE4CEE"/

 

wsp:val

"00EE6387"/

 

wsp:val

"00EE67AC"/

 

wsp:val

"00EF0CDB"/

 

wsp:val

"00EF485C"/

 

wsp:val

"00EF4A14"/

 

wsp:val

"00EF5EBF"/

 

wsp:val

"00EF6560"/

 

wsp:val

"00EF7579"/

 

wsp:val

"00EF7CB5"/

 

wsp:val

"00F027A9"/

 

wsp:val

"00F02DF0"/

 

wsp:val

"00F106CE"/

 

wsp:val

"00F10BC2"/

 

wsp:val

"00F113C4"/

 

wsp:val

"00F13D38"/

 

wsp:val

"00F167B1"/

 

wsp:val

"00F17C6A"/

 

wsp:val

"00F2047C"/

 

wsp:val

"00F208BE"/

 

wsp:val

"00F216F5"/

 

wsp:val

"00F22A95"/

 

wsp:val

"00F22FDA"/

 

wsp:val

"00F25670"/

 

wsp:val

"00F25E76"/

 

wsp:val

"00F261CE"/

 

wsp:val

"00F2722A"/

 

wsp:val

"00F3095A"/

 

wsp:val

"00F3165F"/

 

wsp:val

"00F31776"/

 

wsp:val

"00F32DDB"/

 

wsp:val

"00F349BE"/

 

wsp:val

"00F4294F"/

 

wsp:val

"00F42A7D"/

 

wsp:val

"00F515CA"/

 

wsp:val

"00F520E2"/

 

wsp:val

"00F526C4"/

 

wsp:val

"00F53671"/

 

wsp:val

"00F53751"/

 

wsp:val

"00F5455E"/

 

wsp:val

"00F552B7"/

 

wsp:val

"00F557BA"/

 

wsp:val

"00F55C3A"/

 

wsp:val

"00F60102"/

 

wsp:val

"00F619CE"/

 

wsp:val

"00F6713E"/

 

wsp:val

"00F67CC1"/

 

wsp:val

"00F7735A"/

 

wsp:val

"00F80422"/

 

wsp:val

"00F80967"/

 

wsp:val

"00F81774"/

 

wsp:val

"00F86B28"/

 

wsp:val

"00F935C2"/

 

wsp:val

"00F946F9"/

 

wsp:val

"00FA2457"/

 

wsp:val

"00FA279C"/

 

wsp:val

"00FA5432"/

 

wsp:val

"00FA574E"/

 

wsp:val

"00FA6A6E"/

 

wsp:val

"00FB7BE1"/

 

wsp:val

"00FC4E7F"/

 

wsp:val

"00FC6095"/

 

wsp:val

"00FD5B47"/

 

wsp:val

"00FD7D2F"/

 

wsp:val

"00FE2269"/

 

wsp:val

"00FE2BC4"/

 

wsp:val

"00FE44B1"/

 

wsp:val

"00FE569B"/

 

wsp:val

"00FE66B8"/

 

wsp:val

"00FF4459"/

 

wsp:val

"00FF4E23"/

 

wsp:val

"00FF566E"/

 

wsp:val

"00FF6318"/

 

wsp:val

"00FF6B10"/

 

 

 

 

w:val

"center"/

 

cs

w:val

"24"/

 

w:val

"EN

US"/

 

 

 

cs

w:val

"24"/

 

 

id

"_x0000_t75"

coordsize

"21600,21600"

o:spt

"75"

o:preferrelative

"t"

path

"m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe"

filled

"f"

stroked

"f"

 

joinstyle

"miter"/

 

eqn

"if

lineDrawn

pixelLineWidth

0"/

 

eqn

"sum

@0

1

0"/

 

eqn

"sum

0

0

@1"/

 

eqn

"prod

@2

1

2"/

 

eqn

"prod

@3

21600

pixelWidth"/

 

eqn

"prod

@3

21600

pixelHeight"/

 

eqn

"sum

@0

0

1"/

 

eqn

"prod

@6

1

2"/

 

eqn

"prod

@7

21600

pixelWidth"/

 

eqn

"sum

@8

21600

0"/

 

eqn

"prod

@7

21600

pixelHeight"/

 

eqn

"sum

@10

21600

0"/

 

o:extrusionok

"f"

gradientshapeok

"t"

o:connecttype

"rect"/

 

v:ext

"edit"

aspectratio

"t"/

 

w:name

"wordml://03000001.png"

iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAgEAAAHoCAMAAADnm8yEAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACx

jwv8YQUAAAAgY0hSTQAAeiYAAICEAAD6AAAAgOgAAHUwAADqYAAAOpgAABdwnLpRPAAAAwBQTFRF

AAAA////AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAZ3bsYwAAABh0RVh0U29mdHdhcmUAUGFpbnQuTkVU

IHYzLjM2qefiJQAAS8pJREFUeF7tnYfWJDmqhPe+/0vf+VOYCEAmXZnOmnN2u4wsfARIWTP9v//7

/fNsC/zv2dv/v//JP881w8MJUAD+91w7PHfnf1HvADwXgR8BT88DPwJ+BDy3BqIs8Fgz/DTgpwGP

hX+rA2X38PJp9niyBqDbn4vAkwn4nQa3E/HTRI/2+7sP+BHwuxR8tgbApeBjtfDhBPyeDD28DrBa

8LEK8KsDfnXAs7PA7yzw04CfBvw04Pdc4MFFkD0ZeO6d8C8LtGdDPwKeqgPq+R8BTyVAg98fEz/P

Es+uBP3p4PM8rzt+OgFyLfxcAB56K7ydAJvX22EwvnwQEc/UAHc73gYADD8C/l0L/MW7ux2uBPGG+Elx8aS9xn9LiHwe3vy7IRB39jACxM/8C0F+PmRNHgLBswhw7/bi/3nnwycRIEU/6AD+QiQXCM8Q

gQcRoKW+Hf/A59uxEM6GcFz81zl4DgFw7pMLgIIAuSbGM+KPgH/EApb4W6S3c0HMAv6coJ0Y/5G9

D7fxiE2yvNvD4EyAeh0Twr9OwWMJ2OKfL4c87v2bf93/z/mFSItuPgPGf28w3go+Iw88SQMsGZT3

QoEPafzTgLda4EI8PZ5bgZc1AT/zx4aX7f9jy8oLjXyZsXSgK4txIkDyQZEFMPKvPQ1cuZlLLf2x

BODpbbbjhfgKt8BwFtTnRXQntDz7Wq2wPNxspzd8/6kEgMfmu16Ir0AAnASYgNxuPP1OAj7Q3B+4

JHfJ2k+4mtMmnNhJ/6/psBKE64LpsDbQ+M6FJp8D/doWM8u9djU2m9p+xbtLbmAn6LAY8f6DMZx8

rgBz/JzQKVJvMPdHEgCLmsd3s+rMtkCANI5631ro/4MQdb3iY44cFyH+NIt/2nqa5cGiMwTEDbNI

JG/BY0Dm4CgBIyvGDUwT1ot14AMJyEsaUbBIQLj/hQoD80NTgdVfiZCuVH7r5KfPYuCDCUC/90N8

LwEtB8j/1NkS+9tY9n+zxIL/3mkdtzACbuBHwKxsb99zAHUR2ElA/UNhzdWaE7wqnGV4WWlPAfRz

KgZ+BCwkOjuxmbV6CCwTYE/+FC0uAbZ4DQTMUJUY74gFftzJBwuWuL3Jx2WBTpVmp/RokXUC6L8W

EKLeNaf5DTPQwlmgsCKsi1HbVON2v65P8ElraeJPzjDjtU+LfR0gwB8S21z4iMBS0MyKKkvlwlwf

gtbMRn319x9GwOCcFk6JmGHFkTPbaaXfWEIVwHeO4Xw8/bVZqQEN6PxP+3g2+Mu+/5yViL3YaiFc

K7OYO6c2WyNgE6ElJ7kGlNrUAWDpAmu6l+safBQBoPlWPNNn5b6Xq6xIgJ/99ZXdCC0RMLw3YDWD

wwUmtuv8eHykTyLABVMO7RRFXencTUCLXbz9aapsueFPAzoFPltaV9zTgFDGRCqOu+3Cnh9DQMqX

ssnNXVrundUArPMth1vdn6uDmaFXCACY6ppgNsnN338TAZ3yaVkDYgUIEmNFCNSHC5afECBsuZz0

MF+Y6rYmn0CAVlQe9bBdMto5DeA7f6/jWA08R8yNPiQAVx425G9NgOaT3dTiAwiIRuAMfDkBeEBT

FdiKAPhn9bQ2ICAMyD63d+v6dZP/3387pRHH+kghI4m0yAENX7biEGmtJ3JC9k8sIQxsrpMgAWni

P5IbzbT0OHf3tvM2n/PAb9YAz5S9WIcqPZpEDEsEsIDkHt0rJ5v/IAF5YnA+WjkQoAi/yN95mrcT

kK7NaI0WtPEsCNHnBMw1dRT8XRmqONLgbp3o4kqbIwFBwJIOvPGO8L0EcOCLIKDBpUhrgVLWh/F5

njDTC6kFBOwJUmcMV4tqsJjwtcwM0rttp6d7Lw3UmwkY+yNaoKOkckEDS534cZTBs+mTLM8zyWh+

qvK0CIgx3uyyR3VuyxL3EiAa2Q/I8EwuiaFpQCkB5XOXVehyZ1nM+Dqw6/xQkbZyYkCAFQBKQ9/H

hTheB8StBIi1uquVOMBL89AWCODkIH5O/hC7DqbULvm5HXwy6V+gpw4lgw4I4CcFw6eFMzOeo+FO

AqZwBwL+CqqULqUEKKqArWmS8AkCf1oiIdWj56/FmIA8L5xLmVQpKmJisWU0RuQxRT3rZsaxsp1h

4EYCdNETc3JCpL00u+UQAFUsU+mgstYRswJ4ah7dkpgnqonTSk1vogO9d7nBGAczZftcAlqYziQZ

Q6pLQJkEuhowmrLFE3gQz3LCwVQDuuJD0U4ZJ+9AuJiovJ4mbjox3qoBdhHfMWgRM4GAJvQxO3i/

npLPoEP/F5o+g7ZQEBgl5AEoCO2b6mjbN5La8Uyo9y1yy6gt9tt5Z1TkZAQeSMBYAjQ5DWvFM068

TQMgrU7SMuomL8f1L35ufTrpeKgBftzD3q2LYTuQLWlYdYYKRcczqY/SIO8lJ/VWzIXLGVf3dnTD

mGYheegxSWBYJXFTLwR5lWDnkAZg6npjWgOgf9oYTsDoQsBadtDDzTSiJgS07/smwjuFWyqBmzXA

jDAMSlcB1INWQ6aoMrPCOcHd0emh07fxZRbwFjk2XkFz8LamgTw8tOQTbUqFtOEITUiEAOdXE9Al

TUyJkmgmOE7AUMPVpmh6/oxBLAhIANTHVgiAWPuxCPVzgEfAkJTjUn6jBmjtIhHTVwEscsj2PQJQ

W4MvPMLTfOIDk4G0dTWxlR/lkkW1IwOo+FUUMwGuSVu/AQAqSOOS+jgA9/37S75i0N3apGQDNMdR

AvqeM3tXAZUIKD3zQgJkQVYKfFsWMMe2cOljSvU3trTyLPbVETtiXEzl2VuCdUKJwpebdQngfOap

rO0cDACZfagALnXS7JsJGCgdXHdstqpMVROQ/a+fFBnA7yVGPAKsPenqz1qRruAnsE0jB27F0Pjm

LCB3YjMN8BIdwkf2Ha008UIFgBEwFiTz4uayXq4YzR+KgMY0DcSqPiWgDfjVBNRHOrcUnK6yCKjo

Bq8OGegljTb6VEutgeAQE9iy/+XYGbShLYBQq1Mk9fsXCBhs087X4iNSgRhCEhLLOcAagtn7gqTO

MSdlZA4REIQtHGeq9TA4X04A1TRBJjUmWX9RIaqMvK4BGsimNEPvO176TOMEAR7tMGcbD9zbSUuy

Q+357QT0EJDduy620IuQZPFejMMU/9MUQAoDd3/Bh735k6tT2tG0JiCA5uTQAEP8IwR0MurmdGM+

Jeo6ersMlL6a1SJJGIxNnWcFgULekoQAAf7fNEt7TiHzLxCQL78qJ1aX8tBu7geXTfdd8GK2d8zS

UAXgM4A8Nm2BUpd/w3QhAZ3erRpie30pAegv2dXMhfUlaWHOmQ4jNpxTBwBgukFRSkm5np1AKsSj

udYFj0dBUtoaOQsM1z2vbjotbnwukFMub4EsZLagbddBRam6mwxq67ZPR+biBovD13vpzAQEyEIC

YP2LiMN+7ne8jYDqITsZH3yuoZHAZ8GwR7Kg0Yse4uAc2/EsArikcqZEQDCFCkXofI8E3PdkaJbJ

NBhZazcWBg7KDk+NY5NCRyaRlCIy/RpgOulQZuzk4yTHq4qXVQFjc5+UnPEuLNIQhabvewgo2gYE

MgHTfZWiPA7thOZoE5rGkAD+Kcy/SYBovac+MpJmiKW0NMvlWL/X9cCaDCxIDg40rTG0sTwCY6WA

TSXBv+0kcLMGVFpomwtebG3nrqUL5Gk0Q4OVoUPzJRoTAtsOx13FMGifkf9XLbPHHNZ29ybXZ6lN

7ngz6PoUfVKnk3Cur2URrujNXRO48NQnWsareZVTVEceNWnc46t7Ro1rhq32KlolYGh0garz3Lbf

VWuNXR7d3WlbXVOAWV9VvHJBYCI3HMXTlV67cizxuyW7Mty7BLTnPzMv6kXJPk2fOaSedWcvx/Nu

AsYXGrswn+WrnYNFrQUTEszVsBI/fQRCmSVhFj7tjLyPF0+ROsnIDp2FjLsOdotrVavxLg/uprOJ

izUgL9WKHpupVoGhcFbmXEVgxYs9D6/0hXXEMqKPZ3/gCoB4UrwUgesJACknDfCZOkeE/r46cowM

9F6TIO9QT8VUwVyaK4LUWXcrAjt4YHzYerHtZqYdO5np+OUE4LO9HQQw5mHVfWOtOMZ67wkdbbs8

wV6su3RQ1eynA0wI07PGzOskVnsaz9tKIYzFoDDGj7mKkYYSUJ6vd3inlZk7IucAAUUwtbNBGWUd

qvuPRgGGLyKg3n/HET0HjUwYImnGxBxhbzEbq/i+d7arEOjyWFgH27bXO1ie7fnyLMA7K0kfuLTW

hq5lxQuV27hPV3MH9qn6TLDoLTR/PpCA7JLCptf57bqRqLzRYWGj7vcO/rVRBrFi7phhvjcFkODO

B3cs6rYF8V0ioW1VBy5dN81XfFsdoKaACcCBhEC1ytLZHcGofrs1ied9hvlr3Z07DDVDMWt2TwIq

c8W2hZX3bw1k80zn2Fdz1FZ3eSBpM0RgWS+7GW9s9izXRza6OsrMKUlpe8pWmcjbtgtR1YEjGyr6

XJ4FtjXq/wX5ndYvpV72dipm7yovu++YvRICw9m6c1QETBZUPBFo1vkiAtq2u3q3pAK9WOkOHYNI

7XUMAC263fRtnDKmx880aAGd9FJGiBmQFHY1Qc33fbkGEKfJUdPHA2HFU9XwDJNzjXjLSJxbg1uo

leMicBOLYy7tA7yK9z8W+tspcNtNL6wWV8M0Huk01uWkVFTegKMW6FuyXLOJLSr0QQPu2+yUgPVA

XNkH6h0TIE73bX40AWJkVF9im844E48Mc0CuN6IKmBktbFYcocqhkzMHaHvQgioz4OYmO9EFFjpW

KICIwD6cu60X4nB9pkixG7GK/LlVJjH29zXmfduLa+U2Lyjn6nY3R2s/GcT0FyEXXma3dEt7xfXD

66QAH04AxrjmrVoE5leb05ANShPvoQIJeocwRZoDXTxvQuIAOBPzfDDbC9sIUhrW/xhIqzDPdnvV

OBontBF9GsPa0M3Yaa0zq9nJqFBR9Y5HkITOdFCqs2TpzhJSZpuewzxtUZz+PNbpfL0M8sz3pl9r

DddabcJM2UzDNMgayHN/5FARizQHnrYK2X0B0dMsqI6HOrr1KCrGoCnGAuUDmit+A2vUl2LocazV

EmD80f1kXvuac+pWl2qAWJac4D4wMFDihvP3CQgp3zO979I+s9jHesDzPCkr5f9QC6DSe5HQtIa2

FClYoL1WSRQg1IhZ1bELiMsJwL+gQ+PPgjHqzqRA2hSltWn/g5/iUuRr4obx/G97NBX4G0J/nKM9

wFjoOP3LrSDEt8mlua4Jw9wWa/9VAF3wn0kQn8JBJAGIk+AbILvyX/a7noAsruo9j7ZFFTCf6MlP

wg0+V7jAJxZyUQU0gbI8o2oABGZ6O3WC+KKweaD6uNrU4RsTQABwneRCRGK1K8yHjW8nQIK4ljlK

b3mdXYkgBMDRHtlOnUiIFwQ5qYf8ZKOYo6Wkpaxkv36xCbKzGowAU+0LBgAznGoW9+va5QgXNxAQ

Fc8DizTU33TX3Q0cFOwiB7MKSGO64x9HhfjMNUMPHZLFbEQKy/RpyDAr23SESbBoJJW9I+4u+lxM

gOfqsH3cmkWPeKq/ht43NQGW442Av8wN2tyqtulxUOXCa4ZWAWAVwKPgenphPgKAw545C+v9ezvf

wg46riaADtMQ8xwgJGP79gMJAMUFBRpL5Uae6rP4dqIAUHmqwlsPrmnknck/LG7ZB2CLuQJcfBew

RcTySlcbUrRHnFE2yaqro4MyQ1kPka0eh5ncbMmhlSo2ZJpamBw4zKBgOpzifQQACOgVAAzmdYNN

Wl5PQKUCor4Bd1/aVJjN8YgQaq+FoThI4xhVH0+VPbO0JXrvtnKNFY15xaNeQd7tIAOgEVwNfTvc

VVm7zP93aIDYPFfctCvcCiXZuLccV9nsNpiQJJbk06DU8+KePgEuW3YLYZUhXEL0IYh+BO7DrJiU

2OeRALemj34RBTdogJ5/oq27e+SIS1YK3HcBkDsjiNq2OYhqrxYmBJj+GzdEFWSJcjlJqerpcOOr

BFyety8iIKqTyzoJPG4zvh4oZRVVPqOkbXOaVvx2g4PKjrqQZ9Rw5R6KlgWzVQmWLzIHLiX9qN16

KaUuFf6xkeRIRbhOK8G1BMCpBlYKi8TNAQJ9oVSxJYOCvf++l1wmsd6M6j7c3sj/6fS9+YAA6OEj

AD+kEnR4p2jm0I7uMjh6oaHb/g4CoFpjI+C+0fbBOgMY2eV6CCjs6UMSa40TOEp14lI+BlC8VI/x

mqpXW6RNlIOZlhzvsuqggdoDzGC4f5IG5ECIBIsTbNExWvq7Qeumc0EYD9zoA1r02rfVZFUr1Gmn

qEJIF0kEjPYELofxokDpV+x/OJacg+DCLGAHL1+qazf6AosEjqy1vYyVlZYBcJAG1NdqKAGiGXYW

BD90VwkIzHfiAsH7YQCy8uRMNJ9r1OJiArapgmbHCwIMHzPDzKuwBxl+sKtCBXJ0JxW3qx70jRUR

IAVzqVrwCWyYkkUHALr+ajaG4+3CfH1sz3SOgQ2+oXCgLfLCccOVstZanb1H7WK8csI1YYpjKzjx

1K8GF7qHARW2OpQLEKjqwYDGEkUVRNiHE8BPaUyZbTdBnrteKU04RcXP/Xadpzd7cEbMBDT7uvLr

e6wHxyHDIbwGgJSp6lyMK32NAeWvFyebrPgaDTBVsmPYdkqHJY5eV8EwibSpHxJrnj/9go1HKVvA

2RK1oDP/DgmAEUzSgiIG7Wrftin05Xn3XVQHYOj4YY0QgCcqQVZB08UEc5Uft1BL+p9Y0U0JsJwP

vbJ6FcbnDdcNJNSRepcsjP9gFnW+eMyl6iQEFxLgv6OTSFC5sjWDejvt6nRMBBOZnxpaadOQDKcP

/dlOlIDt4ggKQskJVCJOtGm+csK/vfEqk7iAFADSqtbkzHocgysJsARqzjTRwk8smmTnLGimdKdN

LctpmtkiD+8KUXElLqEH1gI6QOwRV7gEJuufEKAgFAWhDsqTX3YSgBrkOETsb9KxsDPHHa7n7CmL

9PRcN1gSjlQ3a3iRdGpK9xMedpUOeoFs1Gz8eNf+opYAkPLIosCZpC25lHwzARZYgG/c5uZui05n

aerhWTxSPW9iIxOYHjABsZgBZRCPDcNkac2AiWVypELnhMyJqqEL+EQNQIFNhmr79l1ZA/nCq3DW

4zPC1CbEFKNL0DDnalIdYmuxzNGUcs7cZLWqI80MKjlqATKJSYRrQYZ1Ui6v2u6yOkA31VszC4Gz

jBbwiuiKZVkesFyna2vCIzovSxFUPEOoozZ3VXG4amJqZ2Zw0Fg7oEFXVAztQ0sIna4wdYzoel0k

Ai4KhQq4PJ7bIQaJvYY8j1GtIuU1YwtUX8HJkIOyxAeGzdvLeRiQop4zkdB9epAQ0Z3xagSIAK24

LBJPLQ3liFOQVZtUfBt55nnw+kkAZGfq/KAAVrCyAvRD6XRKArJP2TgKSpNS11VWGFc1AD4SYHXh

eeFl5Nqq2mea192tpAGGjjOENB0xmSUZPZPqYpIpYJk4EW3mfFFyEwFad6Gxy12MCGhHL7HYqcg7

SgD53eq2U/lSwPMaVMrMbIiO7Tx6EKEjLMY+p/aVF0A1Cqw6yYJY2S3gLejm5gwCSADnc673XRvo

PCgfW0yeMZWeAyQLeFVCElhoDxgOj1JnzBKF+wqMonkh6QazYZ4jHbQh/uurWdpE++gawaIHCdCK

4GTeBUWjRKmPUCwepupp18NHbZL6nQG7XsTfbqiCoik833ou1jhA3tVQ50zvBbia9o8qPIzrHmQe

S9dezGw9TpUBGNqk5pQDRB7gOQGsDZd5ziT3E6C4F8tHPbWoQCt4BPgoJ23fvO2iZARI+c0ENOP6

mcBfn4kUGFR265aA7dvVaNgyehyyyVUicGZn1RrEhubLZnHU4LY/wp9EAI2k0Xp4tx5ymHqh0ISD

iyWdDRkp1f5mviLpbnbxTZcItMWyw9kaqpJXrWob57Bxy466B49mbmbb6xLAUXhKAZpL41KUQKVQ

v29WlfgPBJy2UtwuqR19mcIFibAvW5dLfHfNKBTjkDTzMhkB0gLQDT9SnNunz4/j6JkMUy6eDkwD

jIPTVtLp1dmRAAlG3q2RkT19HQBXa4DnsoEKgKsBAefb7+Yxig8BDxoAlJqyIyFZA7wmOEuAexaC

F0NfF0egdt18oQJcngUgv80QUDUuSN8cA2FzyPmo7vmGP9wIwGK21Li9j1Xh4WWAX92rCIARxoeo

ntJfqAB3EWBBJoFFtpP1i5HJEH4BJ5v3dHDU/JvkOwHbgCYtamKkUSG+jgDbqVUa8sJiOUVBjHLM+ZcqwD0ESPhi9Y3qhtsXvwIG8K344tyBwHhDTfDzXmOATovAB1eLxyAUQYOd5pOQRIwsI4Q4K8HF

/r+PADBrZUZ1OeQ/+SgRcLIWSATohRDVfuYfy13mlJ4UL/IQEetJH0OJhccXEMBCDs6Ftbt/vT6g

8KNnQVkED9dimQDL8HovoXkBtQBPkWeOXZX75DKKMxxnBMcL1TMli0UKh80OWxZGrQkoLt2qbOaf

uUNENXiKg7sdEWBL1PNheXsQMtiudZQA2N1QK1EwJLJeZpudAbJY/EUEZDUvxJPzWw20dovdT2ix

6q6UFXDGCwT4HL7SM2k3rRlDhX0hekCzdWTzYgAuuQ+AIGE5iMTVERFtIfexIfSOR6ISYOPiaQDP

fYEAX8exMMnQrhEQVSFG1y4Rmjc+trnktOT5foSD7DcbiaVxo73icb6fSuY0wP6+c5Cw/m+fmssg+o5rwBCAsEyrDNQdOf7jJXafpp1GuoMAk9uOEWyJRABmRDsv4W6OqkDQACdNE7D6XperxhVijs17

TAH68f8NBJBjPao4b4lhxN3R1lgUlSbcybeyaPENwAcNgML1CgLi6ouQBcnhJxRRdyAdGc0mEsdF

SkvQIzat8nt9n7mtj5rrHsjZFm0kHyn4DkejR3mbSf+/qgr9vuaEBowAQKXXxOTtET+zkaQoxEg9

/xEEpEUD3b5o5wB1oCEiPkmZ2C7JlNcjhbDFDfreM4A+tUedaOc15GRXoBD3HMG2AY9mpQDdzNPZ

8TEjIMPsWl4Y/ETfKPuppmiu7gBiJt6auIvbS9sr2Ec+3rvinQS4LhwlgIWPDnquYgqY1qBp07jN

0vNu1yNx4c7ba8+yfZYuiLHgzj8/qovLqx9EwIYBRPauOBIAXkDY2poajW2BStxOA/v48W8k8BBB

EuDvUmpz1r6Hs0oIvXM/YrriLAAh2/EORTTHOAcMHNc0VygQUSWWQYCTnry0oTDwMOKVgLzu+ayW

AsNeAAw4k4afy8XhPfh1edyiF3rzZV6sAYXU4y6zCmzfgrbBig2JzZRqNw6aHRv05w0a334IoBRd

EyCLXJ8QAIBHjsQ5NgkE0Fkl/bCwuL9rNlxfXm55qnMlV/pZtTT7zOK7DDLdk3xpmkGhu7ppUfY2

puRkGhHDSNtQRpCssDbhXAESDA30eAm2Et3aa21pPX0+1Zs6V2vOhMon+EXuaHZkg3oxsL5qIwBl

1FI8hKBnBH2lxGzvF2eEmtZ11jinsFAoWwzDOyR/MO0KIwurXt3ZwlC56I9cm5E1xiyqg2IoHyle

Wodms6V/PPbBj0CFOwcXZ0WhnVMWZ/SVeYfgf0hC8RwA2XI+30UALLO9bO5O1OOOUIt9XCS/GzSG

zNJ67KihCV97ufUyAS3gXWDt2LYwJWhXgBt3JBEfOfZMUPENauj9d4RCd/XLwbSw/6oetMgCBFoI

pgFBB2oC8GH60nLsssdl1kRELWpTubpoASpNrF6cz5kISPGvY+ZAKWoBmDC0Z3DnCxu0uJYApXP7

k2ZFQzPOoWnPZmEPc5XUbIGuZg1wGvgWIBDg9xe2hl7swVwKVMMdJBu1LpiozG+p/YXe3+LzFD9V

Z6Ocv4w2YL793YUEtJXsIMDU34+QTcNUyYCg0m5KhvxpqraDgDgu2E2+YtU67b/rCYC7qxSo7N7o

drevjaFOTPvsaoCHZ3tl8onKY66RBl71y3nQXahSQlVaRwPCxziL7Y3jnMujvERbPchPVV+f4OAO

AjTsCjt1EGClg8g1L+bQ6GzarOgK0PaYzAshNSBAKNIRhgHIGy4BaMOBP+k1rNEtFbU07OWE85td

zg7QU8Nq/60t7g3dYtdv+ayQWepEoThaJ8eRSDWgu8uMxP+fh7J+BAmuzUarqpbossTQ++GDYoRm

wW8u9No9BFRXA8i9bZ8IUATUE75NbhYjumcnM6uAp+04DoUAiU2gAC6Eff7ouBignfj2zVMIgPWp

YCxn+WwCArn0tgzXnpr2xY8zf2YCBAbdEhvKQdRG2yZUbUrZQBW7H5kJv0rh3QRWmpDz8bjQqXB6

hjmtBhdpQHR5eF8sU1vErzpoJEeWXEmAwZjqYLUr/ulh56rCGuA5ey0AaZWwQnu5vXDojFrOjZVX

P5wA3CHYihUvwGYIJAiDheT7dL/QoZ/QgABXa/ufFQHKAhNTuG2hEMjPFaPvfbZmje6gSYO6Z6Hd

mnCJBvjiOfaHG+xDHWxRbnZgAY69TXYxlvWCB4svrixQnto8qt1z8+ZcxZVB8vNcXNiml2vBFQR0

8R2RQboXIiAhkFc5JsD/QoB8Emyp3dVeJ8MQ9PW0T7WEXyEA1xrVDPdZOTYWMNHdSQouOMxdQQA4

k02EnkzqUFrATCbfQqKMJVfPG+JJhso/pNS+jWHfhfJBvyQGypQVHZeX1otjkxvXnbKpjRjNmDRl

DmlocQ0Bw9NfpiJtMl+4RQf20WpOJBOZ7zR6tUWzlyi7Bb2+d2Xw58/WXnp6f4MTxaMBVVc2cde6

ZJeZXoueBTl57fa97OBgvwgSxexozB7iQeDG40Uju83B/p7CfT3QsXCU/AtsaflWCyg8MSQn+lQr

gA+iEK8REMKt2scep16oARSKHJhxRVP/RrFLwHU04aLtzCw4dhX6pHJ+Obo1nM0N36Ok7egWbHe4

Z+QeCm4VyO7YrPE55oLdCoBqAq47I43Nsr6+3QTs8ccnEaD1FCfBbqhsXwz2Ch3LC5TQeRvMqKo1

98JP46ONvBHfnW2UttRRAatKlzBQ/5/E/jLZ9PVwVYaW5/S5VC1s2YRwKej5bAJkn26IzsYF4yXv

i1n8j9VeBa3Huxba3Ff3kRrm72JJkXJfTgJ97i6MftqfjTvSgJArFegKBxcyP6zw2nEwDYuJms7d

e5kGdC8FUgik3e8hoMwf/OHlHo8DqlX182UC4G+3KfDZRYBt+ZMIsFTcX1TPln82HH3H6WN03G4D

zcmPIrLYI7HWUavuEuR+uYJGJT0YolqZLqOvuYv7+Ztzvem8pS7oEgTK6UoJQHhuJiDc98T7ISC1

tlb/elkVIMZCFwAsfueu6be4lACr2gTjzrQIeWzS4OmGcc1WEZmlMtebrakarN2ygEZtJ6Lbx6T3

HQLafpcEXRqNLbyHiHsIyM9FcU0kcwUC4zqw2N0pAvYpKXhp5LVwTe0LrLOAYr/gDV3AvmUPkFiY

cw9QCP2kX4/ioKzk3Z42UNrtNCojjAJ0ZaPgANlrL1uV8h01noJhUL+gsbTPynIX2ryPgK5O8OVi

IKCfXs1+OwhwByyYyjTdBbur271sNSagvwj0+ucToLvs7Dbmg3QICHn5v2f91qUXJVQ79IUidscI

XETAXPs3SxeA6TcxEYY9V4WFyX5/1sU9cLMbNGCidBXObJC+Ofo6CfvoERBLrVUFJoM180/rcFxD

e23/X+xBhssnYk9Shxa7RMTlBISlaqjkj/mTqlKsIqG3KS69yhy8bdXbxRXxCtq77C0hQDp3TRwr

Qf3pQQl3g2rXP0u+XWt0CwGkAmuSUBFQrG1FBDoaoFetMpP7MHtzc7MFZqUBfZ0RcuIl9aYBJn+o

gyQPcwziY5I1Nw9aXUoA2pI3WazAFS5+6WZQeqzFwPKtl+ltmhEJSB6gcfvqZIlkULY37WC7dh2r

qwwHoKFbyTynAbj+TtB/dmcu6ayyq6Rgr+rBYD8RzAkQ14SplR2Wh3L9QtnEbgkQFwCWeyZgLRzb

anUhpxFYm3RhGrfXzPO+a9jFUP58+uArXtdcA8x/No4qQ6wP2si9OkC0qWuW0qpjn7Es9Q3Odl5w

zKzJXQTM5oVfdKixp1KpOaG75qkGOCPOQlRthGxAwDAIuwT0zf0vECCmHDIVvTwAZZAkBnlgXAdk

AiTUbdHREdUVAiSLYiUc6nhP1d0R/+jIQB8IXptkVW3HZcU8WNdaZDntWAchGA3d3V6L9L7tO9+r

ydzcOgR2iF4aEFCrQHBbQUC1ejeKImmfDLb6aQS0OhwX3NV1s3MnN4btB592XWwU1nxUv0HgIjxL

8YgALep8tsoltsV86sdo5wNEZbm4KUd6LUY7rS6tA3YSIAYYaIXrLTUqEQBLd6KM5VWFtLolQp/y

8qLG0/syJomAeBLA2EfYFgiwPHDK/1f+QmQsW10tc9XMu26dStFPYuuuKPhw18RJGhWeD/xt+zCK

VBKtMCDpQYRnHOf7POkA7+uXWl+mATm9zldG0PQAGBAQ6reOYtjK1KM4E/sYcoJwMSWgPt/LnEG5

LiRAImByMzV3wZUaYJtehWqodFWs5UQIQwyCD/6qaQx5VGATGxcERwDnTevqGznDw4JTPwtYcRpc

Ta4ae7DMtRnXWu1SpgoAvk2fWZ5j2VqnLID3wRiG2p9zgL/jfu3zHQTEtttw1H9sgpHN1dIfpgFw

QKW9uTqXW/YkjcYXmYO+4oApjJGAYPnwtb2VtaGW2OQkMOtht/lJt9cmKmaBjzpMU4Zthon0Tq3S

bbC+neU5Bm7GxVtMcSlWGcECZykC2cVq9z/raxDzMFt7sWu5yVikL1hCuyjHsKtEQYyArv1A5a65

DGqqtrCdnU3GBMTBNp5hb2Sr7StQgxjexWBcbTW6pBsfyBsO+v8jtkoCYEzXKRuTLoI89GuUZYOz

uxTYbFKSnS7C5jcQUP2bMebX7DPzqomkS5zpnRp5slMIeJOYjYBGu8Bg9jMvxjDkafYSgFdj5l1T

GllKiT15JkaSfynbPOF2pOmaYfIoHMvVLIEKjO96894CTm3mW4i/zi2/9kItaL0SASQ2cwI0v+ho

Ji94VrSpyijwLQ9teWX0S5DcRYBGbU+4MyEgR4EAXaO2kHgKQaFmL1CyuNOe6PRKn04QYDkHJxUp

qM8Skfesy9gipLnT/rsjC9CiSgLI/WkJFpHmp3DoQQJA4UXuw4x/b+vo1ypANQGl8W9qAy+wKcEM

6oMaYEkH5d5FxlhAfm2yQo5smiRUp53fhr5mmP4ocwJSX92qB2ciwGRWh/eaDo8WusUNAi0ITEi1

amjf5kLMFpYJsOYyL9myyho+QZyJy3pbHFtFlxgMcYXzbiEAdTWumSnfzEFwm6nyC/aIRTDGolST

wTJeDIIyW2Woxw2mgIjgwwrfKsU4Yg/b3vzj9soFKMd2pQTa63IG7iDAAIgF2xa5yd90S+Lfzgiw

4/2UgLQMGdrV31eM2gyvHT5xn5ckuwkAOYJCMabOWpSY0isk4IYsAP6PdNfvYwdMfHB3DuEL8akv

R1lAjcl5IFVlEJo6l1UWgQC8wqgIsC0J89Jd4xfjGXcfPVpRkBXjJAeXa0ACIJX4ZM3c3M/ufLFw

FQF67ZDr8qgVXj/GLBBrDbQi7SgSIA1VSHQtlexzV979lV67cqwtGkb/IK1B7ilz8D0x6wDrYKWK

oBA8YXun9Z+v1qt3UBL5mq4kzSk4reaSNi2/CzfAFtNUeqglOhiEEC8y6zkRuJiAIQA5UgLZRgWe

xNBaipjuWaZjE0wJaCMuEBAvpZkAi2f0cyAgeNXyUQ6VmO96bm2cnXM69b5yrK4CVPmNc6KrR3uF

Lu4oC3/cWFKiulvsEOrtzUeyhsiYp3Bdpfu8LUBGsJn8I3iVJI+QHNf724TXIXDhUIcAcHe7rRmA

mCshrNiOENhoH5SEnkSVBIBKxDoAQ9sIEHQLAoDp+C1okYvSAgHX+e26kTqhGjXZlJ4U3V0TnGdu

sEubGFxsU5YQNCpFM+QbiWqYN8kTfSeJOIzAbNneQFLI0to7jtJmwqUmGjaDRquekIQrCcCQTBax

naHAg9QSEGYHtQhKqZoArEfXDNk6mh14aozx1EedEO3jvJAAtf7bR0GKZOT2lf3jPrZdxLOJjp8p

vhSASxOK2yTqgewcrIAWsY/JStDChUDMEcomm1jJGYdEbVvqYx6KIVgRsO0WCHeuQZFKAhybwLy7

vQIgXkecUIBrSwqMey4KgrLREcs9zXHiMVMAwHeLW1PkaGISvIi2H1xxHwvNIALuyMC7espwEC3Q

bUhHO0B47CPqhVCAtCiX4zphJw8XZgEPLQmUpAksgqrwsmsLOxeMTg7A2tCjfgcBBqRNQJb3hWVj

zggwkYITJ8Q38kDSB2T4pDmkNLB2ennU/AYClGlcP4W3449iIJ+qXdDU4jFUyu1raMt6u2Agijy/

E4KeBRWYq2sNKAgg0hl3O77aXGSo/3K0zaJTo/EWtjlvcjEByCgTQGSTGJhjNzOICUAR7K6NCRhF

22TfNpGLTCWs9Wd4UjB3WB2QV+WS1twcT49c+tuRR7eQ4ogZmXt41uIeAtCpEVoP7hjamYBmT/9/

i3QPJTK5zruPAPz7CLHnkIAmQqr1RIAWatTfkBbtAq7VyS4WrEQxlEpxmjm6+/3FBEDo0iOCWgHK

CzRxqSu8uNXsA+BEEEoCiqBhm0NcorGNPqaCnS2Ehg89qxu9MKWQDmCj2TAu0gXjpTWgWPQwO6kj

WA+8GOxPCoCJnKTC3yjvoL07CYgaRGuTTZgyU7hV1YGsH7bBwUxWVdmnmwe7OiT14lValLd5FJBr

g1/3fjUBdDaOseZHNo1Wr4XEsYGjoKjmAFQEv4MpNMBs6BqL2Vg/5dOrLyKaJxJACzLaUQMsbCNm

iiIsrFTkZMTrXLYt4brhiijOaosYeyCBXYcEaA9WhBEBRQ+qxy4lwDXNAfUN/70KGsO3GCAs5BWV

gOtcRXntymGdAeZd58Ashm3dTYSCLy143O7ExLz2R9IAMKo4Xobi+jLaHn3FBvIFeuhu6sWiZgoP

W0a2efeoAnWmN3W50l0y7ZVD2r42l9iObYpkDjMbZkpLB5mAWGXPCEDP6pI86v1+PRFga4gOMQJk

cfyexoECwfcpJoKwtj7ZXmiAnkCc9t+FWQAPtkntwkJ9P/wKYiniQsoVi208MQoWFoZifrqKhot8

143gbcF4pgE2fDjYtynIEH8jajSTCgBOtae99WmPxwHuIYD3nRdN4sxX5Rgu2jFpYJ0VHB/v2Djw

8178BvvkeM+ngawBQID42/yZCZBPWOagVgRtIKt9CwGdgjpRF+IenK4SHUInj2AN0QH8IXhe9IBk

RT+z2YUVn0vJiXfXuBoqKzytKHjxQO+Tok99XbrviN73EGCmRhdiTJAWe2zTDpuMFyOgJsQQQceZ

quh9DXlbOZEPbXVJf30FjllsNMgcVRZQ3Hx/kWBXAZRnhzEGw+n3l2aBcQRr+e152sxJ4iffTwig

hZNfbHwzm9WZOXo5/NiciQApbwsNADbhYBA41lXyBhlEA59V4LsISNUP7pwrACr8PLmbMLsogtWL

XDknIMuoAknOi8rCcZgJcJpdStTv8Gc4GFUIkIb9Ndj2JMuWl6fjvRrgBg2oqwEVYix7SIA9dLOU

JMcEy19DQLRPUPxtTvwsU6Xfb98IAdUmEwKUTFD96PX3EFCon1qvAACEr2GCEmB1A5i7imcgucgC

4d9OZUExF5G6tz3IIUJXRAS4FnndIa7PAPDtCBOgt9Q2P4T/9xJQpgIIIAhit2QFQHGktjM1mKxy

qtcBMXpZclVzIPW68x23oAHqm8isbUeFQEmCfQYCKgQqJf0qDaANlPeDkH8zGWwtfSfeMNNeQIAH

uga98YCRaGzaUj04/1QLJY5WK8kPVFH0BIVOEgZRHL+3m/CrMbilDlAjxuiuKtqqjQqImI9+DgYh

5vJNOabKAoMqXvqKj1gdrDi17NQIIG2m94KKNXACKA941es4w2dWbrB1rnZ+o+yWUSsEJHrCARqd

7VnWpRdKYogj95p6w/9sUa1BqwUZ13Dgl625+7VLAAg3SlogAub1PeiCFAvDyXaEurBlFZaaG310

LwGB+vpMi5JO+7YIt0ORNC2iECQZ7uVmdYCeB3UCkxwEROOkJEB7qAw4eUHGKCTI3wC7ObpfttzA

wp0aEAlA9nUraAADAM9cwd8tbOoDp6lM1gCJNjagnzpYfcRDeLygcs9m14bBY3YQdGr6BOSytimz

G+MGr+OQtxKApporgMk3hUU0p8U45GL3BNVUrgEQmxRoHLMtosXZlktUld2JkHFAqLxDsWSaiDU/

HIa9ZcyXN5HwKgIkcMMuWAK5PDKLS/yaQUCPo4J41ndv+n+1lkzKHlaufJlzAmAvQqPxYEtWNfLN

QFHAOhiuueFoepPrdbU3D28+qogmw2EMxYIgqILd84Obiuj1bJE1ABQkvIwasK3FJoqZhjFgTYGs

RlnAls8KghaqFfMWX71UA0oFwEMQGkqlvUUzpEXSAB+yxX9rjFIa1DlaPaGgwYeKVBCQvUHzhjNO

mFW29AQCsGSjcHGdtEtgEkWXzaSoXsAF4cTKrnEDOOCNCkqHgpZEmEjAFJRu8OIQWAfYeQM2FNeJ

p0uD4l/JApsjrLAF1TeF9jhIAhCKPv8e5SFyRRoAOswa6++iJMvYShDHMuwkagCJlDHheoW7Q5Hy

veTElHXmhk9uzgJCAFy5oE2y1SQcQA6aK7hIAC+hSbIGYD3hLTGnWIx2NACgxVDPVQ2sEUTqRwAS

YDY2D1T1DntbIgckEZyaw7AjDny4puSQFdmiX7MI4DfRAKg/lFsbv9IA24DXlyAEN8R7NeRrNIAj

aZUAL62uJKCNGoQ4VAaqDHihQUlopwZ4ERI1BcDAmomouxeFVxDgXNt+e8EaBZ8MhDJcFUp1PEsa

CSPl2CQ7OyXBQBatWYBifanbpgXYY4hUxeIRF4XwXv+349PN/+QKx8r/NDtt3TXgWB2AmZ8i2DQA

S/xAgN4NBuMcIEBOqJYipDLGvdtkaKub3aLDv4AAxd6zXnQHugoiSV9y5ZYKacimPWnB2gxCEk4E

KQ3ALRC6Yh8BJmmEcCh3/3iEtCSzvcIxzVwvII0SL3t7qKVeSLsB3VNVKh4TECO+d0DcJKIjxLsI

kIH8D6EvDd4RnBf45lUElAFVVDvBNJ4tMCFokBQpZEgAqUvzRUd8DIHsgiEB3NwuhkB1qNqD2f3S

8SVeJ1V7wYxYEsF0gYBYL6K4X6EBrBltxLEK1NXmQNGYSSJAplJtmUz+Aqe4eV8xWY3ATgK0ktIF

780CNQHutLycGwjAs07A7xWOqOZ4RR0gF7W1y7yw07CMS/qvRUycdZYenQaTNyXPw6JYFZJGNOuN

6wC49JIJU6rT+sIUojPRy4B4DQGdghO10C2TT+DV5Txk9aAKnW8igBk4lma8N+J6oYEQXKT6rqCs

EGCJj9LRy3wvS33NfFrTxVoJ7CZGjbbdHBXSCFsbCwYqutBvlaK3z5ov+dA+yjStT0JgQECqOG0I

QyDr42v8Iju/fzLz7oCA3t8PgXJJh4P1s0BXaI0AaREcUapJh4D4GwbQAM40IHafAMBL7gMsfVaV

gCuhJVqPQC/XPccHPQAF4DrAJ1OfUVPiB1zRvB584zFvuaNDh3xvBYPojBcRJB9x8/fHYp7hRXVA

S5zZalnPN80HZsyRaPtKNNtQmqPt3fYBTc3utuhPH4cP3IlGSEfRWCUiXbLKdzi7nPPVBOQyL1hE

CHBvag/4pIg/Dds+AaAsybcz7/uEo1X4KJgSaGxd3sf4/zV3glKe1cV1tAWLBeEBFi7ErNIAqfLw

7mfB2a4f0FhmHHLYV42IwQMJsF8JzfYuBLDB4Z1qfRhHTcwakAlYBqCdEBJ0REDaS+XorQd+MbPA

i79/VRbo3goVViR/0/cd97uvxG3xA3j0tgcBa+uLQALqtAoseumQUXqxn/vTvY4AOHyPd6/Xvy7G

yQG9JLB9LkkbtfwQAaXXgIDOLqQbfPvBKeDPXK9jka/chvPqpUtx8Ta0OxLg1RhMTF4lae5og58i

/C6CZunA2NeH1xl8baZPJKAvmRLexdZAMKyRfeY3fz0CPG0EEkw9QFmUgJ7tuqsUAVnzzKtavZiA

pW1lHV3o5iVCIID+YjEkgMXZ34WyzV0vKQayVE+Qeut94+Vv14QvJ2DBCFUBMGfAAiwSAEBFqadq

39p1EoKdDmQtfUGaL/aDWryQgFZzLBCgj2D3mSkTkM5gybW7CEjiv7KVfXt4R+tXErB8GjhgiOZ/

vxVuQ6jL8XU/wiEREDyoSZzKj6nVge3d2OXlBNxz+lDH2HOBywnwAcEbPwJ2oilXdDt79cotz8Ne

BZqfmIBe3NsznNAg9tYlGGj0vCpOf83+XjXK6zXgKhEAu7M044PAvuu9PizaHCDgpYa8ko6XLlyS

9TXrR8eFEblKn1DgTxWxaqjXqNWG3ljF+uKanb12lJcSoL8SuGKL5NchAeEBz4os9BYIWSDPf7Ao

sIGusMqBMV5LgBbrBxaanQw+mBAAlT0cEDoojNY2JIB/J7a6RTyArPa5tN0XEjBV9el9Qqr7xLOx

niiok49C4JoVJyNUrrO5L/Xr+mD/JAE7EfAf9Q3veKjk55rBrbgfgYcRsI5mvxTDH41urUI6wDKt

P9+ojih7eZoPvyXVJXiv5bByjg4WEWft+We9C8bYP8TR+1SxmPm91GT7Sc54XYOzRE+s5YyhvzwC

HYj6sGYSzyUsKWu9L2r1VQQwANH97hiQhaGZlstwcpCabOPBfgCGP4QWUqYuyhXNtMv1DV5OgEjo

kZ1UAKRItjhd0dXV0MN2cB3oDEom0F0tIsAErD01O2K4cRhcPuJkwPjwZsf8YFd1Q1NfLL8gQkWa

c6R5EmqrgQxeNu4kH+sGvxhoL9cJaI1lA0eT4w4b5qbv0YBVE+F6yc3hVxqYACAOK3eiN5M5Bh2C

tqinaQj15Go027LlmflTCFj+mQA7CAjwENNzQWvKFuTfaAfnlmGzQoy10VCHST3xrIlAayUqltZ/

KrLXO79BA44T0EuzvAlKFqOozoR1W0PTso0SuJ1ERdnnTnCaGt7P0IDDgofJe2QqCr/Nsq1SaAZu

Ql2kAolfEXKPy3y7VCEAGuTSPkVARyrkZNr3sgYv1wApvPbizjnAfOmZN9wLzcZ3wbbwnSq3rsEn

tU+s+ssnhYGrEMS4oMs8PBvoHQS0NDBbWa8KMFN5LEoRwAYdj18SMFmSIWI4AgGq434WWdggrAJY

Xuh4YZOdjrhk5h06afPB8c9KpkqO4/Gusea9N/ikEgk1HMzVUjk+LwANEnzN5Z7BpZFUAiu24i2s

9Li8zZcRoLW/+tCOlZzZgzxoK6sFXPnjq0aIneoLyKSHNdzcTlCvE2CFAFQEl7t4pmyvntBicF8e

YN3Qd9FbupmaAAvWcJvgsW48cF4hDvQrVZMTBNi4VsS8wxvvmNNy5frkHGQcgK7r6B0ZG+Qb0rd5

mDVAotf+QNdTF9Z7TlGLP4NJ8f8mHXhfFnAxWOGgIsAEW2S7yO/0ux0s4IQhVwNxcBtTj/SJAPoS

KgoSj6UsAP6OqWbFHte1eQcBVplpwl3YTiYAMrZ8Kd6DiHSZVRexSrizMcKLYHQlyVD4FTeSODyO

tkE0BrY6wj8Z9lww1c4m7yIgl+PjhY8JwJxcAcBnAXJZq/gh7weOPJlAWmFGDOR9BOii5cYKVrHT

h+eav4uAZNjJNoYEqKRbIKEXPbxQ4E22KfiCJtRrKlSAzwJTj7j2cb7xji90ywunAsNg1KytYEaA

uwV9C6GNomM6i1nC47qXnKbpJXi2RwKM3yFgR3qc4jZrsGb/2Sh7vyfdXepMVV68d8tR6XnbgdC0

W/weICaBbvBjQ1Ack3+9fRrlclxbVwNe55fXzYRWdbVdpR1Std0ok5Jsb5As9mKbkaovdrskDkvO

BQTqus31mGjsxonn6CcR+0YXhPlrtISlaNnX6H0EpP9e9HDhHmXqyHR19+cTinga0MsBOqxxINtV

41wEjABlISAxSAFg82cTgEl4ii3En6g5JnO9xZdhSmFxX1ukxjieHlCgEjDNEO3h3XSzQEhPriX8

64CYxab2Od7gjRpwiAB80i9Bb/oOTFQGUfHmH2KYrUllOgYlAigX2Gb0YLmQAgRl+c1CWtZxp+7q+QEELK0XHdUexGj4NA4wrntPHFxHMNV67dA+HRdxmmZaU+0RUszg1z5hdM8Csc9oGUsWW230HgLw

5xxrK+Aq7D/zWDFWEDDLweI5zRns1SUCxPWBAP8r1Xocxc/7BKw68HS7NfufniYP4LK5tAQ4C1ju

NDdYAQiOKZfswl0tSH5DNliPZQEiQPthQd8tRXjiXiWIInWD8XHIJfPfsgZI36NFYKxrsILH0dJG

SXe9TIBndTU4+rAapEeAK9KwFslYwKkyffmiPPA+AjCZDxDbnEbZ2UwlVbh1VgJmo3kGB/2X5SzW

AUEDtIqD3pX/8mc/AjYXDGH3IstqP4zdSgNGkqVA4bxCEsxUjwC1yIAA15ltQBLcFG9OQDbDMzTg

FgImSQWulFwDvCyZpRA8BBhHVKZQYDMBcWmSCvUPmvtHgJjDAgkOX+S5lAVWCcATZdOBkR55QFtp

4leItjauCqMEQPnLyLEM2Xe3FGBh0DfXAXMNCCGHtZoW0rolD8S+5ZofvV7TG4ApAZTi4Sa41ShK

wJbT4J+gACUBbbCIDm70VhA+g4DxKiDmxIGqAdzP64P+eJKZPThdh5kNUBb1myR/SPT6CRIArUIR

UPufAj41udX5Lf7un6I3AzhskvKCl+ABUJ04QwFWFWOuAhh+VRaIcr29l4gFAjSSRdWklU89cb+R

Gdvd7p+3EqB5FBS23DA7QbGVT70moLDtXO/gOcL8Z8rtz5dhHTQ7OyjG+/AyyYPdCVKtB11BwgYo

X0bGewnA7DfaEuqwChepZzhRop943JjvIaAttONKEIE+ASQCeTPQUR5k2JFhqwPikTRs+TKHp4He

TAAAv2OPWohpBHno+nYYEJAHsTec37wIM19EbBgpHBuiePhYCQlQb/t0YUQoC3eY5VjTbyWAQspM

j6pZBxGe1assUD8djJqiEWueMqy6FU0UD9d96GvHS5SdY45d7vVGAiBkxByLqw5HJ7Vg+1PHGKmo

fJcJ8AN+WEobVhRL68XtFGjiP5HtioCtrw2so/+N+RAC8DZ9chpAh4SU6SnBi7+eAfXY7ncCOQGX

1aDMr6TiMWbzILixg3FJgPLKX9K7xag43uydGnCMAJdPC2UPv2jKlM8p7uUNXsa0WO/Z0wgIRLS3

IC3FALWXsWPV4rhnV3u+mQA22oL2gdZu7tD/Wf5GM0Yp9+ovnRVVC7SL+johVNzyJIFakoFu3AuC

9QpW/bre7q0EYN5ukYcnpGoTzWwQgf6BK3S1J+zId0B+Jev6wK98IZETi/w1g/vSV9rvSIwrw3V1

7Uzn831xl5ScR2GEcepEGBql5QgdV2xJ4H4CKMaDpZwmYI/FnkEAXMNiQphvXj1ahFXujMIR9KNF

scQykKHFf1D4bTqegBPZ0MXzbfF0e3g53Pa9WcDMb7ZXB802ZDFd+Dv1zSnVkjARgFeUpg6cA04S

sMfc+3iZGaz7/Z4lHZ5k1JGz+uaQrfloYRLTOf47RsOxJIp7dZjkA/865ACGCU+FhdBUKPJn/QW/

zDEvm6hHQZeAwcqMgDioFvvhcxhKM/kyAaEvEWAIlsDkHWdI6towC80twdcG/RgC/LLGrleKba+Z

ukzUKPw9/6t/459iq5TyaaLp2oqKAYGKZ5wbvY5DfwoBEgweJb3oWCm8qG/0tpUcHQxaZeBAxjoA

vB7WOEEAEdRBURUeSgDYumlSUFYxVbMe2E3kywEOIc5+A6/LJPxjLu1sN8JAB4ViTQ1r6d9CIwzy

kT9ZIFXxN2qCF1WBH5AFzLHoePR6rb+aKJ0KdllUZzZsg6lyZrgXIOx4Jdw7XG3Rlz53u/JiDQG0

UXgeQ0BzhYZlEIFBHqxD0SIZrZzvGcWvLhoaoDY/XzqO83GMdkqxPpV9DAiAywGTArvxCk5++9Y6

QIIxERBObyEgSGR7LIBZLN4hii0aXU3aKuARsKWORQTyQ8WSDkMAWXgwAWq2rMxudzqQoXqv0Q9C

i07VGdXvSkD4pc/WbBon4OtCwPEjackJwfODf722ufOtpns7P0V/BAi5HMux22bGlGEXlmey6tlf

Q869r7W/65G6bUmVw/JHWzYfswa8qQp4631ADvsowhaWQSQX3I49GjmAj+k9E6AZgXXJcsfirIRp

xphZ2b73iiQnkuVJDzd8nwZobIWwDiFHR0A5Za1uVkdWkPL7igBWZJ1rV3EueQeC3JZciAV8NPyt

6eq2d7Z7HwG+W0vUYDmMC42SPVvD5O+3O+4TrAD5tWcbkiCJ1T1rGPxoKGwZIdg1wwWNP48ATvam

wZuOr/+DUlIQ8DeaZIY/125a4JkCvI3TVjE9XlG3hlACgiTs3OS6OQYtd5n1khlhEA70Zvcq1g4Y

hrxFo3rEs0fbO6sF5Etss58A47ezaTXAO9Tf8tvVXt0z3o0E4C2d+tbrfT4VbEuWcKVqMN8O7Nkd

5v6aAAOA7xQPTXK401s1gMtgeyfXeJ4A+rur1YESRtAViHQPc680hA1gglbTKdZnIiWutrDzNdmr

wx482/FTCMDDPtq8m0kxcKMRyCGxsotZwBUCv1EE2p8+QZ0JFgngR1uggLP+Z7086v8BBKRnNGDz

SeptRkz7s8/0a2sl7nbxaa/4vQW6je6T9OZbsCMu1kVhssM7fS8ie/8UQwD/bGvBYHZBF866FwgQ

AZ7j3dsLBOjzKvpTR+A1jXWK9UN4BRrejcACu7cyEqOYAnK2uM14iYCIDzRoL1ntXQP4JJCSttcl

YV0C8YqdHPaV1i9pMzPy7YuIAUSaMJ5doiduAQjAbO4Z3SlQ/Wd1aKqRyzZHIGrA+m2uIXC7YVcn

eDsBYm5dB2SE2RZcPtVdJKjiRPjMPjEdgNsHER/jhBDYlgIFh2MbE85s0ZLyps1e1+BDCFBDHgJA

I5Yzit8EejSLJkjIcgu8CUgqYB1jKthNQPyh2Otc3ZnpcwhQ+W/uKSr8sINUQVUKwHLuoSykqT81

W3idEBKB9HRrjWd/u1t3LOCTCFBt9WgcbYR9wPHvku0J3VMFngSgOjAqsCUykhPB9KJghyfe1fQT

CICrQavV/3R45v89OqG8SLqXGwCNff9TMwN+s1TnRQTf5dDd834aAVByjR0czxDlzrFYbDvVG0I/

2WMJolHup3bP+xPT/gjYzR524DMSxmF/2JSJoSkcDuRTUnYVAr3t0Sy/KQMw6NUIFHydFY2Wc8o2

d3f+DA2wa0GP0+njsoEIQFgHAOxHAK7sAw0oCehY7EfABah6ruYsXA+NshskWJyKOUDHwCwQFF6U

ATXAaj8bCh0Ns35tDpiUWxd4ddcQYl4/py8Wg1bFc8Sj2/oEuNjIDaFWC5obFMfwhEDrV0sh88J0

lzFe1fhDsoA7CEV5sjgLvHxPD5l9c6i0wAoPL/1UDaw+hB6qGvmMyL2+FID5vwvxKhRdki3WpjZV

BCYEmDutztMnA+5D0/7WmAiQoyNTZHYR5Zgu9rWGXJ/tEzXATgbTxbH8W4RbMmBvcqVvLgsKkfv8

9wmVnXhpQSli3ewf1HJq5Neu1Z0/KPVhSVSBWf1ABHDtFmK9hTtFdzyLbt9XBJjp1pb6WkOuz/bV

BIA8uxdQ8xWorPbod7WBJgApIoAjLvW9mtBbpi1xrBv9o1p+2Lp3aQDqdcejlCYw1nvt8fwHpQkK

id0S6IcbOb864CKuGYHpoOIEj/voCYxeJkDHBueiKyE3kPubQEBnSiTTBX9egw/TAHpItBBW4ic8

2fGOSgI2pxUE2O/HrFoQ90Yr+ftYe3yeh2cr+jgCrDLLkdfdC6CioZs9zAUf0hVvBvhMgeswFfGl

gPzMbP2Z338eAfiLn7HN/DyXHVIRYHmdNID1gKO/vYuEcNXHJ4nP9PJoVR9IgD0mmmWBKo69nm+e

27JAy9125ov3QR0NSD284KOhFKzvcz7XNJ+0fi0HJ2tS11b+xYqSXeSMoCZgmxTVNpjpk6wM4udr

s8EnagA9cxkk/6oKU/86AV7x1VkAXce3QZxJEMtYbYZk8UnRNF3LZxJAybezB6/sqMG2oawA+Ki/

NXAy4rEgZ/Y4XkHA9PcMU1e8qcGHErBgjbqadzXnswRUAXJ9w59oJpHaQVUej314W2Dro2PIwqo/

r8k/QUA6OG5+oczcJyD+PiA/KWgFU6wf9NMKhs/zc39F/wwBVp5rNPNF7YAAqPlbH0eHIlzyyza+

aQTANzu6fCgW30xA5QeM1M5pEf8LQhLImDtQPX4EfCi2KMtW9qkX/bTfvS/gk1uRLYpbHmklpwXS

gOpM8smW47V9tQboVY9f+4iCZ5+QT4PPMykHCEi1yLcw8G8QEG/88DzoCm8VQiQAnFXfCMTbBc8/+MvC77Tld66a6nAp/DEL0I1AyvXxlIA22EkAHhJ+leDLZU9vheM9vx7e/DIXNUK+hUMc3/35WUJ6

4XUQnAfCmeN3K/xy/8OvebZI1AXke+F2woNsAHVDfPaXNYAAYAKwOvxSBfjeX7dBpOr1jzNAeV3/

S0NaNopwg/SzBjgvcjfw3x9cK+IpFGqLN8TAFVN+cR2gfskERO/Cfa413kFA/XsAf/BMhcgVTnnp

GN9PgKu+Gy4czYgAzAlaMWBPvxNUDeiMa7nkR8BLkQ0Kb/7anA76jItqQNglAfORr4fgNoEqBrov

hjdCyrvMcHLe79YAqdL0cNirx8WPiADFNVNlojL4nQJOrM+iT3riXd2/mYBg+uaVbEj3lh0fN73w

d35MsDHoRJHGDFN1Jn6XT/fN+9UEwK8ANaMzAniS89ODf4p1AH1q5zz7lMwaXd4Tn32+eE/r7yeg

knD5LAKAP0N2J1K4i4ygWpDiq1zk6uE9/js/69cTkGKTK/eYFmIVqMoQTvzBLNOY/9r7oO++EfrP

exFgcnARvOEHiH4DWN/5KE2xxMiq/72R9L0rr/UPhT+f57mPKf52VBxYwq+RdPjz4vsxI/xrBNDP

hNsjo55vRdpbg34zpYPY+hj/nV/IP0eAIUAKXhhKlR0Lwd5RkrPBFyf9yg7nIfq0EWL6j2UclPN+

mxczfV0B/INJ4Gv/yxe7sEslIfrb9H/Yatd8X9X438sClflDhJOvvQIYtfoqp+5a7DMI4Powarnm

dT5H9PLCLvN+QeOHEFAi4LmeSoN/tejv0PgUAqrfjvqzwnYzSI+P6/rxC2J67xKfQ0C0jLkY7nv2

Wu9faP9wAvy3hY+J+RQJ/wLGx/ZAPn8sAM+4D+jVQHBhPLoVPgbYt/R6bhaQ2hCOAd/is2vX+XgC

NgM85exf3pZdC9R3jQbHAUgI37WH06t9sgbwHcBpU37pAD8Cxj8i+FK37lj2j4B/8YnvDgAefRq0

EvC5R8E/E+zB5R9s+3QF+BHw6IPgFtFP14Dxb0T/QdFLW/oR8Ogi4KcBTwjyyR5/GvB0CH4E/Ah4

ugWevv+fBvwIeLoFnr7/nwb8CHi6BZ6+/58G/Ah4ugWevv+fBvwIeLoFnr7/nwb8CHi6BZ6+/58G

/Ah4ugWevv+fBvwIeLoFnr7/nwb8CHi6BZ6+/58G/Ah4ugWevv+fBvwIeLoFnr7/nwb8CHi6BZ6+

/58G/Ah4ugWevv+fBvwIeLoFnr7/nwb8CHi6BZ6+/58G/Ah4ugWevv+fBvwIeLoFnr7/nwb8CHi6

BZ6+/58G/Ah4ugWevv+fBvwIeLoFnr7/nwb8CHi6BZ6+//8Hg5Ih0BM07AEAAAAASUVORK5CYII

 

id

"Рисунок

1"

o:spid

"_x0000_i1025"

type

"

_x0000_t75"

alt

"герб"

style

"width:64.58pt;height:60.7pt;visibility:visible"

o:preferrelative

"t"

stroked

"f"

 

src

"wordml://03000001.png"

o:title

"герб"/

 

 

 

 

w:val

"center"/

 

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

cs

w:val

"24"/

 

АРБИТРАЖНЫЙ

СУД

РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН

 

 

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

 

w:val

"center"/

 

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

cs

w:val

"24"/

 

Именем

Российской

Федерации

 

 

 

w:val

"center"/

 

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

w:val

"center"/

 

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

cs

w:val

"24"/

 

Р

Е

Ш

Е

Н

И

Е

 

 

 

w:val

"center"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

w:val

"BodyText"/

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

г.

Махачкала

 

 

 

w:val

"BodyText"/

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

w:val

"RU"/

 

17

мая

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

w:val

"RU"/

 

2024

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

г.

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

Дело

№

А15

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

w:val

"RU"/

 

6018

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

/

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

w:val

"RU"/

 

2023

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

 

w:val

"BodyText"/

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

w:val

"single"/

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

w:val

"single"/

 

 

 

 

w:first

line

"680"/

 

w:val

"both"/

 

w:val

"000000"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

w:val

"000000"/

 

cs

w:val

"24"/

 

Резолютивная

часть

решения

объявлена

 

 

 

w:val

"000000"/

 

cs

w:val

"24"/

 

27

апреля

 

 

w:val

"000000"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

 

w:val

"000000"/

 

cs

w:val

"24"/

 

2024

 

 

w:val

"000000"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

 

w:val

"000000"/

 

cs

w:val

"24"/

 

г.

 

 

 

w:first

line

"680"/

 

w:val

"both"/

 

w:val

"000000"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

w:val

"000000"/

 

cs

w:val

"24"/

 

Полный

текст

решения

изготовлен

 

 

 

w:val

"000000"/

 

cs

w:val

"24"/

 

17

мая

 

 

w:val

"000000"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

 

w:val

"000000"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

 

w:val

"000000"/

 

cs

w:val

"24"/

 

2024

 

 

w:val

"000000"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

 

w:val

"000000"/

 

cs

w:val

"24"/

 

г.

 

 

 

w:first

line

"680"/

 

w:val

"both"/

 

w:val

"000000"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

w:first

line

"680"/

 

w:val

"both"/

 

w:val

"000000"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

w:val

"NoSpacing"/

 

w:first

line

"680"/

 

w:val

"both"/

 

w:ascii

"Times

New

Roman"

w:h

ansi

"Times

New

Roman"/

 

w:val

"

6"/

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

w:ascii

"Times

New

Roman"

w:h

ansi

"Times

New

Roman"/

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

Арбитражный

суд

Республики

Дагестан

в

составе

судьи

Аджиевой

Л.З.,

при

ведении

протокола

секретарем

судебного

заседания

Абакаровой

З.М.,

рассмотрев

в

открытом

судебном

заседании

дело

по

иску

ГКУ

СО

&

171;Хозяйственно

эксплуатационное

управление

Министерства

образования

и

молодежной

политики

Свердловской

области&

187;

(ОГРН

<***>,

ИНН

<***>)

к

ООО

&

171;Высокие

технологии&

187;

(ОГРН

<***>,

ИНН

<***>)

о

взыскании

суммы

неустойки

(пени

и

штрафа)

в

размере

924

177,32

руб.,

и

встречный

иск

ООО

&

171;Высокие

технологии&

187;

к

ГКУ

СО

&

171;Хозяйственно

эксплуатационное

управление

Министерства

образования

и

молодежной

политики

Свердловской

области&

187;

об

обязании

возместить

вред,

причиненный

ООО

&

171;Высокие

технологии&

187;

в

размере

700506,74

руб.,

и

взыскании

50110,22

руб.

неустойки

в

размере

1/300

ставки

ЦБ

РФ

за

каждый

день

просрочки

с

дальнейшим

начислением

неустойки

по

день

фактической

оплаты

долга

(с

учетом

уточнения),

 

 

 

w:val

"BodyText"/

 

cs

w:val

"24"/

 

w:val

"RU"/

 

 

 

cs

w:val

"24"/

 

с

участием

в

судебном

заседании

 

 

cs

w:val

"24"/

 

w:val

"RU"/

 

представителей-

согласно

протоколу,

 

 

 

w:first

line

"680"/

 

w:val

"both"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

w:first

line

"680"/

 

w:val

"center"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

cs

w:val

"24"/

 

УСТАНОВИЛ:

/w:t

 

 

 

w:first

line

"680"/

 

w:val

"center"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

w:first

line

"680"/

 

w:val

"both"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

cs

w:val

"24"/

 

ГКУ

СО

&

171;Хозяйственно

эксплуатационное

управление

Министерства

образования

 

 

и

молодежной

политики

Свердловской

области&

187;

 

 

 

cs

w:val

"24"/

 

(далее

учреждение)

 

 

 

cs

w:val

"24"/

 

обратилось

в

Арбитражный

суд

Республики

Дагестан

с

иском

к

ООО

&

171;Высокие

технологии&

187;

 

 

 

cs

w:val

"24"/

 

(далее

общество)

 

 

 

cs

w:val

"24"/

 

о

взыскании

суммы

неустойки

(пени

и

штрафа)

в

размере

924

177,32

руб.

 

 

 

w:val

"Default"/

 

w:first

line

"680"/

 

w:val

"both"/

 

 

О

 

 

тветчик

 

 

в

 

 

отзыв

 

 

е

 

 

на

исковое

заявление

 

 

просит

в

иске

отказать

 

 

.

 

 

 

 

От

него

же

поступило

встречное

исковое

заявление

к

ГКУ

СО

&

171;Хозяйственно

эксплуатационное

управление

Министерства

образования

и

молодежной

политики

Свердловской

области&

187;

о

признании

учреждения

неосновательно

обогатившимся

и

взыскании

700506,74

неосновательного

обогащения,

50110,22

руб.

неустойки

и

продолжить

начисление

неустойки

по

день

фактической

оплаты

долга

 

 

,

которое

определением

от

07.09.2023

принято

к

рассмотрению

совместно

с

первоначальным

иском

 

 

.

 

 

В

последующем

от

него

поступило

уточнение

предмета

встречных

требований,

в

котором

просит

обязать

 

 

ГКУ

СО

&

171;Хозяйственно

эксплуатационное

управление

Министерства

образования

и

молодежной

политики

Свердловской

области&

187;

 

 

возместить

вред,

причиненный

 

 

 

 

ООО

&

171;Высокие

технологии&

187;

 

 

в

размере

700506,74

руб.,

50110,22

руб.

неустойки

в

размере

1/300

ставки

ЦБ

РФ

за

каждый

день

просрочки

с

дальнейшим

начислением

неустойки

по

день

фактической

оплаты

долга,

что

суд

принял.

 

 

 

w:first

line

"680"/

 

w:val

"both"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

cs

w:val

"24"/

 

Представитель

 

 

 

cs

w:val

"24"/

 

учреждения

 

 

cs

w:val

"24"/

 

в

судебном

заседании

поддержал

исковые

требования

по

основаниям,

изложенным

в

исковом

заявлении,

просил

удовлетворить

исковые

требования

истца

в

полном

объеме

 

 

cs

w:val

"24"/

 

,

а

в

 

 

cs

w:val

"24"/

 

удовлетворении

встречного

иска

 

 

cs

w:val

"24"/

 

отказать

 

 

cs

w:val

"24"/

 

.

 

 

 

w:first

line

"680"/

 

w:val

"both"/

 

 

cs

w:val

"24"/

 

Представитель

 

 

общества

в

судебном

заседании

просил

 

 

в

удовлетворении

иска

учреждения

отказать,

 

 

встречное

исковое

заявление

 

 

,

 

 

 

 

 

 

удовлетворить.

 

 

 

w:first

line

"680"/

 

w:val

"both"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

 

 

cs

w:val

"24"/

 

В

соответствии

со

ст.

163

АПК

РФ

в

судебном

заседании

с

 

 

cs

w:val

"24"/

 

21

 

 

cs

w:val

"24"/

 

.

 

 

cs

w:val

"24"/

 

31

 

 

cs

w:val

"24"/

 

по

 

 

 

cs

w:val

"24"/

 

27

 

 

cs

w:val

"24"/

 

.

 

 

cs

w:val

"24"/

 

04

 

 

cs

w:val

"24"/

 

.

 

 

cs

w:val

"24"/

 

2024

 

 

cs

w:val

"24"/

 

объявлял

 

 

cs

w:val

"24"/

 

ись

 

 

cs

w:val

"24"/

 

перерыв

 

 

cs

w:val

"24"/

 

ы

 

 

cs

w:val

"24"/

 

.

 

 

 

w:val

"off"/

 

w:first

line

"680"/

 

w:val

"both"/

 

w:val

"

6"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

w:val

"

6"/

 

cs

w:val

"24"/

 

Исследовав

материа

 

 

w:val

"

6"/

 

cs

w:val

"24"/

 

лы

дела,

выслушав

представителе

 

 

w:val

"

6"/

 

cs

w:val

"24"/

 

й

 

 

w:val

"

6"/

 

cs

w:val

"24"/

 

сторон

 

 

w:val

"

6"/

 

cs

w:val

"24"/

 

,

оценив

в

совокупности

имеющиеся

в

деле

доказательства,

суд

 

 

 

w:val

"

6"/

 

cs

w:val

"24"/

 

установил

следующее

 

 

w:val

"

6"/

 

cs

w:val

"24"/

 

.

 

 

 

w:val

"List"/

 

w:left

"0"

w:first

line

"680"/

 

w:val

"both"/

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

w:val

"000000"/

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

Как

следует

из

материалов

дела,

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

на

основании

протокола

подведения

итогов

определения

поставщика

(подрядчика,

исполнителя)

№0162200011822000082

2

от

28.02.2022

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

между

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

государственным

казенным

учреждением

Свердловской

области

"Хозяйственно

эксплуатационное

управление

министерства

образования

и

молодежной

политики

свердловской

области"

(заказчик)

и

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

ООО

&

171;Высокие

технологии&

187;

(

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

п

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

оставщик)

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

заключен

государственный

контракт

№

0162200011822000082

от

11.03.2022

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

,

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

в

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

соответствии

с

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

условиям

которого

п

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

оставщик

обязуется

поставить

цифровые

лаборатории

в

целях

создания

и

обеспечения

функционирования

центров

образования

естественно

научной

и

технологической

направленностей

"Точка

роста"

в

общеобразовательных

организациях,

расположенных

в

сельской

местности

и

малых

городах

Свердловской

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

области,

в

2022

году

(далее

–

товар),

а

з

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

аказчик

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

принять

и

оплатить

т

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

овар

в

порядке

и

на

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

условиях,

предусмотренных

к

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

онтрактом

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

(п.

1.1.

контракта).

 

 

 

w:val

"List"/

 

w:left

"0"

w:first

line

"680"/

 

w:val

"both"/

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

Наименование,

количество

и

ины

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

е

характеристики

поставляемого

т

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

овара

указаны

в

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

спецификации

(приложение

№

1

к

к

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

онтракту),

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

являющейся

неотъемлемой

частью

к

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

онтракта

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

.

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

Цена

контракта

составляет

73

737

552

рублей

00

копеек,

включая

НДС20%

12

289

592,01

рублей

01

копеек

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

(п.

1.2

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

,

2.1

к

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

онтракта).

 

 

 

w:val

"List"/

 

w:left

"0"

w:first

line

"680"/

 

w:val

"both"/

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

Согласно

п.

3.1.

контракта

п

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

оста

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

вщик

самостоятельно

доставляет

товар

заказчику

по

адресам

п

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

олучателей,

указанным

в

приложении

№

2

к

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

настоящему

к

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

онтракту

(далее

–

место

доставки)

в

срок

с

момента

заключения

контракта

по

31.05.2022.

Поставщик

не

менее

чем

за

7

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

дней

до

осуществления

поставки

товара

направляет

в

адрес

з

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

аказчика

уведомл

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

ение

о

времени

и

дате

доставки

т

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

овара

в

место

доставки.

 

 

 

w:val

"List"/

 

w:left

"0"

w:first

line

"680"/

 

w:val

"both"/

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

В

пункте

4.4.6.

контракта

стороны

определили,

что

заказчик

вправе

принять

решение

об

одностороннем

отказе

от

исполнения

контракта

в

соответствии

с

гражданским

законодательством.

 

 

 

w:val

"List"/

 

w:left

"0"

w:first

line

"680"/

 

w:val

"both"/

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

В

соответствии

с

п.

12.2.

контракта

расторжение

контракта

допускается

по

соглашению

сторон,

по

решению

суда

или

в

связи

с

односторонним

отказом

стороны

от

исполнения

контракта

в

соответствии

с

гражданским

законодательством

Российской

Федерации

в

порядке,

предусмотренном

частями

9-

23

статьи

95

Федерального

закона

от

5

апреля

2013

г.

N

44

ФЗ

"О

контрактной

системе

в

сфере

закупок

товаров,

работ,

услуг

для

обеспечения

государственных

и

муниципальных

нужд".

 

 

 

w:val

"List"/

 

w:left

"0"

w:first

line

"680"/

 

w:val

"both"/

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

21.06.2022

з

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

аказчиком

принято

решение

об

одностороннем

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

отказе

от

исполнения

контракта.

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

Указанное

решение

не

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

отменено

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

и

вступило

в

силу

08.07.2022.

 

 

 

w:val

"List"/

 

w:left

"0"

w:first

line

"680"/

 

w:val

"both"/

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

В

соответствии

с

разделом

VII

к

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

онтракт

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

а

п

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

оставщиком

в

к

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

ачестве

обеспечения

исполнения

контракта

была

предоставлена

з

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

аказчику

незав

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

исимая

гарантия

от

03.03.2022

№

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

V750823,

выданная

публичным

акционерным

обществом

&

171;Московский

кредитный

банк&

187;

(далее-

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

г

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

арант)

в

размере

5

%

от

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

начальной

(максимальной)

цены

к

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

онтракта

на

сумму

3

762

120

руб

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

.

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

,

по

условиям

которо

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

й

последнее

обязалось

уплатить

з

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

аказчику

(бенефициару)

по

его

требованию

денежную

сумму,

не

превышающую

сумму

гарантии,

в

случае

неисполнения

или

не

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

надлежащего

исполнения

п

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

оставщиком

(принципалом)

обеспеченных

гара

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

нтией

денежных

обязательств

по

контракту.

Поскольку

п

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

оставщиком

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

не

исполнены

обязательства

по

контракту

в

полном

объеме,

з

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

аказчиком

в

соответ

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

ствии

с

положениями

раздела

VI

к

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

онтракта

и

Федерального

закона

№

44

ФЗ

была

рассчитана

сумма

неустойки

за

период

с

01.06.2022

по

30.06.2022

в

сумме

700

506

руб

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

.

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

74

коп.

На

основа

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

нии

данного

расчета

30.06.2022

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

з

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

аказчиком

в

адрес

г

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

аранта

направлено

требование

об

уплате

денежной

суммы

по

гарантии.

В

соответствии

с

условиями

гарантии

ПАО

&

171;Московский

кредитный

банк&

187;

в

течение

5

рабочих

дней

с

момента

поступления

указанного

требова

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

ния,

то

есть

12.07.2023

произведен

платеж

в

пользу

з

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

аказчика

в

сумме

700

506

руб

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

.

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

74

коп.

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

 

w:val

"List"/

 

w:left

"0"

w:first

line

"680"/

 

w:val

"both"/

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

В

соответствии

с

п.

4.3.4

контракта

претензией

от

15.03.2023

учреждение

просило

общество

в

течение

30

дней

уплатить

штраф

за

неисполнение

обязательств

по

контракту

в

размере

737

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

375,52

руб.,

то

есть

1%

от

цены

контракта.

 

 

 

w:val

"List"/

 

w:left

"0"

w:first

line

"680"/

 

w:val

"both"/

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

Поскольку

п

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

е

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

ни

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

за

период

с

01.06.2022

по

30.06.2022

в

размере

700

506

руб.

74

коп.

были

уплачены

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

по

банковской

гарантии

банком

гаранто

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

м,

а

обязательства

сторон

по

контракту

прекратились

вступлением

в

законную

силу

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

решени

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

я

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

заказчика

об

одностороннем

отказе

от

его

исполнения

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

08.07.2022,

учреждение

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

,

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

12.07.2023

направило

претензию

в

адрес

общества,

в

которо

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

й

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

просило

оплатить

пени

в

размере

186

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

801,80

руб.

за

период

просрочки

с

01.07.2022

по

08.07.2022

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

,

в

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

нем

же

учреждение

повторно

просило

общество

оплатить

также

штраф,

предусмотренны

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

й

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

контрактом,

в

размере

737

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

375,52

руб.

 

 

 

w:val

"List"/

 

w:left

"0"

w:first

line

"680"/

 

w:val

"both"/

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

Указанные

претензионные

письма

обществом

оставлены

без

удовлетворения.

 

 

 

w:val

"List"/

 

w:left

"0"

w:first

line

"680"/

 

w:val

"both"/

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

Полагая,

что

общество

необоснованно

уклоняется

от

уплаты

оставшейся

части

пени

и

штрафа,

учреждение

обратилось

в

арбитражный

суд

с

настоящим

иском.

 

 

 

w:val

"List"/

 

w:left

"0"

w:first

line

"680"/

 

w:val

"both"/

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

С

учетом

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

характер

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

а

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

спорных

правоотношений,

исходя

из

содержания

прав

и

обяза

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

нностей

сторон,

предусмотренны

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

х

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

контрактом

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

,

суд

квалифицирует

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

спорные

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

правоотношения,

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

как

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

регулируемые

главой

30

Гражданского

кодекса

Российской

Федерации

(далее-

ГК

РФ),

Федеральным

законом

от

05.04.2013

N

44

ФЗ

"О

контрактной

системе

в

сфере

закупок

товаров,

работ,

услуг

для

обеспечения

государственных

и

муниципальн

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

ых

нужд"

(далее-

Закон

N

44

ФЗ

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

).

 

 

 

w:val

"List"/

 

w:left

"0"

w:first

line

"680"/

 

w:val

"both"/

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

В

соответствии

со

статьей

506

ГК

РФ

по

договору

поставки

поставщик,

осуществляющий

предпринимательскую

деятельность,

обязуется

передать

в

обусловленный

срок

или

сроки

производимые

или

закупаемые

им

товары

покупателю

для

использования

в

предпринимательской

деятельности

или

в

иных

целях,

не

связанных

с

личным,

семейным,

домашним

и

иным

подобным

использованием.

 

 

 

w:val

"List"/

 

w:left

"0"

w:first

line

"680"/

 

w:val

"both"/

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

В

силу

статьи

526

ГК

РФ

по

государственному

или

муниципальному

контракту

на

поставку

товаров

для

государственных

или

муниципальных

нужд

(далее-

государственный

или

муниципальный

контракт)

поставщик

(исполнитель)

обязуется

передать

товары

государственному

или

муниципальному

заказчику

либо

по

его

указанию

иному

лицу,

а

государственный

или

муниципальный

заказчик

обязуется

обеспечить

оплату

поставленных

товаров.

 

 

 

w:first

line

"680"/

 

w:val

"both"/

 

w:val

"000000"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

cs

w:val

"24"/

 

В

соответствии

со

ст.

 

 

cs

w:val

"24"/

 

309

ГК

РФ

 

 

cs

w:val

"24"/

 

,

 

 

cs

w:val

"24"/

 

обязательства

должны

исполняться

надлежащим

образом

в

соответствии

с

условиями

обязательства

и

требованиями

закона,

иных

правовых

актов,

а

при

отсутствии

таких

условий

и

требований-

в

соответствии

с

обычаями

делового

оборота

или

иными

обычно

предъявляемыми

требованиями.

 

 

 

w:val

"000000"/

 

cs

w:val

"24"/

 

Статьей

310

ГК

РФ

установлено,

что

односторонний

отказ

от

исполнения

обязательства

и

 

 

 

w:val

"000000"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

 

w:val

"000000"/

 

cs

w:val

"24"/

 

одностороннее

изменений

его

условий

не

допускаются,

за

исключением

случаев,

предусмотренных

законом.

 

 

 

w:val

"List"/

 

w:left

"0"

w:first

line

"680"/

 

w:val

"both"/

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

В

соответствии

с

п.6.3

и

6.4

контракта,

стороны

определили,

что

в

случае

просрочки

исполнения

поставщиком

обязательств

(в

том

числе

гарантийного

обязательства),

предусмотренных

контрактом,

поставщик

уплачивает

заказчику

пени.

Пеня

начисляется

за

каждый

день

просрочки

исполнения

поставщиком

обязательства,

предусмотренного

контрактом,

начиная

со

дня,

следующего

после

дня

истечения

установленного

контрактом

срока

исполнения

обязательства.

Размер

пени

составляет

1/300

действующей

на

дату

уплаты

пени

ключевой

ставки

ЦБ

РФ

от

цены

контракта

(отдельного

этапа

исполнения

контракта),

уменьшенной

на

сумму,

пропорциональную

объему

обязательств,

предусмотренных

контрактом.

За

каждый

факт

неисполнения

или

ненадлежащего

исполнения

поставщиком

обязательств,

предусмотренных

контрактом,

за

исключением

просрочки

исполнения

поставщиком

обязательств

(в

том

числе

гарантийного

обязательства),

предусмотренных

контрактом,

поставщик

уплачивает

заказчику

штраф.

Размер

штрафа

определяется

в

соответствии

с

Правилами

определения

размера

штрафа,

начисляемого

в

случае

ненадлежащего

исполнения

заказчиком,

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

неисполнения

или

ненадлежащего

исполнения

поставщиком

(подрядчиком,

исполнителем)

обязательств,

предусмотренных

контрактом

(за

исключением

просрочки

исполнения

обязательств

заказчиком,

поставщиком

(подрядчиком,

исполнителем),

утвержденными

постановлением

Правительства

Российской

Федерации

от

30.08.2017

№1042

и

составляет

1%

цены

контракта.

 

 

 

w:val

"off"/

 

w:val

"off"/

 

w:val

"off"/

 

w:first

line

"680"/

 

w:val

"both"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

cs

w:val

"24"/

 

В

соответствии

с

 

w:dest

"consultantplus://offline/ref

F6ED491883FC994593E1D5575F569DF9DF1CD334C3977842C292883639A8C2E662A4E79BB22512159C43CEE4C30F711513775171D605FDE2Q7x2L"

 

 

w:val

"0000FF"/

 

cs

w:val

"24"/

 

частью

4

статьи

34

 

 

 

cs

w:val

"24"/

 

Закона

N

44

ФЗ,

в

контракт

включается

обязательное

условие

об

ответственности

заказчика

и

поставщика

(подрядчика,

исполнителя)

за

неисполнение

или

ненадлежащее

исполнение

обязательств,

предусмотренных

контрактом.

 

 

 

w:val

"off"/

 

w:val

"off"/

 

w:val

"off"/

 

w:first

line

"680"/

 

w:val

"both"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

cs

w:val

"24"/

 

Согласно

 

 

w:dest

"consultantplus://offline/ref

F6ED491883FC994593E1D5575F569DF9DF1DD63DC1977842C292883639A8C2E662A4E79BB22516129943CEE4C30F711513775171D605FDE2Q7x2L"

 

 

w:val

"0000FF"/

 

cs

w:val

"24"/

 

статье

12

 

 

 

cs

w:val

"24"/

 

ГК

РФ

взыскание

неустойки

является

одним

из

способов

защиты

нарушенного

гражданского

права.

 

 

 

w:val

"off"/

 

w:val

"off"/

 

w:val

"off"/

 

w:first

line

"680"/

 

w:val

"both"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

cs

w:val

"24"/

 

На

основании

 

 

w:dest

"consultantplus://offline/ref

F6ED491883FC994593E1D5575F569DF9DF1DD63DC1977842C292883639A8C2E662A4E79BB220101C931CCBF1D2577E100A695769CA07FFQEx0L"

 

 

w:val

"0000FF"/

 

cs

w:val

"24"/

 

пункта

1

статьи

329

 

 

 

cs

w:val

"24"/

 

ГК

РФ

исполнение

обязательств

может

обеспечиваться

неустойкой,

залогом,

удержанием

имущества

должника,

поручительством,

банковской

гарантией,

задатком

и

другими

способами,

предусмотренными

законом

или

договором.

 

 

 

w:val

"off"/

 

w:val

"off"/

 

w:val

"off"/

 

w:first

line

"680"/

 

w:val

"both"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

cs

w:val

"24"/

 

В

силу

 

 

w:dest

"consultantplus://offline/ref

F6ED491883FC994593E1D5575F569DF9DF1DD63DC1977842C292883639A8C2E662A4E79BB22410149143CEE4C30F711513775171D605FDE2Q7x2L"

 

 

w:val

"0000FF"/

 

cs

w:val

"24"/

 

пункта

1

статьи

330

 

 

 

cs

w:val

"24"/

 

ГК

РФ

неустойкой

(штрафом,

пеней)

признается

определенная

законом

или

договором

денежная

сумма,

подлежащая

уплате

должником

кредитору

в

случае

неисполнения

или

ненадлежащего

исполнения

обязательства,

в

частности

в

случае

просрочки

исполнения.

 

 

 

w:val

"off"/

 

w:val

"off"/

 

w:val

"off"/

 

w:first

line

"680"/

 

w:val

"both"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

cs

w:val

"24"/

 

В

 

w:dest

"consultantplus://offline/ref

F6ED491883FC994593E1D5575F569DF9DF1CD334C3977842C292883639A8C2E662A4E79BB22411149F43CEE4C30F711513775171D605FDE2Q7x2L"

 

 

w:val

"0000FF"/

 

cs

w:val

"24"/

 

части

6

статьи

34

 

 

 

cs

w:val

"24"/

 

Закона

N

44

ФЗ

определено,

что

в

случае

просрочки

исполнения

поставщиком

(подрядчиком,

исполнителем)

обязательств

(в

том

числе

гарантийного

обязательства),

предусмотренных

контрактом,

а

также

в

иных

случаях

неисполнения

или

ненадлежащего

исполнения

поставщиком

(подрядчиком,

исполнителем)

обязательств,

предусмотренных

контрактом,

заказчик

направляет

поставщику

(подрядчику,

исполнителю)

требование

об

уплате

неустоек

(штрафов,

пеней).

 

 

 

w:val

"ConsPlusNormal"/

 

w:first

line

"680"/

 

w:val

"both"/

 

w:ascii

"Times

New

Roman"

w:h

ansi

"Times

New

Roman"

w:cs

"Times

New

Roman"/

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

w:ascii

"Times

New

Roman"

w:h

ansi

"Times

New

Roman"

w:cs

"Times

New

Roman"/

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

Как

следует

из

 

 

w:dest

"consultantplus://offline/ref

CFFFEFA05402A6ABF7349FDFB3915243CE8E874DEF6217973B13FF53C4D7AA9C3F0DE42D683EFA0E3D1DC7CBFD2C69B7CC9FB8FC4Eu63EO"

 

 

w:ascii

"Times

New

Roman"

w:h

ansi

"Times

New

Roman"

w:cs

"Times

New

Roman"/

 

w:val

"0000FF"/

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

части

7

статьи

34

 

 

 

w:ascii

"Times

New

Roman"

w:h

ansi

"Times

New

Roman"

w:cs

"Times

New

Roman"/

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

Закона

N

44

ФЗ,

пеня

начисляется

за

каждый

день

просрочки

исполнения

поставщиком

(подрядчиком,

исполнителем)

обязательства,

предусмотренного

контрактом,

начиная

со

дня,

следующего

после

дня

истечения

установленного

контрактом

срока

исполнения

обязательства,

и

устанавливается

контрактом

в

размере,

определенном

в

порядке,

установленном

Правительством

Российской

Федерации,

но

не

менее

чем

одна

трехсотая

действующей

на

дату

уплаты

пеней

ставки

рефинансирования

Центрального

банка

Российской

Федерации

от

цены

контракта,

уменьшенной

на

сумму,

пропорциональную

объему

обязательств,

предусмотренных

контрактом

и

фактически

исполненных

поставщиком

(подрядчиком,

исполнителем).

 

 

 

w:val

"ConsPlusNormal"/

 

w:first

line

"680"/

 

w:val

"both"/

 

w:ascii

"Times

New

Roman"

w:h

ansi

"Times

New

Roman"

w:cs

"Times

New

Roman"/

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

w:ascii

"Times

New

Roman"

w:h

ansi

"Times

New

Roman"

w:cs

"Times

New

Roman"/

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

Штрафы

начисляются

за

неисполнение

или

ненадлежащее

исполнение

поставщиком

(подрядчиком,

исполнителем)

обязательств,

предусмотренных

контрактом,

за

исключением

просрочки

исполнения

поставщиком

(подрядчиком,

исполнителем)

обязательств

(в

том

числе

гарантийного

обязательства),

предусмотренных

контрактом.

Размер

штрафа

устанавливается

контрактом

в

виде

фиксированной

суммы,

определенной

в

порядке,

установленном

Правительством

Российской

Федерации

(

 

w:dest

"consultantplus://offline/ref

CFFFEFA05402A6ABF7349FDFB3915243CE8E874DEF6217973B13FF53C4D7AA9C3F0DE4286A3BF65B6452C697BB7A7AB4CD9FBBFE526D4894u738O"

 

 

w:ascii

"Times

New

Roman"

w:h

ansi

"Times

New

Roman"

w:cs

"Times

New

Roman"/

 

w:val

"0000FF"/

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

часть

8

статьи

34

 

 

 

w:ascii

"Times

New

Roman"

w:h

ansi

"Times

New

Roman"

w:cs

"Times

New

Roman"/

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

Закона

N

44

ФЗ).

 

 

 

w:val

"ConsPlusNormal"/

 

w:first

line

"680"/

 

w:val

"both"/

 

w:ascii

"Times

New

Roman"

w:h

ansi

"Times

New

Roman"

w:cs

"Times

New

Roman"/

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

w:ascii

"Times

New

Roman"

w:h

ansi

"Times

New

Roman"

w:cs

"Times

New

Roman"/

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

Суд

установил

ненадлежащее

исполнение

обществом

обяза

 

 

w:ascii

"Times

New

Roman"

w:h

ansi

"Times

New

Roman"

w:cs

"Times

New

Roman"/

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

тельств

по

контракту

и

нарушение

 

 

w:ascii

"Times

New

Roman"

w:h

ansi

"Times

New

Roman"

w:cs

"Times

New

Roman"/

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

сроков

его

исполнения.

 

 

 

w:val

"ConsPlusNormal"/

 

w:first

line

"680"/

 

w:val

"both"/

 

w:ascii

"Times

New

Roman"

w:h

ansi

"Times

New

Roman"

w:cs

"Times

New

Roman"/

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

w:ascii

"Times

New

Roman"

w:h

ansi

"Times

New

Roman"

w:cs

"Times

New

Roman"/

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

Доказательств,

опровергающих

данный

вывод,

общество

не

представило.

 

 

 

w:val

"ConsPlusNormal"/

 

w:first

line

"680"/

 

w:val

"both"/

 

w:ascii

"Times

New

Roman"

w:h

ansi

"Times

New

Roman"

w:cs

"Times

New

Roman"/

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

w:ascii

"Times

New

Roman"

w:h

ansi

"Times

New

Roman"

w:cs

"Times

New

Roman"/

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

Из

правовой

позиции

Верховного

Суда

Российской

Федерации,

изложенной

в

 

w:dest

"consultantplus://offline/ref

CFFFEFA05402A6ABF73492CCA6915243C9878145EF6517973B13FF53C4D7AA9C2D0DBC246839EF5B6E4790C6FDu23EO"

 

 

w:ascii

"Times

New

Roman"

w:h

ansi

"Times

New

Roman"

w:cs

"Times

New

Roman"/

 

w:val

"0000FF"/

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

определении

 

 

 

w:ascii

"Times

New

Roman"

w:h

ansi

"Times

New

Roman"

w:cs

"Times

New

Roman"/

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

от

09.03.2017

N

302

ЭС16

14360,

следует,

что

 

 

w:dest

"consultantplus://offline/ref

CFFFEFA05402A6ABF7349FDFB3915243CE8E874DEF6217973B13FF53C4D7AA9C2D0DBC246839EF5B6E4790C6FDu23EO"

 

 

w:ascii

"Times

New

Roman"

w:h

ansi

"Times

New

Roman"

w:cs

"Times

New

Roman"/

 

w:val

"0000FF"/

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

Закон

 

 

 

w:ascii

"Times

New

Roman"

w:h

ansi

"Times

New

Roman"

w:cs

"Times

New

Roman"/

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

N

44

ФЗ

предусматривает

возможность

одновременного

взыскания

как

штрафа,

так

и

пеней.

 

 

 

w:val

"ConsPlusNormal"/

 

w:first

line

"680"/

 

w:val

"both"/

 

w:ascii

"Times

New

Roman"

w:h

ansi

"Times

New

Roman"

w:cs

"Times

New

Roman"/

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

w:ascii

"Times

New

Roman"

w:h

ansi

"Times

New

Roman"

w:cs

"Times

New

Roman"/

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

Кроме

того,

из

буквального

текста

части

8

статьи

34

Закона

о

контрактной

системе

следует

возможность

взимания

нескольких

штрафов

при

неисполнении

или

ненадлежащем

исполнении

контракта.

 

 

 

w:val

"ConsPlusNormal"/

 

w:first

line

"680"/

 

w:val

"both"/

 

w:ascii

"Times

New

Roman"

w:h

ansi

"Times

New

Roman"

w:cs

"Times

New

Roman"/

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

w:ascii

"Times

New

Roman"

w:h

ansi

"Times

New

Roman"

w:cs

"Times

New

Roman"/

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

В

связи

с

изложенным

при

установлении

фактов

совершения

исполнителем

по

государственному

контракту

нескольких

самостоятельных

однородных

нарушений

допустимо

взыскание

с

него

нескольких

штрафов

непосредственно

после

выявления

нарушений.

 

 

 

w:val

"off"/

 

w:val

"off"/

 

w:val

"off"/

 

w:first

line

"680"/

 

w:val

"both"/

 

w:fareast

"Calibri"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

w:fareast

"Calibri"/

 

cs

w:val

"24"/

 

Исходя

из

разъяснений,

изложенных

в

 

w:dest

"https://login.consultant.ru/link/?req

doc&base

LAW&n

218867&dst

100366"

 

 

w:fareast

"Calibri"/

 

w:val

"0000FF"/

 

cs

w:val

"24"/

 

пункте

36

 

 

 

w:fareast

"Calibri"/

 

cs

w:val

"24"/

 

Обзора

судебной

практики

применения

законодательства

Российской

Федерации

о

контрактной

системе

в

сфере

закупок

товаров,

работ,

услуг

для

обеспечения

государственных

и

муниципальных

нужд,

утвержденного

Президиумом

Верховного

Суда

Российской

Федерации

28.06.2017,

применение

двух

видов

ответственности-

взыскание

одновременно

пени

и

штрафа

возможно

при

наличии

двух

самостоятельных

нарушений-

просрочки

исполнения

обязательств

и

неисполнении

обязательства

в

целом.

 

 

 

w:val

"off"/

 

w:val

"off"/

 

w:val

"off"/

 

w:first

line

"680"/

 

w:val

"both"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

cs

w:val

"24"/

 

Согласно

расчету

истца

с

ответчика

за

период

с

01.07.2022

по

08.07.2022

подлежит

взысканию

пени

в

размере

186801,80

руб.

 

 

cs

w:val

"24"/

 

(73737552

руб.

х

 

 

cs

w:val

"24"/

 

8х

 

 

cs

w:val

"24"/

 

9,5%х1/300

 

 

cs

w:val

"24"/

 

)

 

 

cs

w:val

"24"/

 

и

штраф

в

размере

737375,52

руб.

 

 

cs

w:val

"24"/

 

(73737552х1%

737375,52

руб.).

 

 

 

w:val

"List"/

 

w:left

"0"

w:first

line

"680"/

 

w:val

"both"/

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

Расчет

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

пени

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

и

штрафа

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

судом

проверен,

признан

верным.

 

 

 

w:val

"left"

w:pos

"142"/

 

w:val

"off"/

 

w:val

"off"/

 

w:val

"off"/

 

w:first

line

"680"/

 

w:val

"both"/

 

w:val

"000000"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

w:val

"000000"/

 

cs

w:val

"24"/

 

В

 

w:dest

"consultantplus://offline/ref

A3C0AEE6567A0682B4566768BF9C3B96CDFAF14A3EA5C23481B891FBE795F641A46B30F95EB0B806D1CF891D9B8207C0797C09CED6957E7CK"

 

 

w:val

"000000"/

 

cs

w:val

"24"/

 

пункте

42.1

статьи

112

 

 

 

w:val

"000000"/

 

cs

w:val

"24"/

 

Закона

N

44

ФЗ

указано,

что

начисленные

поставщику

(подрядчику,

исполнителю),

но

не

списанные

заказчиком

суммы

неустоек

(штрафов,

пеней)

в

связи

с

неисполнением

или

ненадлежащим

исполнением

в

2015,

2016

и

2020

годах

обязательств,

предусмотренных

контрактом,

подлежат

списанию

в

случаях

и

порядке,

которые

установлены

Правительством

Российской

Федерации.

 

 

 

w:val

"left"

w:pos

"142"/

 

w:first

line

"680"/

 

w:val

"both"/

 

w:val

"000000"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

w:val

"000000"/

 

cs

w:val

"24"/

 

Правительством

Российской

Федерации

утверждены

 

 

w:dest

"consultantplus://offline/ref

A3C0AEE6567A0682B4566768BF9C3B96CDF9F24439A7C23481B891FBE795F641A46B30FB5FB9BE0580959919D2D509DC7A6617C8C895EF9C757FK"

 

 

w:val

"000000"/

 

cs

w:val

"24"/

 

Правила

 

 

 

w:val

"000000"/

 

cs

w:val

"24"/

 

осуществления

заказчиком

списания

сумм

неустоек

(штрафов,

пеней),

начисленных

поставщику

(подрядчику,

исполнителю),

но

не

списанных

заказчиком

в

связи

с

неисполнением

или

ненадлежащим

исполнением

обязательств,

предусмотренных

контрактом,

утвержденных

постановлением

Правительства

Российской

Федерации

от

04.07.2018

N

783

(далее-

правила

N

783).

 

 

 

 

w:val

"left"

w:pos

"142"/

 

w:first

line

"680"/

 

w:val

"both"/

 

w:val

"000000"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

w:val

"000000"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

w:dest

"consultantplus://offline/ref

A3C0AEE6567A0682B4566768BF9C3B96CDF9F1413AA7C23481B891FBE795F641B66B68F75DBAA00D8180CF48947873K"

 

 

w:val

"000000"/

 

cs

w:val

"24"/

 

Постановлением

 

 

 

w:val

"000000"/

 

cs

w:val

"24"/

 

Правительства

Российской

Федерации

от

10.03.2022

N

340

внесены

изменения

в

 

w:dest

"consultantplus://offline/ref

A3C0AEE6567A0682B4566768BF9C3B96CDF9F24439A7C23481B891FBE795F641B66B68F75DBAA00D8180CF48947873K"

 

 

w:val

"000000"/

 

cs

w:val

"24"/

 

постановление

 

 

 

w:val

"000000"/

 

cs

w:val

"24"/

 

Правительства

Российской

Федерации

от

04.07.2018

N

783

"О

списании

начисленных

поставщику

(подрядчику,

исполнителю),

но

не

списанных

заказчиком

сумм

неустоек

(штрафов,

пеней)

в

связи

с

неисполнением

или

ненадлежащим

исполнением

обязательств,

предусмотренных

контрактом",

которым

утверждены

 

 

w:dest

"consultantplus://offline/ref

A3C0AEE6567A0682B4566768BF9C3B96CDF9F24439A7C23481B891FBE795F641A46B30FB5FB9BE0580959919D2D509DC7A6617C8C895EF9C757FK"

 

 

w:val

"000000"/

 

cs

w:val

"24"/

 

правила

 

 

 

w:val

"000000"/

 

cs

w:val

"24"/

 

N

783;

из

названия

документа

исключены

фразы

"в

2015,

2016,

2020

и

2021

годах",

что

означает

снятие

ограничений

во

времени

для

списания

неустоек.

 

 

 

w:val

"left"

w:pos

"142"/

 

w:first

line

"680"/

 

w:val

"both"/

 

w:val

"000000"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

w:val

"000000"/

 

cs

w:val

"24"/

 

Согласно

 

 

w:dest

"consultantplus://offline/ref

A3C0AEE6567A0682B4566768BF9C3B96CDF9F24439A7C23481B891FBE795F641A46B30FB5FB9BE058D959919D2D509DC7A6617C8C895EF9C757FK"

 

 

w:val

"000000"/

 

cs

w:val

"24"/

 

подпун

 

aml:id

"0"

w:type

"Word.Bookmark.Start"

w:name

"_Hlt133354228"/

 

 

w:val

"000000"/

 

cs

w:val

"24"/

 

к

 

aml:id

"0"

w:type

"Word.Bookmark.End"/

 

 

w:val

"000000"/

 

cs

w:val

"24"/

 

ту

"а"

пункта

3

 

 

 

w:val

"000000"/

 

cs

w:val

"24"/

 

правил

N

783,

если

общая

сумма

начисленных

и

неуплаченных

неустоек

(штрафов,

пеней)

не

превышает

5%

цены

контракта,

заказчик

осуществляет

списание

начисленных

и

неуплаченных

сумм

неустоек

(штрафов,

пеней).

При

рассмотрении

иска

заказчика

о

взыскании

штрафных

санкций

по

муниципальному

контракту

суд

вправе

самостоятельно

устанавливать

наличие

оснований

для

применения

мер

государственной

поддержки.

Списание

начисленных

и

неуплаченных

сумм

неустоек

в

связи

с

ненадлежащим

исполнением

обязательств,

предусмотренных

контрактом,

является

обязанностью

государственного

(муниципального)

заказчика.

 

 

 

w:val

"left"

w:pos

"142"/

 

w:val

"off"/

 

w:val

"off"/

 

w:val

"off"/

 

w:first

line

"680"/

 

w:val

"both"/

 

w:val

"000000"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

w:val

"000000"/

 

cs

w:val

"24"/

 

Согласно

пункту

2

Правил

N

783

списание

начисленных

и

неуплаченных

сумм

неустоек

(штрафов,

пеней)

осуществляется

по

контрактам,

обязательства

по

которым

исполнены

в

полном

объеме.

 

 

 

 

w:val

"left"

w:pos

"142"/

 

w:val

"off"/

 

w:val

"off"/

 

w:val

"off"/

 

w:first

line

"680"/

 

w:val

"both"/

 

w:val

"000000"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

w:val

"000000"/

 

cs

w:val

"24"/

 

Поскольку,

ответчик

не

представил

доказательства

исполнения

государственного

контракта

от

 

 

 

w:val

"000000"/

 

cs

w:val

"24"/

 

11.03.2022

 

 

w:val

"000000"/

 

cs

w:val

"24"/

 

в

полном

объеме,

основания

для

списания

начисленной

пени

у

заказчика

отсутствуют.

Соответственно,

у

суда

отсутствуют

основания

для

отказа

в

удовлетворении

исковых

требований

 

 

w:val

"000000"/

 

cs

w:val

"24"/

 

в

этой

части

 

 

w:val

"000000"/

 

cs

w:val

"24"/

 

.

 

 

 

w:val

"List"/

 

w:left

"0"

w:first

line

"680"/

 

w:val

"both"/

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

Общество

в

дополнительном

отзыве

на

исковое

заявление

просит

в

случае

удовлетворения

исковых

требований,

рассмотреть

вопрос

об

уменьшении

суммы

неустойки.

 

 

 

w:first

line

"680"/

 

w:val

"both"/

 

w:val

"000000"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

w:val

"000000"/

 

cs

w:val

"24"/

 

Подлежащая

уплате

неустойка,

установленная

законом

или

договором,

в

случае

ее

явной

несоразмерности

последствиям

нарушения

обязательства,

может

быть

уменьшена

в

судебном

порядке

(пункт

1

статьи

333

ГК

РФ).

 

 

 

w:val

"List"/

 

w:left

"0"

w:first

line

"680"/

 

w:val

"both"/

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

Согласно

пункту

77

постановления

Пленума

от

24.03.2016

N

7

&

171;О

применении

судами

некоторых

положений

Гражданского

кодекса

Российской

Федерации

об

ответственности

за

нарушение

обязательств&

187;

снижение

размера

договорной

неустойки,

подлежащей

уплате

коммерческой

организацией,

индивидуальным

предпринимателем,

а

равно

некоммерческой

организацией,

нарушившей

обязательство

при

осуществлении

ею

приносящей

доход

деятельности,

допускается

в

исключительных

случаях,

если

она

явно

несоразмерна

последствиям

нарушения

обязательства

и

может

повлечь

получение

кредитором

необоснованной

выгоды

(пункты

1,

2

статьи

333

ГК

РФ).

 

 

 

w:val

"List"/

 

w:left

"0"

w:first

line

"680"/

 

w:val

"both"/

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

Предоставляя

суду

право

уменьшить

размер

неустойки,

закон

не

определяет

критерии

и

пределы

ее

соразмерности.

Определение

несоразмерности

неустойки

последствиям

нарушения

обязательства

осуществляется

судом

по

своему

внутреннему

убеждению,

основанному

на

всестороннем,

полном,

объективном

и

непосредственном

исследовании

имеющихся

в

деле

доказательств.

 

 

 

w:val

"List"/

 

w:left

"0"

w:first

line

"680"/

 

w:val

"both"/

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

В

соответствии

с

пунктом

71

Постановления

Пленума

Верховного

Суда

Российской

Федерации

от

24.03.2016

N

7

"О

применении

судами

некоторых

положений

Гражданского

кодекса

Российской

Федерации

об

ответственности

за

нарушение

обязательств"

(далее-

Постановление

N

7),

если

должником

является

коммерческая

организация,

индивидуальный

предприниматель,

а

равно

некоммерческая

организация

при

осуществлении

ею

приносящей

доход

деятельности,

снижение

неустойки

судом

допускается

только

по

обоснованному

заявлению

такого

должника,

которое

может

быть

сделано

в

любой

форме

(пункт

1

статьи

2,

пункт

1

статьи

6,

пункт

1

статьи

333

ГК

РФ).

При

этом

в

соответствии

с

пунктом

73

Постановления

N

7,

бремя

доказывания

несоразмерности

неустойки

и

необоснованности

выгоды

кредитора

возлагается

на

ответчика.

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

 

w:val

"List"/

 

w:left

"0"

w:first

line

"680"/

 

w:val

"both"/

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

Согласно

пункту

75

Постановления

N

7

при

оценке

соразмерности

неустойки

последствиям

нарушения

обязательства

необходимо

учитывать,

что

никто

не

вправе

извлекать

преимущества

из

своего

незаконного

поведения,

а

также

то,

что

неправомерное

пользование

чужими

денежными

средствами

не

должно

быть

более

выгодным

для

должника,

чем

условия

правомерного

пользования

(пункты

3,

4

статьи

1

ГК

РФ).

 

 

 

w:val

"List"/

 

w:left

"0"

w:first

line

"680"/

 

w:val

"both"/

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

Как

указал

Конституционный

Суд

Российской

Федерации

в

Определении

от

14.10.2004

N

293

О,

право

снижения

размера

штрафа

(неустойки)

предоставлено

суду

в

целях

устранения

явной

ее

несоразмерности

последствиям

нарушения

обязательств.

 

 

 

w:val

"List"/

 

w:left

"0"

w:first

line

"680"/

 

w:val

"both"/

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

Оценивая

условия

спорного

контракта,

суд

пришел

к

выводу,

что

установление

в

контракте

различного

подхода

к

расчету

неустойки

для

заказчика

и

исполнителя

нарушает

баланс

интересов

сторон,

ставит

исполнителя,

нарушившего

обязательство

в

более

неблагоприятное

положение,

по

сравнению

с

заказчиком,

допустившим

нарушение.

 

 

 

w:val

"List"/

 

w:left

"0"

w:first

line

"680"/

 

w:val

"both"/

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

В

Постановлении

от

17.12.2013

N

12945/13

по

делу

N

А68

7334/2012

Президиум

Высшего

Арбитражного

Суда

Российской

Федерации

разъяснил

следующее:

положения

Федерального

закона

от

21.07.2005

N

94

ФЗ

"О

размещении

заказов

на

поставки

товаров,

выполнение

работ,

оказание

услуг

для

государственных

и

муниципальных

нужд"

предусматривают

равную

ответственность

государственного

заказчика

и

исполнителей

государственного

заказа

за

просрочку

исполнения

обязательств,

аналогичную

по

размеру

той,

которая

установлена

в

государственном

контракте

для

государственного

заказчика.

Подход,

основанный

на

сопоставимости

мер

ответственности

сторон

государственных

и

муниципальных

контрактов,

корреспондирует

с

положениями

статьи

124

ГК

РФ

о

том,

что

публичные

образования

вступают

в

гражданские

отношения

на

равных

началах

с

иными

участниками

этих

отношений-

гражданами

и

юридическими

лицами.

Равные

начала

предполагают

определенную

сбалансированность

мер

ответственности,

предусмотренных

для

сторон

одного

договора

при

неисполнении

ими

обязательств.

 

 

 

w:val

"List"/

 

w:left

"0"

w:first

line

"680"/

 

w:val

"both"/

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

Учитывая

компенсационный

характер

гражданско

правовой

ответственности,

под

соразмерностью

суммы

неустойки

последствиям

нарушения

обязательства

Кодекс

предполагает

выплату

кредитору

такой

компенсации

его

потерь,

которая

будет

адекватна

и

соизмерима

с

нарушенным

интересом.

 

 

 

w:val

"List"/

 

w:left

"0"

w:first

line

"680"/

 

w:val

"both"/

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

В

соответствии

с

частью

8

статьи

34

Федерального

закона

от

05.04.2013

№

44

ФЗ

штрафы

начисляются

за

неисполнение

или

ненадлежащее

исполнение

поставщиком

(подрядчиком,

исполнителем)

обязательств,

предусмотренных

контрактом,

за

исключением

просрочки

исполнения

поставщиком

(подрядчиком,

исполнителем)

обязательств

(в

том

числе

гарантийного

обязательства),

предусмотренных

контрактом.

Размер

штрафа

устанавливается

контрактом

в

виде

фиксированной

суммы,

определенной

в

порядке,

установленном

Правительством

Российской

Федерации.

 

 

 

w:val

"List"/

 

w:left

"0"

w:first

line

"680"/

 

w:val

"both"/

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

В

силу

пункта

2

Постановления

№

1042

от

30.08.2017

размер

штрафа

устанавливается

контрактом

в

порядке,

установленном

пунктами

3-

9

данного

постановления,

в

виде

фиксированной

суммы,

в

том

числе

рассчитываемой

как

процент

цены

контракта,

или

в

случае,

если

контрактом

предусмотрены

этапы

исполнения

контракта,

как

процент

этапа

исполнения

контракта

(далее-

цена

контракта

(этапа)).

 

 

 

w:val

"List"/

 

w:left

"0"

w:first

line

"680"/

 

w:val

"both"/

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

Материалами

дела

установлено,

что

ответчиком

не

представлены

доказательства

исполнения

поставки

по

государственному

контракту

в

полном

объеме

на

сумму

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

73737552

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

руб

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

.,

указанный

факт

ответчиком

не

оспаривается.

 

 

 

w:val

"List"/

 

w:left

"0"

w:first

line

"680"/

 

w:val

"both"/

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

При

рассмотрении

иска

заказчика

о

взыскании

штрафных

санкций

по

государственному

контракту

суд

вправе

самостоятельно

устанавливать

наличие

оснований

для

применения

мер

государственной

поддержки.

 

 

 

w:val

"List"/

 

w:left

"0"

w:first

line

"680"/

 

w:val

"both"/

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

Данный

правовой

подход

изложен

в

пункте

40

обзора

судебной

практики

применения

законодательства

Российской

Федерации

о

контрактной

системе

в

сфере

закупок

товаров,

работ,

услуг

для

обеспечения

государственных

и

муниципальных

нужд,

утвержденного

Президиумом

Верховного

Суда

Российской

Федерации

28.06.2017,

и

неоднократно

отражался

в

определениях

Судебной

коллегии

по

экономическим

спорам

Верховного

Суда

Российской

Федерации.

 

 

 

w:val

"List"/

 

w:left

"0"

w:first

line

"680"/

 

w:val

"both"/

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

Аналогичная

правовая

позиция

изложена

в

постановлении

Арбитражного

суда

Северо

Кавказского

округа

от

01.04.2022

по

делу

№

А32

8770/2021.

 

 

 

w:val

"List"/

 

w:left

"0"

w:first

line

"680"/

 

w:val

"both"/

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

Таким

образом,

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

п

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

ринимая

во

внимание

обстоятельства

рассматриваемого

спора,

учитывая

необходимость

соблюдения

баланса

интересов

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

заказчика

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

и

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

поставщика

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

,

установленный

законом

размер

штрафа,

суд

считает

необходимым

удовлетворить

ходатайство

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

общества

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

об

уменьшении

размера

начисленного

штрафа

на

основании

положений

статьи

333

Гражданского

кодекса

Российской

Федерации

и

снизить

сумму

штрафа

до

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

368687,76

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

руб.

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

(до

50%

подлежащей

взысканию

суммы

штрафа).

 

 

 

w:val

"List"/

 

w:left

"0"

w:first

line

"680"/

 

w:val

"both"/

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

Суд

полагает,

что

указанная

сумма

неустойки

компенсирует

потери

истца

в

связи

с

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

не

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

исполнением

ответчиком

договорных

обязательств,

является

справедливой,

достаточной

и

соразмерной,

поскольку

неустойка

служит

средством,

обеспечивающим

исполнение

обязательства,

а

не

средством

обогащения

кредитора

за

счет

должника.

 

 

 

w:val

"List"/

 

w:left

"0"

w:first

line

"680"/

 

w:val

"both"/

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

В

связи

с

чем,

в

остальной

части

требований

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

в

размере

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

368

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

687,76

руб.

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

надлежит

отказать.

 

 

 

w:val

"List"/

 

w:left

"0"

w:first

line

"680"/

 

w:val

"both"/

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

Доводы

общества

о

том,

что

на

заявленные

учреждением

требования

распространяется

правила

о

моратори

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

и

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

,

установленные

постановлением

Правительства

Российской

Федерации

от

28.03.2022

№497

суд

считает

несостоятельными

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

в

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

вид

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

у

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

следующего.

 

 

 

w:val

"List"/

 

w:left

"0"

w:first

line

"680"/

 

w:val

"both"/

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

Согласно

п.3.1

контракта,

срок

поставки

и

приемки

товара

установлен

с

момента

заключения

контракта

по

31.05.2022.

 

 

 

w:val

"off"/

 

w:val

"off"/

 

w:val

"off"/

 

w:first

line

"680"/

 

w:val

"both"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

w:dest

"consultantplus://offline/ref

EF38A0DAE6130C395C816E4BD3EEB9A41CABEAC64C56FB2A62C63F978ED0E44BDE2843FABFF941C2167925723Cb1a5S"

 

 

w:val

"000000"/

 

cs

w:val

"24"/

 

Постановлением

 

 

 

cs

w:val

"24"/

 

Правительства

Российской

Федерации

от

28.03.2022

N

497

"О

введении

моратория

на

возбуждение

дел

о

банкротстве

по

заявлениям,

подаваемым

кредиторами"

на

территории

Российской

Федерации

сроком

на

6

месяцев

введен

мораторий

на

возбуждение

дел

о

банкротстве

по

заявлениям,

подаваемым

кредиторами,

что

влечет

невозможность

начисления

пеней

в

период

с

01.04.2022

по

день

прекращения

действия

моратория,

то

есть

по

01.10.2022

включительно.

 

 

 

w:val

"off"/

 

w:val

"off"/

 

w:val

"off"/

 

w:first

line

"680"/

 

w:val

"both"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

cs

w:val

"24"/

 

Просрочка

исполнения

контракта

обществом

допущен

 

 

cs

w:val

"24"/

 

а

 

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

 

cs

w:val

"24"/

 

с

01.06.2022

 

 

cs

w:val

"24"/

 

,

то

есть

после

в

 

 

cs

w:val

"24"/

 

в

 

 

cs

w:val

"24"/

 

едения

моратори

 

 

cs

w:val

"24"/

 

я

 

 

cs

w:val

"24"/

 

.

 

 

 

w:val

"List"/

 

w:left

"0"

w:first

line

"680"/

 

w:val

"both"/

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

Таким

образом,

в

период

действия

моратория

финансовые

санкции

не

начисляются

только

на

требования,

возникшие

до

введения

моратория

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

.

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

Указанный

вывод

изложен

в

определении

Судебной

коллегии

по

экономическим

спорам

Верховного

Суда

Российской

Федерации

от

20.11.2023

№306

ЭС23

14467.

 

 

 

w:val

"List"/

 

w:left

"0"

w:first

line

"680"/

 

w:val

"both"/

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

Обществом

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

заявлено

встречное

исковое

заявление

к

ГКУ

СО

&

171;Хозяйственно

эксплуатационное

управление

Министерства

образования

и

молодежной

политики

Свердловской

области&

187;

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

о

признании

учреждения

неосновательно

обогатившимся

и

взыскании

700

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

506,74

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

руб.

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

неосновательного

обогащения,

50

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

110,22

руб.

неустойки

и

продолжить

начисление

неустойки

по

день

фактической

оплаты

долга,

которое

определением

от

07.09.2023

принято

к

рассмотрению

совместно

с

первоначальным

иском.

 

 

 

w:val

"List"/

 

w:left

"0"

w:first

line

"680"/

 

w:val

"both"/

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

В

последующем

общество

неоднократно

уточн

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

я

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

ло

свои

требования.

 

 

 

w:val

"List"/

 

w:left

"0"

w:first

line

"680"/

 

w:val

"both"/

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

Заявлением

от

15.04.2024

общество

уточнило

требование,

просит

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

обяза

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

ть

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

учреждение

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

возместить

вред,

причиненный

обществу

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

в

размере

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

700

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

506,74

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

руб.

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

,

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

неустойки

в

размере

1/300

ставки

ЦБ

РФ

за

каждый

день

просрочки

в

размере

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

50

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

110,22

руб.

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

с

дальнейшим

начислением

неустойки

по

день

фактической

оплаты

долга

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

,

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

что

суд

принял.

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

При

этом

в

обоснование

своих

требований

общество

ссылается

на

ст.

15

ГК

РФ,

п.1

ст.

1064

и

ст.

375.1

ГК

РФ.

 

 

 

w:val

"List"/

 

w:left

"0"

w:first

line

"680"/

 

w:val

"both"/

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

Исследовав

материалы

дела,

суд

приходит

к

выводу

об

отсутствии

оснований

для

удовлетворения

встречных

исковых

требований

общества

исходя

из

следующего.

 

 

 

w:val

"List"/

 

w:left

"0"

w:first

line

"680"/

 

w:val

"both"/

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

Основанием

предъявления

рассматриваемого

иска

явилось

то,

что

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

,

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

по

мнению

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

общества,

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

учреждением

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

незаконно

списана

с

расчетного

счета

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

общества

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

,

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

по

требованию

об

оплате

банковской

гарантии

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

,

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

неустойка

в

сумме

700

506

руб.

74

коп.,

в

связи

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

с

этим

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

просит

взыскать

указанную

сумму

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

с

начала

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

как

неосновательное

обогащение

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

,

затем

как

вред,

причиненный

обществу

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

.

 

 

 

w:val

"List"/

 

w:left

"0"

w:first

line

"680"/

 

w:val

"both"/

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

Учреждение

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

,

возражая

против

удовлетворения

требований

указывает,

что

поскольку

контракт

расторгнут

в

результате

решения

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

учреждения

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

об

одностороннем

отказе

от

его

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

исполнения

в

связи

с

его

существенным

нарушением,

вырази

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

вшемся

невозможностью

поставки

п

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

оставщиком

товаров

надлежащего

качест

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

ва

и

соответствующего

условиям

контракта,

в

приемлемый

для

з

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

аказчика

и

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

соответствующий

установленный

к

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

онтрактом

срок,

постольку

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

учреждением

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

реализовано

право

выбора

в

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

зыскания

суммы

неустойки

по

к

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

онтракту

во

внесудебном

порядке

по

банковской

гарантии,

законных

оснований

для

освобождения

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

общества

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

от

обязанности

по

ее

уплате

не

имелось.

 

 

 

w:val

"List"/

 

w:left

"0"

w:first

line

"680"/

 

w:val

"both"/

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

В

соответствии

с

п.

1

ст.

450.1

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

ГК

РФ

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

предоставленное

настоящим

Кодексом,

другими

законами,

иными

правовыми

актами

или

договором

право

на

односторонний

отказ

от

договора

(исполнения

договора)

(статья

310)

может

быть

осуществлено

управомоченной

стороной

путем

уведомления

другой

стороны

об

отказе

от

договора

(исполнения

договора).

 

 

 

w:val

"List"/

 

w:left

"0"

w:first

line

"680"/

 

w:val

"both"/

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

Договор

прекращается

с

момента

получения

данного

уведомления,

если

иное

не

предусмотрено

настоящим

Кодексом,

другими

законами,

иными

правовыми

актами

или

договором.

 

 

 

w:val

"List"/

 

w:left

"0"

w:first

line

"680"/

 

w:val

"both"/

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

В

соответствии

с

п.

2

ст.

450.1

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

ГК

РФ

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

в

случае

одностороннего

отказа

от

договора

(исполнения

договора)

полностью

или

частично,

если

такой

отказ

допускается,

договор

считается

расторгнутым

или

измененным.

 

 

 

w:val

"List"/

 

w:left

"0"

w:first

line

"680"/

 

w:val

"both"/

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

Согласно

ч.

2

ст.

523

ГК

РФ

н

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

арушение

договора

поставки

поставщиком

предполагается

существенным

в

случаях:

неоднократного

нарушения

сроков

поставки

товаров.

 

 

 

w:val

"List"/

 

w:left

"0"

w:first

line

"680"/

 

w:val

"both"/

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

Рассмотрев

мотивы

начисления

неустойки

суд

приш

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

ел

к

выводу

о

том,

что

условия

к

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

онтракта

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

обществом

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

нарушены

и

начисление

неустойки

является

правомерным

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

.

 

 

 

w:val

"List"/

 

w:left

"0"

w:first

line

"680"/

 

w:val

"both"/

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

Судом

установлено,

что

ранее

общество

обратилось

в

Арбитражный

суд

Свердловской

области

(дело

№А60

64498/2022)

с

иском

к

ГКУ

СО

&

171;Хозяйственно

эксплуатационное

управление

Министерства

образования

и

молодежной

политики

Свердловской

области&

187;

о

взыскании

неосновательного

обогащения

в

размере

700506,74

руб.

и

неустойки

в

размере

2276,65

руб.

с

продолжением

начисления

неустойки

по

день

фактического

исполнения

обязательства.

 

 

 

w:val

"NoSpacing"/

 

w:val

"off"/

 

w:first

line

"680"/

 

w:val

"both"/

 

w:ascii

"Times

New

Roman"

w:h

ansi

"Times

New

Roman"/

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

w:ascii

"Times

New

Roman"

w:h

ansi

"Times

New

Roman"/

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

Вступившим

в

законную

силу

решением

Арбитражного

суда

Свердловской

области

от

31.05.2023

 

 

w:ascii

"Times

New

Roman"

w:h

ansi

"Times

New

Roman"/

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

,

 

 

w:ascii

"Times

New

Roman"

w:h

ansi

"Times

New

Roman"/

 

w:val

"

8"/

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

имеющим

в

силу

ст.

69

АПК

РФ

преюдициальное

значение

для

данного

дела

 

 

w:ascii

"Times

New

Roman"

w:h

ansi

"Times

New

Roman"/

 

w:val

"

8"/

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

,

 

 

w:ascii

"Times

New

Roman"

w:h

ansi

"Times

New

Roman"/

 

w:val

"

8"/

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

установлен

факт

 

 

 

w:ascii

"Times

New

Roman"

w:h

ansi

"Times

New

Roman"/

 

w:val

"

8"/

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

законности

действий

заказчика

по

вопросу

одностороннего

отказа

от

исполнения

контракта

и

начисления

на

общество

пени

за

 

 

w:ascii

"Times

New

Roman"

w:h

ansi

"Times

New

Roman"/

 

w:val

"

8"/

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

 

w:ascii

"Times

New

Roman"

w:h

ansi

"Times

New

Roman"/

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

просрочку

исполнения

поставщиком

обязательств

по

контракту,

в

связи

с

чем

 

 

w:ascii

"Times

New

Roman"

w:h

ansi

"Times

New

Roman"/

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

 

w:ascii

"Times

New

Roman"

w:h

ansi

"Times

New

Roman"/

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

в

удовлетворении

иска

отказано.

 

 

 

w:val

"List"/

 

w:left

"0"

w:first

line

"680"/

 

w:val

"both"/

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

М

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

атериалами

дела

подтверждается,

что

на

дату

принятия

решения

об

одно

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

стороннем

отказе

от

исполнения

контракта

(21.06.2022)

поставщик

т

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

овар

не

поставил.

Иного

суду

не

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

представлено

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

.

Поскольку

материалами

дела

подтверждается

факт

ненадлежащего

исполнения

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

поставщиком

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

взятых

на

себя

обязательств

в

рамках

контракта,

постольку

суд

пришел

к

выводу

о

правомерности

начислен

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

ия

неустойки

в

порядке

п.

6.3.

к

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

онтракта

за

период

с

01.06.2022

по

30.06.2022

в

сумме

700

506

руб.

74

коп.

 

 

 

w:val

"List"/

 

w:left

"0"

w:first

line

"680"/

 

w:val

"both"/

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

Доводам

общества

о

том,

что

исполнить

обязательства

по

контракту

не

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

выполнил

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

по

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

независящи

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

м

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

от

него

обстоятельств

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

ам

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

,

возникши

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

м

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

после

заключения

контракта,

также

дана

оценка

в

рамках

рассмотрения

дела

№А60

64498/2022,

в

связи

с

чем

повторной

оценке

эти

доводы

не

подлежат.

 

 

 

w:val

"off"/

 

w:val

"off"/

 

w:val

"off"/

 

w:first

line

"680"/

 

w:val

"both"/

 

w:fareast

"Calibri"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

w:fareast

"Calibri"/

 

cs

w:val

"24"/

 

В

силу

 

 

w:dest

"https://login.consultant.ru/link/?req

doc&base

LAW&n

300822&dst

100091"

 

 

w:fareast

"Calibri"/

 

w:val

"0000FF"/

 

cs

w:val

"24"/

 

статей

15

 

 

 

w:fareast

"Calibri"/

 

cs

w:val

"24"/

 

,

 

w:dest

"https://login.consultant.ru/link/?req

doc&base

LAW&n

300822&dst

10644"

 

 

w:fareast

"Calibri"/

 

w:val

"0000FF"/

 

cs

w:val

"24"/

 

375.1

 

 

 

w:fareast

"Calibri"/

 

cs

w:val

"24"/

 

ГК

РФ

бенефициар

обязан

возместить

гаранту

или

принципалу

убытки,

которые

причинены

вследствие

того,

что

представленные

им

документы

являлись

недостоверными

либо

предъявленное

требование

являлось

необоснованным.

 

 

 

w:val

"off"/

 

w:val

"off"/

 

w:val

"off"/

 

w:first

line

"680"/

 

w:val

"both"/

 

w:fareast

"Calibri"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

w:dest

"https://login.consultant.ru/link/?req

doc&base

LAW&n

300853&dst

102607"

 

 

w:fareast

"Calibri"/

 

w:val

"0000FF"/

 

cs

w:val

"24"/

 

Пунктом

1

статьи

1064

 

 

 

w:fareast

"Calibri"/

 

cs

w:val

"24"/

 

ГК

РФ

предусмотрено,

что

вред,

причиненный

личности

или

имуществу

гражданина,

а

также

вред,

причиненный

имуществу

юридического

лица,

подлежит

возмещению

в

полном

объеме

лицом,

причинившим

вред.

 

 

 

w:val

"off"/

 

w:val

"off"/

 

w:val

"off"/

 

w:first

line

"680"/

 

w:val

"both"/

 

w:fareast

"Calibri"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

w:fareast

"Calibri"/

 

cs

w:val

"24"/

 

В

соответствии

с

 

w:dest

"https://login.consultant.ru/link/?req

doc&base

LAW&n

300853&dst

102610"

 

 

w:fareast

"Calibri"/

 

w:val

"0000FF"/

 

cs

w:val

"24"/

 

пунктом

2

статьи

1064

 

 

 

w:fareast

"Calibri"/

 

cs

w:val

"24"/

 

ГК

РФ

лицо,

причинившее

вред,

освобождается

от

возмещения

вреда,

если

докажет,

что

вред

причинен

не

по

его

вине.

 

 

 

w:val

"off"/

 

w:val

"off"/

 

w:val

"off"/

 

w:first

line

"680"/

 

w:val

"both"/

 

w:fareast

"Calibri"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

w:fareast

"Calibri"/

 

cs

w:val

"24"/

 

Согласно

 

 

w:dest

"https://login.consultant.ru/link/?req

doc&base

LAW&n

300822&dst

100091"

 

 

w:fareast

"Calibri"/

 

w:val

"0000FF"/

 

cs

w:val

"24"/

 

статье

15

 

 

 

w:fareast

"Calibri"/

 

cs

w:val

"24"/

 

ГК

РФ

лицо,

право

которого

нарушено,

может

требовать

полного

возмещения

причиненных

ему

убытков,

если

законом

или

договором

не

предусмотрено

возмещение

убытков

в

меньшем

размере.

Под

убытками

понимаются

расходы,

которые

лицо,

чье

право

нарушено,

произвело

или

должно

будет

произвести

для

восстановления

нарушенного

права,

утрата

или

повреждение

его

имущества

(реальный

ущерб),

а

также

неполученные

доходы,

которые

это

лицо

получило

бы

при

обычных

условиях

гражданского

оборота,

если

бы

его

право

не

было

нарушено

(упущенная

выгода).

 

 

 

w:val

"off"/

 

w:val

"off"/

 

w:val

"off"/

 

w:first

line

"680"/

 

w:val

"both"/

 

w:fareast

"Calibri"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

w:fareast

"Calibri"/

 

cs

w:val

"24"/

 

В

соответствии

с

разъяснениями,

данными

в

 

w:dest

"https://login.consultant.ru/link/?req

doc&base

LAW&n

181602&dst

100032"

 

 

w:fareast

"Calibri"/

 

w:val

"0000FF"/

 

cs

w:val

"24"/

 

пункте

12

 

 

 

w:fareast

"Calibri"/

 

cs

w:val

"24"/

 

постановления

Пленума

Верховного

Суда

Российской

Федерации

от

23.06.2015

N

25

"О

применении

судами

положений

раздела

I

части

первой

Гражданского

кодекса

Российской

Федерации",

по

делам

о

возмещении

убытков

истец

обязан

доказать,

что

ответчик

является

лицом,

в

результате

действий

(бездействия)

которого

возник

ущерб,

а

также

факты

нарушения

обязательства

или

причинения

вреда,

наличие

убытков

(

 

w:dest

"https://login.consultant.ru/link/?req

doc&base

LAW&n

300822&dst

100093"

 

 

w:fareast

"Calibri"/

 

w:val

"0000FF"/

 

cs

w:val

"24"/

 

пункт

2

статьи

15

 

 

 

w:fareast

"Calibri"/

 

cs

w:val

"24"/

 

ГК

РФ).

 

 

 

w:val

"off"/

 

w:val

"off"/

 

w:val

"off"/

 

w:first

line

"680"/

 

w:val

"both"/

 

w:fareast

"Calibri"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

w:fareast

"Calibri"/

 

cs

w:val

"24"/

 

Возмещение

убытков

является

мерой

гражданско

правовой

ответственности,

поэтому

лицо,

требующее

возмещения

убытков,

должно

доказать

факт

нарушения

права,

наличие

и

размер

понесенных

убытков,

причинную

связь

между

нарушением

права

и

возникшими

убытками.

 

 

 

w:val

"off"/

 

w:val

"off"/

 

w:val

"off"/

 

w:first

line

"680"/

 

w:val

"both"/

 

w:fareast

"Calibri"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

w:fareast

"Calibri"/

 

cs

w:val

"24"/

 

Между

противоправным

поведением

одного

лица

и

убытками,

возникшими

у

другого

лица,

чье

право

нарушено,

должна

существовать

прямая

(непосредственная)

причинная

связь.

Под

причинно

следственной

связью

понимается

объективно

существующая

связь

между

явлениями,

при

которой

одно

явление

(причина)

предшествует

во

времени

другому

(следствию)

и

с

необходимостью

порождает

его.

Причинная

связь

между

фактом

причинения

вреда

(убытков)

и

действием

(бездействием)

причинителя

вреда

должна

быть

прямой

(непосредственной).

 

 

 

w:val

"off"/

 

w:val

"off"/

 

w:val

"off"/

 

w:first

line

"680"/

 

w:val

"both"/

 

w:fareast

"Calibri"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

w:fareast

"Calibri"/

 

cs

w:val

"24"/

 

Недоказанность

одного

из

указанных

фактов,

свидетельствует

об

отсутствии

состава

гражданско

правовой

ответственности.

 

 

 

w:val

"List"/

 

w:left

"0"

w:first

line

"680"/

 

w:val

"both"/

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

В

обоснование

своих

требований

обществом

представлены

в

материалы

дела

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

распечатки

отчета

о

финансовых

результатах

за

2022

год,

бухгалтерск

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

ий

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

баланс,

акт

сверки

взаимных

расчетов

за

период

2021

год

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

а,

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

между

обществом

и

ООО

&

171;Техкомпания

ХУАВЭЙ&

187;,

за

2022

год

с

ООО

&

171;НСН&

187;,

скриншоты

с

объявлением

об

уходе

из

России

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

компании

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

w:val

"EN

US"/

 

Nokia

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

и

возможности

ухода

из

России

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

компании

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

w:val

"EN

US"/

 

Huawei

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

.

 

 

 

w:val

"List"/

 

w:left

"0"

w:first

line

"680"/

 

w:val

"both"/

 

w:fareast

"Calibri"/

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

Однако

о

 

 

w:fareast

"Calibri"/

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

бщество

не

доказало

условия,

при

наличии

которых

допускается

возмещение

вреда,

причиненного

в

результате

незаконного

действия

учреждения

 

 

w:fareast

"Calibri"/

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

,

прямая

(непосредственная)

причинная

связь

 

 

w:fareast

"Calibri"/

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

.

 

 

 

w:val

"off"/

 

w:val

"off"/

 

w:val

"off"/

 

w:first

line

"680"/

 

w:val

"both"/

 

w:fareast

"Calibri"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

w:fareast

"Calibri"/

 

cs

w:val

"24"/

 

Исследовав

представленные

обществом

доказательства,

суд

не

нашел

 

 

 

w:fareast

"Calibri"/

 

cs

w:val

"24"/

 

основания

для

квалификации

действий

ответчик

 

 

w:fareast

"Calibri"/

 

cs

w:val

"24"/

 

а

 

 

w:fareast

"Calibri"/

 

cs

w:val

"24"/

 

в

качестве

незаконных,

причинно

следственная

связь

с

возникшими

у

 

 

w:fareast

"Calibri"/

 

cs

w:val

"24"/

 

общества

вреда

 

 

w:fareast

"Calibri"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

 

w:fareast

"Calibri"/

 

cs

w:val

"24"/

 

(

 

 

w:fareast

"Calibri"/

 

cs

w:val

"24"/

 

убытками

 

 

w:fareast

"Calibri"/

 

cs

w:val

"24"/

 

)

 

 

w:fareast

"Calibri"/

 

cs

w:val

"24"/

 

не

доказана.

 

 

w:fareast

"Calibri"/

 

cs

w:val

"24"/

 

Р

 

 

w:fareast

"Calibri"/

 

cs

w:val

"24"/

 

асходы,

понесенные

обществом

возникли

вследствие

предпринимательского

риска

и

не

обусловлены

действиями

 

 

 

w:fareast

"Calibri"/

 

cs

w:val

"24"/

 

учреждения

 

 

w:fareast

"Calibri"/

 

cs

w:val

"24"/

 

.

В

рассматриваемом

случае

расходы

возникли

в

результате

неправомерных

действий

самого

 

 

 

w:fareast

"Calibri"/

 

cs

w:val

"24"/

 

общества

 

 

w:fareast

"Calibri"/

 

cs

w:val

"24"/

 

по

 

 

 

w:fareast

"Calibri"/

 

cs

w:val

"24"/

 

неисполнению

обязательств

по

госконтракту,

потому

 

 

 

w:fareast

"Calibri"/

 

cs

w:val

"24"/

 

и

соответствующие

расходы

не

могут

быть

квалифицированы

судом

в

качестве

 

 

 

w:fareast

"Calibri"/

 

cs

w:val

"24"/

 

вреда

(

 

 

w:fareast

"Calibri"/

 

cs

w:val

"24"/

 

убытков

 

 

w:fareast

"Calibri"/

 

cs

w:val

"24"/

 

)

 

 

w:fareast

"Calibri"/

 

cs

w:val

"24"/

 

в

смысле,

придаваемом

данной

правовой

конструкции

 

 

 

w:fareast

"Calibri"/

 

cs

w:val

"24"/

 

статьями

15,

1064

ГК

РФ

 

 

w:fareast

"Calibri"/

 

cs

w:val

"24"/

 

.

 

 

 

w:val

"List"/

 

w:left

"0"

w:first

line

"680"/

 

w:val

"both"/

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

При

таких

обстоятельствах

требования

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

общества

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

об

обязании

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

учреждения

возместить

вред,

причиненный

в

размере

700

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

506,74

руб.

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

удовлетворению

не

подлежат.

 

 

 

w:val

"List"/

 

w:left

"0"

w:first

line

"680"/

 

w:val

"both"/

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

И

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

стец

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

также

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

просит

взыскать

с

ответчика

неустойку

в

размере

1/300

ставки

ЦБ

РФ

за

каждый

день

просрочки

в

размере

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

50

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

110,22

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

руб

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

.

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

и

продолжить

начисление

неустойки

по

день

фактической

оплаты

долга.

 

 

 

w:val

"List"/

 

w:left

"0"

w:first

line

"680"/

 

w:val

"both"/

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

Поскольку

основное

требование

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

оставлено

без

удовлетворения,

постольку

не

подлеж

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

и

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

т

взысканию

и

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

неустойк

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

а

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

,

так

как

данные

требования

являются

акцессорными

обязательствами,

обеспечивающими

главное

обязательство.

С

учетом

изложенного

в

удовлетворении

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

встречных

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

исковых

требований

 

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

общества

следует

 

 

w:val

"24"/

 

cs

w:val

"24"/

 

отказать.

 

 

 

w:val

"BodyText2"/

 

w:after

"0"

w:line

"240"

w:line

rule

"auto"/

 

w:first

line

"680"/

 

w:val

"both"/

 

w:val

"000000"/

 

w:val

"RU"/

 

 

 

w:val

"000000"/

 

В

соответствии

со

статьями

112

и

170

АПК

РФ

в

судебном

акте,

которым

заканчивается

рассмотрение

дела

по

существу,

разрешаются

вопросы

распределения

между

сторонами

судебных

расходов.

 

 

 

w:val

"off"/

 

w:val

"off"/

 

w:val

"off"/

 

w:first

line

"680"/

 

w:val

"both"/

 

w:fareast

"Calibri"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

w:fareast

"Calibri"/

 

cs

w:val

"24"/

 

В

силу

 

 

w:dest

"consultantplus://offline/ref

84A2C1DEDFF3C0F8F87145DDD87EC6BE5615154D743300C006801BB33542157E4CDB2E8DDF4F8ADBSBsAK"

 

 

w:fareast

"Calibri"/

 

cs

w:val

"24"/

 

части

1

статьи

110

 

 

 

w:fareast

"Calibri"/

 

cs

w:val

"24"/

 

АПК

РФ,

судебные

расходы,

понесенные

лицами,

участвующими

в

деле,

в

пользу

которых

принят

судебный

акт,

взыскиваются

арбитражным

судом

со

стороны.

 

 

 

w:first

line

"680"/

 

w:val

"both"/

 

w:val

"000000"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

w:val

"000000"/

 

cs

w:val

"24"/

 

В

связи

с

этим

 

 

 

w:val

"000000"/

 

cs

w:val

"24"/

 

в

соответствии

со

ст.

110

АПК

РФ

 

 

 

w:val

"000000"/

 

cs

w:val

"24"/

 

судебные

расходы

по

 

 

 

w:val

"000000"/

 

cs

w:val

"24"/

 

госпошлин

 

 

w:val

"000000"/

 

cs

w:val

"24"/

 

е

 

 

w:val

"000000"/

 

cs

w:val

"24"/

 

в

размере

 

 

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

 

cs

w:val

"24"/

 

21484

 

 

 

cs

w:val

"24"/

 

руб.

 

 

 

cs

w:val

"24"/

 

с

 

 

w:val

"000000"/

 

cs

w:val

"24"/

 

ледует

отнести

на

 

 

 

w:val

"000000"/

 

cs

w:val

"24"/

 

общество

 

 

w:val

"000000"/

 

cs

w:val

"24"/

 

и

взыскать

 

 

 

w:val

"000000"/

 

cs

w:val

"24"/

 

в

 

 

w:val

"000000"/

 

cs

w:val

"24"/

 

пользу

учреждения

 

 

w:val

"000000"/

 

cs

w:val

"24"/

 

.

 

 

 

w:first

line

"680"/

 

w:val

"both"/

 

w:val

"000000"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

w:val

"000000"/

 

cs

w:val

"24"/

 

В

связи

с

отказом

в

удовлетворении

встречного

иска,

судебные

расходы

по

встречному

иску

относятся

на

общество.

 

 

 

w:first

line

"680"/

 

w:val

"both"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

cs

w:val

"24"/

 

Руководствуясь

статьями

110,

167

171,

176

Арбитражного

процессуального

кодекса

Российской

Федерации,

 

 

 

w:first

line

"680"/

 

w:val

"center"/

 

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

w:first

line

"680"/

 

w:val

"center"/

 

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

cs

w:val

"24"/

 

Р

Е

Ш

И

Л:

/w:t

 

 

 

w:first

line

"680"/

 

w:val

"center"/

 

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

w:first

line

"680"/

 

w:val

"both"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

cs

w:val

"24"/

 

исковое

заявление

удовлетворить

частично.

 

 

 

w:first

line

"680"/

 

w:val

"both"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

cs

w:val

"24"/

 

Взыскать

с

ООО

&

171;Высокие

технологии&

187;

(ИНН

<***>)

в

пользу

ГКУ

СО

&

171;Хозяйственно

эксплуатационное

управление

Министерства

образования

и

молодежной

политики

Свердловской

области&

187;

(ОГРН

<***>,

ИНН

<***>)

186

 

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

 

cs

w:val

"24"/

 

801,80

руб.

неустойки

за

период

с

01.07.2022

по

08.07.2022,

368

 

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

 

cs

w:val

"24"/

 

687,76

руб.

штрафа,

а

также

судебные

расходы

по

уплате

госпошлины

в

размере

21

 

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

 

cs

w:val

"24"/

 

484

руб.

В

остальной

части

в

иске

отказать.

 

 

 

w:first

line

"680"/

 

w:val

"both"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

cs

w:val

"24"/

 

В

удовлетворении

встречного

иска

отказать.

 

 

 

w:first

line

"680"/

 

w:val

"both"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

cs

w:val

"24"/

 

Решение

суда

может

быть

обжаловано

в

Шестнадцатый

арбитражный

апелляционный

суд

в

месячный

срок

со

дня

его

принятия

через

Арбитражный

суд

Республики

Дагестан.

 

 

 

w:first

line

"680"/

 

w:val

"both"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

w:first

line

"680"/

 

w:val

"both"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

w:first

line

"680"/

 

w:val

"both"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

cs

w:val

"24"/

 

Судья

 

 

 

 

 

 

 

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

 

cs

w:val

"24"/

 

Л.З.

Аджиева

 

 

 

w:first

line

"680"/

 

w:val

"both"/

 

w:val

"

8"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

 

w:val

"left"

w:pos

"540"/

 

w:first

line

"680"/

 

w:val

"both"/

 

 

cs

w:val

"24"/

 

w:val

"SR

CYR"/

 

 

 

w:first

line

"709"/

 

w:val

"both"/

 

w:val

"

8"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

w:first

line

"680"/

 

w:val

"both"/

 

w:val

"

8"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

 

w:val

"left"

w:pos

"540"/

 

w:first

line

"680"/

 

w:val

"both"/

 

 

cs

w:val

"24"/

 

w:val

"SR

CYR"/

 

 

 

w:first

line

"709"/

 

w:val

"both"/

 

w:val

"

8"/

 

cs

w:val

"24"/

 

 

 

w:val

"BodyTextIndent"/

 

w:after

"0"/

 

w:left

"0"

w:first

line

"680"/

 

w:val

"both"/

 

 

w:type

"even"

 

 

w:val

"Header"/

 

w:wrap

"around"

w:vanchor

"text"

w:hanchor

"margin"

w:x

align

"center"

w:y

"1"/

 

w:val

"PageNumber"/

 

 

 

w:val

"PageNumber"/

 

w:fldCharType

"begin"/

 

 

w:val

"PageNumber"/

 

PAGE

 

 

 

w:val

"PageNumber"/

 

w:fldCharType

"separate"/

 

 

w:val

"PageNumber"/

 

w:fldCharType

"end"/

 

 

 

w:val

"Header"/

 

 

w:type

"odd"

 

 

w:val

"Header"/

 

w:h

"180"

w:h

rule

"exact"

w:wrap

"around"

w:vanchor

"text"

w:hanchor

"page"

w:x

"6136"

w:y

"271"/

 

w:val

"PageNumber"/

 

w:val

"20"/

 

 

 

w:val

"PageNumber"/

 

w:val

"20"/

 

w:fldCharType

"begin"/

 

 

w:val

"PageNumber"/

 

w:val

"20"/

 

PAGE

 

 

 

w:val

"PageNumber"/

 

w:val

"20"/

 

w:fldCharType

"separate"/

 

 

w:val

"PageNumber"/

 

w:val

"20"/

 

10

 

 

w:val

"PageNumber"/

 

w:val

"20"/

 

w:fldCharType

"end"/

 

 

 

w:val

"Header"/

 

 

w:type

"even"

 

 

w:val

"Footer"/

 

 

w:type

"odd"

 

 

w:val

"Footer"/

 

 

w:type

"first"

 

 

w:val

"Header"/

 

 

w:type

"first"

 

 

w:val

"Footer"/

 

 

w:w

"11906"

w:h

"16838"/

 

w:top

"1134"

w:right

"849"

w:bottom

"993"

w:left

"1276"

w:header

"360"

w:footer

"708"

w:gutter

"0"/

 

w:space

"708"/

 

w:line

pitch

"360"/