АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

Дело №А45-27114/2025

г. Новосибирск

11 декабря 2025 года

Резолютивная часть решения объявлена 11 декабря 2025 года

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Дорофеевой Д.Н., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Никоненко А.Д., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению муниципального казенного учреждения города Новосибирска «Управление дорожного строительства» (ОГРН 1065406101265), г. Новосибирск, к обществу с ограниченной ответственностью «СТС-ПЛЮС» (ОГРН 1165476085345), г. Новосибирск, об исполнении гарантийных обязательств. Лица, участвующие в деле и процессе: от истца – Ивченко О.В. (доверенность №02 от 09.01.2025, служебное удостоверение, диплом); от ответчика – не явился, извещен,

УСТАНОВИЛ:

муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Управление дорожного строительства» обратилось с исковым заявлением, уточненным в ходе судебного разбирательства, к обществу с ограниченной ответственностью «СТС-ПЛЮС» об исполнении гарантийных обязательств.

Определением суда от 05.08.2025 исковое заявление принято, назначено предварительное судебное заседание.

Ответчик представил отзыв на исковое заявление, согласно которому просил отказать в удовлетворении исковых требований, по доводам, указанным в отзыве на исковое заявление, указал, что дефекты возникли вследствие чрезмерной нагрузки на объект.

С учетом бремени доказывания судом было предложено ответчику рассмотреть вопрос о назначении судебной экспертизы, однако ответчик ходатайство не заявил.

В соответствии со ст. 65 АПК РФ, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Как следует из материалов дела, между муниципальным казенным учреждением города Новосибирска «Управление дорожного строительства» (МКУ «УДС») (далее - Истец, Заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «СТС-ПЛЮС» (ООО «СТС-ПЛЮС») (далее - Ответчик, Подрядчик) заключен муниципальный контракт № 142/20 от 13.12.2020 на выполнение мероприятий по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на улицах города Новосибирска по ремонту автомобильной дороги общего пользования по улице Сибиряков - Гвардейцев от площади Сибиряков - Гвардейцев до площади Кирова.

В 2020 году работы по ремонту объекта были выполнены подрядчиком и приняты заказчиком 29.10.2021, что подтверждается актом о приемке выполненных работ. В соответствии с условиями контракта гарантийный срок, в течение которого подрядчик обязуется устранять за свой счёт дефекты, повреждения и другие недостатки, составляет 5 лет. Таким образом, по состоянию на текущую дату гарантийный срок на результат выполненных по контракту работ не истек и действует до 29.10.2026.

В результате обследований объекта, проведенных 21.04.2025, 20.11.2025 без участия подрядчика (18.03.2025 письмом № 24/03/01329 уведомили об обследовании, 19.11.2025 письмо № 24/03/08046), были выявлены дефекты:

- колейности - 7 147 м2 - нарушение требований п. 5.2.4 ГОСТ Р 50597 - 2017: Нечетная сторона ул. Сибиряков-Гвардейцев: hcp=29,8 мм средняя полоса по ходу движения транспорта от Северного проезда до д. 51/5 ул. Сибиряков-Гвардейцев (150 п.м.); hCp=29,l мм средняя полоса по ходу движения транспорта от зд. 51/1 к4 ул. Сибиряков-Гвардейцев до пл. Кирова (292 п.м.). Четная сторона ул. Сибиряков-Гвардейцев: hcp=33,6 мм средняя полоса по ходу движения транспорта от пл. Кирова до Северного проезда (800 п.м.); hcp=28,4 мм левая полоса по ходу движения транспорта от пл. Кирова до Северного проезда (800 п.м.);

- выбоины, износ верхнего слоя покрытия - 507,51 м2 - нарушение требований п. 5.2.4 ГОСТ Р 50597 - 2017: Нечетная сторона ул. Сибиряков-Гвардейцев: зд. 51/1 к4 ул. Сибиряков-Гвардейцев до пл. Кирова (средняя полоса по ходу движения транспорта) от 2+92 м до 3+16 м (24*3,5м); в районе зд. 51/5 ул. Сибиряков-Гвардейцев (левая полоса по ходу движения транспорта) (1*0,5м); в районе зд. 51а ул. Сибиряков-Гвардейцев (правая полоса по ходу движения транспорта) (0,1*0,1м); в районе зд. 51/3 ул. Сибиряков-Гвардейцев (правая полоса по ходу движения транспорта) (1,0* 1,0м); в районе зд. 51/1 к4 ул. Сибиряков-Гвардейцев (средняя полоса по ходу движения транспорта) (1*0,5м); в районе зд. 51/1 ул. Сибиряков-Гвардейцев (средняя полоса по ходу движения транспорта) (9*0,5м+3*0,5м); в районе зд. 51/1 ул. Сибиряков-Гвардейцев (правая полоса по ходу движения транспорта) (2,5* 1,5м); в районе ООТ «Индустриальная» ул. Сибиряков-Гвардейцев (левая полоса по ходу движения транспорта) (68*0,5м); в районе ООТ «Индустриальная» ул. Сибиряков-Гвардейцев (средняя полоса по ходу движения транспорта) (68*0,5м). Четная сторона ул. Сибиряков-Гвардейцев: от пл. Кирова до Северного проезда (левая полоса по ходу движения транспорта) 0+45 м (0,5*0,5м); от пл. Кирова до Северного проезда (правая, средняя и левая полоса по ходу движения транспорта) 1+57 м (правая 20*0,5м; средняя 28*0,5м, левая 33*0,5м); от пл. Кирова до Северного проезда (средняя полоса по ходу движения транспорта) 3+35 м (7* 1м); от пл. Кирова до Северного проезда (средняя полоса по ходу движения транспорта) 3+70 м (2* 1м); от пл. Кирова до Северного проезда (средняя полоса по ходу движения транспорта) 5+27 м (2* 1м); от пл. Кирова до Северного проезда (средняя полоса по ходу движения транспорта) 5+33 м (1*1м); от пл. Кирова до Северного проезда (средняя полоса по ходу движения транспорта) 6+13 м (3*1м); от пл. Кирова до Северного проезда (средняя и левая полоса по ходу движения транспорта) от 6+70 до 7+00 (средняя 30* 1м, левая 30* 1м); от пл. Кирова до Северного проезда (средняя полоса по ходу движения транспорта) от 7+00 до 7+50 (50* 1м); от пл. Кирова до Северного проезда (средняя полоса по ходу движения транспорта) 8+00 (17* 1м); от пл. Кирова до Северного проезда (правая и средняя полоса по ходу движения транспорта) 8+17 - 8+40 м (23*7м).

Во исполнение обязательств, предусмотренных контрактом истец направил ответчику письменную претензию с требованием произвести работы по устранению выявленных недостатков (дефектов) в рамках гарантийных обязательств.

До настоящего времени недостатки (дефекты) на объекте ремонта не устранены.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения с настоящим исковым заявлением.

Согласно статьям 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательств и одностороннее изменение его условий, за исключением случаев, установленных законом или предусмотренных договором, не допускается.

В соответствии с пунктом 1 статьи 721 ПК РФ качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода.

Согласно пункту 1 статьи 722 ГК РФ в случае, когда законом, иным правовым актом, договором подряда или обычаями делового оборота предусмотрен для результата работы гарантийный срок, результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве (пункт 1 статьи 721 ГК РФ).

В силу пункта 1 статьи 723 ГК РФ в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования, Заказчик вправе по своему выбору определить вид ответственности Подрядчика из предусмотренных указанным пунктом, если иное не установлено законом или договором.

Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода (часть 1 статьи 721 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В случае, когда законом, иным правовым актом, договором подряда или обычаями делового оборота предусмотрен для результата работы гарантийный срок, результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве (статья 722 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока (часть 3 статьи 724 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В силу пункта 1 статьи 755 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик, если иное не предусмотрено договором строительного подряда, гарантирует достижение объектом строительства указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации объекта в соответствии с договором строительного подряда на протяжении гарантийного срока. Установленный законом гарантийный срок может быть увеличен соглашением сторон.

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает подрядчик (пункты 2, 3 статьи 755 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно пункта 6.2 Контракта гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы.

Гарантийный срок устранения дефектов, возникших в течение гарантийных сроков, на автомобильной дороге или искусственном сооружении и входящих в него инженерных сооружений, оборудования, материалов будет составлять:

- верхний слой а/б покрытия - 5 лет;

- бортовые камни - 5 лет;

- тротуары - 5 лет;

- дорожная разметка - 1 год.

- ограждение барьерное, пешеходное - 5 лет.

с момента (даты) подписания сторонами Акта приемки объекта в эксплуатацию.

С учетом того, что решение суда должно быть исполнимым выявленные недостатки подлежат устранению в течении месяца с момента вступления решения в законную силу, при наступлении климатических условий (в сухую погоду весной и летом при температуре окружающего воздуха не ниже 5°С, осенью - не ниже 10°С).

Принимая во внимание вышеизложенное, суд признает исковые требования подлежащими удовлетворению.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации государственная пошлина по иску в размере 50 000 рублей подлежит взысканию с ответчика в доход федерального бюджета в связи с освобождением истца от ее уплаты.

Руководствуясь статьями 110, 167, 168, 169, 170, 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Обязать общество с ограниченной ответственностью «СТС-ПЛЮС» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в течение месяца с момента вступления решения в законную силу, при наступлении климатических условий (в сухую погоду весной и летом при температуре окружающего воздуха не ниже 5°С, осенью - не ниже 10°С), устранить следующие недостатки (дефекты) в выполненных работах по муниципальному контракту от 13.12.2020 № 142/20:

- Образование колейности - 7 147 м2 - нарушение требований п. 5.2.4 ГОСТ Р 50597 - 2017: Нечетная сторона ул. Сибиряков-Гвардейцев: hcp=29,8 мм средняя полоса по ходу движения транспорта от Северного проезда до д. 51/5 ул. Сибиряков-Гвардейцев (150 п.м.); hCp=29,l мм средняя полоса по ходу движения транспорта от зд. 51/1 к4 ул. Сибиряков-Гвардейцев до пл. Кирова (292 п.м.). Четная сторона ул. Сибиряков-Гвардейцев: hcp=33,6 мм средняя полоса по ходу движения транспорта от пл. Кирова до Северного проезда (800 п.м.); hcp=28,4 мм левая полоса по ходу движения транспорта от пл. Кирова до Северного проезда (800 п.м.);

- выбоины, износ верхнего слоя покрытия - 507,51 м2 - нарушение требований п. 5.2.4 ГОСТ Р 50597 - 2017: Нечетная сторона ул. Сибиряков-Гвардейцев: зд. 51/1 к4 ул. Сибиряков-Гвардейцев до пл. Кирова (средняя полоса по ходу движения транспорта) от 2+92 м до 3+16 м (24*3,5м); в районе зд. 51/5 ул. Сибиряков-Гвардейцев (левая полоса по ходу движения транспорта) (1*0,5м); в районе зд. 51а ул. Сибиряков-Гвардейцев (правая полоса по ходу движения транспорта) (0,1*0,1м); в районе зд. 51/3 ул. Сибиряков-Гвардейцев (правая полоса по ходу движения транспорта) (1,0* 1,0м); в районе зд. 51/1 к4 ул. Сибиряков-Гвардейцев (средняя полоса по ходу движения транспорта) (1*0,5м); в районе зд. 51/1 ул. Сибиряков-Гвардейцев (средняя полоса по ходу движения транспорта) (9*0,5м+3*0,5м); в районе зд. 51/1 ул. Сибиряков-Гвардейцев (правая полоса по ходу движения транспорта) (2,5* 1,5м); в районе ООТ «Индустриальная» ул. Сибиряков-Гвардейцев (левая полоса по ходу движения транспорта) (68*0,5м); в районе ООТ «Индустриальная» ул. Сибиряков-Гвардейцев (средняя полоса по ходу движения транспорта) (68*0,5м). Четная сторона ул. Сибиряков-Гвардейцев: от пл. Кирова до Северного проезда (левая полоса по ходу движения транспорта) 0+45 м (0,5*0,5м); от пл. Кирова до Северного проезда (правая, средняя и левая полоса по ходу движения транспорта) 1+57 м (правая 20*0,5м; средняя 28*0,5м, левая 33*0,5м); от пл. Кирова до Северного проезда (средняя полоса по ходу движения транспорта) 3+35 м (7* 1м); от пл. Кирова до Северного проезда (средняя полоса по ходу движения транспорта) 3+70 м (2* 1м); от пл. Кирова до Северного проезда (средняя полоса по ходу движения транспорта) 5+27 м (2* 1м); от пл. Кирова до Северного проезда (средняя полоса по ходу движения транспорта) 5+33 м (1*1м); от пл. Кирова до Северного проезда (средняя полоса по ходу движения транспорта) 6+13 м (3*1м); от пл. Кирова до Северного проезда (средняя и левая полоса по ходу движения транспорта) от 6+70 до 7+00 (средняя 30* 1м, левая 30* 1м); от пл. Кирова до Северного проезда (средняя полоса по ходу движения транспорта) от 7+00 до 7+50 (50* 1м); от пл. Кирова до Северного проезда (средняя полоса по ходу движения транспорта) 8+00 (17* 1м); от пл. Кирова до Северного проезда (правая и средняя полоса по ходу движения транспорта) 8+17 - 8+40 м (23*7м).

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СТС-ПЛЮС» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 50 000 руб.

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия.

Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его вступления в законную силу, при условии, если оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья

Д.Н. Дорофеева