Арбитражный суд

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

ул. Мира, д. 27, г. Ханты-Мансийск, 628011, тел. (3467) 95-88-71, сайт http://www.hmao.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А75-13954/2020

17 ноября 2020 г.

г. Ханты-Мансийск

Резолютивная часть решения объявлена 10 ноября 2020 г.

Полный текст решения изготовлен 17 ноября 2020 г.

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в составе судьи Инкиной Е.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению  обществас ограниченной ответственностью «Пурэнергомонтаж» (ОГРН 

<

***>,ИНН 

<

***>, адрес: 143005, 

<

...>) к публичному акционерному обществу  «Нефтяная компания «Роснефть» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 115035, г. Москва,ул. Наб. Софийская, д. 26/1) о взыскании 1 535 725 рублей 64 копеек,

третьи лица: общество с ограниченной ответственностью «РН-Юганскнефтегаз»(ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 628309, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

<

...>), конкурсный управляющий общества с ограниченной ответственностью «Пурэнергомонтаж» ФИО2,

с участием представителей:

от истца – ФИО3 по доверенности от 16.09.2020,

от ответчика – ФИО4 по доверенности от 31.01.2020,

от третьих лиц – не явились,                           

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Пурэнергомонтаж» (далее – истец,ООО «Пурэнергомонтаж») обратилось в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с исковым заявлением к публичному акционерному обществу «Нефтяная компания «Роснефть» (далее – ответчик, ПАО «НК «Роснефть») о взыскании   1 535 725 рублей 64 копеек задолженности по оплате выполненных работ по договору подряда № 60 от 25.12.2014.

В обоснование исковых требований истец ссылается на вышеуказанный договори ненадлежащее исполнение ответчиком обязательств в части оплаты.

К участию в деле привлечены третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора: общество с ограниченной ответственностью «РН-Юганскнефтегаз», конкурсный управляющий ООО «Пурэнергомонтаж» ФИО2.

Определением от 09.09.2020 судебные заседания по делу назначенына 10.11.2020 (предварительное заседание в 10 часов 00 минут, судебное – 10 часов05 минут).

Стороны обеспечили явку своих представителей в судебные заседания. Третьи лица не явились, извещены.

Возражений относительно рассмотрения дела в судебном заседании непосредственно после окончания предварительного судебного заседания не заявлено.

На основании части 4 статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пункта 27 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.12.2006 № 65, определением от 10.11.2020, в связис готовностью дела, с учетом мнения представителей сторон, суд завершил предварительную подготовку по делу и перешел к рассмотрению дела в судебном заседании.

Возражений относительно рассмотрения дела в отсутствие третьих лиц не заявлено.

Согласно части 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судом дело рассмотрено в отсутствие третьих лиц.

В ходе судебного заседания представителем истца исковые требования и доводы искового заявления поддержаны.

Представитель ответчика находил исковые требования не подлежащими удовлетворению по доводам, изложенным в отзыве на иск, ссылаясь на то, что суммав размере 1 535 725 рублей 64 копеек является суммой резерва, условия для оплаты которой еще не наступили. Одновременно с приведенным доводом ответчиком заявлено об истечении срока исковой давности по предъявленным требованиям.

Третьи лица отзывы на исковое заявление не представили.

Суд, заслушав представителей сторон, исследовав материалы дела, находит исковые требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, между истцом (подрядчик) и ответчиком (заказчик) заключен договор подряда № 60 от 25.12.2014 (л.д. 31-112 т. 4, далее – договор),по условиям которого заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательствапо выполнению комплекса работ по строительству объекта: «Подстанция 35/6 кВ в районе куста скважин 311» Приобского м/р, а заказчик обязуется принять и оплатить выполненные подрядчиком работы (в редакции дополнительного соглашения № 2к договору от 29.01.2016, л.д. 103, 104 т. 4).

Сроки выполнения работ: начало производства работ по объекту – 10.01.2016; окончание производства работ по объекту и сдачи объекта заказчику – 24.10.2016(в редакции  дополнительного соглашения № 3 к договору от 20.05.2016,л.д. 109, 110 т. 4).

Стоимость договора составляет 139 436 030 рублей 92 копейки, в том числе НДС(в редакции дополнительного соглашения № 3 к договору от 20.05.2016, л.д. 109, 110 т. 4).

Оплата выполненных работ производится заказчиком в рублях РФ по факту выполненных работ по законченному этапу (согласно графику производства работ) путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика не ранее чем через 60 календарных дней, но не позднее 90 календарных дней с момента подписания заказчиком и подрядчиком 3-х комплектов следующих документов: оригинала счета-фактуры,акта сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2), справки (форма КС-3). Указанные документы предоставляются заказчику не позднее 24 числа текущего месяца.

Согласно пункту 6.1.3 договора заказчик до окончания строительства объекта резервирует 10% от стоимости услуг подрядчика (кроме услуг по транспортировке МТР поставки заказчика, страхования, пуско-наладочных и проектно-изыскательских работ). Заказчик производит оплату зарезервированной части в течение 90 календарных дней, начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором стороны подписали нижеуказанные документы: акт приемки законченного строительством объекта (форма КС-11), при наличии положительных заключений государственных органов надзора; акт приемки территории временной базы подрядной организации.

Как указывает истец, работы по договору выполнены подрядчиком в полном объеме, в подтверждение чего в материалы дела представлены подписанные сторонами актыпо форме КС-2 и справки по форме КС-3. Каких-либо замечаний по качеству выполненных работ от заказчика не поступало.

ООО «Пурэнергомонтаж» в претензии от 16.04.2020, направленной в адресПАО «НК «Роснефть», потребовало погасить задолженность в сумме 1 535 725 рублей64 копеек (л.д. 47-49 т. 8).

Неисполнение ответчиком обязательств по оплате вышеуказанной суммы задолженности за выполненные по договору работы послужило основанием для обращения истца с настоящим иском в арбитражный суд.

В силу части 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. Обязательства возникают из договора и из иных оснований, указанных в Кодексе (статья 307 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно статье 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии со статьей 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

В силу пункта 1 статьи 746 Гражданского кодекса Российской Федерации оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса, а именно: если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

В силу части 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

Согласно правовой позиции, приведенной в пункте 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда», а также указанным выше условиям договора, основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику.

По правилам части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства,на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Предъявляя требование об оплате выполненных работ, подрядчик должен доказать фактическое выполнение работ и их стоимость.

Согласно подписанным без замечаний актам о приемке выполненных работ по форме КС-2, справкам о стоимости работ и затрат по форме КС-3, представленнымв материалы дела, подрядчик сдал, а заказчик принял работы по вышеуказанному договору (л.д. 113-150 т. 4, л.д. 28-77 т. 5).

Факт выполнения работ, их объем, качество и стоимость ответчиком в рамках настоящего дела не оспариваются, равно как и не оспаривается наличие задолженностив размере 1 535 725 рублей 64 копеек.

Возражения ПАО «НК «Роснефть» сводятся лишь к тому, что указанная сумма является резервом, условия для выплаты которого, перечисленные в пункте 6.1.3 договора, по мнению ответчика, еще не наступили.

В силу статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

В силу статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Возражения ответчика о не наступлении срока по уплате зарезервированной суммы судом отклоняются.

В силу пункта 2 статьи 1, статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации граждане и юридические лица свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора.

Таким образом, стороны вправе определить порядок оплаты выполненных работ по своему усмотрению.

Срок исполнения обязательства может исчисляться, в том числе, с момента исполнения обязанностей другой стороной, совершения ею определенных действий или с момента наступления иных обстоятельств, предусмотренных законом или договором. Если наступлению обстоятельства, с которым связано начало течения срока исполнения обязательства, недобросовестно воспрепятствовала или содействовала сторона, которой наступление или ненаступление этого обстоятельства невыгодно, то по требованию добросовестной стороны это обстоятельство может быть признано соответственно наступившим или ненаступившим (пункт 1 статьи 6, статья 157 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункт 23 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22.11.2016 N 54 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполнении»).

По условиям пункта 6.1.3 договора заказчик до окончания строительства объекта резервирует 10% от стоимости услуг подрядчика (кроме услуг по транспортировке МТР поставки заказчика, страхования, пуско-наладочных и проектно-изыскательских работ). Заказчик производит оплату зарезервированной части в течение 90 календарных дней, начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором стороны подписали нижеуказанные документы: акт приемки законченного строительством объекта (форма КС-11), при наличии положительных заключений государственных органов надзора; акт приемки территории временной базы подрядной организации.

Вышеуказанные условия договора не противоречат положениям статьи 746 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Вместе с тем, в соответствии с пояснениями истца, не опровергнутыми ответчиком, и подтвержденными письменными доказательствами, работы по договору подряда выполнены в полном объеме, в том числе пусконаладочные работы; ответчик какие-либо работы на объекте заказчика в настоящее время не производит. По утверждению истца, все необходимые документы сторонами подписаны и переданы заказчику, но посколькуООО «Пурэнергомонтаж» находится в процедуре банкротства, представить их не представляется возможным в виду отсутствия в распоряжении конкурсного управляющего, принявшего все зависящие от него меры для передачи и получения документации.

В свою очередь ответчик в процессе рассмотрения дела причины, препятствующие подписанию акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-11),не указал, равно как и не представил доказательства, подтверждающие, что строительство объекта по спорному договору не окончено, что ответчиком принимались (принимаются) меры по завершению строительства спорного объекта, а также доказательства того, что удерживая сумму резерва, ответчик действовал разумно и добросовестно (предпринимал меры к поиску нового подрядчика, завершению строительства и т.п.). Каких-либо замечаний, претензий по качеству работ, начиная с момента окончания срока выполнения работ по договору (24.10.2016) вплоть до настоящего времени, заказчик подрядчикуне предъявлял. Не приведено соответствующих доводов и при рассмотрении дела в суде.

Согласно правовому подходу, изложенному в определении Верховного Суда Российской Федерации от 26.02.2016 № 309-ЭС15-13978, бремя доказывания тех или иных фактов должно возлагаться на ту сторону спора, которая имеет для этого объективные возможности и, исходя из особенностей рассматриваемых правоотношений, обязана представлять соответствующие доказательства в обоснование своих требований и возражений.

По мнению суда, вышеперечисленные доказательства совершенно без претерпевания какого-либо непосильного бремени или, тем более, ущемления своих прав, мог бы предоставить ответчик.

Фактическое выполнение подрядчиком всех работ по договору и передача их заказчику порождают необходимость соотнесения взаимных предоставлений сторон по этому договору и определения завершающей обязанности одной стороны в отношении другой.

Принимая во внимание отсутствие доказательств того, что строительство объектапо договору подряда не окончено, а также отсутствие доказательств принятия ответчиком мер по завершению строительства спорного объекта, учитывая продолжительность временного периода, истекшего с момента подписания оправдательных документов, при не оспоренном доводе истца о завершении подрядчиком всех работ на объекте и прекращении ответчиком выполнения работ на объекте, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для удержания зарезервированной суммы.

Согласно пункту 3 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. В силу пункта 4 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

Суд отмечает, что с момента подписания актов о приемке выполненных работ и по дату судебного заседания все разумные сроки ожидания истекли. Позиция заказчика, получившего тот результат работ, который был предусмотрен спорным договором и представляет для него потребительскую ценность (обратного из материалов дела не следует), заключающаяся в многолетнем пассивном ожидании лишь формального подписания акта КС-11, в условиях длительной неоплаты работ (в нарушение обычной договорной практики по подряду), не соответствует стандартам добросовестности и, по сути, является злоупотреблением договорными условиями.

Кроме того, в силу требований действующего законодательства обратитьсяв государственные органы надзора за получением положительных заключений (в случае отсутствия таковых) может и сам заказчик. Помимо этого, утверждение итогового актао приемке выполненных работ зависит только от воли самого заказчика. В случае необходимости данного документа заказчику в качестве отчетности, он не лишен праваи возможности самостоятельно его изготовить и подписать.

Поскольку подрядчиком доказана добросовестность его действий, выразившаясяв своевременном исполнении обязательств по договору подряда, учитывая истечение всех разумных сроков по оплате образовавшейся задолженности за выполненные работы, суд признает обязательство, связанное с началом течения срока исполнения обязательства по оплате резерва, наступившим. Возражения ответчика в данной части судом отклоняются.

Довод ответчика о том, что истцом пропущен срок исковой давности по заявленным требованиям, также отклоняется судом.

В силу статьи 203 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности прерывается предъявлением иска в установленном порядке, а также совершением обязанным лицом действий, свидетельствующих о признании долга. После перерыва течение срока исковой давности начинается заново; время, истекшее до перерыва, не засчитывается в новый срок.

Согласно разъяснениям Пленума Верховного Суда Российской Федерации, изложенным в абзаце втором пункте 20 Постановления от 29.09.2015 № 43 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности» (далее - Постановление № 43), к действию, свидетельствующему о признании долга в целях перерыва течения срока исковой давности, в частности, может относиться акт сверки взаимных расчетов, подписанный уполномоченным лицом.

В пункте 22 Постановления № 43 указано, что совершение представителем должника действий, свидетельствующих о признании долга, прерывает течение срока исковой давности при условии, что это лицо обладало соответствующими полномочиями (статья 182 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В материалы дела истцом представлен акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 31.12.2017 (л.д. 89, 90 т. 5). Акт содержит необходимые реквизиты, подписи сторон и печати, из его содержания следует факт признания ответчиком спорной задолженностипо договору. О фальсификации данного акта сверки ответчик не заявлял (статья 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). Таким образом,с учетом даты обращения истца с настоящим иском в арбитражный суд общий срок исковой давности по заявленным требованиям не истек.

На основании изложенного, учитывая, что ответчик не подтвердил факт погашения задолженности перед истцом, размер долга не оспорил, суд считает подлежащим удовлетворению требование истца к ответчику о взыскании задолженности в сумме1 535 725 рублей 64 копеек.

В соответствии со статьями 101, 110, 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, с учетом предоставленной истцу отсрочки уплаты государственной пошлины, государственная пошлина подлежит  взысканию с ответчикав доход федерального бюджета.

Учитывая изложенное, руководствуясь статьями 9, 16, 64, 65, 71, 167, 168, 169, 170, 171, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить.   

Взыскать с публичного акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть»в пользу общества с ограниченной ответственностью «Пурэнергомонтаж» 1 535 725 рублей 64 копейки – сумму задолженности.

Взыскать с публичного акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть» в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 28 357 рублей.

Настоящее решение может быть обжаловано в Восьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия путем подачи апелляционной жалобы. Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в суд кассационной инстанции при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. 

В соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры разъясняет, что в соответствии со статьей 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.

По ходатайству указанных лиц копии решения, вынесенного в виде отдельного судебного акта, на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Судья                Е.В. Инкина