РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Москва 

04.12.2017 года                                                           Дело № А40-169658/17-110-1577

Резолютивная часть решения объявлена 27.11.2017 года 

Решение в полном объеме изготовлено 04.12.2017 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи Мищенко А.В. /единолично/, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з ФИО1,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску акционерного общества "ПРИМОРГРАЖДАНПРОЕКТ" (ОГРН 

<

***>, 690091,

<

...>)  к открытому  акционерному обществу "ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЙ ТРЕСТ ПО ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ МОСКОВСКОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО УЗЛА ИМЕНИ В.Ю. АБДУРАХМАНОВА" (ОГРН 

<

***>, 121374, 

<

...>) о взыскании 35 092 778,66 руб.,

при участии:

от истца – ФИО2 по дов. от 25.07.2016,

от ответчика - ФИО3 по дов. от  01.02.2017№31,

УСТАНОВИЛ:

акционерное общество "ПРИМОРГРАЖДАНПРОЕКТ"  обратилось в Арбитражный суд города Москвы к открытому  акционерному обществу "ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЙ ТРЕСТ ПО ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ МОСКОВСКОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО УЗЛА ИМЕНИ В.Ю. АБДУРАХМАНОВА" о взыскании " 33 759 642 руб. 56  коп. задолженности, 1 333 136 руб. 10  коп. процентов за пользование чужими денежными средствами.

Ответчик иск не признал, отзыв не представил.

Заслушав представителей сторон, исследовав и оценив представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам:

Как усматривается из материалов дела, между ОАО «Трест Мосэлектротягстрой» и ОАО «Приморграждаыпроект» был заключен договор № 10-ПИР/ГУС-15 от 15.02.2013г. на выполнение проектных и изыскательских работ по двум объектам - Военный городок №21-22 «Западный« (шифр объекта П-34/12) и «Военный городок №6 «Северный « (шифр объекта П-30/12).

При проведении работ данный договор по инициативе Заказчика был перезаключен путем заключения двух договоров:

в отношении работ по объекту «Военный городок №21-22 «Западный», 

<

...> « ( шифр объекта П-34/12) заключен договор № 1314187385602090942000000/239-ПИР/ГУС-15 от 01.12.2016г. ( далее по тексту договор)

и в отношении работ по объекту «Военный городок №6 «Северный», 

<

...> « ( шифр объекта П-30/12) заключен договор № 131418738556209О942ОШО00/205-ПИР/ГУС-15 от 0!. 12.2016г (далее по тексту договор).

Все основные условия данных договоров являются сходными и перезаключение было осуществлено по инициативе и заявлению Заказчика и связано с введением особого порядка осуществления расчетов по каждому объекту проектирования в отдельности ввиду поскольку проектируемые объекты являлись предметом государственного контракта и было необходимо установить в отношении каждого объекта идентификатор государственного контракта.

В соответствии с соглашением о расторжении договора № 10-ПИР/ГУС-15 от 15.02.2013г. в связи с перезаключением договора сторонами было подтверждено, что согласно подписанным актам сдачи-приемки выполненных проектнв1х и изыскательских работ Заказчиком были приняты работы по Договору на сумму 74 797 369.49 руб. . в том числе НДС 18 % - 11 409 768,23 руб., из них:

- по шифру П-30/12 ( «Северный»)- в сумме 37 582 864,14 руб.

-по шифру П-34/12 («Западный») - в сумме 37 214 505.35 руб. Заказчиком по договору № 10-ПИР/ГУС-15 от 15.02.2013г. всего были перечислены денежные средства в общей сумме 86 945 726,00 руб. . При перезаключении договора Стороны договорились о распределении указанной суммы аванса между двумя объектами, а с учетом принятых Заказчиком работ и их стоимости сумма оставшегося аванса в размере в 12 148 356,51 руб. «перешла» на объект по шифру П-34/12 («Западный»).

В то же время к моменту перезаключения договора 01.12.2016г. Подрядчиком были сданы Заказчику работы, но в отношении данных работ Заказчик затягивал подписание актов сдачи-приемки выполненных работ.

Так до 01.12.2016г.. Заказчику были переданы результаты работ, но акты о приемки работ не были подписаны в отношении следующих работ:

по объекту «Военный городок № 6 , «Северный» (шифр П-30/12)

- I этап инженерные изыскания по накладным № 309 от 29.12.2014г., №309А от

29.12.2014г., № 36 от 02.04.2015г.

- I этап Наружные сети ливневой канализации и их сооружений по накладным №6 от 25.03.2016г., № 40 от 18.08.2016г.

- VII этап Наружные сети теплоснабжения и их сооружения. Тепловые сети для присоединения (подключения) проектируемых зданий по накладным №42 от 01.09.2016г.. №44 от 12.06.2016г.

По объекту «Военный городок № 21-22 «Западный» (шифр П-34/12):

-I этап инженерные изыскания по накладным № 37 от 02.04.2015г., № 39 от 07.04.2015г.

-I Этап. Наружные сети ливневой канализации и их сооружений по накладным № 30 от28.06.2016г., № 51 от 18.10.2016г., № 37 от 02.04.15. № 39 от 07.04.15 -V этап. Парковая зона (Отапливаемые хранилища № 7-11.20-24) по накладным № 32 от 25.07.2016г., № 59 от 15.11.2016г.

-VI этап Парковая зона (Отапливаемые хранилища № 31 и площадки для установки МК-ХВВТ № 29,30) по накладным № 33 от 27.07.2016г, № 61 от 16.11.2016г.

-VII этап (реконструкция столовая, казарма, учебный корпус) по накладным № 122 от 23.11.2015г., № 1 от 19.01.2016г., № 4 от 08.02.16

-VIII (реконструкция казарма ) по накладным № 106 от 16.10.2015г., № 2 от 19.01.2016г., № 34 от 27.07.2016г., № 222 от 18.08.2014г.

VIII (реконструкция казарма ) по накладным № 120 от 12.1 1.2015г., № 35 от 27.07.2016г

IX (реконструкция казарма ) по накладным № 118 от 10.11.2015, № 3 от 19.01.2016г.. № 36 от 27.07.2016г

IX (реконструкция казарма ) по накладным № 147 от Л3.12.2015г., №,37 от 27.07.2016г. 

В соответствии со ст. 11.1. договоров от 01.1-2.2016г. все обязательства, неисполненные Сторонами в части данных Работ по договору № 10-ПИР/ГУ С-15 от 15.02.2013г. к моменту подписания договоров подлежат исполнению в соответствии с договорами от 01.12.2016г., в том числе обязательства по выполнению расчетов между Сторонами.

В соответствии со ст.ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона и односторонний отказ от их исполнения не допускается за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно ст. 758 ГК РФ по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат.

По отдельным этапам работы были выполнены и проектная документация передана в соответствии с договором № Ю-ПИР/ГУС-15 от 15.02.2013г., но расчеты за переданный результат работ не произведен.

По объекту «Военный городок №6 «Северный», 

<

...> « ( шифр объекта П-30/12) проектная документация по I и VII этапу работ была сдана Заказчику до заключения договора от 01.12.2016г., но расчеты за выполнение данных работ не проведены.

В соответствии с актом № 7/П-30/12 от 20.01.2017г. сдачи приемки выполненных работ работы по I и VII этапу по объекту «Военный городок №6 «Северный», 

<

...> « ( шифр объекта П-30/12) выполнены в полном объеме . Стоимость выполненных работ составила - 905595 1,60 руб., в том числе НДС.

Так, по объекту «Военный городок №21-22 «Западный«, 

<

...> « ( шифр объекта П-34/12) была сдана Заказчику до заключения договора от 01.12.2016г. проектная документация по I, V,VI, VII, VIII,IX этапам работ, но расчеты за выполнение данных работ не проведены .

В соответствии с актом № 8/ПД I, V,\T этапы и ПД и РД / VII, VIIIJX этапы /34/12 от 20.01.2017г. сдачи приемки выполненных работ выполнены в полном объеме. Стоимость выполненных работ составила -36852047,47 руб., в том числе НДС. С учетом суммы аванса 12 148 356,51 руб. к оплате за выполненные работы подлежала сумма в размере 24703690,96 руб.

В соответствии с п.4.2. договоров от 01.12.2016г. оплата выполненных Подрядчиком Работ производится Заказчиком на основании оригинала счета, оформленного Подрядчиком на основании первичной учетной документации в течение 25 (двадцати пяти) банковских дней с момента подписания Акта о приемке выполненных проектных работ. Указанный срок по оплате работ по указанному вышеуказанным актам от 20.01.2017г. в отношении работ по двум указанным объектам истек 28.02.2017г.

Вместе с тем  платежи в установленном порядке за выполненные работы не произведены. Предъявленные Заказчику претензии от 01.03.2017г., остались без ответа.

Ответчик свои обязательства не исполнил, работы в срок в размере 33 759 642,56 руб. не оплатил, доказательств погашения задолженности не представил.

При указанных обстоятельствах иск в этой части подлежит удовлетворению.

Кроме того, поскольку оплата работ ответчиком в установленный договорами срок не произведена, с него на основании ст. 395 ГК РФ подлежат взысканию проценты за пользование чужими денежными средствами, что по расчету истца за период с 01.03.2017г. по 16.08.2017г., проверенному судом, составляет 1 333 136,10 руб. 

В соответствии со ст. 110 АПК РФ расходы по госпошлине относятся на ответчика.  

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 110, 123, 156, 169-171 АПК РФ,  

Р Е Ш И Л:

Взыскать с открытого акционерного общества "ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЙ ТРЕСТ ПО ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ МОСКОВСКОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО УЗЛА ИМЕНИ В.Ю. АБДУРАХМАНОВА" в пользу акционерного общества "ПРИМОРГРАЖДАНПРОЕКТ" 33 759 642 руб. 56  коп. задолженности, 1 333 136 руб. 10  коп. процентов, 198 464 руб. в возмещение расходов пот госпошлине.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение  месяца с даты его принятия.

Судья:               А.В.Мищенко