АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А45-31690/2024

город Новосибирск

10 июля 2025 года

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Серёдкиной Е.Л., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Красько А.А., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «АМТ-Групп» (ОГРН 

<

***>), г. Новосибирск,  

к обществу с ограниченной ответственностью «СК «Вектор» (ОГРН 

<

***>), г. Новосибирск,  

при участии в деле третьих лиц: ООО «Шестнадцатая концессионная компания «Просвещение» (ОГРН 

<

***>), ООО «Двадцатая концессионная компания «Просвещение» (ОГРН 

<

***>), ГКУ НСО «УКС» (ОГРН 

<

***>), ООО «Орион» (ОГРН 

<

***>), Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу (ИНН: 

<

***>),  

о взыскании 95508396,83 рублей. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

решил:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СК «Вектор» (ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «АМТ-Групп» (ОГРН 

<

***>) по договору субподряда № Д-СП-17 от 28.08.2023 7 045 735 рублей 09 копеек неосновательного обогащения, 2 796 496 рублей 55 копеек штрафа, 2 069 407 рублей 45 копеек пени за нарушение срока выполнения работ, 295 000 рублей неустойки за нарушение срока выполнения работ свыше 15 дней, 2 515 327 рублей 43 копейки пени за нарушение срока возврата аванса и начиная с 16.05.2024 пеню по ставке 0,1% от общей суммы аванса за каждый день просрочки до полного возврата неосновательного обогащения;  

- по договору субподряда № НН-СП-15 от 28.08.2023 15 940 342 рубля 23 копейки неосновательного обогащения, 1 979 459 рублей 38 копеек штрафа, 1 464 799 рублей 94 копейки пени за нарушение срока выполнения работ, 295 000 рублей неустойки за нарушение срока выполнения работ свыше 15 дней, 5 690 702 рубля 18 копеек пени за нарушение срока возврата аванса и начиная с 16.05.2024 пеню по ставке 0,1% от общей суммы аванса за каждый день просрочки до полного возврата неосновательного обогащения;  

- по договору субподряда № М-СП-20 от 11.12.2023 12 205 146 рублей 04 копейки неосновательного обогащения, 2 890 847 рублей 39 копеек штрафа, 700 197 рублей 06 копеек пени за нарушение срока выполнения работ, 65 000 рублей неустойки за нарушение срока выполнения работ свыше 15 дней, 554 657 рублей 23 копейки убытков, 4 357 237 рублей 14 копеек пени за нарушение срока возврата аванса и начиная с 16.05.2024 пеню по ставке 0,1% от общей суммы аванса за каждый день просрочки до полного возврата неосновательного обогащения; 200 000 рублей расходов по уплате государственной пошлины.  

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд, в течение месяца после его принятия.  

Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа при условии, если оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья Е.Л. Серёдкина