АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ  424002, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект 40  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

РЕШЕНИЕ арбитражного суда первой инстанции (резолютивная часть) 

«

Дело № А38-1339/2019

г. Йошкар-Ола

2» октября 2019 года

Арбитражный суд Республики Марий Эл  

в лице судьи Фурзиковой Е.Г. 

при ведении протокола и аудиозаписи судебного заседания  секретарем ФИО1  

рассмотрел в открытом судебном заседании дело 

по иску акционерного общества «Жилищно-эксплуатационная управляющая компания «Заречная» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к ответчику обществу с ограниченной ответственностью «ТеплоТехМонтаж» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 

о понуждении устранить недостатки работ и взыскании расходов на проведение  экспертизы  

с участием представителей: 

от истца – ФИО2 по доверенности (после перерыва),  от ответчика – не явился, извещен по правилам статьи 123 АПК РФ,  

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 АПК РФ, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

1. Обязать общество с ограниченной ответственностью «ТеплоТехМонтаж»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в течение двух месяцев со дня вступле- ния решения арбитражного суда в законную силу устранить недостатки выпол- ненных работ по договору подряда № 1 от 30.06.2017 по ремонту кровли жилого  дома по адресу: 

<

...>: произвести демонтаж профнастила и монтаж профнастила оцинкованного с  покрытием полиэстер на кровле многоквартирного дома площадью 592,2 кв.м,  произвести демонтаж и монтаж планки конька (коньковых элементов) размерами  10х200х200х10х2000 мм на кровле многоквартирного дома в количестве 45 штук,  произвести демонтаж и монтаж торцевой планки размерами 2 м на кровле многоквартирного дома в количестве 14 штук, произвести демонтаж и монтаж верхних  планок примыкания к кровле многоквартирного дома в количестве 50 штук, произвести демонтаж и монтаж планки нестандартной размерами 2 м на кровле мно- 

гоквартирного дома в количестве 5 штук, произвести демонтаж и монтаж верхних  желобов ендовы размерами 2 м на кровле многоквартирного дома в количестве 30  штук, произвести замену костыля кровельного на кровле многоквартирного дома  в количестве 24 штук, произвести демонтаж и монтаж устройств слуховых окон  на чердаке кровли многоквартирного дома в количестве 2 штук, произвести демонтаж и монтаж устройств снегозадержания на кровле многоквартирного дома  длиной 45 м, произвести демонтаж и монтаж лестниц, переходных мостиков на  кровле многоквартирного дома, 4 штуки, весом 0,196 т с соблюдением условий  договора подряда № 1 от 30.06.2017 и обязательных требований к видам работ и  материалам.  

2. Взыскать с общество с ограниченной ответственностью «ТеплоТехМонтаж» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу акционерного общества  «Жилищно-эксплуатационная управляющая компания «Заречная» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) убытки в сумме 30 000 руб. и расходы по  уплате государственной пошлины в сумме 8000 руб.  

3. Возвратить акционерному обществу «Жилищно-эксплуатационная управляющая компания «Заречная» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) из феде- рального бюджета государственную пошлину в сумме 1000 руб., уплаченную по  платежному поручению № 663 от 21.03.2019. Выдать справку на возврат государ- ственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в  Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Республики  Марий Эл.  

Судья Е.Г. Фурзикова