Арбитражный суд Калининградской области Рокоссовского ул., д. 2, 

<

...> http://kaliningrad.arbitr.ru Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е

 

г. Калининград Дело № А21-9284/2025  

«22» октября 2025 года 

Резолютивная часть решения объявлена «08» октября 2025 года Решение изготовлено в полном объеме «22» октября 2025 года  

Арбитражный суд Калининградской области в составе судьи Шкутко О.Н.  

при ведении протокола судебного заседания секретарем Захарян А.А. 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "КРЫЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) к АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "ПРИБАЛТИЙСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "ЯНТАРЬ" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) о взыскании 7 750 879,82 рубля  

при участии в судебном заседании: от истца – ФИО1 по доверенности; от ответчика: н/я; установил. 

 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КРЫЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) обратился в суд с иском к АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "ПРИБАЛТИЙСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "ЯНТАРЬ" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) о взыскании основного долга в сумме 6 935 324,31 рубля, процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме 815 555,51 рубля.  

 В судебном заседании судом приняты к рассмотрению уточненные требования истца о взыскании с ответчика основного долга в сумме 5 548 259,44 рубля и процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме 815 555,51 рубля.  

 Судом установлено. 

 Между сторонами был заключен договор на выполнение работы от 20.05.2016 № 1418187304982010105000077/27-92/16 в редакции дополнительных соглашений и протокола разногласий. Согласно договору в редакции дополнительных соглашений и протокола разногласий исполнитель (ответчик) обязуется выполнить и сдать заказчику (ответчику) работу "Проведение государственных мореходных испытаний корабля проекта 11711 (зав. № С-301) (измерение характеристик волнения)", а заказчик обязуется принять и оплатить работу исполнителя в сумме 11 571 765,8 ркбля (в том числе НДС 1 928 627,64 рубля), полный объем работы и отдельные ее  

этапы указаны в прилагаемом к договору календарном плане, составляющем неотъемлемую часть договора.  

 Согласно уточненному расчету истца, с учетом оплаты ответчиком 1 387 064,87 рубля по платежному поручению от 26.09.2025, задолженность ответчика по оплате работ, выполненных истцом и принятых ответчиком по актам от 06.09.2024 № 660 и № 661 составила 5 548 259,44 рубля.  

 В претензиях от 23.12.2024 № 1910/24292-2024 и от 06.03.2025 № 1910/4042-2025, истец просил ответчика оплатить задолженность по договору в сумме 6 935 324,31 рубля.  

 В связи с тем, что задолженность по оплате работ ответчиком погашена не была, истец обратился в суд с настоящим иском.  

 На день рассмотрения дела в суде ответчиком не представлено доказательств оплаты основного долга по договору в сумме 5 548 259,44 рубля или обоснованных возражений в отношении размера основного долга.  

 Согласно расчету истца за период с 18.12.2024 по 11.07.2025 подлежат уплате проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 815 555,51 рубля.  

 Ответчик не представил возражений в отношении расчета процентов и доказательств уплаты процентов.  

 Расчет проверен судом, признан обоснованным. 

 Требования истца подлежат удовлетворению на основании положений статей 309, 310, 395, 711 ГК РФ, положений договора от 20.05.2016 № 1418187304982010105000077/27-92/16 в редакции дополнительных соглашений и протокола разногласий.  

 Решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа.  

 Руководствуясь статьями 167-171 АПК РФ, суд 

Р Е Ш И Л:

Взыскать с акционерного общества «Прибалтийский судостроительный завод «ЯНТАРЬ» в пользу Федерального государственного унитарного предприятия «КРЫЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР» основной долг в сумме 5 548 259,44 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 815 555,51 рублей, расходы по госпошлине в сумме 215 914 рублей.  

 Возвратить Федеральному государственному унитарному предприятию «КРЫЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР» из Федерального бюджета госпошлину в сумме 41 612 рублей.  

 Решение может быть обжаловано в месячный срок в арбитражный апелляционный суд.  

 Судья О.Н. Шкутко