АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4,

www.ekaterinburg.arbitr.ru e-mail: info@ekaterinburg.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации

 

МОТИВИРОВАННОЕ 

РЕШЕНИЕ

Дело №А60-38942/2023

26 сентября 2023 года

г. Екатеринбург

 

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи Е.В. Высоцкой рассмотрел в порядке упрощенного производства дело № А60-38942/2023 по исковому заявлению публичного акционерного общества "Трансконтейнер" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к акционерному обществу "Вагонная ремонтная компания - 1" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

о взыскании неустойки по договору № ТКд/21/01/0004/ВРК-1/3/2021 от 01.01.2021 в размере 4 826 руб. 50 коп.

 

Дело рассмотрено в порядке упрощенного производства без вызова сторон после истечения сроков, установленных судом для представления доказательств и иных документов в соответствии с главой 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Лица, участвующие в деле, о принятии искового заявления, возбуждении производства по делу и рассмотрении дела в порядке упрощенного производства извещены арбитражным судом надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации на сайте суда.

Отводов составу суда не заявлено.

 

27.07.2023 от ответчика поступило ходатайство об ознакомлении с материалами дела.

27.07.2023 от истца поступило ходатайство об уточнении заявленных требований, просит взыскать неустойку по договору № ТКд/21/01/0004/ВРК-1/3/2021 от 01.01.2021 с 28.06.2022 по 23.09.2022 в размере 9 976 руб. 38 коп.

Уточнения приняты судом на основании ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

01.08.2023 от истца поступило ходатайство о приобщении к делу дополнительных документов.

02.08.2023 от ответчика поступил отзыв на исковое заявление.

Других ходатайств и заявлений в суд не поступало.

 

Судом 18.09.2023 путем подписания резолютивной части вынесено решение. Публичное акционерное общество "Трансконтейнер" обратилось в арбитражный суд с заявлением о составлении мотивированного решения. Учитывая, что заявление подано с соблюдением установленного ст. 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации срока, изготовлено мотивированное решение.

 

Публичное акционерное общество "Трансконтейнер" обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с исковым заявлением к акционерному обществу "Вагонная ремонтная компания - 1" о взыскании неустойки по договору № ТКд/21/01/0004/ВРК-1/3/2021 от 01.01.2021 в размере 4 826 руб. 50 коп.

Ответчик возражает против удовлетворения заявленных требований по основаниям, изложенным в отзыве, в случае признания требований обоснованными, просит снизить размер неустойки на основании ст. 333 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд 

 

установил:

Между публичным акционерным обществом "Трансконтейнер" (заказчик) (далее – ПАО «Трансконтейнер», истец) и акционерным обществом "Вагонная ремонтная компания - 1" (подрядчик) (далее – АО «ВРК-1», ответчик) заключен договор № ТКд/21/01/0004/ВРК-1/3/2021 от 01.01.2021 (далее - Договор) по условиям которого, Заказчик поручает и обязуется оплатить, а Подрядчик принимает на себя обязательства производить текущий ремонт грузовых вагонов (далее -TP), принадлежащих Заказчику на праве собственности, аренды или ином законном основании (далее -грузовые вагоны) в вагонных ремонтных депо Подрядчика (далее - Депо Подрядчика), в том числе определение ремонтопригодности и ремонт колесных пар и запасных частей. Перечень Депо Подрядчика указан в Приложении № 1 к настоящему Договору (п. 1.1 Договора).

Основанием для отцепки грузового вагона в TP являются требования, установленные Инструкцией по техническому обслуживанию вагонов в эксплуатации (Инструкция осмотрщику вагонов), утвержденной Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества (протокол от 21-22 мая 2009 года № 50) (п. 1.4 Договора).

Согласно п. 2.1 Договора, Стоимость проведения TP одного грузового вагона определяется исходя из фактически выполненных ремонтных работ на основании дефектной ведомости ВУ-22. Цена ремонтных работ, одного грузового вагона без учета стоимости запасных частей собственности Подрядчика, ремонта колесных пар собственности Заказчика (Приложение № 13 к настоящему Договору), полной окраски грузовых вагонов (Приложение Х° 17 к настоящему Договору), услуг по подаче грузовых вагонов с железнодорожных путей общего пользования на тракционные пути Депо Подрядчика и уборку грузовых вагонов с тракционных путей Депо Подрядчика на железнодорожные пути общего пользования (Приложение № 4), услуг по хранению и погрузки (выгрузки) ремонтопригодных узлов, деталей и колесных пар грузовых вагонов собственности Заказчика и металлолома (неремонтопригодных узлов и деталей собственности Заказчика) на территории Депо Подрядчика (Приложение № 5) определена Прейскурантом цен на ремонтные работы, выполняемые при текущем отцепочном ремонте грузовых вагонов (Приложение № 2 к настоящему Договору).

НДС подлежит исчислению и уплате в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

Изменение Прейскуранта цен не допускается в течение всего срока действия Договора. Внесение в Прейскурант цен новых (ранее отсутствующих ценовых позиций), а также изменение перечня вагоноремонтных предприятий Подрядчика не являются изменением Прейскуранта цен.

Лимит стоимости контрольно-регламентных работ при текущем отцепочном ремонте (ТР-2) с учетом подачи/уборки, без учета замены литых деталей и иных видов работ проводимых в рамках TP, без учета НДС указан в Приложении №16 к настоящему Договору.

Цена на капитальный ремонт колесных пар собственности Заказчика определяется настоящим Договором (Приложение № 2), и отражена без учета НДС. НДС подлежит исчислению и уплате в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

Цена полной окраски грузовых вагонов определяется настоящим Договором (Приложение № 17), и отражена без учета НДС. НДС подлежит исчислению и уплате в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

Цена запасных частей, стоимость которых не учтена в работах по замене забракованных запчастей на новые или бывшие в употреблении собственности Подрядчика определяется настоящим Договором (Приложение № 13), и отражена без учета НДС. НДС подлежит исчислению и уплате в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

В случае изменения цен (уменьшения/увеличения) на запасные части собственности Подрядчика, Подрядчик в течение 5 (пяти) календарных дней с даты изменения цен на запасные части, закупаемые Подрядчиком у сторонних организаций, обязан уведомить Заказчика об указанном изменении цен и направить проект дополнительного соглашения Заказчику посредством факсимильной или электронной связи

Согласование изменения цен и подписание дополнительного соглашения к настоящему Договору, осуществляется Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения уведомления об изменении цен. Выполненные ремонтные работы на грузовом вагоне и их цена отражаются в Расчетно-дефектной ведомости на ремонт грузового вагона (далее - Расчетно-дефектная ведомость) по согласованной форме (Приложение № 3).

Расчетно-дефектная ведомость формируется Депо Подрядчика и утверждается начальником Депо Подрядчика.

Отдельной строкой в Расчетно-дефектную ведомость включается сбор за подачу грузовых вагонов с железнодорожных путей общего пользования на тракционные пути Депо Подрядчика и их уборку после ремонта с тракционных путей Депо Подрядчика на железнодорожные пути общего пользования.

Ставка сбора за подачу 1 (одного) грузового вагона с железнодорожных путей общего пользования на тракционные пути Депо Подрядчика и уборку с тракционных путей Депо Подрядчика на железнодорожные пути общего пользования определяется настоящим Договором (Приложением № 4 к настоящему Договору), и отражена без учета НДС. НДС подлежит исчислению и уплате в порядке предусмотренном законодательством РФ.

Срок хранения металлолома исчисляется с даты подписания Сторонами акта приема-передачи товарно-материальных ценностей на хранение формы МХ-1 до момента его отгрузки по разнарядке Заказчика, с учетом указанных в ней сроков. Акт о возврате товарно-материальных ценностей, сданных на хранение по форме МХ-3 подписывается Сторонами на дату фактической отгрузки металлолома.

Цена услуг по хранению металлолома собственности Заказчика в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта приема-передачи товарно-материальных ценностей на хранение формы МХ-1 входит в стоимость работ по текущему ремонту грузового вагона Заказчика, указанного в первом абзаце настоящего пункта.

Цена услуг по хранению металлолома на территории Депо Подрядчика собственности Заказчика, начиная с 16 (шестнадцатого) дня с даты подписания Сторонами акта приема-передачи

товарно-материальных ценностей на хранение формы МХ-1 определяется в соответствии с Протоколом согласования цены на хранение и погрузку (выгрузку) узлов, деталей, колесных пар и металлолома (Приложение № 5 к настоящему Договору).

В случае, если отгрузка металлолома не произведена в дату, указанную в разнарядке Заказчика, плата за хранение данного металлолома Подрядчиком не взимается (за исключением случаев, когда задержка отгрузки вызвана виновными действиями Заказчика).

Срок хранения ремонтопригодных узлов, деталей и колесных пар собственности Заказчика исчисляется с даты подписания акта приема-передачи товарно-материальных ценностей на хранение формы МХ-1 до даты подписания Сторонами акта о возврате товарно-материальных ценностей формы МХ-3.

Цена услуг по хранению ремонтопригодных узлов, деталей и колесных пар собственности Заказчика в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта приема-передачи товарно-материальных ценностей на хранение формы МХ-1 входит в стоимость работ по текущему ремонту грузового вагона Заказчика, указанного в первом абзаце настоящего пункта.

Цена услуг по хранению ремонтопригодных узлов, деталей и колесных пар собственности Заказчика начиная с 31 (тридцать первого) дня даты подписания Сторонами акта приема-передачи товарно-материальных ценностей на хранение формы МХ-1 определяется в соответствии с Протоколом согласования цены на хранение и погрузку (выгрузку) узлов, деталей, колесных пар и металлолома (Приложение № 5 к настоящему Договору).

Перечень контрольно-регламентных работ, выполняемых при текущем отцепочном ремонте в объеме ТР-2 указан в Приложении № 18 к настоящему Договору.

В соответствии с п. 4.1 Договора, Продолжительность нахождения одного грузового вагона заказчика в TP не должна превышать 78 часов с момента подачи грузового вагона Заказчика на станцию примыкания депо подрядчика.

Сроки выполнения подрядчиком работ по определению ремонтопригодности и ремонту деталей, узлов и колесных пар грузовых вагонов определяются сторонами в Заявках (Приложение № 19 к настоящему Договору).

Сроки выполнения подрядчиком работ по определению ремонтопригодности и ремонту деталей, узлов и колесных пар грузовых вагонов исчисляются с даты доставки запасных частей в депо подрядчика и оформления акта приема-передачи узлов и деталей (Приложение № 20 к настоящему договору) и не могут превышать 5 (пяти) суток.

Обязательства подрядчика по выполнению ремонта грузовых вагонов считаются исполненными с момента передачи отремонтированных грузовых вагонов перевозчику для отправки по маршруту, указанному в заявке заказчика.

Проанализировав представленные в материалы дела документы, суд пришел к выводу, что сторонами заключен договор, который по своей правовой природе является договором подряда.

Соответственно, правоотношения сторон в данном случае регулируются § 1 главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии с ч. 1 ст. 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда подрядчик обязуется выполнить по заданию заказчика определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно п. 1 ст. 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Истец указывает, что в рамках исполнения договора от 01.01.2021 № ТКд/21/01/0004/ВРК-1/3/2021 в вагонно ремонтных депо АО «ВРК-1» был произведен плановый ремонт грузовых вагонов: В ВЧДР Свердловск-Сортировочный и Чусовская - обособленных структурных подразделениях АО «ВРК-1» в период с 28.06.2022 по 23.09.2022 в ожидании деповского ремонта сверх норматива, установленного пунктом 4.1. договора, находились следующие вагоны собственности ПАО «ТрансКонтейнер»:

№ п/п

№ вагона

Дата, номер претензи и / дата получени я

претензи и

Дата подачи вагона в ремонт/пе ревода в нерабочий парк

Плановый срок выхода вагона из ремонта

Фактичес к ая дата

выхода вагона из

ремонта

Коли ч

ество суто

к прос

ро чки

Фактичес

кая стоимост ь ремонта вагона,

руб.

Неусто йка за наруше

ние сроков ремонт а, 0,1%

за каждый день,

руб

1.

92519099

Исх. 1476/НКП от

07.10.2022

/

24.10.2022

04.08.2022 17:43

07.08.2022 23:43

15.08.2022 14:10

7

19 502,97

136,52

2.

98102882

 

06.08.2022 18:13

10.08.2022 00:13

15.08.2022 14:10

4

4 360,49

17,44

3.

54124094

 

04.08.2022 17:43

07.08.2022 23:43

16.08.2022 13:00

8

19 502,97

156,02

4.

94181948

 

08.08.2022

12.08.2022

19.08.2022

6

61 338,73

368,03

 

18:10

00:10

11:00

 

 

5.

94185410

 

18.08.2022 02:03

21.08.2022 08:03

24.08.2022 15:00

2

19 502,97

39,01

6.

94838802

 

20.08.2022 05:43

23.08.2022 11:43

25.08.2022 15:50

1

40 163,92

40,16

7.

98021413

 

16.08.2022 04:41

19.08.2022 10:41

25.08.2022 15:50

5

20 915,93

104,58

8.

98151806

 

21.08.2022 06:16

24.08.2022 10:16

27.08.2022 11:30

2

19 502,97

39,01

9.

92542398

 

20.08.2022 00:47

23.08.2022 06:47

28.08.2022 13:00

4

21 093,17

84,37

10.

94860475

 

19.08.2022 15:21

22.08.2022 21:21

28.08.2022 13:00

5

11 836,45

59,18

11.

97899694

 

21.08.2022 23:22

25.08.2022 05:22

28.08.2022 13:00

2

19 502,97

39,01

12.

97950091

 

12.08.2022 06:03

15.08.2022 10:03

17.08.2022 17:50

!

11 887,59

11,89

13.

91781369

 

20.08.2022 00:47

23.08.2022 06:47

25.08.2022 17:50

,

11 840,65

11,84

14.

94884749

 

20.08.2022 00:47

23.08.2022 06:47

27.08.2022 13:20

 

15 673,91

47,02

15.

94184637

Исх. 1477/НКП от

07.10.2022

/

19.10.2022

27.07.2022 16:54

30.07.2022 22:54

01.08.2022 11:55

1

20 695,62

20,70

16.

54292479

 

29.07.2022 18:44

02.08.2022 0:44

04.08.2022 9:00

1

19 502,97

19,50

17.

59184093

 

30.07.2022 01:12

02.08.2022 7:12

04.08.2022 9:00

1

11 836,45

11,84

18.

91725044

 

29.07.2022 18:44

02.08.2022 0:44

04.08.2022 9:00

1

19 502,97

19,50

19.

94186848

 

30.07.2022 01:12

02.08.2022 7:12

04.08.2022 9:00

1

11 836,45

11,84

20.

54273776

 

25.07.2022 02:46

28.07.2022 8:47

08.08.2022 12:00

10

15 669,71

156,70

21.

94851805

 

31.07.2022 03:13

03.08.2022 9:13

08.08.2022 12:00

4

26 128,65

104,51

22.

94308855

 

02.08.2022 05:13

05.08.2022 11:13

09.08.2022 15:00

3

19 502,97

58,51

23.

94431483

 

02.08.2022 05:13

05.08.2022 11:13

09.08.2022 15:00

3

19 502,97

58,51

24.

54391156

 

31.07.2022 12:32

03.08.2022 18:32

10.08.2022 12:00

6

40 818,40

244,91

25.

94825569

 

06.08.2022 14:29

09.08.2022 20:29

11.08.2022 12:00

1

19 502,97

19,50

26.

98028954

 

06.08.2022 08:00

09.08.2022 14:00

11.08.2022 12:00

1

19 502,97

19,50

27.

98104219

 

06.08.2022 14:18

09.08.22 20:18

11.08.2022 12:00

1

19 502,97

19,50

28.

97922793

Исх. 1485/НКП от

07.10.2022

/

20.10.2022

28.06.2022 13:35

01.07.2022 19:35

03.07.2022 15:30

1

11 836,45

11,84

29.

98173487

 

29.06.2022 16:59

02.07.2022 22:59

04.07.2022 15:15

1

19 502,97

19,50

30.

94424389

 

02.07.2022 16:13

05.07.2022 22:13

07.07.2022 15:00

1

19 502,97

19,50

31.

94572997

 

04.07.2022 14:42

07.07.2022 20:42

09.07.2022 11:25

1

19 502,97

19,50

32.

98132558

 

06.07.2022 15:41

09.07.2022 21:41

11.07.2022 16:00

1

11 836,45

11,84

33.

54291513

 

07.07.2022 13:21

10.07.2022 19:21

12.07.2022 13:00

1

19 502,97

19,50

34.

54180294

 

07.07.2022 13:21

10.07.2022 19:21

13.07.2022 14:00

2

19 502,97

39,01

35.

92938794

 

13.07.2022

16.07.2022

18.07.2022

1

19 502,97

19,50

 

15:07

21:07

13:00

 

 

36.

91728444

14.07.2022 15:42

17.07.2022 21:42

19.07.2022 14:00

1

11 836,45

11,84

37.

94842903

14.07.2022 15:42

17.07.2022 21:42

19.07.2022 14:00

1

19 502,97

19,50

38.

95372496

14.07.2022 15:42

17.07.2022 21:42

19.07.2022 14:00

1

19 502,97

19,50

39.

91208298

16.07.2022 18:22

19.07.2022 0:22

22.07.2022 14:00

2

19 502,97

39,01

40.

91771550

16.07.2022 18:22

19.07.2022 0:22

24.07.2022 14:00

4

19 502,97

78,01

41.

94873254

16.07.2022 18:22

19.07.2022 0:22

24.07.2022 14:00

4

19 502,97

78,01

42.

98015696

16.07.2022 18:22

19.07.2022 0:22

24.07.2022 14:00

4

15 669,71

62,68

43.

94441334

18.07.2022 15:34

21.07.2022 21:34

25.07.2022 11:00

3

19 502,97

58,51

44.

95431193

21.07.2022 14:27

24.07.22 20:27

28.07.2022 12:00

3

29 564,36

88,69

45.

54291505

23.07.2022 14:34

26.07.2022 20:34

31.07.2022 11:00

4

19 304,97

77,22

46.

97937890

23.07.2022 04:51

26.07.2022 10:51

31.07.2022 11:00

4

19 502,97

78,01

47.

91771626

22.08.2022 16:02

25.08.2022 22:02

04.09.22 15:00

10

19 502,97

195,02

48.

94839180

04.09.2022 05:11

07.09.2022 11:11

09.09.22 14:00

2

19 502,97

39,01

49,

91726588

01.09.2022 05:54

04.09.2022 11:54

10.09.22 12:00

6

15 669,71

94,01

50.

92530393

01.09.2022 05:54

04.09.2022 11:54

10.09.22 12:00

6

15 669,71

94,01

51.

98020217

06.09.2022 21:10

10.09.2022 3:10

12.09.22 12:00

2

15 669,71

31,33

52.

92960491

05.09.2022 06:01

08.09.2022 12:01

13.09.22 13:30

5

19 502,97

97,51

53.

91782730

Исх. 1684/НКП

07.09.2022 14:58

10.09.2022 20:58

15.09.22 12:00

5

21 814,97

109,07

54.

98145949

от

09.09.2022

12.09.2022

15.09.22

 

19 502,97

58,51

 

 

14.11.2022

04:31

10:31

12:00

3

 

 

55.

94492691

/

28.11.2022

06.09.2022 06:37

09.09.2022 10:37

17.09.22 10:00

8

19 502,97

156,02

56.

94842044

12.09.2022 06:06

15.09.2022 12:06

18.09.22 11:30

3

16 862,36

50,59

57.

97970099

13.09. 022 00:51

16.09.2022 6:51

20.09.22 11:00

4

19 502,97

78,01

58.

98026248

15.09.2022 16:47

18.09.2022 22:47

21.09.22 12:00

3

19 502,97

58,51

59.

91718643

17.09.2022 01:45

20.09.2022 7:45

23.09.22 10:00

3

19 502,97

58,51

60.

95099891

18.09.2022 06:05

21.09.2022 12:05

24.09.22 10:00

3

19 502,97

58,51

61.

91586099

19.09.2022 14:11

22.09.2022 20:11

25.09.22 10:00

3

19 502,97

58,51

62.

91957969

Исх. 1686/НКП

18.09.2022 22:08

22.09.2022 4:08

25.09.22 10:00

3

19 502,97

58,51

63.

94051091

 

18.09.2022 06:05

21.09.2022 12:05

25.09.22 10:00

4

20 298,07

81,19

64.

95566295

от

16.11.2022

/

28.11.2022

19.09.2022 14:11

22.09.2022 20:11

25.09.22 10:00

3

19 502,97

58,50

65.

94605391

 

20.09. 2022 12:53

23.09.2022 18:53

26.09.22 10:00

3

15 669,71

47,00

66.

54314828

20.09.2022

23.09.2022

27.09.22

4

30 359,46

121,43

 

12:53

18:53

14:00

 

 

67.

91962407

20.09.2022 12:53

23.09.2022 18:53

28.09.22 12:00

5

19 502,97

97,51

68.

54263165

22.09.2022 15:50

25.09.2022 21:50

30.09.22 10:00

5

19 900,52

99,50

69.

94447539

23.09.2022 06:45

26.09.2022 12:45

30.09.22 10:00

4

11 836,45

47,35

70.

54177894

27.08.2022 19:44

31.08.2022 1:44

02.09.22 17:50

2

19 425,36

38,85

71.

59723296

27.08.2022 19:44

31.08.2022 1:44

02.09.22 17:50

2

21 953,33

43,91

72.

98106925

26.08.2022 17:30

29.08.2022 23:30

02.09.22 17:50

4

19 378,42

77,51

73.

91726315

27.08.2022 19:44

31.08.2022 1:44

04.09.22 14:10

4

19 378,42

77,51

74.

94870318

30.08.2022 22:37

03.09.2022 4:37

06.09.22 17:50

3

30 017,4

90,05

75.

94212693

30.08.2022 22:37

03.09.2022 4:37

07.09.22 17:50

4

25 786,59

103,15

76.

94306594

27.08.2022 19:44

31.08.2022 1:44

07.09.22 17:50

7

25 786,59

180,51

Согласно п. 4.1. Договора сроки выполнения ремонта грузовых вагонов исчисляются с момента подачи грузовых вагонов на станцию примыкания Депо Подрядчика и не превышают 6 (шесть) суток для деповского и 8 (восемь) суток для капитального ремонта.

Сроки выполнения Подрядчиком входного контроля запасных частей исчисляются с момента доставки запасных частей в депо Подрядчика и не превышают 5 (пяти) суток. Обязательства Подрядчика по выполнению ремонта грузовых вагонов считаются исполненными с момента передачи отремонтированных грузовых вагонов перевозчику для отправки по маршруту, указанному в заявке Заказчика.

Согласно имеющимся сведениям у истца и представленным документам в материалы дела, вагоны истца  превысили срок нахождения вагонов в ремонте от 1 до 10 суток.

Пунктом 7.3 Договора предусмотрена ответственность за нарушение подрядчиком сроков ремонта грузовых вагонов, заказчик вправе взыскать с подрядчика неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая) от фактической стоимости ремонта грузового вагона, указанной в Расчетно-дефектной ведомости за каждый календарный день просрочки.

В соответствии с п. 9.2. Договора истец направил в адрес ответчика претензии с требованием о возмещении неустойки за нарушение договорных обязательств.  Вместе с тем претензии оставлены без удовлетворения, в связи с чем истец обратился в арбитражный суд с настоящим исковым заявлением.

Согласно ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации  обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В силу положений ст. 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства.

Статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий (ч. 2 ст. 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Ответчик, возражая против удовлетворения заявленных требований, не оспаривает период начисленной истцом неустойки, однако считает, что размер неустойки является чрезмерным и подлежит снижению на основании ст. 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, поскольку ни каких убытков, кроме суммы ремонта, которая самостоятельно по иску ПАО «ТрансКонтеёнер» не понесло.

Штраф должен компенсировать истцу потери от недополученных доходов от использования (сдачи в аренду вагона либо перевозки грузов). Вместе с тем, ответчик указывает, что истец не представил документы в подтверждение несения убытков.

Кроме того, ответчик указывает, что истец просит взыскать неустойку за период с 28.06.2022 по 23.09.2022, вместе с тем, истцом не учтено, что в указанный период начисление каких-либо штрафных санкций не возможно, поскольку действовал мораторий, установленный Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2022 № 497 "О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами".

Изучив представленные в материалы дела документы на основании ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд пришел к следующим выводам.

Суд отмечает, что истец просит взыскать неустойку за нарушение подрядчиком сроков ремонта грузовых вагонов. Материалами дела подтверждается факт нарушения сроков ремонта грузовых вагонов, а именно в материалы дела представлены железнодорожные транспортные накладные, акты о выполненных работах, уведомления о приемке вагонов из ремонта, из дат которых следует, что срок ремонта вагонов превышает срок установленный договором.

Договором п. 7.3 прямо предусмотрена ответственность за нарушение сроков ремонта вагонов, ответчик не представил доказательств, того, что им были выполнены работы в сроки предусмотренные договором, в связи с чем как было указано ранее неустойка начислена истцом правомерно.

Вместе с тем, суд отмечает, что истец просит взыскать неустойку, период которой подпадает под действие моратория, установленного Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2022 № 497 "О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами".

Суд принимает во внимание, что Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2022 № 497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами» введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, в отношении юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей (п. 1).

Так положения пункта 1 настоящего постановления не применяются в отношении должников, являющихся застройщиками многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, включенных в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» в единый реестр проблемных объектов на дату вступления в силу настоящего постановления (п. 2).

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и действует в течение 6 месяцев. Поскольку данное постановление опубликовано 01.04.2022, то с этой даты невозможно начисление каких-либо финансовых санкций на задолженность ответчика.

Таким образом, до 01.10.2022 введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве организаций и индивидуальных предпринимателей по заявлениям, подаваемым кредиторами.

Поскольку период взыскания неустойки подпадает под действие моратория, то оснований для взыскания неустойки не имеется, на основании изложенного в удовлетворении требований судом отказано.

В соответствии с ч.1 ст.110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицом, участвующим в деле, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются со стороны.       

Поскольку в удовлетворении заявленных требований судом отказано, то расходы по оплате государственной пошлины относятся на истца.

На основании ст. 309, 310, 330, 702, 703, 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 28.03.2022 № 497 "О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами", руководствуясь статьями 110, 167-171, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

РЕШИЛ:

1. В удовлетворении заявленных исковых требований отказать. 

2. Решение арбитражного суда по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства, подлежит немедленному исполнению. Решение вступает в законную силу по истечении срока, установленного для подачи апелляционной жалобы. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено или не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.

3. Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия в полном объеме. 

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» http://ekaterinburg.arbitr.ru.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить соответственно на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru.

 

Судья                                                                                                                          Е.В. Высоцкая