224_4525336 

 

Арбитражный суд Пермского края Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А50-25720/2022

26 сентября 2023 года

г. Пермь

 

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Кудиновой О.В. при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Захаровой Е.А., 

рассмотрел в судебном заседании дело по иску муниципального казенного  учреждения "Управление капитального строительства" (ОГРН: 

<

***>,  дата присвоения ОГРН: 17.09.2002, ИНН: 

<

***>)  

к ответчику – обществу с ограниченной ответственностью "ИнтерСтрой"  (ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 07.07.2008, ИНН: 

<

***>)  

об исполнении обязательств в натуре, 

с привлечением третьих лиц: общество с ограниченной ответственностью  "Строительная компания "Кровля и фасад" (ОГРН: 

<

***>, дата  присвоения ОГРН: 13.08.2014, ИНН: 

<

***>), общество с ограниченной  ответственностью "ЕВРОЭКСПЕРТСТРОЙ" (ОГРН: 

<

***>, дата  присвоения ОГРН: 04.05.2017, ИНН: 

<

***>), муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение "Школа № 22" (ОГРН: 

<

***>, дата  присвоения ОГРН: 18.12.2002, ИНН: 

<

***>), общество с ограниченной  ответственностью "Амега" (ОГРН: 

<

***>, дата присвоения  ОГРН: 13.02.2008, ИНН: 

<

***>)  

Руководствуясь ст.ст. 110, 167-170, 174, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Пермского края  

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить. 

 Обязать общество с ограниченной ответственностью "ИнтерСтрой" (ОГРН:  

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 07.07.2008, ИНН: 

<

***>) не позднее  трех месяцев с момента вступления в законную силу решения исполнить  обязательство в натуре, а именно:  

1. Выполнить работы по устройству полов в малом спортивном зале на  объекте «Общеобразовательная школа на 1224 места», расположенном по адресу:  Пермский край, г.Березники, Правобережный район, квартал 12, в соответствии с  

требованиями, установленными в Инструкции по укладке напольных покрытий  изготовителя ООО «ТАМСЕТТ Винисин» и СП 71.13330.2017;  

2. Устранить дефекты, выявленные в ходе проверки состояния кровли,  зафиксированные актом осмотра от 28.09.2022г., в частности:  

- устранить протекание кровли в осях 24-28 ряд П-С (кабинет физики); 

- устранить протечки потолка в следующих помещениях:  

- 1 этаж: в пищеблоке коридор, мясной цех (освещение после протечки так и  не восстановлено);  

- 2 этаж: актовый зал, коридор возле кабинета 216;  

- 3 этаж: коридор возле каб. 305, в том числе, в кабинете возле доски, коридор  возле кабинетов 306, 312, 314, 315, 317, 318, 324, 325. В лаборантской при  кабинетах 312, 313, в кабинетах 319, 320 возле входной двери;  

- восстановить целостность мягкой кровли здания;  - устранить трещины в парапете и вентиляционной шахты;  

- восстановить герметизацию теплоизоляционного укрытия вентиляционных  систем, находящихся на кровле;  

- устранить протечки системы ливневой канализации в помещениях школы в  осях 3 ряд Б, Г-С; в осях 5-8 ряд С-Т; в осях 14-26 ряд Б-В;  

- восстановить кронштейны, удерживающие вентсистему ПД9 и кабельные  трассы.  

3. Устранить дефекты, выявленные в ходе проверки состояния стеклопакетов,  зафиксированные актом осмотра от 28.09.2022г., в частности: произвести замену  стеклопакетов в кабинетах №№ 106, 107, 217, 221, рекреации возле актового зала,  коридора возле раздевалок спортзала, в бассейне: заменить стеклопакет возле  большой чаши, в помещений лаборантской, закрепить зажимы на оконных рамах.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ИнтерСтрой" (ОГРН:  

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 07.07.2008, ИНН: 

<

***>) в пользу  муниципального казенного учреждения "Управление капитального  строительства" (ОГРН: 

<

***>, дата присвоения ОГРН: 17.09.2002,  ИНН: 

<

***>) судебную неустойку в размере 5000 руб. за каждый день  просрочки исполнения судебного решения по истечения трех месяцев с момента  вступления решения в законную силу до дня фактического исполнения, судебные  расходы по оплате судебной экспертизы в размере 125 000 руб., судебные расходы  по оплате государственной пошлины в размере 6 000 руб.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в  Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его  принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Пермского  края.  

Судья О.В.Кудинова