РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-191201/23-126-1520

г. Москва

09 февраля 2024 года

Резолютивная часть решения объявлена 25 января 2024 года

Полный текст решения изготовлен 09 февраля 2024 года

Арбитражный суд г. Москвы в составе:

председательствующего судьи Новикова М.С. 

протокол судебного заседания вел помощник судьи Антоновский С.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело 

по иску ООО "СТРОЙВЕКТОР" (ИНН 

<

***>) 

к ООО "ЭКОАЛЬЯНС НЕВА" (ИНН 

<

***>) 

о взыскании 4 456 443,18 руб. 

В судебном заседании приняли участие: 

от истца: ФИО1, доверенность от 18.08.2023 

от ответчика: ФИО2, доверенность от 11.07.2023

У С Т А Н О В И Л:

ООО "СТРОЙВЕКТОР" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением о взыскании с ООО "ЭКОАЛЬЯНС НЕВА" задолженности по договорам подряда № 5П-21 от 25 июня 2021 года и №8П-21 от 25 июня 2021 г. по фактически выполненным работам по Реконструкции тепловой сети от ТК1 (участок № 1)-Замена участков квартальных тепловых сетей ул. Заводская-Школьная Ду 200 в г. Бокситогорск Ленинградской области в размере 4 456 443 руб. 18 коп.

Истец поддержал исковые требования в полном объеме, представил возражения на отзыв ответчика.

Ответчик против удовлетворения исковых требований возражал по доводам изложенным в отзыве.

Выслушав представителей истца и ответчика, изучив материалы дела, оценив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности на основании ст. 71 АПК РФ, арбитражный суд установил, что требования истца заявлены не обоснованно и не подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

При этом суд исходит из того, что в соответствии со ст.4 Арбитражного процессуального кодекса РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном АПК РФ.

Согласно ст.65 Арбитражного процессуального кодекса РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Вместе с тем, согласно ч.2 ст.9 Арбитражного процессуального кодекса РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий. 

Как следует из материалов дела, между ООО «Экоальянс Нева» (Заказчик) и ООО «СтройВектор» (Подрядчик) сложились подрядные отношения в рамках фактического выполнения Подрядчика работ, предусмотренных договорами подряда № 5П-21 от 25.06.2021 г. и № 8П-21 от 25.06.2021 г.

Согласно п.2.1, договора подряда № 5П-21 от 25.06.2021 г. предметом настоящего Договора является выполнение Подрядчиком работ по Реконструкция тепловой сети от ТК1 (участок № 1)-Замена участков квартальных тепловых сетей ул. Заводская Ду 200 в г. Бокситогорск, Филиал АО «Нева Энергия» Бокситогорский, в соответствии с Техническим заданием Заказчика (Приложением 1). Цена Договора определяется сметной стоимостью работ и составляет 2 316 050 руб. 40 коп., в том числе НДС 20% (п. 3.1 договора подряда № 5П-21 от 25.06.2021 г.). Сроки выполнения работ предусмотрены п. 4.1. договора подряда № 5П-21 от 25.06.2021 г.: начало выполнения работ – 25.06.2021 г., окончание работ - 16.08.2021 г. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения договора Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика аванс в размере 50 (пятидесяти) % цены договора, что составляет: 1 158 025 руб. 20 коп., в том числе НДС 20%. (п. 5.1. договора подряда № 5П-21 от 25.06.2021 г.). Окончательный расчёт за выполненные Работы производится в течение 5 (пяти) рабочих дней по результатам выполнения Работ на основании подписанных Заказчиком Актов о приёмке выполненных работ, Справок о стоимости выполненных работ и затрат, и счетов на оплату. Подрядчик по завершении Работ представляет Заказчику Журнал учета выполненных работ (форма КС-6а), составленный на его основании Акт о приёмке выполненных работ по форме КС-2 и составленную на его базе справку по форме КС-3. Заказчик, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предоставления Подрядчиком Актов о приёмке выполненных работ, Справок о стоимости выполненных работ и затрат (п. 5.1. договора подряда № 5П-21 от 25.06.2021 г.).

Согласно п.2.1, договора подряда № 8П-21 от 25.06.2021 г. предметом настоящего Договора является выполнение Подрядчиком работ по Реконструкция тепловой сети от ТК1 (участок № 1)-Замена участков квартальных тепловых сетей ул. Заводская-Школьная Ду 200 в г. Бокситогорск, Филиал АО «Нева Энергия» Бокситогорский, в соответствии с Техническим заданием Заказчика (Приложение №1). Цена Договора определяется сметной стоимостью работ и составляет 1 456 246 руб. 80коп., в том числе НДС 20%. (п. 3.1 договора подряда № 8П-21 от 25.06.2021 г.). Сроки выполнения работ предусмотрены п. 4.1. договора подряда № 8П-21 от 25.06.2021 г.: начало выполнения работ - 25.06.2021 г., окончание работ - 16.08.2021 г. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения договора Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика аванс в размере 50 (пятидесяти) % цены договора, что составляет: 728 123 руб. 40 коп., в том числе НДС 20% (п. 5.1. договора подряда № 8П-21 от 25.06.2021 г.). Окончательный расчёт за выполненные Работы производится в течение 5 (пяти) рабочих дней по результатам выполнения Работ на основании подписанных Заказчиком Актов о приёмке выполненных работ, Справок о стоимости выполненных работ и затрат, и счетов на оплату. Подрядчик по завершении Работ представляет Заказчику Журнал учета выполненных работ (форма КС-6а), составленный на его основании Акт о приёмке выполненных работ по форме КС-2 и составленную на его базе справку по форме КС-3. Заказчик, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предоставления Подрядчиком Актов о приёмке выполненных работ, Справок о стоимости выполненных работ и затрат (п. 5.1. договора подряда № 8П-21 от 25.06.2021 г.).

ООО «Экоальянс Нева» передало на подписание Подрядчику оба договора подряда с приложениями к ним, 19 июня 2021 г. ООО «Экоальянс Нева» передало Подрядчику по Акту приема-передачи строительную площадку для выполнения работ по договорам подряда № 5П-21 и № 8П-21 от 25 июня 2021 г. «Разрешение на производство земляных работ, связанных с работами по ремонту тепловой сети по адресу: Реконструкция тепловой сети от ТК № 1 Замена участков квартальных тепловых сетей: ул. Социалистическая, д. №2-ул. Заводская д. №11 Ду 200-250 мм)» № 22 оформлено 09 июня 2021 г. и передано Подрядчику. «Разрешение № 16 на производство работ в охраняемой зоне объекта газораспределительной системы» от 09 июня 2021 г. также было передано Подрядчику для выполнения работ по договорам подряда № 5П-21 и № 8П-21 от 25 июня 2021 г. Подрядчику также передана «Схема прокладки газопроводов низкого давления сталь диаметром 159 мм и ПЭ диаметром 63 и 160 мм от ж/

<

...> до ж/

<

...>», утвержденная начальником Бокситогорской службы теплоснабжения ФИО3 ООО «Экоальянс Нева» выдано Техническое задание для выполнения работ по договорам подряда № 5П-21 и № 8П-21 от 25 июня 2021 г.

Имеющиеся у ООО «СтройВектор» договоры подряда № 5П-21 и № 8П-21 от 25 июня 2021 г. не подписаны генеральным директором ООО «Экоальянс Нева». Оплата аванса в соответствии с пунктом 5.1. указанных договоров Заказчиком не произведена.

ООО «СтройВектор» выполнило в полном объеме подрядные работы, предусмотренные Техническими заданиями к договорам подряда № 5П-21 и № 8П-21 от 25 июня 2021 г. передало 29.07.2021 г. в ООО «Экоальянс Нева» Акты выполненных работ по форме КС-2 № 1 от 10.07.2021 г. и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 1 от 10.07.2021 г. в 2-х экземплярах. Общая стоимость фактически выполненных работ по договорам подряда № 5П-21 и № 8П-21 от 25 июня 2021 г. по расчету Подрядчика составила 4 456 443,18 руб.

04 июля 2021 г. Заказчику Подрядчиком по Акту приема-передачи передана вся исполнительная документацию по фактически выполненным работам по реконструкции тепловой сети от ТК1 (участок № 1)-Замена участков квартальных тепловых сетей ул. Заводская Ду 200 в г. Бокситогорек. Заказчик претензий по переданной исполнительной документации не заявлял.

11 августа 2021 г. состоялась встреча уполномоченных представителей ООО «Экоальянс Нева» и ООО «СтройВектор» с целью досудебного урегулирования спора, связанного с проведением строительных работ на участках тепловой сети в г. Бокситогорск Ленинградской области. По результатам этой встречи стороны договорились провести совместный осмотр объектов, натурное освидетельствование и инструментальные замеры в присутствии представителей обеих сторон с целью фиксации действительного объема и стоимости выполненных работ на строительных площадках Ду 500, Ду 200, Ду 250. Стороны договорились признать результаты фото и видео фиксации состояния строительной площадки, проведенные ранее сторонами независимо друг от друга, приемлемыми дополнительными источниками информации для обеих сторон, помимо осмотра объектов, их натурного и инструментального обследования, для целей установления действительно выполненного объема работ. Применительно к фактическим работам, выполненными ООО «СтройВектор» по Ду 200, стороны договорились признать расценки, указанные в договоре 06062021 от 25.06.2021 г., заключенном между ООО «Экоальянс Нева» и АО «Нева Энергия», единственно действительными и согласованными обеими сторонами для целей расчета стоимости работ в отношении объекта Ду 200.

Вышеуказанные обстоятельства подтверждаются требованием об уплате неустойки и возврате непогашенного аванса исх. № 17-21 от 21 сентября 2021 г., направленное ООО «Экоальянс Нева» в адрес ООО «СтройВектор».

22 августа 2021 г. в соответствии с достигнутыми 11 августа 2021 г. договоренностями Подрядчиком на электронную почту ООО «Экоальянс Нева» направлены фотоматериалы и строительно-техническое заключение №198/2021, выполненное ООО «ПСБ КАЙЛАС», подтверждающие выполненные Подрядчиком объемы по реконструкции тепловой сети Ду 200.

29.08.2021 г. уполномоченными представителями ООО «Экоальянс Нева» и ООО «СтройВектор» произвели осмотр строительных работ - тепловой сети от ТК1 (участок № 1) - Замена участков квартальных тепловых сетей ул. Школьная Ду 200 в г. Бокситогорск Ленинградской области. По результатам осмотра составлен протокол от 29.08.2021 г., а также соответствующие акты со стороны Заказчика и Подрядчика.

По результатам произведенного сторонами осмотра и повторной встречи 13 сентября 2021 г., Заказчик не оплатил задолженность по фактически выполненным работам по реконструкции тепловой сети Ду 200.

Истец направлял в адрес ответчика претензию с требованием об оплате работ по реконструкции тепловой сети Ду 200 в размере 4 456 443,18 руб., однако требование было оставлено ответчиком без финансового удовлетворения. 

В связи с неисполнением требований в досудебном порядке Истец обратился в Арбитражный суд города Москвы с настоящим исковым заявлением.

Стороны согласно ст. ст. 8, 9 АПК РФ, пользуются равными правами на представление доказательств и несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий, в том числе представления доказательств обоснованности и законности своих требований или возражений.

Согласно требованиям ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Согласно ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Однако, учитывая доводы ответчика, доводы Истца являются незаконными и необоснованными по следующим основаниям: 

Договоры подряда №5П-21 от 25.06.2021 г. и №8П-21 от 25.06.2021 г. не подписаны со стороны Ответчика, соответственно, Истец не может ссылаться на условия данных договоров и данные доказательства не могут быть положены в основу доказательств по настоящему делу.

Данная задолженность списана с расчетного счета Ответчика «21» июня 2023 г. в рамках исполнения судебного акта по делу № А40-30479/22 по иску Истца к Ответчику о взыскании задолженности по Договору подряда № 25/06/2021-ПД-001 от 25.06.2021 в размере 4 456 443 руб. 18 коп., задолженности за фактически выполненные работы по замене участков магистральных тепловых сетей ДУ 250 в г. Бокситогорск в размере 2 075 735 руб. 26 коп.

Согласно решению Арбитражного суда города Москвы от 20.12.2022 по делу № А40-30479/22 с Ответчика в пользу Истца подлежит взысканию задолженность по Договору подряда № 25/06/2021-ПД-001 от 25.06.2021 г. в размере 1 958 758 руб. 68 коп., задолженность за фактически выполненные работы по замене участков магистральных тепловых сетей ДУ 250 в г. Бокситогорек в размере 388 458 руб. 97 коп.

В ходе рассмотрения дела №А40-30479/22 была проведена судебная экспертиза (заключение эксперта №0043-22-А от 07.11.2022 г.) для определения объема и стоимости работ.

На разрешение экспертов были поставлены следующие вопросы:

1. Определить каковы объемы и стоимость фактически выполненных с надлежащим качеством (в соответствии с условиями Договора № 25/06/2021-ПД-001 от 25.06.2021г., требованиями СНиП проектно-сметной документацией и иными требованиями, предъявляемыми для аналогичного вида работ) работ Обществом с ограниченной ответственностью "СТРОЙВЕКТОР", указанных в спорных актах о приемке выполненных работ, исходя из расценок, согласованных сторонами в сметном расчете к Договору № 25/06/2021 -ПД-001 от 25.06.2021 г. (либо, если в условиях договоров нет сведений о цене или способах ее определения, исходить из цены, которая обычно, при сравнимых обстоятельствах, взимается за аналогичные работы)? В случае выявления работ, выполненных с ненадлежащим качеством, определить их объем и стоимость, а также перечень и стоимость устранения недостатков работ.

2. Определить каковы объемы и стоимость фактически выполненных с надлежащим качеством (в соответствии с условиями технического задания, требованиями СНиП, проектно-сметной документацией и иными требованиями, 8 предъявляемыми для аналогичного вида работ) работ Обществом с ограниченной ответственностью "СТРОЙВЕКТОР" по замене участков магистральных тепловых сетей ДУ 250 в г. Бокситогорск, указанных в Акте о приемке выполненных работ № 1 от 10.07.2021 г., исходя из расценок, согласованных сторонами в сметном расчете к техническому заданию (либо, если в условиях договоров нет сведений о цене или способах ее определения, исходить из цены, которая обычно, при сравнимых обстоятельствах, взимается за аналогичные работы)? В случае выявления работ, выполненных с ненадлежащим качеством, определить их объем и стоимость, а также перечень и стоимость устранения недостатков работ.

При проведении экспертизы устанвлено, что в составе представленных на экспертизу материалов содержится документация, относящаяся к выполнению работ по замене участков магистральных тепловых сетей по ул. Заводская ДУ 250 мм, так и по замене участков квартальных тепловых сетей ул. Заводская ДУ 200 мм.

Вместе с тем, выполнение работ по устройству сети ДУ 200 мм не было предусмотрено условиями Договора № 25/06/2021-ПД-001 от 25.06.2021.

Учитывая это, эксперты исследовали работы по устройству теплосети ДУ 200 мм и при ответе на вопрос выделили их в отдельную группу (стр.34-36 экспертного заключения).

Стоимость данных работ приведена в Таблице 1 экспертного заключения (стр.36).

В исследовательской части заключения содержатся скриншоты фотоматериалов, которые сделаны при обследовании результатов работ (стр.16-17., стр.22-33), исследовалась исполнительная документация (стр. 14), заключение проверки сметной стоимости работ (стр.15) по спорному объекту.

Сведения об объеме фактически выполненных работ приведены в Графе 13 Таблицы 3 (для работ по замене участков магистральных тепловых сетей ул. Заводская - ул. Школьная ДУ 250 мм) и в Графе 14 Таблицы 4 (для работ по замене участка квартальных тепловых сетей ул. Заводская ДУ 200 мм) (стр. 43-51).

В материалы дела Истцом представлены акты освидетельствования скрытых работ, которые были предметом исследования в экспертном заключении (стр.39-41).

Также данные акты и расчеты объемов и стоимости выполненных работ по спорному объекту были предметом исследования в деле №А40-218283/21 по иску Ответчика к Истцу о взыскании с учетом принятых судом уточнений в порядке ст. 49 АПК РФ неотработанного аванса по договору № 6П-21 от 29.04.2021 г. в размере 3 262 036 руб. 68 коп., неустойки за период с 17.06.2021 г. по 03.08.2021 г. в размере 69 364 руб. 89 коп. и по встречному исковому заявлению Истца о взыскании с ответчика задолженности по договору № 6П-21 от 29.04.2021 г. в размере 373 279 руб. 09 коп., по которому суд отказал Истцу в удовлетворении встречных требований.

Таким образом, Истец обратился в суд с исковым заявлением, по предмету которого уже вынесено решение суда, которое вступило в законную силу и исполнено на момент обращения Истца в суд.

С учетом изложенного, суд считает, что истец не доказал наличие обстоятельств, входящих в предмет доказывания по данному спору, в связи с чем правовых оснований для удовлетворения иска у суда не имеется.

Судебные расходы по оплате государственной пошлины распределяются по правилам ст. 110 АПК РФ.

Учитывая ст. ст. 8, 12, 307-310, ГК РФ, руководствуясь ст. ст. 65, 68, 71, 75, 110, 167-171, 176, 180, 181, 319 АПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении исковых требований отказать. 

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья:

М.С. Новиков