Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А40-159687/23-19-1242

25 августа 2023 года

г.  Москва

Резолютивная часть решения объявлена                   14 августа 2023 г.

Мотивированное решение изготовлено                        25 августа 2023 г.

Арбитражный суд в составе судьи Подгорной С.В.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, 

рассмотрев в судебном заседании дело

по иску ООО "ЛОГОПАРК СКОЛКОВО" (ИНН: 

<

***> ОГРН: 

<

***>)

к ответчикуООО "ЭЛКОМ-ЭЛЕКТРОЩИТ" (ИНН: 

<

***> ОГРН: 

<

***>)

о взыскании задолженности в размере неустойки в размере 11 448 676 руб. 72 коп. 

при участии:

от истца: ФИО2, доверенность, паспорт, диплом

от ответчика: ФИО3, доверенность, паспорт, диплом 

 

УСТАНОВИЛ:

ООО «Логопарк Сколково» обратилось с исковым заявлением к ООО «Элком-электрощит» о взыскании 11 448 676руб. 72коп. неустойки по договору №14/12 от 14.12.2021г.

Учитывая, что в предварительном судебном заседании у лиц, участвующих в деле, отсутствовали возражения против перехода из предварительного судебного заседания в основное, то суд завершил предварительное судебное заседание и открыл судебное заседание в первой инстанции  на основании ст. 137 АПК РФ. 

Истец в судебном заседании поддержал исковые требования, просил их удовлетворить.

Ответчик иск не признал по основаниям, изложенным в письменном отзыве.

Как усматривается из материалов дела, 14.12.2021г. между истцом и ответчиком заключен договор №14/12.

В соответствии с вышеуказанным договором ответчик обязался выполнить работы, а истец принять и оплатить их.

Согласно п. 1.3 договора ответчик обязуется выполнить работы в срок до 15.04.2022г.

По мнению истца, в сроки установленные договором ответчик работы не выполнил, что подтверждается актами сдачи-приемки выполненных работ и справками о стоимости выполненных работ и затрат от 28.02.2023г., в связи с чем, истец просит взыскать неустойку, предусмотренную п. 9.1 договора, из расчета 0,1% от стоимости работ за каждый день просрочки, что по расчету истца составляет 11 448 676руб. 72коп.

Оценив материалы дела, выслушав представителей сторон, суд пришел к выводу об отказе в удовлетворении иска по следующим основаниям.

Согласно п. 4.1.1 договора заказчик обязан передать подрядчику всю необходимую проектную документацию (техническое задание) на выполняемые работы, выполненную по нормам и правилам.

При этом, ответчик получил проектную документацию 20.01.2022г., что подтверждается  актом приема-передачи. Рабочая документация была подписана 20.03.2023г.

Пунктом 3 статьи 743 ГК РФ предусмотрено, что подрядчик, обнаруживший в ходе строительства не учтенные в технической документации работы и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости строительства, обязан сообщить об этом заказчику. 

При неполучении от заказчика ответа на свое сообщение в течение десяти дней, если законом или договором строительного подряда не предусмотрен для этого иной срок, подрядчик обязан приостановить соответствующие работы с отнесением убытков, вызванных простоем, на счет заказчика. Заказчик освобождается от возмещения этих убытков, если докажет отсутствие необходимости в проведении дополнительных работ.

В соответствии с ч. 1 ст. 719 ГК РФ подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.

Согласно ч. 2.1 ст. 48 ГрК РФ рабочая документация представляет собой документацию, содержащую материалы в текстовой и графической формах и (или) в форме информационной модели, в соответствии с которой осуществляются строительство, реконструкция объекта капитального строительства, их частей. Рабочая документация разрабатывается на основании проектной документации. Подготовка проектной документации и рабочей документации может осуществляться одновременно.

Таким образом, фактически приступить к выполнению работ с даты заключения договора подрядчик не мог в виду отсутствия необходимой документации.

При этом, ответчиком были обнаружены недостатки в переданной истцом проектной документации, в связи с чем, 18.03.2022г. между сторонами был заключен договор №01/03 на подготовку и внесение изменений в проектной документации на спорном объекте.

Рабочая (проектная) документация была передана 20.03.2023г., что указывает на отсутствие фактической возможности для своевременного исполнения ответчиком обязательств.

Суд также принимает во внимание что в соответствии с дополнительным соглашением №1 от 15.05.2022г., то есть после окончания срока выполнения работ, установленного в договоре, передавался давальческий материал, а дополнительным соглашением №2 от 15.06.2022г. корректировался объем работ.

Так, из действий сторон, в том числе и истца, усматривается заинтересованность и необходимость в выполнении дополнительных работ, что увеличивает срок их выполнения.

Исходя из статей 329, 330 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой (штрафом, пеней), которой признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности. Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства (пункт 1 статьи 401 ГК РФ).

На основании п. 2 ст. 401 ГК РФ отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство.

Согласно п. 3 ст. 405 ГК РФ должник не считается просрочившим, пока обязательство не может быть исполнено вследствие просрочки кредитора.

В силу п. 1 ст. 406 ГК РФ кредитор считается просрочившим, если он не совершил действий, предусмотренных законом, иными правовыми актами или договором, либо вытекающих из обычаев делового оборота или из существа обязательства, до совершения которых должник не мог исполнить своего обязательства.

Таким образом, вина кредитора имеет место в случае, если должник не мог исполнить свое обязательство по причине действий или бездействия кредитора, которыми должнику созданы препятствия к надлежащему выполнению.

Для применения названной нормы и освобождения должника от ответственности необходимо, чтобы просрочка кредитора лишила должника возможности надлежащим образом исполнить обязательство.

Предполагается, что в случае возникновения обстоятельств, находящихся вне контроля должника и препятствующих исполнению им обязательства, он освобождается от ответственности, если у него отсутствует возможность принять разумные меры для устранения таких обстоятельств.

Судом установлено, что ответчик исполнил свои обязательства, предусмотренные государственным контрактом с нарушением установленных сроков, в связи с невыполнением истцом встречных обязательств, что является основанием для освобождения ответчика от обязанности по оплате неустойки.

Оценив по правилам ст. 71 АПК РФ имеющиеся в деле доказательства, суд установил, что сроки выполнения работ были нарушены по независящим от ответчика обстоятельствам, по вине истца, который в нарушение условий договора не обеспечил предоставление ответчику надлежащей документации и объекта, необходимого для выполнения работ.

Вопреки требованиям, установленным в ст. 65 АПК РФ, доказательств обратного истцом в материалы дела не представлено.

Так, ответчик не может считаться просрочившим свои обязательства, поскольку истец не совершил действий, предусмотренных государственным контрактом, до совершения которых ответчик не мог исполнить своего обязательства, в связи с чем, у суда отсутствуют основания для взыскания неустойки.

При вышеуказанных обстоятельствах, суд пришел к выводу об отказе в удовлетворении исковых требований.

Госпошлина по иску относится на истца, в связи с отказом в удовлетворении исковых требований в порядке ст. 110 АПК РФ.

Руководствуясь ст. ст. 309, 310, 329, 330, 401, 405, 406, ГК РФ, ст. ст. 65, 71, 110, 167-171, 176 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований, отказать.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья:

С.В. Подгорная