Д Е В Я Т Ы Й  А Р Б И Т РА Ж Н Ы Й  А П Е Л Л Я Ц И О Н Н Ы Й С У Д

127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной Сторожки, 12

адрес электронной почты: info@mail.9aas.ru

адрес веб-сайта: http://9aas.arbitr.ru

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Дело № А40-191558/2016

г. Москва

03 февраля 2017 года

Резолютивная часть постановления объявлена 31 января 2017 года 

Полный текст постановления изготовлен 03 февраля 2017 года 

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе: 

Председательствующего судьи: Гармаева Б.П.,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу ответчика –

общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «ВЕСТИН» 

на решение Арбитражного суда города Москвы 

от 11.11.2016г. по делу № А40-191558/2016, 

принятое в порядке упрощенного производства

судьей Ведерниковым М.А. (шифр судьи 15-1675) 

по иску общества с ограниченной ответственностью «Модульные котельные системы»к обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания «ВЕСТИН»

о взыскании задолженности неустойки

без вызова сторон

У С Т А Н О В И Л:

Общество с ограниченной ответственностью «Модульные котельные системы» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания «ВЕСТИН» о взыскании 467 327 руб.            60 коп. задолженности по договору подряда № 41299-К от 25.04.2013г. и 285 537 руб. 16 коп. неустойки за нарушение сроков оплаты работ.

Дело рассмотрено в порядке упрощенного производства по правилам главы 29 Арбитражного процессуального кодекса РФ. 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 11.11.2016г. по делу              № А40-191558/2016 исковые требования удовлетворены.

Ответчик не согласился с принятым решением, обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит обжалуемое решение изменить в части взыскания неустойки путём применения положений ст. 333 Гражданского кодекса РФ.

Ответчик полагает, что при вынесении оспариваемого решения суд первой инстанции не учёл то обстоятельство, что размер взыскиваемой неустойки явно несоразмерен последствиям нарушения обязательств.   

Истец не согласился с доводами апелляционной жалобы, направил письменные возражения, в которых указал на неправомерность доводов ответчика и отсутствие оснований для снижения размера неустойки.                

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, без вызова сторон на основании статьи 272.1 Арбитражного процессуального кодекса РФ, проверив законность обжалуемого судебного акта в порядке, установленном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса РФ, арбитражный апелляционный суд полагает об отсутствии оснований для отмены решения Арбитражного суда города Москвы.

Как следует из материалов дела, правоотношения сторон урегулированы договором подряда № 41299-К от 25.04.2013г. по условиям которого Подрядчик (истец) принял на себя обязательство по выполнению комплекса работ по поставке, монтажу и  пуско-наладке котельной мощностью 5,2 МВт (первая очередь котельной)                            в соответствии с Технической спецификацией, предполагаемой к размещению                   по адресу: 

<

...> а Заказчик (ответчик) обязался создать Подрядчику необходимые для выполнения работ условия, принять их результат и оплатить обусловленную цену.

Во исполнение принятых на себя обязательств истец выполнил предусмотренные договором работы, что подтверждается подписанными сторонами актами выполненных работ № 155 от 09.09.2013г., № 2 от 09.12.2014г., № 1 от 31.10.2013г., № 2 от 17.12.2013г.

Однако ответчик своих обязательств по оплате выполненных работ надлежащим образом не исполнил, задолженность ответчика перед истцом составила 467 327 руб. 60 коп.

Исковые требования мотивированы ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по оплате выполненных работ. 

Разрешая спор по существу, Арбитражный суд города Москвы пришёл                к выводу о наличии оснований для удовлетворения исковых требований в части взыскания суммы задолженности.

Арбитражный апелляционный суд находит такой вывод суда первой                      инстанции законным и обоснованным.

Согласно пункту 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

В соответствии с пунктом 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской             Федерации сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком                  оформляется актом, подписанным обеими сторонами.

В силу указанной нормы и положений статьи 702 Гражданского кодекса РФ            основанием возникновения обязательства по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику.

В соответствии со статьями 307 - 310 Гражданского кодекса Российской              Федерации обязательства должны быть выполнены надлежащим образом,                  односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

Поскольку акты о приемке выполненных работ подписаны ответчиком без каких-либо замечаний и заверены печатью ответчика, оснований для уклонения                 от оплаты выполненных работ у ответчика не имеется. 

При таком положении суд правомерно удовлетворил требования истца               в части взыскания суммы задолженности.

Согласно пункту 1 статьи 330 Гражданского кодекса РФ неустойкой (штрафом,             пени) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего             исполнения обязательства, в частности в случае просрочки его исполнения. 

Пунктом 7.3 договора предусмотрена ответственность Заказчика                             за нарушение сроков оплаты работ в виде неустойки в размере 0, % от суммы                    просроченного платежа.

Установив факт ненадлежащего исполнения ответчиком обязательств по оплате выполненных работ, суд первой инстанции также правомерно удовлетворил              требования истца о взыскании неустойки, предусмотренной пунктом 7.3           договора.

Оспаривая решение суда, ответчик утверждает, что размер взыскиваемой неустойки явно несоразмерен последствиям нарушения обязательств, в связи с чем, подлежащая взысканию неустойка подлежит уменьшению путём применения положений ст. 333 Гражданского кодекса РФ.

Указанный довод ответчика подлежит отклонению по следующим основаниям:

Исходя из принципа осуществления гражданских прав своей волей и в своем интересе (статья 1 ГК РФ) неустойка может быть снижена судом на основании статьи 333 Гражданского кодекса РФ только при наличии соответствующего заявления           со стороны ответчика.

Согласно части первой статьи 333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. Гражданское законодательство предусматривает неустойку в качестве способа обеспечения исполнения обязательств и меры имущественной ответственности за их неисполнение или ненадлежащее исполнение, а право снижения неустойки предоставлено суду в целях устранения явной ее несоразмерности последствиям нарушения обязательств.

Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в Постановлении от 22.12.2011г. № 81 «О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснил, что соразмерность неустойки последствиям нарушения обязательства предполагается. Основанием для применения статьи 333 ГК РФ может служить только явная несоразмерность неустойки последствиям нарушения обязательств.

Согласно правовой позиции, изложенной в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016г. № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» (далее - Постановление Пленума ВС РФ № 7) если должником является коммерческая организация, индивидуальный предприниматель, а равно некоммерческая организация при осуществлении ею приносящей доход деятельности, снижение неустойки судом допускается только по обоснованному заявлению такого должника, которое может быть сделано в любой форме (пункт 71 Постановления).

Из пункта 77 Постановления Пленума ВС РФ № 7 следует, что снижение размера договорной неустойки, подлежащей уплате коммерческой организацией, индивидуальным предпринимателем, а равно некоммерческой организацией, нарушившей обязательство при осуществлении ею приносящей доход деятельности, допускается в исключительных случаях, если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства и может повлечь получение кредитором необоснованной выгоды.

В соответствии с пунктом 73 Постановления Пленума ВС РФ № 7, бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды кредитора возлагается на ответчика. Несоразмерность и необоснованность выгоды могут выражаться, в частности, в том, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки (часть 1 статьи 56 ГПК РФ, часть 1 статьи 65 АПК РФ).

Учитывая вышеуказанные обстоятельства, особого внимания заслуживает            тот факт, что определением Арбитражного суда города Москвы от 22.09.2016г. ответчику был установлен срок направления возражений, ходатайств и заявлений по делу до 19.10.2016г. 

Однако, несмотря на данные сроки, ответчик отзыв на иск не представил, ходатайство о снижении размера неустойки в суд не направил. 

Согласно статьям 8, 9 Арбитражного процессуального кодекса                      Российской Федерации, стороны пользуются равными правами на представление                              доказательств и несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий, в том числе представления доказательств                           обоснованности и законности своих требований или возражений.

Согласно п. 3 ч. 41 Арбитражного процессуального кодекса РФ непринятие стороной мер к надлежащей реализации своих процессуальных прав и обязанностей относит на эту сторону все негативные риски, связанные с ненадлежащей защитой собственных прав и законных интересов. 

Поскольку со стороны ответчика ходатайство о снижении размера неустойки не поступало, у суда первой инстанции отсутствовали основания для его уменьшения.

При указанных обстоятельствах, арбитражный апелляционный суд полагает,                        что фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, судом первой инстанций установлены на основании полного и всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств, выводы суда основаны на правильном применении норм материального и процессуального права.

Доводы ответчика, изложенные в апелляционной жалобе, не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного решения, либо опровергали выводы суда первой  инстанции, в связи с чем, признаются судом апелляционной инстанции несостоятельными и не могут служить основанием для отмены решения Арбитражного суда города Москвы.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 110, 176, 266, 268, 269, 271, 272.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд 

П О С Т А Н О В И Л:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 11.11.2016г. по делу                             № А40-191558/16 оставить без изменения, апелляционную жалобу -                                    без удовлетворения. 

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа и только по основаниям предусмотренным ч. 4 ст. 288 АПК РФ.

Судья:      Б.П. Гармаев