АРБИТРАЖНЫЙ СУД АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

656015, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, проспект Ленина,76, тел.: (385-2) 29-88-01 

http://altai-krai.arbitr.ru е-mail: a03.info@arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е

 

г. Барнаул Дело № А03-21584/2017  

Резолютивная часть решения объявлена 28 мая 2018 года. Полный текст решения изготовлен 01 июня 2018 года. 

Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Сосина Е.А., при ведении  протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном  заседании дело по иску акционерного общества «Барнаулкапстрой», г. Барнаул  

(ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью  «Капстрой», г. Барнаул (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании 89 613 руб.,  

при участии: 

от истца: ФИО2 - представитель по доверенности;  от ответчика: не явился,  

установил:

акционерное общество «Барнаулкапстрой» (далее – истец) обратилось в Арбитражный  суд Алтайского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Капстрой»  (далее – ответчик) о взыскании 89 613 руб. убытков по устранению строительных  недостатков по договору № 20 от 14.03.2013.  

Исковые требования мотивированы ненадлежащим исполнением ответчиком  обязательств по договору подряда на строительство № 20 от 14.03.2013, что привело к  возникновению убытков.  

Ответчик отзыв на иск с документальным обоснованием своей позиции не  представил, в судебное заседание не явился, на основании статьи 123 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) извещен надлежащим  образом о месте и времени судебного заседания.  

В соответствии со статьей 156 АПК РФ дело по существу рассмотрено в отсутствие  представителя ответчика.  

В судебном заседании в порядке статьи 163 АПК РФ объявлялся перерыв. 

В судебном заседании представитель истца поддержал заявленные исковые  требования.  

Выслушав представителя истца, исследовав материалы дела, суд установил  следующие обстоятельства.  

14.03.2013 между акционерным обществом «Барнаулкапстрой» (заказчик) и  обществом с ограниченной ответственностью «Капстрой» (подрядчик) заключен договор  подряда на строительство № 20 (далее – договор), по условиям которого подрядчик в счет  оговоренной в статье 3 настоящего договора стоимости выполнит на свой риск  собственными и привлеченными силами и средствами работы по возведению жилых домов  по ул. Геодезической (стр. № 12а, № 10, № 14) 2-ой пусковой комплекс 1-ой очереди  застройки жилого мини-поселка «Солнечная поляна», находящегося в городе Барнауле и  ограниченного улицами Энтузиастов, А. Петрова, Геодезическая и Солнечная поляна в  соответствии с условиями договора, заданием заказчика и проектной документацией,  включая работы, определенно в нем не упомянутые, но необходимые для полного  сооружения объекта и нормальной эксплуатации (пунтк 2.1 договора).  

Согласно пункту 3.1 договора, стоимость работ, выполняемых подрядчиком по  настоящему договору, определяется на основании договорной цены (приложение № 1)  согласованной сторонами и ориентировочно составляет 61 510 200 руб., в том числе НДС.  

Заказчик в течение 20 дней с момента выставления подрядчиком счета-фактуры,  после подписания акта выполненных работ (форма КС-2), производит оплату выполненных  работ денежными средствами, либо иным способом, не противоречащим действующему  законодательству РФ (пункт 7.2 договора).  

В соответствии с пунктом 6.1 договора, работы по настоящему договору должны быть  начаты после получения разрешения на строительство объекта, завершены по жилому дому  стр. № 12а в июне 2014, стр. № 10 в ноябре 2014, стр. № 14 в октябре 2014 и производиться в  соответствии с графиком производства работ (Приложение № 2).  

Во исполнение обязательств, предусмотренных договором, между заказчиком и  подрядчик после выполнения работ составлены акты о приемке работ № 19 от 26.09.2014,  

 № 23 от 26.09.2014, № 18 от 30.09.2014, № 21 от 31.10.2014. 

13.09.2016 комиссией в составе представителя акционерного общества  «Барнаулкапстрой» ФИО4, директора общества с ограниченной ответственностью  «Капстрой» ФИО5 составлен акт осмотра.  

Согласно акту осмотра объекта (жилой дом по ул. Геодезическая, д. 47Д в г. Барнауле) комиссией выявлено следующее: 

 - обществом с ограниченной ответственностью «Капстрой» нарушена технология  подготовки поверхностей оштукатуривания в подъездах дома, а именно  предварительно поверхность стен не очищена от пыли и грязи, в результате чего  произошло отслоение штукатурного слоя от внутренних стен.  

Для устранения строительных недостатков необходимо в подъездах произвести  восстановление штукатурного слоя стен в объеме 66,85 кв.м и окраску стен  водоэмульсионными составами в объеме 66,85 кв.м.;  

 - обществом с ограниченной ответственностью «Капстрой» некачественно  выполнено устройство примыканий кровли дома к парапетам, вентиляционных шахт к  кровле, а именно отсутствуют внутренние ендовы, в результате чего происходит  замачивание стен вентиляционных шахт.  

Для устранения строительных недостатков необходимо демонтировать наружные  металлические оцинкованные ендовы в объеме 43 м.п., установить внутренние  металлические оцинкованные ендовы в объеме 43 м.п.к парапетам и вентиляционным  шахтам, увеличить высоту вентиляционных шахт в количестве 12 шт. по отношению к  

парапету на 0,3 м., установить наружные металлические оцинкованные ендовы в объеме  

43 м.п. 

Строительные недостатки в жилом доме по ул. Геодезическая, 47Д в  г. Барнауле произошли вследствие некачественного выполнения  

строительно-монтажных работ обществом с ограниченной ответственностью  «Капстрой» по договору № 20 от 14.03.2013.  

28.08.2017 комиссией в составе представителя акционерного общества  «Барнаулкапстрой» ФИО4, конкурсного управляющего общества с  ограниченной ответственностью «Капстрой» ФИО6 составлен акт осмотра  жилых домов по ул. Геодезическая, 47В и ул. Геодезическая, 47Д.  

В результате осмотра жилого дома по ул. Геодезическая, 47В комиссией установлено  следующее:  

 - обществом с ограниченной ответственностью «Капстрой» нарушена технология  подготовки поверхностей оштукатуривания в подъездах дома, а именно предварительно  поверхность стен не очищена от пыли и грязи, в результате чего произошло отслоение  штукатурного слоя от внутренних стен.  

Для устранения строительных недостатков необходимо в подъездах произвести  восстановление штукатурного слоя стен в объеме 14,5 кв.м и окраску стен  водоэмульсионными составами в объеме 14.77 кв.м.;  

 - обществом с ограниченной ответственностью «Капстрой» некачественно выполнено  устройство оснований под входные группы в дом, а именно недостаточно уплотнен грунт  под тамбурами, в результате чего произошло проседание фундаментов входных групп и  раскрытие примыканий входных групп от дома с последующей деформацией металлической  декоративной обшивки, также некачественно выполнено примыкание к кровли входных  групп к зданию.  

Для устранения строительных недостатков необходимо демонтировать наружные  фасадные горизонтальные примыкания входных групп в объеме 24,9 м.п., выполнить  устройство внутренних ендов в объеме 24,9 м.п., установить наружные фасадные  горизонтальные примыкания входных групп в объеме 24,9 м.п.. демонтировать фасадные  вертикальные примыкания входных групп в объеме 13.92 м.п., установить наружные  фасадные вертикальные примыкания входных групп в объеме 13.92 м.п.  

В результате осмотра жилого дома по ул. Геодезическая, 47Д комиссией установлено  следующее:  

 - обществом с ограниченной ответственностью «Капстрой» некачественно выложена  плитка в тамбурах дома, а именно ниже уровня входной ступени, в результате чего  происходит попадание дождевых и талых вод с крыльца дома в тамбуры.  

Для устранения строительных недостатков необходимо в тамбурах произвести  разборку покрытий из тротуарной плитки в объеме 38 кв.м., устройство цементно-песчаной  стяжки в объеме 38 кв.м., устройство покрытий из керамогранита в объеме 38 кв.м.;  

 - обществом с ограниченной ответственностью «Капстрой» некачественно выполнено  устройство оснований под входные группы в дом, а именно недостаточно уплотнен грунт  под тамбурами, в результате чего произошло проседание фундаментов входных групп и  раскрытие примыканий входных групп от дома с последующей деформацией металлической  декоративной обшивки, также некачественно выполнено примыкание к кровли входных  групп к зданию.  

Для устранения строительных недостатков необходимо демонтировать наружные  фасадные горизонтальные примыкания входных групп в объеме 49,8 м.п.. выполнить  устройство внутренних ендов в объеме 49,8 м.п., установить наружные фасадные  горизонтальные примыкания входных групп в объеме 49.8 м.п., демонтировать фасадные  вертикальные примыкания входных групп в объеме 27.84 м.п., установить наружные  фасадные вертикальные примыкания входных групп в объеме 27,84 м.п.  

Выявленные недостатки возникли в результате некачественно выполненных 

строительно-монтажных работ обществом с ограниченной ответственностью «Капстрой» по  договору № 20 от 14.03.2013.  

Однако в связи процедурой банкротства в отношении общества с ограниченной  ответственностью «Капстрой» подрядчик указанные недостатки в выполненных работах  произвести не имеет возможности.  

Акционерное общество «Барнаулкапстрой» устранило указанные недостатки в рамках  договоров № 85/16-8 от 15.09.2016, № 80 от 20.09.2016, № 83-/17-8 от 04.09.2017, № 85 от  07.09.2017.  

15.09.2016 между акционерным обществом «Барнаулкапстрой» (заказчик) и  ФИО7 (исполнитель) заключен договор № 85/16-8 на  выполнение ремонтных работ в жилом доме по ул. Геодезическая, 47Д.  

Согласно акту приема-передачи выполненных работ от 25.03.2017, исполнителем  выполнены работы по восстановлению штукатурного слоя стен в объеме 66,85 кв.м и  окраске стен водоэмульсионными составами в объеме 66,85 кв.м., а заказчиком приняты  выполненные работы. Стоимость выполненных работ составила 15 175 рублей, с учетом  НДФЛ 13%.  

Акционерное общество «Барнаулкапстрой» оплатило выполненные работы  ФИО7, что подтверждается реестром денежных средств с результатами зачислений   № 28 от 05.04.2017.  

20.09.2016 между акционерным обществом «Барнаулкапстрой» (заказчик) и  ФИО8 (исполнитель) заключен договор № 80 на выполнение  работ по устранению недостатков в конструкции кровли жилого дома по ул. Геодезическая,  47Д (стр. № 10).  

Согласно акту сдачи-приемки выполненных работ от 10.10.2016, ФИО8  демонтировал наружные металлические оцинкованные ендовы в объеме 43 м.п., установил  внутренние металлические оцинкованные ендовы в объеме 43 м.п., увеличил высоту  вентиляционных шахт 12 шт.*0.3 м., установил наружные металлические оцинкованные  ендовы в объеме 43 м.п., а акционерное общество «Барнаулкапстрой» приняло выполненные  работы.  

Стоимость выполненных работ составила 27 586 руб., с учетом НДФЛ 13%. 

По платежному поручению № 3696 от 14.10.2016 акционерное общество  «Барнаулкапстрой» перечислило денежные средства ФИО8 за выполненные  работы.  

04.09.2017 между обществом с ограниченной ответственностью «Барнаулкапстрой»  (заказчик) и ФИО7 (исполнитель) заключен договор  

 № 83/17-8 на выполнение ремонтных работ в жилых домах по ул. Геодезическая, 47В и по  ул. Геодезическая, 47Д.  

Согласно акту приема-передачи выполненных работ от 29.09.2017 Глазырин А.А. в  жилом доме по ул. Геодезическая, 47Д произвел разборку покрытий из тротуарной плитки в  объеме 38 кв.м., устройство цементно-песчаных стяжек в объеме 38 кв.м., устройство  покрытий из керамогранита в объеме 38 кв.м.; в жилом доме по ул. Геодезическая, 47В  произвел восстановление штукатурного слоя стен в подъездах в объеме 14,5 кв.м., окраску  стен в подъездах в объеме 14,77 кв.м., а акционерное общество «Барнаулкапстрой» приняло  выполненные работы.  

Стоимость выполненных работ составила 23 863 руб., с учетом НДФЛ 13%.  

Акционерное общество «Барнаулкапстрой» оплатило выполненные работы  ФИО7, что подтверждается реестром денежных средств с результатами зачислений   № 101 от 05.10.2017.  

07.09.2017 между акционерным обществом «Барнаулкапстрой» (заказчик) и  

ФИО9 (исполнитель) заключен договор на № 85 на оказание услуг  по устройству примыкания элементов входных тамбуров к зданию в жилых домах по  

ул. Геодезическая, 47В и по ул. Геодезическая, 47Д. 

Согласно акту сдачи-приемки оказанных услуг от 15.09.2017, ФИО9 в жилом  доме по ул. Геодезическая, 47В произвела демонтаж наружных фасадных горизонтальных  примыканий в объеме 24,9 м.п., устройство внутренних ендов в объеме 24,9 м.п., установку  наружных фасадных горизонтальных примыканий в объеме 24,9 м.п., демонтаж наружных  фасадных вертикальных примыканий 13,92 м.п., установку наружных фасадных  вертикальных примыканий в объеме 13,92 м.п.; в жилом доме по ул. Геодезическая, 47Д  демонтаж наружных фасадных горизонтальных примыканий а объеме 49,8 м.п., устройство  внутренних ендов в объеме 49,8 м.п., установку наружных фасадных горизонтальных  примыканий в объеме 49.8 м.п., демонтаж наружных фасадных вертикальных примыканий в  объеме 27.84 м.п., установку наружных фасадных вертикальных примыканий в объеме  

27.84 м.п., а акционерное общество «Барнаулкапстрой» приняло оказанные услуги. 

Стоимость оказанных услуг составила 22 989 руб., с учетом НДФЛ 13%. 

Акционерное общество «Барнаулкапстрой» оплатило оказанные услуги  

ФИО9, что подтверждается расходным кассовым ордером от 19.09.2017 № 273 и  платежной ведомостью от 18.09.2017.  

Общая сумма понесенных акционерным обществом «Барнаулкапстрой» расходов па  устранение строительных недостатков в жилых домах по ул. Геодезическая, 47В и  

по ул. Геодезическая, 47Д в г. Барнауле составила 89 613 руб. 

23.10.2017 акционерным обществом «Барнаулкапстрой» направлена претензия  

 № 2301/1 с требованием о возмещении денежных средств в размере 89 613 руб., понесенных  на устранение строительных недостатков в жилых домах по ул. Геодезическая, 47В и  

по ул. Геодезическая, 47Д в г. Барнауле. 

Полагая, что в результате действий подрядчика истцу причинен материальный ущерб,  истец обратился в суд с настоящим иском.  

Давая оценку отношениям, суд полагает, что между сторонами заключен договор  подряда, к которому подлежат применению положения главы 37 Гражданского кодекса  Российской Федерации (далее – ГК РФ).  

Согласно статье 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется  выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее  результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.  

В соответствии со статьей 740 ГК РФ, по договору строительного подряда подрядчик  обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный  объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику  необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить  обусловленную цену.  

В силу статьи 723 ГК РФ в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с  отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными  недостатками, которые делают его непригодным для предусмотренного в договоре  использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности  для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или  договором, по своему выбору потребовать от подрядчика:  

-безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;  -соразмерного уменьшения установленной за работу цены;  

-возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика  устранять их предусмотрено в договоре подряда.  

В соответствии с пунктом 17.4 договора, сторонами предусмотрено, что в случае если  объект строительства создан подрядчиком с отступлениями от проектной документации и от  условий договора, приведшим к ухудшению качества объекта, или с иными недостатками,  которые делают его непригодным для использования в дальнейшем, заказчик по своему  выбору вправе потребовать от подрядчика:  

- безвозмездное устранение недостатков в разумный срок;  - возмещение своих расходов на устранение недостатков;  

- соразмерного уменьшения стоимости объекта, установленной пунктом 3.1  настоящего договора.  

Таким образом, в договоре подряда стороны прямо предусмотрели право заказчика  требовать возмещения своих расходов на устранение недостатков работ.  

Как следует из актов осмотра объекта от 13.09.2016 и от 28.08.2017, в выполненных  ответчиком работах по договору подряда на строительство № 20 от 14.03.2013, обнаружены  недостатки, возникшие по вине подрядчика.  

Согласно актам сдачи-приемки оказанных услуг по договорам № 85/16-8 от  15.09.2016, № 80 от 20.09.2016, № 83-/17-8 от 04.09.2017, № 85 от 07.09.2017 стоимость  затрат на устранение выявленных строительных недостатков составляет 89 613 руб.  

Расходы, понесенные истцом по возмещению недостатков в выполненных ответчиком  работ по договору на строительство № 20 от 14.03.2013, а также их стоимость,  подтверждаются договорами № 85/16-8 от 15.09.2016, № 80 от 20.09.2016, № 83-/17-8 от  04.09.2017, № 85 от 07.09.2017, реестрами денежных средств с результатами зачисления,  платежным поручением № 3696 от 14.10.2016, расходным кассовым ордером № 273 от  19.09.2017, платежной ведомостью, о компенсации стоимости устранения строительных  недостатков.  

Оценив представленные доказательства, суд приходит к выводу о том, что недостатки  в выполненных работах произошли по вине подрядчика, выполнившего работу с  ненадлежащим качеством, в связи с чем с последнего подлежат взысканию убытки в сумме  89 613 руб.  

При этом суд расценивает заявленные требования как текущие платежи, поскольку  обязательства по возмещению стоимости за выполненные работы по устранению  недостатков в связи с ненадлежащим выполнением ответчиком работ по договору № 47 от  27.04.2012 возникли после принятия арбитражным судом заявления о признании общества с  ограниченной ответственностью «Капстрой» банкротом и введения в отношении ответчика  процедуры банкротства - конкурсное производство.  

Аналогичный подход изложен в постановлении Первого арбитражного  апелляционного суда от 09.07.2015, постановлении Арбитражного суда Волго – Вятского  округа от 30.12.2015 по делу № А43-459/2015, оставленным без изменения Определением  Верховного Суда РФ от 18.04.2016 № 301-ЭС16-2606.  

Расходы по государственной пошлине в силу части 1 статьи 110 АПК РФ относятся на  ответчика.  

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

решил:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Капстрой» в пользу  акционерного общества «Барнаулкапстрой» 89 613 руб. убытков и 3 585 руб. в счет  возмещения расходов по уплате государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Алтайского края в Седьмой  арбитражный апелляционный суд, г. Томск, в течение месяца со дня принятия решения, либо  в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в течение двух месяцев со дня вступления  решения в законную силу, если такое решение было предметом рассмотрения в арбитражном  суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции  отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья Е.А. Сосин