ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной Сторожки, 12

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 09АП-57425/2024

Дело № А40-50113/24

г. Москва

31 октября 2024 года

Резолютивная часть постановления объявлена 22 октября 2024 года 

Постановление изготовлено в полном объеме 31 октября 2024 года 

 

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Порывкина П.А.,

судей: Бодровой Е.В., Новиковой Е.М.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Коваль М.Г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу АО «КОНЦЕРН ВОЗДУШНО-КОСМИЧЕСКОЙ ОБОРОНЫ «АЛМАЗ – АНТЕЙ» на решение Арбитражного суда г. Москвы от 10.07.2024 по делу № А40-50113/24, 

по иску АО «КОНЦЕРН ВКО «АЛМАЗ – АНТЕЙ» (ИНН 

<

***>) к ООО «АТИ» (ИНН 

<

***>) о взыскании, 

 

при участии в судебном заседании: 

от истца: ФИО1 по доверенности от 08.12.2023, ФИО2 по доверенности от

08.12.2023,

от ответчика: ФИО3 по доверенности от 31.03.2022, ФИО4 по доверенности

от 29.01.2024. 

 

У С Т А Н О В И Л:

АО «КОНЦЕРН ВКО «АЛМАЗ – АНТЕЙ» (далее - истец, заказчик) обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с исковыми требованиями о взыскании неустойки по договору от 27.01.2020 №05-04/НПП в размере 21 569 057 руб. 96 коп., с учетом уточнения исковых требований, принятых судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) с ООО «АТИ» (далее - ответчик, подрядчик) 

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 10.07.2024 в удовлетворении исковых требований отказано.

Не согласившись с указанным судебным актом, истец обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просил решение суда первой инстанции отменить.

В обоснование апелляционной жалобы истец указал на неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела; недоказанность имеющих значение для дела обстоятельств, которые суд считал установленными; несоответствие выводов, изложенных в решении, обстоятельствам дела; нарушение или неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.

Информация о принятии апелляционной жалобы вместе с соответствующим файлом размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Девятого арбитражного апелляционного суда (www.9aas.arbitr.ru) и Картотеке арбитражных дел по веб-адресу: (www.kad.arbitr.ru) в соответствии положениями части 6 статьи 121 АПК РФ.

Явившиеся в судебное заседание представители истца озвучили свою позицию, просили решение суда первой инстанции отменить, требования апелляционной жалобы удовлетворить.

Представители ответчика озвучили свою позицию, просили решение суда первой инстанции оставить без изменения, в удовлетворении требований  апелляционной жалобы отказать.

11.10.2024 от ответчика поступил отзыв на жалобу, который в порядке статьи 262 АПК РФ приобщен к материалам дела.

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены в апелляционном порядке.

Повторно рассмотрев дело по правилам статей 266, 268 АПК РФ, изучив доводы жалобы, исследовав и оценив представленные доказательства, отзыв, заслушав позиции сторон, Девятый арбитражный апелляционный суд не находит оснований для отмены или изменения решения Арбитражного суда города Москвы от 10.07.2024.

Как следует из материалов дела и установлено апелляционным судом, 27.01.2020 между АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» (Заказчик) и ООО «НПП «ЦРТС» (ИНН: 

<

***>) был заключен договор от 27.01.2020 № 05-04/НПП (далее - Договор), предметом которого являлось выполнение работ в рамках реализации мероприятия: «Создание широкозонной многопозиционной системы наблюдения (МПСН) филиала «Аэронавигация Дальнего Востока», в части создания районов 1-6 широкозонной МПСН (п. 2.1 Договора).

20.07.2021 ООО «НПП «ЦРТС» ликвидировано в связи с реорганизацией в форме присоединения к ООО «АТИ» (Подрядчик), что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц № ЮЭ9965-23-132470567. Соответственно, все права и обязанности ООО «НПП «ЦРТС», вытекающие из Договора, перешли к ООО «АТИ», которое и является надлежащим ответчиком по делу.

Сроки выполнения обязательств по этапам 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 Договора, установленные п. 6.1 Договора и Календарным планом выполнения работ Приложение №1 к Дополнительному соглашению №2 от 20.01.2020 к Договору, Ответчиком нарушены

Ответчик в установленные Договором сроки результаты по подэтапам не передал, в связи с чем, на основании п. 10.4 Договора была начислена неустойка, с учетом уточненных требований, в общем размере 21 569 057 руб. 96 коп., что послужило основанием для обращения в суд с настоящим иском.

Ответчик представил отзыв, платежные поручения на уплату неустойки в сумме                   6 403 176, 01 руб., расчет неустойки исходя из ставки 1/300 учетной ставки ЦБ РФ, представил письма о передаче результатов работ (раньше актов), указал на необходимость перерасчет неустойки до даты фактической передачи результатов работ, а не дат актов и просил применить статью 333 ГК РФ.

Также ответчик представил претензии от заказчика истца об уплате неустойки за те же нарушения сроков по тем же работам и этапам, судебные акты по взысканию с истца неустойки в пользу государственного заказчика, пояснил, что до настоящего времени у сторон сложились правила делового оборота, по которым ответчик компенсировал сумму неустойки за просрочку выполнения работ по этапам, которую истцу начислял государственный заказчик в размере взысканной с истца по решениям суда и только в этом конкретном случае истец потребовал взыскать сумму неустойки выше уже компенсированной в 3 раза.

Поскольку ответчик нарушил условия договора, истец обратился с требованиями в суд.

Согласно положениям статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательств и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательств и одностороннее изменение его условий не допускается.

В соответствии со статьей 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результаты заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно пункту 1 и 3 статьи 720 ГК РФ заказчик работ обязан в сроки и в порядке предусмотренном договором осмотреть и принять выполненную работу (ее результат) с участием подрядчика, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику. При принятии работы без проверки или при отсутствии возражений против качества работы заказчик не вправе ссылаться на ее недостатки.

Согласно ст. 708 ГК РФ, в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы. Указанные в договоре подряда начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работы могут быть изменены в случаях и в порядке, предусмотренных договором.

Согласно статье 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности просрочки исполнения.

Согласно положениям ст. 401 ГК РФ лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности.

Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства.

Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство.

В соответствии с пунктом 10.4 Договора в случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки. Размер такой неустойки составляет 1/100 действующей на день предъявления требования ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, исчисленной от стоимости неисполненного обязательства за каждый день просрочки его исполнения, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательств.

При расчете суммы неустойки Истец определяет период просрочки не по дате предъявления результатов работ, а по дате подписания Истцом Актов сдачи-передачи работ.

Между тем, согласно правовой позиции, изложенной в Определении Верховного Суда Российской Федерации от 15.10.2019 №305-ЭС19-12786 по делу № А40- 236034/2018, срок выполнения работы необходимо отличать от срока приемки выполненной работы, который является самостоятельным и может быть установлен в договоре подряда.

Условие Договора, определяющее дату исполнения обязательств по отдельным этапам как дату подписания заказчиком акта сдачи выполненного этапа работ, не должно ставить в зависимость от усмотрения заказчика период ответственности исполнителя за нарушение сроков выполнения работ.

Отказывая в удовлетворении требований, суд первой иснатнции праовмерно исходил из следующего.

Судом установлены даты фактической передачи результатов работ:

Этап 4.2. Разработка проектно-сметной документации для создания района №3 МПСН Хабаровский ЦОВД – 01.10.2021 (Письмо исх. №529-1/2021 от 01.10.2021 года);

Этап 4.3. Разработка проектно-сметной документации для создания района №4 МПСН Хабаровский ЦОВД – 25.06.2021 (Письмо исх. №236 от 25.06.2021 года);

Этап 4.4. Разработка проектно-сметной документации для создания района №5 МПСН Хабаровский ЦОВД – 24.11.2021 (Письмо исх. №743/2021 от 24.11.2021 года);

Этап 4.5. Разработка проектно-сметной документации для создания района №6 МПСН Хабаровский ЦОВД – 14.12.2021 (Письмо исх. №835/2021 от 14.12.2021 года).

В соответствии с пунктом 10 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 16 от 14.03.2014 «О свободе договора и ее пределах», при рассмотрении споров о защите от несправедливых договорных условий суд должен оценивать спорные условия в совокупности со всеми условиями договора и с учетом всех обстоятельств дела.

Согласно п. 10.4. Договора (в редакции Дополнительного соглашения №2 от 20.01.2021) размер неустойки за просрочку выполнения работ Подрядчиком составляет 1/100 (Одна сотая) действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, исчисленной от стоимости неисполненного обязательства за каждый просрочки его исполнения, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательств.

Вместе с тем, суд принимает во внимание, что применительно к ответственности Истца Договором установлены более благоприятные последствия неисполнения обязательств по оплате работ.

Так, согласно п. 10.3. Договора (в редакции Дополнительного соглашения №2 от 20.01.2021), в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки. Размер неустойки составляет 1/300 (Одну трехсотую) действующей на день предъявления требования ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, исчисленной от стоимости неисполненного обязательства за каждый день просрочки его исполнения.

Таким образом, Договором предусмотрены условия неравной имущественной ответственности за нарушение обязательств для сторон: ответственность Заказчика за неисполнение обязательства в 3 раза меньше, чем коррелирующая ей ответственность за неисполнение обязательства Подрядчиком, что указывает на очевидный дисбаланс договорных отношений в части ответственности сторон.

С учетом компенсационного характера гражданско-правовой ответственности под соразмерностью суммы неустойки последствиям нарушения обязательства Гражданский кодекс РФ предполагает выплату кредитору такой компенсации за потери, которая будет адекватна нарушенному интересу и соизмерима с ним.

Общий размер взысканной неустойки с АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» в пользу ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» за просрочку исполнения этапов 4.2, 4.3, 4.4, 4.5. по Договору №1197/19 от 27.12.2019 г. составляет 6 403 176 руб. 01 коп., что подтверждено судебными актами по делам №А40-136078/21, №А40-153032/22, №А40-41491/22, №А40-193335/21, №А40-153038/22. Взысканные судебными актами денежные суммы АО «Концерн ВКО «Алмаз- Антей» перевыставлены Истцом на Ответчика посредством направления Претензий.

Требования Истца удовлетворены Ответчиком в добровольном порядке в общем размере 6 403 176,01 руб., о чем в материалы дела представлены платежные поручения.

Ответчиком заявлено ходатайство о снижении штрафа в порядке ст. 333 ГК РФ.

В отношении снижения размера финансовых санкций судом установлено, что с учетом положений статьи 333 ГК РФ и Постановления Пленума ВАС РФ от 22.12.2011 № 81 «О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление Пленума ВАС РФ № 81), исходя из принципа осуществления гражданских прав своей волей и в своем интересе (статья 1 ГК РФ) неустойка может быть снижена судом на основании статьи 333 Кодекса только при наличии соответствующего заявления со стороны ответчика, который должен представить доказательства явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства. При этом уменьшение неустойки, определенной договором и подлежащей уплате лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, допускается в исключительных случаях, если будет доказано, что взыскание неустойки в предусмотренном договором размере может привести к получению кредитором необоснованной выгоды (п. 2 ст. 333 ГК РФ).

Критериями для установления несоразмерности неустойки в каждом конкретном случае могут быть: чрезмерно высокий процент неустойки; значительное превышение суммы неустойки над размером возможных убытков, вызванных нарушением обязательств; длительность неисполнения обязательств и др. (пункт 2 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14.07.1997 № 17 «Обзор практики применения арбитражными судами статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации»),

Институт неустойки необходим, чтобы находить баланс между законными интересами кредитора и должника. Кредитору нужно восстановить имущественные потери от нарушения обязательства, но он не должен получить сверх того прибыль (Определение Верховного Суда РФ от 15.01.2019 № 25-КГ18-8).

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в определении от 21.12.2000 № 263-0, суд обязан установить баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного (а не возможного) размера ущерба, причиненного в результате конкретного правонарушения. Критериями для установления несоразмерности подлежащей уплате неустойки последствиям нарушения обязательства в каждом конкретном случае могут быть: чрезмерно высокий процент неустойки, значительное превышение суммы неустойки над суммой возможных убытков, вызванных нарушением обязательства, длительность неисполнения обязательства и другие обстоятельства.

В силу пункта 75 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 7 от 24 марта 2016 года «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» при оценке соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства необходимо учитывать, что никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения, а также то, что неправомерное пользование чужими денежными средствами не должно быть более выгодным для должника, чем условия правомерного пользования (пункты 3, 4 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации).

При этом суд оценивает возможность снижения неустойки с учетом конкретных обстоятельств дела.

Таким образом, понятие несоразмерности носит оценочный характер.

Суд считает, что требуемая Истцом неустойка за несвоевременное исполнение обязательств по выполнению работ явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, в связи с чем подлежит уменьшению.

Превращение неустойки в способ обогащения кредитора недопустимо и противоречит ее компенсаторной функции, которая предполагает соразмерность суммы неустойки реальным последствиям нарушения обязательства.

В силу ст. 71 АПК РФ указано, что арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Согласно пункту 3 статьи 1 ГК РФ при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. В силу пункта 4 статьи 1 ГК РФ никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

Оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации. По общему правилу пункта 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное.

Поведение одной из сторон может быть признано недобросовестным не только при наличии обоснованного заявления другой стороны, но и по инициативе суда, если усматривается очевидное отклонение действий участника гражданского оборота от добросовестного поведения. В этом случае суд при рассмотрении дела выносит на обсуждение обстоятельства, явно свидетельствующие о таком недобросовестном поведении, даже если стороны на них не ссылались (Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Из материалов дела следует, что в адрес Ответчика направлялись претензии об уплате неустойки, из содержания которых следовало, что Истец считал достаточным и соразмерным компенсацию взысканных с АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» сумм неустойки, начисленных в рамках Договора №1197/19 от 27.12.2019.

Таким образом, поведение Истца свидетельствовало о достаточности и соразмерности выплаченной Ответчиком неустойки в размере, взысканной с Истца в рамках исполнения Договора 1197/19 от 27.12.2019, что также свидетельствует о полной компенсации негативных последствий несвоевременного исполнения Ответчиком обязательств.

При изложенных обстоятельствах, заявления Истца о недостаточности выплаченной Ответчиком неустойки подлежат оценке применительно к принципу «эстоппель» и правило venire contra factum proprium (никто не может противоречить собственному предыдущему поведению), в соответствии с которыми изменение стороной своей позиции в ущерб контрагенту, который ранее разумно и добросовестно полагался на обратное поведение такой стороны, лишает ее в этом случае права на представление возражений.

Принцип эстоппель (estoppel) означает лишение стороны в споре права ссылаться на какие-либо факты, оспаривать или отрицать их ввиду ранее ею же сделанного заявления об обратном в ущерб противоположной стороне в процессе судебного/арбитражного разбирательства, применение которой означает утрату права на защиту посредством лишения стороны права на возражение.

Данное понятие указывает на то, что поведение стороны для оценки ее добросовестности нужно рассматривать во времени, в некоей хронологической протяженности, учитывая последовательность либо непоследовательность действий, возражений и заявлений этой стороны.

Необходимо отметить, что главная задача принципа эстоппель состоит в том, чтобы воспрепятствовать стороне получить преимущества и выгоду, как следствие своей непоследовательности в поведении в ущерб другой стороне, которая добросовестным образом положилась на определенную юридическую ситуацию, созданную первой стороной.

Основу принципа эстоппель составляет двуединство принципов справедливости и добросовестности при приоритете последнего.

Таким образом, применительно к рассматриваемому случаю, поскольку на лицо противоречивое, непоследовательное поведение истца, что в том числе следует из предъявления им требования о взыскании неустойки в более увеличенном размере (в 3 раза), по сравнению с неустойкой взысканной Госзаказчиком с Истца, с учетом добровольной выплаты неустойки Ответчиком по ранее полученной претензии на сумму 6 403 176,01 руб., оценив поведение истца в спектре положений ст. 10 ГК РФ, необходимо применить к отношениям сторон положения абзаца четвертого пункта 2 статьи 10 ГК РФ, в связи с чем, требования в требованиях истца правомерно отказано.

Доводы апелляционной жалобы повторяют доводы искового заявления, изложенные выше, признанные судами необоснованными, в связи с чем оснований для отмены или изменения обжалуемого решения суда первой инстанции по доводам апелляционной жалобы не имеется.

При рассмотрении дела и принятии обжалуемого решения судом первой инстанции были установлены все существенные для дела обстоятельства и им дана надлежащая правовая оценка. Выводы суда первой инстанции основаны на всестороннем и полном исследовании доказательств по делу. Нормы материального права применены правильно. 

Нарушений норм процессуального права, влекущих безусловную отмену судебного акта (часть 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), при принятии решения судом первой инстанции не допущено.

Руководствуясь статьями 266 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд, 

 

П О С Т А Н О В И Л:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 10.07.2024 по делу № А40-50113/24 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения. 

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа. 

 

Председательствующий судья:                                                                        П.А. Порывкин

Судьи:                                                                                                                 Е.В. Бодрова

 

                                                                                                                             Е.М. Новикова