Арбитражный суд Волгоградской области  

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) 

город Волгоград 

«16» марта 2022 года Дело № А12-4626/2021  

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Васюковой Е.С. 

при ведении протокола судебного заседания и ведении его аудиозаписи помощником  судьи Дулиной О.А.,   

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с  ограниченной ответственностью «Агроэлита Семена» (ИНН: 

<

***>, ОГРН:  

<

***>, Самойловский район Саратовской области) к обществу с ограниченной  ответственностью «Волгалайт» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>, г. Волгоград) о  безвозмездном устранении недостатков работ по договору строительного подряда,  

и по встречному исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью  «Волгалайт» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>, г. Волгоград) к обществу с  ограниченной ответственностью «Агроэлита Семена» (ИНН: 

<

***>, ОГРН:  

<

***>, Самойловский район Саратовской области) о взыскании задолженности,  

руководствуясь ст. ст. 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

По первоначальному иску. 

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Агроэлита  Семена» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>, Самойловский район Саратовской  области) удовлетворить.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Волгалайт» (ИНН:  

<

***>, ОГРН: 

<

***>, г. Волгоград) в течение 30 календарных дней с даты  вступления в законную силу решения суда по настоящему делу, безвозмездно устранить  недостатки работ, проведенных ООО «ВолгаЛайт» по договору на выполнение работ от  24.05.2017 № 7 по строительству выставочного павильона в р.п. Самойловка, Саратовской  области, а именно произвести работы:  

- демонтировать доборные элементы конструкций стен и кровли в объёме 272 п.м.;  

- демонтировать стеновые панели наружных ограждающих конструкций в объёме  381 кв.м.;  

- демонтировать кровельные сендвич-панели в объёме 184 кв.м.;  

- демонтировать конструкции подвесных потолков типа «Армстронг», каркасы  которых крепятся к нижней поверхности кровельных панелей в объёме 172 кв.м.;  

- демонтировать элементы электропроводки, прикреплённые к нижней поверхности  кровельных панелей в объёме 374 п.м.;  

- демонтировать заполнения оконных проёмов из ПВХ в объёме 7,5 кв.м.;  

- демонтировать заполнение оконных проёмов из алюминиевых профилей в объёме  92,1 кв.м.;  

- выполнить окраску металлических конструкций в объёме 52,7 кв.м.; 

- выполнить монтаж кровельных и стеновых панелей в соответствии с  требованиями нормативно-технической документации.  

- смонтировать конструкции подвесных потолков типа «Армстронг» в объёме 172  кв.м.;  

- смонтировать элементы электропроводки в объёме 374 п.м.;  

- выполнить монтаж заполнений оконных проёмов из алюминия и ПВХ в  соответствии с требованиями нормативно-технической документации;  

- смонтировать доборные элементы конструкций стен и кровли в объёме 272 п.м. 

В случае неисполнения судебного акта взыскать с общества с ограниченной  ответственностью «Волгалайт» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>, г. Волгоград) в  пользу общества с ограниченной ответственностью «Агроэлита Семена» (ИНН:  

<

***>, ОГРН: 

<

***>, Самойловский район Саратовской области) судебную  неустойку в размере 1 000 руб. в день за период неисполнения судебного акта в первые 30  календарных дней после истечения срока исполнения судебного акта, 1 500 руб. в день за  период неисполнения судебного акта с 31 по 60 календарный день, 2 000 руб. в день за  период неисполнения судебного акта с 61 календарного дня до даты фактического его  исполнения.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Волгалайт» (ИНН:  

<

***>, ОГРН: 

<

***>, г. Волгоград) в пользу общества с ограниченной  ответственностью «Агроэлита Семена» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>,  Самойловский район Саратовской области) расходы на проведение досудебного  исследования в размере 145 000 руб., расходы на проведение судебной экспертизы в  размере 50 000 руб., а также судебные расходы по уплате государственной пошлины в  размере 6 000 руб.  

По встречному иску. 

В удовлетворении заявления общества с ограниченной ответственностью  «Волгалайт» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>, г. Волгоград) о назначении по  делу повторной экспертизы отказать.  

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Волгалайт»  (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>, г. Волгоград) удовлетворить в части.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Агроэлита Семена»  (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>, Самойловский район Саратовской области) в  пользу общества с ограниченной ответственностью «Волгалайт» (ИНН: 

<

***>,  ОГРН: 

<

***>, г. Волгоград) задолженность в размере 887 864 руб. 78 коп.  

В удовлетворении иска в остальной части отказать. 

В результате зачета первоначальных и встречных исковых требований взыскать  общества с ограниченной ответственностью «Агроэлита Семена» (ИНН: 

<

***>,  ОГРН: 

<

***>, Самойловский район Саратовской области) в пользу общества с  ограниченной ответственностью «Волгалайт» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>,  г. Волгоград) задолженность в размере 686 864 руб. 78 коп.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Агроэлита Семена»  (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>, Самойловский район Саратовской области) в  доход федерального бюджета государственную пошлину за рассмотрение встречного иска  в размере 7 830 руб.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Волгалайт» (ИНН:  

<

***>, ОГРН: 

<

***>, г. Волгоград) в доход федерального бюджета  государственную пошлину за рассмотрение встречного иска в размере 45 278 руб.  

В полном объеме решение будет изготовлено в течение 5 рабочих дней. 

Решение может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд  в течение месяца со дня его принятия через Арбитражный суд Волгоградской области.  

Судья Е.С. Васюкова  

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначейство 

Дата 09.12.2021 9:39:57Кому выдана Васюкова Елена Сергеевна