Арбитражный суд Краснодарского края 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А32-4802/17

г. Краснодар

31 августа 2017 г.

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Гречко О.А.  

руководствуясь статьями 110, 167-171 АПК РФ, 

Р Е Ш И Л:

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Еврострой» в течение 30  календарных дней со дня вступления решения в законную силу выполнить гарантийные  обязательства по муниципальному контракту № 23 от 9 октября 2014 года, а именно  устранить следующие дефекты (недостатки):  

 1) Локальное проседание асфальто-бетонного покрытия. 

 2) Проседание асфальто-бетонного покрытия по периметру здания.   Фасад здания:  

 3) Разрушение штукатурной отделки на площадках лестничных маршах пожарных  выходов.  

 4) Разрушение штукатурной внутренней отделки лестничных маршах пожарных  выходов.  

 5) Разрушение штукатурной торцевой отделки лестничных маршах пожарных  выходов  

 6) Коррозийное разрушение окраски ограждения лестничных маршах пожарных  выходов  

 7) Деформация дощатой отделки козырька, образовались зазоры до 10мм. 

 8) Потеки от ливневой воды на известковой окраски фасада здания. Главный вход  не герметичное примыкание козырька к стенке фасада здания.  

 9) Многочисленные трещины декоративной отделки фасада здания, разрушение  декоративно-штукатурного слоя.  

 Внутренние помещения здания:  

 10) щели между рамой оконного блока и створкой до 10 мм.  11) неплотное прилегание створки к оконному блоку. 

 12) Разрушения штукатурной отделки откосов из-за воздействия влаги от осадков,  отслоение известковой окраски откосов, многочисленные трещины, следы грибковых  образований.  

 13) Отклеивание напольного покрытия на пороге.  14) намокание перекрытия в теплопункте, протекание кровли. 

 15) Разрушение напольного покрытия из керамической плитки в месте входа  канализационной трубы.  

 16) В теплопункте разрушение штукатурной отделки потолка, восстановить  отвалившуюся вентиляционнуюя решетку.  

 В случае неисполнения решения суда в установленный срок взыскать с 

ООО «Еврострой» в пользу Управления строительства администрации муниципального  образования город-курорт Геленджик 500000 руб.  

 Взыскать с ООО «Еврострой» в доход федерального бюджета госпошлину в сумме  2000 руб.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в порядке  апелляционного производства и в порядке кассационного производства в срок, не  превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу решения, через  принявший решение в первой инстанции Арбитражный суд Краснодарского края.  

Вступившее в законную силу решение арбитражного суда первой инстанции может  быть обжаловано в кассационном порядке, если было предметом рассмотрения в  арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной  инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

 Судья О.А. Гречко