59/2023-219011(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е

 

дело № А43-7764/2023

24 ноября 2023 года

г. Нижний

Новгород 

Резолютивная часть решения 23.11.2023  

В полном объеме решение изготовлено 24.11.2023 

Арбитражный суд Нижегородской области в составе судьи Годухина Артема Евгеньевича (шифр 59304), при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Сосиной А.В., рассмотрев в  судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "Гранд Инвест" (ОГРН:  

<

***>, ИНН: 

<

***>), Республика Коми, город Сыктывкар,  

к ответчику: публичному акционерному обществу "Россети Центр и Приволжье" (ИНН: 

<

***>,  ОГРН: 

<

***>), город Нижний Новгород,  

об обязании исполнить технологическое присоединение в рамках договора № 521052045, при участии представителей сторон: от истца: неявка, 

от ответчика: Несен А.В., ФИО1, представители по доверенности,  

УСТАНОВИЛ:

В Арбитражный суд Нижегородской области поступило исковое заявление общества с  ограниченной ответственностью "Гранд Инвест" к публичному акционерному обществу "Россети  Центр и Приволжье" об обязании исполнить технологическое присоединение в рамках договора №  521052045 о технологическом присоединении объекта - гостиницы, расположенной по адресу: 

<

...> у дома № 1 (пересечение).  

Требования основаны на статьях 309, 310,330 Гражданского кодекса Российской Федерации,  ст. 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об электроэнергетике" (далее – Закон об  электроэнергетике), п. 3 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств  потребителей электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от  27.12.2004 № 861 (далее - Правила № 861) и мотивировано необоснованным уклонением ответчика от  технологического присоединения объекта истца к электрическим сетям.  

Ответчик исковые требования не признал по основаниям, изложенным в отзыве. 

Истец, надлежащим образом извещенный о дате, времени иместе судебного заседания в суд не  явился.  

В соответствии с пунктом 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации суд рассматривает дело в отсутствие истца.  

В судебном заседании объявлен перерыв в порядке статьи 163 АПК РФ. После перерыва  рассмотрение дела продолжено.  

Изучив материалы дела, суд установил следующее. 

Сторонами заключен договор об осуществлении технологического присоединения к  электрическим сетям № 521052045 (далее - договор), по условиям которого сетевая организация  (ответчик) принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения  энергопринимающих устройств заявителя (истца), в том числе по обеспечению готовности объектов  электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к  присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в  случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов  электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом  следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств  120 кВт; категория надежности вторая; и т.д.  

Технологическое присоединении необходимо для электроснабжения объектов заявителя:  гостиница, расположенная по адресу: 

<

...> у дома № 1  (пересечение).  

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет шесть месяцев  со дня заключения договора (пункт 5 договора).  

В установленный договором срок мероприятия по технологическому присоединению  ответчиком выполнены не были.  

Истец направил в адрес ответчика претензию с требованием об исполнении условий договора. 

Претензия была оставлена ответчиком без удовлетворения, требуемые действия не  осуществлены, что явилось основанием для обращения истца в суд с исковым заявлением о  понуждении ответчика выполнить обязательства по осуществлению технологического присоединения.  

Оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам статьи 71 АПК РФ, суд  приходит к следующим выводам.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Закона об электроэнергетике технологическое  присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей  электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, в том числе объектов  микрогенерации, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым  организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской  Федерации, и носит однократный характер.  

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении  технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между  сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.  

Порядок технологического присоединения установлен Правилами технологического  присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, утвержденных  постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861.  

Правила № 861 в пункте 7 устанавливают следующую процедуру технологического  присоединения:  

а) подача заявки юридическим или физическим лицом (далее - заявитель), которое имеет  намерение осуществить технологическое присоединение по основаниям, предусмотренным пунктом  2 настоящих Правил;  

б) заключение договора; 

в) выполнение сторонами договора мероприятий по технологическому присоединению,  предусмотренных договором;  

г) получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на  допуск в эксплуатацию объектов заявителя. В случае технологического присоединения объектов лиц,  указанных в пункте 12 настоящих Правил, технологическое присоединение которых осуществляется  по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) к электрическим сетям  классом напряжения до 20 кВ включительно, объектов лиц, указанных в пунктах 12(1), 13 и 14  настоящих Правил, а также в отношении объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций  классом напряжения до 20 кВ включительно, построенных (реконструированных) в рамках  исполнения технических условий в целях осуществления технологического присоединения  заявителя, получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на  допуск в эксплуатацию объектов заявителя с учетом положений пунктов 18(1) - 18(4) настоящих  Правил не требуется;  

д) осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя (за  исключением заявителей, указанных в пунктах 12(1) и 14 настоящих Правил, в случае, если  технологическое присоединение энергопринимающих устройств таких заявителей осуществляется на  уровне напряжения 0,4 кВ и ниже) к электрическим сетям и фактического приема (подачи)  напряжения и мощности. Для целей настоящих Правил под фактическим присоединением  понимается комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое  соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, в которую была  подана заявка, и объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) заявителя без  осуществления фактической подачи (приема) напряжения и мощности на объекты заявителя  (фиксация коммутационного аппарата в положении "отключено").  

В соответствии с пунктом 3 Правил № 861 сетевая организация обязана выполнить в  отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению  при условии соблюдения им настоящих Правил.  

Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического  присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с  лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую  организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств,  принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании, а  

также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по  технологическому присоединению.  

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между  сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими  Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации (пункт 6 Правил   № 861).  

Судом установлено, что срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению  установлен договором шесть месяцев со дня заключения.  

Фактическое присоединение объекта истца ответчиком в установленный срок не было  осуществлено.  

В силу ст. 12 ГК РФ присуждение к исполнению обязанности в натуре является одним из  предусмотренных законом способов защиты нарушенного права.  

Возражая против удовлетворения исковых требований ответчик заявил ходатайство о  приобщении к материалам дела документов, свидетельствующих об исполнении им условий договора   № 521052045: акта об осуществлении технологического присоединения № 855-Н от 24.07.2023.  

Акт составлен в присутствии истца и подписан последним без замечаний. Истцом возражений в отношении данного акта не поступило. 

Изучив представленные в материалы дела документы, суд полагает обязательства,  предусмотренные договором № 521052045 об осуществлении технологического присоединения,  фактически исполненными ответчиком.  

При таких обстоятельствах, суд не усматривает оснований для удовлетворения исковых  требований.  

Расходы по государственной пошлине в порядке части 1 статьи 110 АПК РФ и ст. 333. 40 НК  относятся на ответчика и подлежат взысканию в пользу истца в связи с добровольным удовлетворении  ответчиком требований истца после обращения в арбитражный суд и вынесения определения о  принятии искового заявления к производству.  

Руководствуясь статьями 110, 112, 167 — 171, 176, 180, 181, 182, 319 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении иска отказать. 

Взыскать с публичного акционерного общества "Россети Центр и Приволжье" (ИНН:  

<

***>, ОГРН: 

<

***>), город Нижний Новгород, в пользу общества с ограниченной  ответственностью "Гранд Инвест" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>), Республика Коми, 

<

...> 000 руб. 00 коп. расходов по оплате госпошлины.  

Исполнительный лист выдается после вступления решения в законную силу по заявлению  взыскателя.  

Настоящее решение вступает в законную силу по истечении одного месяца со дня принятия,  если не будет подана апелляционная жалоба. Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный  апелляционный суд через Арбитражный суд Нижегородской области в течение месяца с момента  принятия решения.  

В таком же порядке решение может быть обжаловано в арбитражный суд Волго-Вятского округа  в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого акта, при  условии, что он был предметом рассмотрения Первого арбитражного апелляционного суда или Первый  арбитражный апелляционный суд отказал в восстановлении пропущенного срока подачи  апелляционной жалобы; если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом  Российской Федерации.  

Судья А.Е. Годухин