АРБИТРАЖНЫЙ СУД АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ)

Дело № А06-11330/2024

г. Астрахань

29 января 2025 года

Арбитражный суд Астраханской области в составе: судьи: Чижовой С.Ю. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Туралиевой Л.Г.  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Внести изменения в муниципальный контракт № 249 от 29.12.2023, изложив в новой редакции дату окончания работ, предусмотренную пунктом 2.1 контракта, приняв новую дату окончания работ – 31.05.2025.  

Взыскать с Управления по капитальному строительству администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Современные системы реновации» расходы по оплате государственной пошлины в размере 50 000 руб.  

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия, через Арбитражный суд Астраханской области.  

Информация о движении дела может быть получена на официальном интернет – сайте Арбитражного суда Астраханской области: http://astrahan.arbitr.ru»  

Судья С.Ю. Чижова  

29 января 2025 года