1 1125_6969302  

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

ул. Гоголя, 18, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450076, http://ufa.arbitr.ru/, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А07-32158/2022

г. Уфа

07 декабря 2023 года

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Проскуряковой С. В.,  при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев дело по иску  

государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Башкортостан  Стерлибашевская центральная районная больница (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «СК Арсенал групп» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>)  

об обязании ответчика безвозмездно устранить недостатки работ, выполненных по  государственному контракту на капитальный ремонт кровли и фасада терапевтического  корпуса ГБУЗ РБ Стерлибашевская ЦРБ от 08.10.2021г. № 97;  

об обязании ответчика завершить работы согласно гарантийному письму ответчика по  договору на производство работ по капитальному ремонту № 75-в от 18.11.2021г.  

В соответствии со ст. 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской  

Федерации оглашается 

резолютивная часть решения

. 

Руководствуясь ст.ст. 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской  

Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ:

Исковые требования государственного бюджетного учреждения здравоохранения  Республики Башкортостан Стерлибашевская центральная районная больница (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) удовлетворить.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью «СК Арсенал групп» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в течение 30 календарных дней с момента вступления  в силу решения суда безвозмездно устранить недостатки работ, выполненных по договору  на капитальный ремонт кровли и фасада терапевтического корпуса ГБУЗ РБ  Стерлибашевская ЦРБ от 08.10.2021 № 97, а именно: выполнить работы по покраске  навесов терапевтического корпуса, выравниванию и покраске стен на входных группах  терапевтического корпуса, фиксации и герметизации кровли терапевтического корпуса,  закрытию стартовым углом металлосайдинга в нижней части здания терапевтического  корпуса, восстановлению разрушенного бетонного основания площадки в нижней части  здания терапевтического корпуса, восстановлению плитки на входных группах  терапевтического корпуса.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СК Арсенал групп» (ИНН  5612175430, ОГРН 1205600010296) в пользу государственного бюджетного учреждения  здравоохранения Республики Башкортостан Стерлибашевская центральная районная  больница (ИНН 0241000938, ОГРН 1020201336528) судебные расходы по оплате  государственной пошлины в размере 6 000 руб. 00 коп.  

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу по  ходатайству взыскателя.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его  принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы  решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия  постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный  суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через  Арбитражный суд Республики Башкортостан.  

Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом Российской  Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Уральского округа при  условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной  инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного  срока подачи апелляционной жалобы.  

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или  кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах  Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru или  Арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.  

Судья С.В. Проскурякова