АРБИТРАЖНЫЙ СУД АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

414014, г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6

Тел/факс (8512) 48-23-23, E-mail: astrahan.info@arbitr.ru

http://astrahan.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А06-2163/2022

г. Астрахань

27 сентября 2022 года

Резолютивная часть решения объявлена 22 сентября 2022года,

Арбитражный суд Астраханской области в составе судьи: Богатыренко С.В.

при ведении протокола судебного заседания   секретарем судебного заседания ФИО1 

рассмотрев в судебном заседании дело  по иску  Общества с ограниченной ответственностью «АстЭнергоСтрой» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)   к Государственному  бюджетному учреждению здравоохранения Астраханской области Александро-Мариинская  областная клиническая больница (ИНН 

<

***>, ОГРН    

<

***>) о взыскании  ущерба в сумме 63 032 руб.

при участии:

от истца: не явился.

от ответчика: ФИО2, представитель по доверенности от 23.01.2021 г. 

 

Истец в соответствии со статьями 11, 12 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьей 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, обратился в арбитражный суд с иском к ответчику  о взыскании  ущерба в сумме 63 032 руб.

В судебное заседание не явился представитель истца, о дате заседания извещен надлежащим образом в соответствии со ст. 123 АПК РФ.

Судебное заседание в порядке ст. 156 АПК РФ проводится в отсутствие представителя истца. 

Представитель ответчика просит приобщить к материалам дела копию доверенности на ФИО3

Суд приобщает документ к материалам дела.

Представитель ответчика иск не признает. Считает, что неисполнение истцом условий контракта от 01.06.2021 г. №155А явилось следствием действий самого истца, вся необходимая документация  имелась у подрядчика. Просит в иске отказать. 

Изучив материалы дела,  выслушав представителя ответчика, суд 

УСТАНОВИЛ:

Как следует из   материалов дела, 01  июня 201г. между Обществом с ограниченной ответственностью «АстЭнергоСтрой» (подрядчик) и ГБУЗ АО АМОКБ (заказчик) заключен муниципальный контракт № 155А на ремонт электрооборудования с последующими измерительными работами.

В соответствии с п. 1.1. контракта подрядчик обязуется по заданию заказчика осуществить ремонт электрооборудования с последующими измерительными работами ГБУЗ АО АМОКБ (терапевтический корпус № 3, терапевтический корпус 1, хирургический корпус № 2, областной перинатальный центр)

В соответствии с  п.п.  2.2. и 2.5. контракта  срок   оказания работ  составляет: в течение 5 рабочих дней по заявке заказчика, но не позднее с даты заключения контракта по 20.12.2021г. включительно.  Работы   по контракту  проводятся   в соответствии с Графиком проведения работ, разработанным Подрядчиком и согласованным с Заказчиком. Работы должны проводиться без остановки текущей деятельности Заказчика. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения или представлять угрозу для работников и пациентов Заказчика. Время проведения работ должно быть согласовано с Заказчиком.

Согласно п.п.2.3. Контракта выполнение работ и передача результата работ по контракту осуществляется в следующем порядке и в следующие сроки, в соответствии с Техническим заданием на выполнение работ (приложение 2 к контракту):

А) составление Подрядчиком графика выполнения работ и его согласование Сторонами осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подачи заявки Заказчиком Подрядчику о выполнении работ;

Б) перед началом выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику список лиц, допущенных к выполнению Работ, который согласовывается Сторонами, предоставляет Заказчику приказы о назначении работников и ответственного руководителя за выполнение Работ;

В) после согласования графика выполнения работ Подрядчик приступает к выполнению работ в соответствии с условиями настоящего контракта.

Цена контракта в соответствии с п.4.1. составила 413 186 рублей.

В силу п.3.1.1. заказчик обязуется передать необходимую документацию для выполнения работ.

Заказчик обязуется  обеспечить  допуск  представителей  подрядчика  на объект для проведения работ (п.3.1.2)

В рамках   контракта подрядчик  обязуется: 

            В течение 3 (трех) рабочих дней с момента подачи заявки Заказчиком на выполнение работ согласовать с Заказчиком График выполнения Работ и представить его Заказчику, согласовать с Заказчиком список лиц, допущенных к выполнению Работ и представить Заказчику приказы о назначении работников и ответственного руководителя за выполнение Работ. Электротехнический персонал Подрядчика, непосредственно принимающий участие в процессе электроиспытательных работ, должен быть прошедшим специальную подготовку, должен иметь действующие группы по электробезопасности не ниже соответствующих видам работ и классу рабочего напряжения электроборудования, с предъявлением Заказчику до начала работ удостоверений, имеющих специальную отметку -«Право на проведение испытаний» (п.3.3.2).

Подрядчик обязуется выполнять Работы по настоящему контракту в часы, согласованные Заказчиком.

Осуществить согласование и оформление необходимых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации документов и разрешений для выполнения Работ, если таковые требуются в соответствии с законодательством Российской Федерации (п.3.3.3).

      Оформлять результаты измерений протоколами установленного действующего образца, включенными в состав Технического отчета (заключения), с последующей выдачей указанных документов Заказчику (п.3.3.4).

Технический отчет должен быть установленного образца и также включать в себя: информацию об объектах (техническая характеристика, информация по паспортным данным и исполнительной документации и т.п.); результаты испытаний (протоколы действующего образца и т.п.); надлежащим образом оформленные электрические схемы испытываемых электрических цепей и оборудования, откорректированные в соответствие с фактическим состоянием питающих схем испытываемого оборудования.

 Обеспечить Работы по контракту самостоятельно приобретенным инженерным оборудованием и материалами, с использованием товара, отвечающего по своим техническим свойствам требованиям ГОСТов и ТУ, Техническому заданию на выполнение работ (приложение 2 к контракту) и иным условиям настоящего контракта без дополнительных расходов Заказчика ( п.3.3.6).

       Выполнить работы в полном объёме, с надлежащим качеством и в соответствии с условиями настоящего контракта. Технического задания на выполнение работ (приложение 2 к контракту), в сроки, указанные в настоящем контракте и передать Заказчику результат выполненных работ по актам сдачи-приемки выполненных работ по формам КС-2, КС-3 (п.3.3.7).

В соответствии с п.3.4.2. контракта подрядчик имеет право запрашивать у заказчика информацию, необходимую для исполнения настоящего контракта.

В целях своевременного и безопасного проведения работ истец письмом от 11.06.2021 исх.178/2021 в целях выполнения работ по контакту обратился к заказчику с просьбой предоставить техническую документацию, а именно действующие паспорта всех заземляющих устройств, протоколы испытаний электрооборудования и электрокоммуникаций, исполнительную документацию всех проводимых электро-монтажных работ,

Кроме того, просил назначить ответственное лицо с правом допуска к работам в электроустановках и правом принятия решения об отключении электропитания объектов для сопровождения бригады подрядчика.

В силу п.46.9 «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» Подрядчик просил осуществить отключение от электросети всех электроприборов, электрооборудования и электроустановок и т.д.

Согласно доводам искового заявления, заказчик запрашиваемую у него подрядчиком документацию не представил, а также не заявил мотивированный отказ в ее предоставлении.

При этом, из письма  заказчика от 30.06.2021г. следует, что  заказчик предлагал подрядчику   приступить к выполнению работ    согласно приложению № 2  с 05.07.2021г. 

Письмом от 07.10.2021г. подрядчик повторно уведомил заказчика о необходимости предоставления документации, указанной в письме от 11.06.2021г.

Заказчик требование подрядчика о предоставлении документации, необходимой для безопасного выполнения работ не исполнил.

В соответствии с техническим заданием на выполнение работ, являющимся приложением к контракту, в силу п. 2.1 работы, производимые подрядчиком, должны выполняться в строгом соблюдении с перечнем нормативной документации, указанным в данном пункте.

Согласно доводам искового заявления,  длительное бездействие со стороны заказчика в части предоставления необходимой подрядчику документации создало препятствия к выполнению работ подрядчиком и сделало невозможным исполнение контракта.

В связи с невозможностью осуществления  работ подрядчик письмом от 14.12.2021 исх.780/2021 уведомил заказчика о приостановлении выполнения работ по контракту.

 10 января 2022г. подрядчиком принято решение   об  одностороннем отказе  от исполнения  государственного контракта. 

Истец 12.01.2022  письмом с почтовым отправлением №41402169012059 направил в адрес заказчика уведомление-претензию об одностороннем отказе от исполнения контракта от 01 июня 2021 г. № 155А с момента получения подрядчиком уведомления о вручении настоящего письма,

Согласно сведениям сайта почта России 14.01.2022 Заказчик получил указанное уведомление, при этом не заявил каких-либо письменных возражений относительно расторжения контракта.

Согласно доводам искового заявления в связи с расторжением  контракта истец понес убытки в виде затрат на приобретение материалов для выполнения работ по объекту на общую сумму 59 632 руб. и расходов в виде выплаты комиссии за выдачу банковской гарантии в сумме 3400 рублей. 

          Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца с настоящим иском в суд.

 Оценив в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доводы сторон, доказательства и обстоятельства, суд считает исковые требования   не подлежащими  удовлетворению.

В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. 

Статья 307 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает, что в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.

На основании статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В силу положений статьи 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Заключенный сторонами  муниципальный  контракт, регулируется положениями параграфа 1 главы 37 "Подряд"  Гражданского кодекса Российской Федерации, а также положениями Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (пункт 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Положения пунктов 1, 2 статьи 763 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривают, что подрядные строительные работы (статья 740), проектные и изыскательские работы (статья 758), предназначенные для удовлетворения государственных или муниципальных нужд, осуществляются на основе государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд.

По государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.

Заказчик обязан в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных договором подряда, оказывать подрядчику содействие в выполнении работы (пункт 1 статьи 718 ГК РФ). 

 В силу п.3.1.1. заказчик обязуется передать необходимую документацию для выполнения работ.

Заказчик обязуется  обеспечить  допуск  представителей  подрядчика  на объект для проведения работ (п.3.1.2)

В рамках   контракта подрядчик  обязуется: 

            В течение 3 (трех) рабочих дней с момента подачи заявки Заказчиком на выполнение работ согласовать с Заказчиком График выполнения Работ и представить его Заказчику, согласовать с Заказчиком список лиц, допущенных к выполнению Работ и представить Заказчику приказы о назначении работников и ответственного руководителя за выполнение Работ. Электротехнический персонал Подрядчика, непосредственно принимающий участие в процессе электроиспытательных работ, должен быть прошедшим специальную подготовку, должен иметь действующие группы по электробезопасности не ниже соответствующих видам работ и классу рабочего напряжения электроборудования, с предъявлением Заказчику до начала работ удостоверений, имеющих специальную отметку -«Право на проведение испытаний» (п.3.3.2).

Подрядчик обязуется выполнять Работы по настоящему контракту в часы, согласованные Заказчиком.

Осуществить согласование и оформление необходимых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации документов и разрешений для выполнения Работ, если таковые требуются в соответствии с законодательством Российской Федерации (п.3.3.3).

      Оформлять результаты измерений протоколами установленного действующего образца, включенными в состав Технического отчета (заключения), с последующей выдачей указанных документов Заказчику (п.3.3.4).

Технический отчет должен быть установленного образца и также включать в себя: информацию об объектах (техническая характеристика, информация по паспортным данным и исполнительной документации и т.п.); результаты испытаний (протоколы действующего образца и т.п.); надлежащим образом оформленные электрические схемы испытываемых электрических цепей и оборудования, откорректированные в соответствит с фактическим состоянием питающих схем испытываемого оборудования.

 Обеспечить Работы по контракту самостоятельно приобретенным инженерным оборудованием и материалами, с использованием товара, отвечающего по своим техническим свойствам требованиям ГОСТов и ТУ, Техническому заданию на выполнение работ (приложение 2 к контракту) и иным условиям настоящего контракта без дополнительных расходов Заказчика ( п.3.3.6).

       Выполнить работы в полном объёме, с надлежащим качеством и в соответствии с условиями настоящего контракта. Технического задания на выполнение работ (приложение 2 к контракту), в сроки, указанные в настоящем контракте и передать Заказчику результат выполненных работ по актам сдачи-приемки выполненных работ по формам КС-2, КС-3 (п.3.3.7).

В соответствии с п.3.4.2. контракта подрядчик имеет право запрашивать у заказчика информацию, необходимую для исполнения настоящего контракта.

Как следует из материалов дела,  заказчик  направил подрядчику  письмо от 10.06.2021 №05-05-10/3287 с требованием приступить к выполнению работ, определенных в Техническом задании, являющемся приложением к контракту от 01.06.2021 №155Ас 15.06.2021.

11.06.2021 в адрес заказчика поступило письмо  подрядчика  от 11.06.2021 №178/2021 с требованием:

произвести отключение от электросети всех электроприборов, электрооборудования и электроустановок, отсоединить приборы освещения от питающих проводников;

предоставить техническую документацию;

назначить ответственное лицо из числа сотрудников ГБУЗ АО АМОКБ с правом допуска к работам в электроустановках, правом принятия решения об отключении электропитания объектов для сопровождения бригады подрядчика;

предоставить допуск сотрудникам Подрядчика на территорию ГБУЗ АО АМОКБ.

Также было предоставлено свидетельство о регистрации электролаборатории от 16.04.2021 №21.

  ГБУЗ АО АМОКБ в ответ на письмо ООО «АстЭнергоСтрой»  от 11.06.2021 №178/2021 посредством ФГУП Почта России заказным письмом с уведомлением направило письмо от 30.06.2021 №05-05-10/3650 с разъяснением порядка прохождения вводного и первичного инструктажа по охране труда на территории ГБУЗ АО АМОКБ, инструктажа по схеме электроснабжения электроустановки, ознакомления с электрической схемой и особенностями электроустановки, с которой им предстоит работать.

В  соответствии с пунктом 46.4 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 №903н командированный персонал по прибытии на место командировки должен пройти вводный и первичный инструктажи по охране труда, должен быть ознакомлен с электрической схемой и особенностями электроустановки, в которой им предстоит работать, а работники, которым предоставляется право выдачи нарядов-допусков и распоряжений, исполнять обязанности ответственного руководителя и производителя работ, должны пройти инструктаж по схеме электроснабжения электроустановки. Инструктажи должны быть оформлены записями в журналах инструктажа с подписями командированных работников и работников, проводивших инструктажи. В данном пункте не говорится о передаче пакета документов Исполнителю.

При этом, персонал подрядчика на место для выполнения работ в соответствии с контрактом не прибыл, вводный и первичный инструктажи не прошел, с электрической схемой и особенностями электроустановки, в которой им предстоит работать, ознакомлен не был.

Кроме того, контрактом от 01.06.2021 №155А обязанность заказчика по передаче в адрес Подрядчика документации, запрашиваемой ООО «АстЭнергоСервис» у ГБУЗ АО АМОКБ (действующих паспортов всех заземляющих устройств, предыдущих протоколов испытаний электрооборудования и электрокоммуникаций, исполнительной документации всех проводимых электромонтажных работ) не предусмотрена.

В дополнение к письму от 30.06.2021 №05-05-10/3650 Заказчиком посредством ФГУП Почта России заказным письмом с уведомлением направлено письмо от 30.06.2021 №05-05-10/3651 с предложением приступить к выполнению работ, определенных в Техническом задании, являющемся приложением к контракту от 01.06.2021 №155А с 05.07.2021.

В связи с тем, что подрядчик не приступил к выполнению работ, определенных в Техническом задании, являющемся приложением к контракту от 01.06.2021 №155А с 05.07.2021, заказчиком  на адрес, указанный в контракте от 01.06.2021 №155А, посредством ФГУП Почта России заказным письмом с уведомлением направлено письмо от 09.07.2021 №05-05-10/3866 с предложением приступить к выполнению работ, определенных в Техническом задании, являющемся приложением к контракту от 01.06.2021 №155А с 12.07.2021.

Однако, к выполнению работ, определенных в Техническом задании, являющемся приложением к контракту от 01.06.2021 №155А, Подрядчик не приступил. 

В связи с длительным периодом уклонения истца от выполнения работ, предусмотренных Контрактом, 06.09.2021 заказчиком на адрес, указанный в контракте от 01.06.2021 №155А, посредством ФГУП Почта России заказным письмом с уведомлением направлено финансовое требование об уплате штрафа и пени (претензия) от 06.09.2021 №05-05-10/5087 с требованием приступить к выполнению работ, определенных условиями настоящего Контракта.

04.10.2021 Заказчиком на адрес электронной почты подрядчика с требованием сообщить сроки выполнения работ, определенных условиями настоящего Контракта.

Дополнительно, 06.10.2021 направлено письмо ГБУЗ АО АМОКБ от 04.10.2021 №05-05-10/5707 с требованием сообщить сроки выполнения работ, определенных условиями настоящего Контракта. 

Данное письмо получено истцом 04.10.2021, что он подтвердил в письме ООО «АстЭнергоСтрой» от 07.10.2021 №599/2021, которым известил заказчика о приостановлении оказания услуг, предусмотренных Контрактом, ввиду обнаружения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, так как ими не получен ответ на письмо ООО «АстЭнергоСтрой» от 11.06.2021 №178/2021.

ГБУЗ АО АМОКБ письмом от 12.10.2021 №05-05-10/5874 сообщило, что ответ на письмо ООО «АстЭнергоСтрой» от 11.06.2021 № 178/2021 был направлен на адрес электронной почты, указанный в контракте от 01.06.2021 №155А, а также посредством ФГУП Почта России заказным письмом с уведомлением в виде писем от 30.06.2021 №05-05-10/3650 и №05-05-10/3650, просило в очередной раз сообщить сроки исполнения работ и указало, что основания, препятствующие исполнению условий контракта, отсутствовали.

В свою очередь ООО «АстЭнергоСтрой» в очередной раз отказалось исполнять условия Контракта от 01.06.2021 №155А, уведомив об этом ГБУЗ АО АМОКБ письмом от 14.12.2021 №780/2021, которым сообщило о приостановлении выполнения работ по Контракту.

10.01.2022 ООО «АстЭнергоСтрой» принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта от 01.06.2021 №155А.

11.01.2022 указанное выше решение об одностороннем отказе от исполнения контракта от 01.06.2021 №155А поступило в адрес Управления Федеральной антимонопольной службы по Астраханской области, на основании которого в отношении ГБУЗ АО АМОКБ было возбуждено дело об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч.7 ст.7.32. КоАП РФ.

Постановлением УФ АС по Астраханской области от 03.03.2022 производство по делу об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч.7 ст.7.32 КоАП РФ, возбужденному в отношении ГБУЗ АО АМОКБ, прекращено в связи с отсутствием в действиях ГБУЗ АО АМОКБ события административного правонарушения.

Согласно п. п. 1, 2, 5 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2016 г. N 7 "О применении судами некоторых положений ГК РФ об ответственности за нарушение обязательств" должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства (пункт 1 статьи 393 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ). Если иное не предусмотрено законом или договором, убытки подлежат возмещению в полном размере: в результате их возмещения кредитор должен быть поставлен в положение, в котором он находился бы, если бы обязательство было исполнено надлежащим образом (статья 15, пункт 2 статьи 393 ГК РФ). 

Согласно статьям 15, 393 ГК РФ в состав убытков входят реальный ущерб и упущенная выгода. 

Под реальным ущербом понимаются расходы, которые кредитор произвел или должен будет произвести для восстановления нарушенного права, а также утрата или повреждение его имущества. 

По смыслу статей 15 и 393 ГК РФ, кредитор представляет доказательства, подтверждающие наличие у него убытков, а также обосновывающие с разумной степенью достоверности их размер и причинную связь между неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства должником и названными убытками. Должник вправе предъявить возражения относительно размера причиненных кредитору убытков, и представить доказательства, что кредитор мог уменьшить такие убытки, но не принял для этого разумных мер (статья 404 ГК РФ). 

При установлении причинной связи между нарушением обязательства и убытками необходимо учитывать, в частности, то, к каким последствиям в обычных условиях гражданского оборота могло привести подобное нарушение. 

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 12 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", по делам о возмещении убытков истец обязан доказать, что ответчик является лицом, в результате действий (бездействия) которого возник ущерб, а также факты нарушения обязательства или причинения вреда, наличие убытков (пункт 2 статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Таким образом, применение меры гражданско-правовой ответственности как возмещение убытков возможно при доказанности совокупности условий: противоправности действий причинителя убытков, причинной связи между противоправными действиями и возникшими убытками, наличия и размера понесенных убытков. При этом для удовлетворения требований о взыскании убытков необходима доказанность всей совокупности указанных фактов. Недоказанность одного из необходимых оснований возмещения убытков исключает возможность удовлетворения требований.

Последствием неправомерных действий ответчика должно быть уменьшение имущества истца, что требует возмещения таких потерь (реальный ущерб) за счет виновной стороны - ответчика. 

Истец, считает, что в связи с расторжением  контракта им  понесены затраты на приобретение материалов для выполнения работ по объекту на общую сумму 59 632 руб., что подтверждается   счет-фактурой №УТ-3715  от 10.11.2021г.,  а также платежным поручением № 175 от 02.11.2021г. об оплате материалов.

Согласно пункту 4.2. контракта стоимость материала входит в цену контракта.

Между тем, из материалов дела не следует, что товар на общую сумму 59 632 руб., указанный в счет-фактуре  №УТ-3715  от 10.11.2021г., приобретен в целях использования  при выполнении работ, предусмотренных контрактом.

Работы по контракту истцом не выполнялись, и, следовательно материалы, приобретенные истцом, остались неиспользованными,   находится во владении самого истца, то есть, является его собственностью. 

Таким образом, несмотря на то, что неиспользованные по расторгнутому муниципальному контракту материал оплачены истцом, сам по себе реальный ущерб у истца отсутствует, поскольку уменьшение имущества у истца в результате неправомерных действий ответчика не произошло. Доказательства того, что указаний  товар не может быть реализован, потерял свои потребительские свойства полностью или частично в материалы дела не представлены (ст. 65 АПК РФ). 

При рассмотрении настоящего дела истец в любом случае обязан был доказать, что не только понес расходы на приобретение товара, но также и доказать, что при наличии в его собственности приобретенного для исполнения контракта товара у него возникли реальные потери, которые необходимо возместить. 

             В связи с вышеизложенным  ущерб  в сумме  59 632 руб. не  подлежит возмещению за счет ответчика. 

Истец также включил в сумму убытков расходы по оплате комиссии за выдачу банковской гарантии в сумме 3400 руб.

Из материалов дела следует, что, между истцом и публичным акционерным обществом "Совкомбанк" (гарант) заключен договор от 19.05.2021 №1939312 о предоставлении Обществу (принципал) банковской гарантии в целях обеспечения надлежащего исполнения принципалом своих обязательств перед Ответчиком по спорному контракту.

Платежным поручением от 19.05.2021 №67 Общество перечислило комиссию за выдачу банковской гарантии в сумме 3400 рублей. 

   Суд, считает, что расходы по выплате комиссии за выдачу банковской гарантии  не подлежат возмещению за счет заказчика, поскольку в действиях ответчика  не усматривается противоправных действий (бездействий), в результате которых контракт не был исполнен и расторгнут.

Неисполнение  контракта от 01.06.2021 №155А и его расторжение явилось следствием действий самого истца

Поскольку, вина заказчика в возникновении убытков у подрядчика отсутствует, то оснований для применения ответственности к заказчику в виде взыскания убытков отсутствуют.

При таких обстоятельствах, исковые требования не подлежат удовлетворению.

Расходы по оплате госпошлины относятся на истца. 

 Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

В иске отказать.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение вступает в законную силу со дня принятия  постановления арбитражного суда апелляционной инстанции. 

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия, через Арбитражный суд Астраханской области.

Информация о движении дела может быть получена на официальном интернет – сайте Арбитражного суда Астраханской области: http://astrahan.arbitr.ru

Судья

С.В. Богатыренко