Арбитражный суд Краснодарского края Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А32-16140/2022

г. Краснодар

20 февраля 2023г.

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Чурикова В.С., при  ведении протокола судебного заседания помощником судьи Новошитской К.А.,  рассматривая в судебном заседании дело по исковому заявлению НКО «Фонд  капитального ремонта МКД » г. Краснодар (ОГРН: 1132300005650, Дата присвоения  ОГРН: 05.12.2013, ИНН: 2311981102) к ООО «Эрбауэр» г. Краснодар (ОГРН:  1072308003624, Дата присвоения ОГРН: 06.04.2007, ИНН: 2308129459) об устранении  недостатков работ, выполненных по договору строительного подряда,  

Руководствуясь ст. ст. 41, 110, 167-170, 176 АПК РФ, суд 

решил:

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Эрбауэр» (ОГРН  1072308003624, ИНН 2308129459) в срок 30 рабочих дней с даты вступления решения в  законную силу за свой счет устранить недостатки работ:  

- по договору от 21.11.2016 № 082ПД/16-КП90 на выполнение работ по  капитальному ремонту общего имущества собственников помещений многоквартирного  дома № 100, расположенного по ул. Гоголя, 100 в г. Кропоткин Краснодарского края -  увеличить ширину картины лотка настенного желоба до 0,7 м., в целях чего произвести  демонтаж покрытий кровель из листовой стали и мелких покрытий и обделок из листовой  стали (поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов); осуществить монтаж обрешетки  сплошной из досок, шириной 0,4 м, мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы) из  листовой оцинкованной стали (устройство настила из оцинкованной кровельной стали  шириной 0,4 м.; монтаж кровли из металлочерепицы по готовым прогонам (простая  кровля); монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля (монтаж снегозадержателей);  осуществить ограждение кровель перилами.  

- по договору от 21.11.2016 № 083ПД/16-КП90 на выполнение работ по  капитальному ремонту общего имущества собственников помещений многоквартирного  дома № 59, расположенного по ул. Красной, в г. Кропоткин Краснодарского края, а  именно: провести замену двух водосточных воронок с использованием цементной стяжки  общей площадью 2 кв.м.; герметизацию кровельного ковра в водоприемных воронках над  подъездами 8 и 12; устранить отслоение примыканий парапета по периметру  многоквартирного дома, путем ремонта рулонного покрытия с промазкой битумными  составами общей квадратурой 30 кв.м.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Эрбауэр» (ОГРН  1072308003624, ИНН 2308129459) в пользу некоммерческой унитарной организации  «Краснодарский краевой фонд капитального ремонта многоквартирных домов» (ИНН  2311981102, ОГРН 1132300005650) размер уплаченной государственной пошлины в  сумме 6 000 руб.  

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного  срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи  апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в  законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной  инстанции.  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятнадцатый  арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения, а также в  кассационном порядке в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух  месяцев с даты вступления решения по делу в законную силу через суд, вынесший  решение.  

 Судья В.С. Чуриков