Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-80630/2018

28 ноября 2018 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена  22 ноября 2018 года.

Полный текст решения изготовлен  28 ноября 2018 года.

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Сергеева О.Н.,

 

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН-СТРОЙ" (адрес:  Россия 191028, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 

<

...>/А/285 ОФИС (308.1), ОГРН:  

<

***>);

ответчик: общество с ограниченной ответственностью "РУСГЛОБАЛ" (адрес:  Россия 191119, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 

<

...>/А/507, ОГРН:  

<

***>);

о взыскании 2 781 449 руб. 05 коп.

 

при участии

-от истца: ФИО2, по доверенности от 22.06.18, 

-от ответчика: не явился, о времени и месте извещен надлежащим образом, 

 

установил:

ООО "РЕГИОН-СТРОЙ" предъявило иск о взыскании с ООО "РУСГЛОБАЛ" 2 781 449 руб. 05 коп. стоимости устранения недостатков в работах, выполненных ответчиком по договору №50/Вр/РС/17 от 15.09.17.

Ответчик отзыв не представил, извещен надлежащим образом. Дело рассматривается без участия ответчика на основании ст.156 АПК РФ.

Судом установлено:

Между сторонами был заключен договор №50/Вр/РС/17 от 15.09.17.

Между ООО «Регион-Строй – Подрядчик ООО «РУСГЛОБАЛ» – Субподрядчик был заключен Договор №50/Вр/РС/17 от 15.09.2017 на выполнение работ по внутренней отделке помещений (далее - Работы) на объекте «Реконструкция амбулатории на 250 посещений в смену дер. Вартемяги (с использованием конструкций объекта незавершенного строительства) по адресу: 

<

...> (далее - Объект) (Далее «Договор»).

25.04.2018 г. в ходе комиссионной проверки с участием представителя Субподрядчика выявлены недоставки в выполненных работах, в том числе: не завершение работ по отделке стен (улучшенная штукатурка, финишное выравнивание, покраска, облицовка, монтаж акустических панелей и др.); не завершение отделочных работ по устройству полов (укладка керамогранита, финишное выравнивание пола, укладка линолеума, устройство плинтуса и др.); не завершение работ по устройству потолков (выравнивание, покраска, устройство огнезащитного полотка, монтаж плит и др.).

Исх. № 108 от 27.04.2018 г. Субподрядчику направлена Претензия с вызовом на объект в соответствии с п. 6.4 Договора  -  для составления акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения (Опись и чек ФГУП «Почта России» от 28.04.2018).

В связи с неприбытием Субподрядчика на Объект для составления акта в порядке п. 6.4 Договора, Подрядчик составил в одностороннем порядке и направил Субподрядчику Акт от 04.05.2018 о недостатках в выполненных работах по Договору и направил Субподрядчику (Опись и чек ФГУП «Почта России» от 15.05.2018).

Срок устранения недостатков по акту определен до 21 мая 2018 года.

В связи с отсутствием со стороны Субподрядчика ответов на направленные Претензию № 108 от 27.04.2017, а также отсутствием возражений на составленный в одностороннем порядке Акт  от 27.04.2017, не преступлением к работам по устранению недостатков вплоть до 22.05.2018, Подрядчик  определил стоимость работ по устранению недостатков согласно Акту от 04.05.2018 в размере 2 781 449,05 (Два миллиона семьсот восемьдесят одна тысяча четыреста сорок девять) рублей 05 коп.

  В соответствии с п 6.8. Договора, если Субподрядчик по требованию Подрядчика не приступает к устранению обнаруженных недостатков в сроки, установленные Подрядчиком, то Подрядчик имеет право устранить эти недостатки за счет Субподрядчика без потери своих прав по гарантиям, в том числе путем привлечения третьих лиц. 

ООО «Регион-Строй» для устранения недостатков в выполненных Ответчиком работах оформило договор субподряда № 09/Вр/РС/18 от 24.04.2018 с ООО «Веста». 

На 20.06.2018 в ООО «Веста» оплачено 2 516 602 (Два миллиона пятьсот шестнадцать тысяч шестьсот два) рубля 00 коп.

Исх. № 133 от 27.05.2018  Подрядчик, используя свое право требовать соразмерного уменьшения стоимости работ по договору, направил Субподрядчику  Претензию с требованием  в срок до 18 июня 2018 года перечислить сумму в размере 2 781 449,05 (Два миллиона семьсот восемьдесят одна тысяча четыреста сорок девять) рублей 05 коп.  на  расчётные реквизиты               ООО «Регион-Строй» (Опись и чек ФГУП «Почта России» от 05.06.2018).

  На 20 июня 2018 г. денежные средства от Субподрядчика не расчетные реквизиты              ООО «Регион-Строй» не поступили.

Учитывая изложенное, иск подлежит удовлетворению с отнесением расходов по государственной пошлине на ответчика.

Руководствуясь статьями 309, 310, 723 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 110, 156, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  

 

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "РУСГЛОБАЛ" в пользу общества с ограниченной ответственностью "РЕГИОН-СТРОЙ" 2 781 449 руб. 05 коп. стоимости устранения недостатков и 36 907 руб. 00 коп. расходов по государственной пошлине.

Выдать исполнительный лист в порядке статьи 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

 

Судья                                                                            Сергеева О.Н.