Арбитражный суд Пензенской области  

Кирова ул., д. 35/39, Пенза г., 440000,  тел.: +78412-52-99-80, факс: 52-70-41, http://www.penza.arbitr..ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

по делу, рассмотренному в порядке упрощённого производства 

г. Пенза Дело № А49-6136/2023  

« 11 » августа 2023г. 

Арбитражный суд Пензенской области в составе судьи Лавровой И.А.,  рассмотрел в порядке упрощённого производства без вызова сторон дело по  иску Акционерного общества "Федеральный научно-производственный центр  "Производственное объединение "Старт" имени М.В. Проценко", ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>  

к Обществу с ограниченной ответственностью "Стройпроект", ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>  

о взыскании неустойки в сумме 190 002 руб. 37 коп. за нарушение срока  поставки товара по договору на поставку оборудования № 19986/155-23/27 от  31 октября 2022 года (за период с 10 января 2023 года по 10 апреля 2023 года).  

 Иск предъявлен в Арбитражный суд Пензенской области в соответствии с  пунктом 16.2 договора (договорная подсудность).  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 228-229 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, статьями 307, 309, 330  Гражданского кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л :

Ходатайство Общества с ограниченной ответственностью "Стройпроект" о  снижении размера санкций в соответствии со статьёй 333 Гражданского  кодекса Российской Федерации оставить без удовлетворения.  

Исковые требования удовлетворить частично, расходы по госпошлине  отнести на истца и на ответчика пропорционально размеру удовлетворенных  требований.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Стройпроект"  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Акционерного общества  "Федеральный научно-производственный центр "Производственное  объединение "Старт" имени М.В. Проценко" (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) неустойку в сумме 175386 руб. 80 коп. за период с 10 января 2023  года по 03 апреля 2023 года, а также расходы по государственной пошлине в  сумме 6184 руб. 62 коп.  

 В удовлетворении остальной части иска отказать. 

Решение подлежит немедленному исполнению. 

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Одиннадцатый  арбитражный апелляционный суд в течение пятнадцати дней со дня принятия  резолютивной части решения, а в случае составления мотивированного  решения по заявлению стороны - со дня принятия решения в полном объёме.  

Судья И.А. Лаврова 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 13.10.2022 3:28:00

Кому выдана Лаврова Ирина Александровна