Арбитражный суд Республики Карелия

ул. Красноармейская, 24 а, г. Петрозаводск, 185910, тел./факс: (814-2) 790-590 / 790-625

официальный сайт в сети Интернет: http://karelia.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

 

РЕШЕНИЕ

Дело №

А26-5207/2024

г. Петрозаводск

25 ноября 2024 года

Резолютивная часть решения объявлена  12 ноября 2024 года. Полный текст решения изготовлен   25 ноября 2024 года.

Арбитражный суд Республики Карелия в составе судьи Колесовой Н.С.,   при ведении протокола судебного заседания секретарем Рыбалкиной Т.В., рассмотрев в судебном заседании без участия представителей сторон материалы дела по иску казенного учреждения Республики Карелия «Управление автомобильных дорог Республики Карелия» к обществу с ограниченной ответственностью «Геолайн» о взыскании 924 074 руб. 67 коп.,

установил:

казенное учреждение Республики Карелия «Управление автомобильных дорог Республики Карелия» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Республики Карелия с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Геолайн»  (далее – ответчик) о взыскании 924 074 руб. 67 коп.. пени за просрочку сдачи работ по государственному контракту от 27.12.2021 г. № 32с-ПИР/21 в размере 924 074 рублей 67 коп.

Отзыв по существу требований ответчиком не представлен.

Стороны, надлежащим образом уведомленные о времени и месте судебного заседания, явку представителей не обеспечили.

Судебное заседание проведено в порядке, предусмотренном частью  3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, без участия представителей сторон.

Изучив представленные доказательства, суд установил следующие обстоятельства.

27.12.2021 между казенным учреждением Республики Карелия «Управление автомобильных дорог Республики Карелия» (далее - КУ РК «Управтодор РК») и обществом с ограниченной ответственностью «Геолайн» был заключен государственный контракт № 32с-ПИР/21 (далее - Контракт) на разработку документации по планировке территории, выполнение инженерных изысканий и подготовку проектной документации объекта «Реконструкция участка автомобильной дороги Оппола-Рускеала, км 58 - км 68».

В соответствии с п. 1.1. Контракта - Подрядчик принимает на себя обязательства в соответствии с Заданием Заказчика № 73-21 на разработку документации по планировке территории, выполнение инженерных изысканий и подготовку проектной документации объекта «Реконструкция автомобильной дороги, обеспечивающей подъезд к АО «Кондопожский ЦБК» (далее-Задание) (Приложение №1 к Контракту) и в сроки, установленные Контрактом, разработать документацию по планировке территории, выполнить инженерные изыскания и осуществить подготовку проектной документации (далее - Документация) в целях реконструкции объекта капитального строительства «Реконструкция автомобильной дороги, обеспечивающей подъезд к АО «Кондопожский ЦБК» (далее - объект), а Заказчик берет на себя обязательства принять выполненные работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Контракта.

В соответствии с п. 3.1. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, включает в себя прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Контракту, и составляет: 6 800 000  рублей 00 копеек, НДС не облагается.

В цену Контракта включены все затраты Подрядчика, связанные с выполнением условий Контракта, в т.ч. связанные с получением в соответствующих организациях документов, согласований, заключений, материалов, арендой специальных средств и прочее, за исключением проведения государственной экспертизы.

Контракт вступает в силу с момента (даты) его подписания обеими Сторонами и действует до 30 декабря 2022 года или до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Согласно п. 4.3. дата окончания работ, в том числе даты окончания отдельных этапов работ, определенные в Графике выполнения работ (Приложение № 2 к Контракту), являются исходными для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.

Согласно п. 2.1.1. Контракта - Подрядчик обязан выполнить работы в полном объеме и в сроки, предусмотренные требованиями настоящего Контракта и приложениями к нему, и сдать результат работ Заказчику в соответствии с разделом 5 Контракта.

Разделом 5 Контракта установлен порядок контроля, сдачи и приемки работ с учетом дополнительного соглашения № 1 от 15.12.2022.

Исходя из изложенного, следует, что Подрядчик должен был передать результат работ Заказчику по этапу 2 до 29.12.2022 года включительно. Однако, Ответчик не исполнил взятые на себя обязательства по государственному контракту. Работы по Контракту были сданы заказчику только 28.12.2023, о чем свидетельствует акт о приемке выполненных работ от 28.12.2023.

Согласно п. 7.1 Контракта Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту в соответствии с действующим законодательством РФ.

Пунктом 7.2 Контракта предусмотрено, что в случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения    или    ненадлежащего     исполнения    Подрядчиком     обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объёму обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком (п. 7.3 Контракта).

В соответствии с абз. «А» п. 7.23. Контракта - за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Подрядчик уплачивает штраф в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042.

Так, за нарушения условий Контракта, Подрядчику были начислены пени, согласно  Претензии № 233 от 30.01.2024 года в сумме 924 074 руб. 67 коп. за нарушение сроков сдачи работ по этапу 2 Контракта за общий период просрочки с 30.12.2022  по 28.12.2023года (364 дня) в размере 924 074 рублей 67 коп. Ключевая ставка банка РФ на 30.01.2024 года составляла 16 %.

В связи с чем, Истец обратился к Ответчику с претензией о выплате пени за 364 дня просрочки исполнения обязательств по Контракту. Однако данные требования Ответчик не исполнил.

В соответствии со статьями 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с их условиями и требованиями закона; односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно статье 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работ по согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Согласно части 3.1 статьи 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

В соответствии с частью 2 статьи 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Ответчик требование истца не оспорил.

При таких обстоятельствах иск подлежит удовлетворению в полном объеме.

Расходы по государственной пошлине в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Карелия

РЕШИЛ:

1.            Иск удовлетворить. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Геолайн" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу казенного учреждения Республики Карелия "Управление автомобильных дорог Республики Карелия" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) 924 074 руб. 67 коп. пени за просрочку сдачи работ по государственному контракту от 27.12.2021 №32с-ПИР/21, 21 481 руб. расходов по оплате государственной пошлины.

2.            Решение может быть обжаловано:

- в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня изготовления полного текста решения в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд (191015, 

<

...>);

- в кассационном порядке в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу – в Арбитражный суд Северо-Западного округа (190000, 

<

...>) при условии, что данное решение было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются в арбитражный суд апелляционной и кассационной инстанций через Арбитражный суд Республики Карелия.

Судья

Колесова Н.С.