14_22898821 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 (в порядке ст. 176 АПК РФ) 

Именем Российской Федерации

Дело № А40-78038/19-14-610

г. Москва

26 июля 2019 года

Арбитражный суд города Москвы в составе  

председательствующего - судьи Лихачевой О.В. Судьей единолично 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  ФИО1, с использованием средств аудиозаписи  

рассмотрев дело по иску ООО ЮнионСтрой к ответчику АО "НПО ИТ" (ОГРН 

<

***>) 

о внесении изменения в пункты 6.2 и 18.1 Контракта № 044800000291000017/У1/13-18  от 24.08.2018 г.  

при участии представителей от истца – ФИО2, по доверенности от 26.03.2019 

от ответчика – ФИО3, по доверенности от 15.01.2019  

РЕШИЛ:

Внести изменения в пункты 6.2 и 18.1 Контракта № 044800000291000017/У1/13- 18 от 24.08.2018г., изложив их в следующей редакции:  

- «6.2. Начальный срок выполнения работ – дата подписания Акта приемки  строительной площадки от Заказчика. Срок завершения работ всех этапов по Контракту  – не позднее 30.09.2019г., а в частности обязательств по вводу объекта в эксплуатацию  не позднее 30.10..2019г.».  

- «18.1. Контракт вступает в силу со дня подписания его стороной и действует до  01.11.2019года, а в частности взаиморасчётов – до полного их исполнения Сторонами».  

Взыскать с АО "НПО ИТ" (ОГРН 

<

***>) в пользу ООО ЮнионСтрой  6 000руб. – государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано лицами, участвующими в деле, в Девятый  арбитражный апелляционный суд в месячный срок с даты его принятия (изготовления в  полном объёме).  

Судья: О.В. Лихачева