АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

17 июля 2019 года

Дело № А33-15542/2018

Красноярск

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 10 июля 2019 года.

В полном объёме решение изготовлено 17 июля 2019 года.

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Куликовской Е.А., рассмотрев в судебном заседании с использованием системы видеоконференц-связи при содействии Десятого Арбитражного апелляционного суда,

дело по иску открытого акционерного общества "НПО "Промавтоматика" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Москва)

к обществу с ограниченной ответственностью "РН-Ванкор" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Красноярск)

о взыскании задолженности,

в присутствии представителей:

от истца (АО "НПО "Промавтоматика") (в Десятом Арбитражном апелляционном суде): ФИО1, по доверенности от 19.06.2018,

от ответчика (ООО "РН-Ванкор") (в Арбитражном суде Красноярского края): ФИО2, по доверенности №31 от 01.01.2018,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Коленько Н.В., 

установил:

открытое акционерное общество "НПО "Промавтоматика" (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью "РН-Ванкор"  (далее – ответчик) о взыскании 30 810 820,66 руб. стоимости материалов и оборудования. 

Исковое заявление принято к производству суда. Определением от 29.06.2018 возбуждено производство по делу.

08 июля 2019 года от истца в материалы дела поступили письменные объяснения в порядке статьи 81 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с приложением дополнительных документов.

08 июля 2019 года от истца в материалы дела поступило сопроводительное письмо о приобщении к материалам дела проекта мотивированного судебного акта по результатам рассмотрения дела № А33-15542/2018.

Представитель истца в судебном заседании исковые требования поддержал в полном объеме; по заявленному ответчиком в прошлом судебном заседании ходатайству о приобщении к материалам дела дополнительных документов (Акт приема-передачи инвентаризационных ведомостей от 06.06.2014; ответ на адвокатский запрос АК ООО «Флагман-Аудит» от 14.05.2019 с исх. № 042.19-И; письмо ООО «ГазкомплектАвтоматика» от 02.10.2014 № ГКА-777 о проведении инвентаризации МТР) возразил.

Суд, руководствуясь статьей 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, приобщил к материалам дела представленные ответчиком документы (Акт приема-передачи инвентаризационных ведомостей от 06.06.2014; ответ на адвокатский запрос АК ООО «Флагман-Аудит» от 14.05.2019 с исх. № 042.19-И; письмо ООО «ГазкомплектАвтоматика» от 02.10.2014 № ГКА-777 о проведении инвентаризации МТР).

Представитель ответчика в судебном заседании исковые требования не признал; по ходатайству о приобщении к материалам дела проекта решения возразил, по вопросу приобщения к материалам дела письменных пояснений с приложением дополнительных документов не возразил.

Ходатайство истца о приобщении к материалам дела письменных объяснения в порядке статьи 81 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с приложением дополнительных документов и сопроводительного письма с приложением проекта мотивированного судебного акта судом удовлетворено в порядке статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства.

Как следует из материалов дела, между ОАО «НПО «Промавтоматика» (Подрядчик) и ЗАО «Ванкорнефть» (Заказчик) заключены однотипные договоры подряда на обустройство объектов Ванкорского месторождения:

№ п/п

Договор подряда 

Объект

№

дата

1

1710212/0865Д 

20.04.12

Система автоматизации, связи, 3ей очереди на объекте «Газокомпрессорная станция высокого давления ЦПС».

2

1710211/0206Д

16.02.11

Системы автоматизации и связи на объекте технологической зоны L центрального пункта сбора нефти.

3

1710212/0114Д

16.02.12

Комплексная система безопасности магистрального нефтепровода на объекте «Магистральный нефтепровод НПС-1, НПС-2, КНПС».

4

1710212/0418Д

27.02.12

Системы комплексной автоматизации и комплекса технических средств охраны на объекте: «Газопровод Ванкор-Хальмерпаютинское от ЦПС Ванкорского месторождения ОАО «НК «Роснефть» до межпромыслового газопровода ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь».

5

1710212/0092Д

08.02.2012

Системы связи на объекте: «Газопровод Ванкор-Хальмерпаютинское от ЦПС Ванкорского месторождения ОАО «НК «Роснефть» до межпромыслового газопровода ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь».

28.12.2015 единственным акционером АО «Ванкорнефть» принято решение о реорганизации АО «Ванкорнефть» в форме выделения из него общества с ограниченной ответственностью «РН-Ванкор» (сокращенное наименование: ООО «РН-Ванкор», адрес места нахождения: РФ, г. Красноярск, Советский район, ул. 78-й Добровольческой бригады, д.15). В связи с чем, вновь образованное общество получило права и обязанности по указанным договорам подряда с ОАО «НПО «Промавтоматика».

Конкретный перечень и объем поручаемых работ согласован сторонами в Приложениях №2 к договорам подряда.

В соответствии с пунктом 2.1. договора подряда №1710212/0865Д от 20.04.2012 подрядчик принимает на себя обязанность по заданию заказчика выполнить работы по созданию систем автоматизации и связи 3-ей очереди на объекте "Газокомпрессорная станция высокого давления ЦПС" на Ванкорском месторождении, указанные в Приложении № 2, в соответствии с Договором, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

В соответствии с пунктом 2.1. договора подряда № 1710211/0206Д от 16.02.2011 подрядчик принимает на себя обязанность по заданию заказчика выполнить работы по созданию систем автоматизации и связи, указанных в Приложении №2, а именно:

- системы автоматизированного управления технологическим процессом (АСУТП);

- системы пожарной сигнализации (ПС);

- системы связи (СС),

на объекте технологической зоны L центрального пункта сбора нефти Ванкорского месторождения, далее по Договору (зона L ЦПС), а также выполнить иные строительные работы в соответствии с Договором, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

В соответствии с пунктом 2.1. договора подряда №1710212/0114Д от 16.02.2012 подрядчик принимает на себя обязанность по заданию заказчика выполнить работы по созданию комплексной системы безопасности магистрального нефтепровода на объекте «НПС-1, НПС-2, КНПС», указанные в Приложении № 2, в соответствии с Договором, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

В соответствии с пунктом 2.1. договора подряда №1710212/0418Д подрядчик принимает на себя обязанность по заданию заказчика выполнить строительно-монтажные и пусконаладочные работы системы комплексной автоматизации и комплекса технических средств охраны объекта «Газопровод Ванкор-Хальмерпаютинское от ЦПС Ванкорского месторождения ОАО «НК «Роснефть» до межпромыслового газопровода ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», указанные в Приложении № 2, в соответствии с Договором, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

В соответствии с пунктом 2.1. договора подряда №1710212/0092Д от 08.02.2012 подрядчик принимает на себя обязанность по заданию заказчика выполнить работы по созданию систем связи на объекте «Газопровод Ванкор-Хальмерпаютинское от ЦПС Ванкорского месторождения ОАО «НК «Роснефть» до  межпромыслового  газопровода ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», указанные в Приложении № 2, а «Заказчик» обязуется принять результат работ и оплатить его.

В соответствии с пунктом 2.2 договоров подряда подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в пункте 2.1. договоров подряда, собственными силами и силами привлеченных субподрядных организаций в соответствии с заданием, утвержденной проектно-сметной и рабочей документацией, строительными нормами и правилами (СНиП) и ведомственными строительными нормами (ВСН) и сдать результат работ заказчику.

Разделом 3 договоров подряда определена стоимость работ с учетом стоимости материалов, приобретаемых подрядчиком самостоятельно у поставщиков, с учетом стоимости материалов, приобретаемых подрядчиком у заказчика по договорам купли-продажи. 

В соответствии с пунктом 3.1.1. договора подряда №1710212/0865Д от 20.04.2012 стоимость работ, выполняемых по настоящему Договору, определяется Протоколом соглашения о договорной цене (Приложение №1) и составляет 663 165 528,14 руб., в том числе НДС (18%) в размере 101 160 843,28 руб., в  том числе:

3.1.1 стоимость строительно-монтажных работ (с учетом стоимости материалов, приобретаемых «Подрядчиком» самостоятельно у поставщиков), которая ориентировочно составляет 656 556 571,03 руб., в том числе НДС (18%) в размере 100 152 697,28 руб.

3.1.2 стоимость материалов, приобретаемых «Подрядчиком» у «Заказчика» по договорам купли-продажи, которая ориентировочно составляет6 608 957,11 руб., в том числе НДС (18%) в размере 1 008 146,00 руб.

Стоимость материалов, приобретаемых «Подрядчиком» у «Заказчика»   по договорам купли-продажи, подлежит уточнению в соответствии с п. 9.5. Договора.

В соответствии с пунктом 3.1. договора № 1710211/0206Д от 16.02.2011 стоимость работ, выполняемых по договору подряда № 1710211/0206Д от 16.02.2011, определяется Протоколом соглашения о договорной цене (Приложение № 2) и составляет 73 273 719,59 руб., в том числе НДС 11 177 347,06 руб., в том числе:

3.1.1. стоимость строительно-монтажных работ (с учетом стоимости материалов, приобретаемых Подрядчиком самостоятельно у поставщиков), которая ориентировочно составляет 69 997 416,97 руб., в том числе НДС 10 677 572,08 руб. 

3.1.2. стоимость материалов, приобретаемых подрядчиком у заказчика по договорам купли-продажи, которая ориентировочно составляет 3 276 302,62 руб., в том числе НДС в сумме 499 774,98 руб. 

Стоимость материалов, приобретаемых подрядчиком у заказчика по договорам купли-продажи, подлежит уточнению в соответствии с пунктом 9.5. договора. 

В соответствии с пунктом 3.1 договора подряда №1710212/0114Д от 16.02.2012 стоимость строительно-монтажных работ (с учетом стоимости материалов, приобретаемых подрядчиком самостоятельно у поставщиков), выполняемых по настоящему договору, определяется Протоколом соглашения о договорной цене (Приложение № 1) и составляет 658 976 321,09 руб., в том числе НДС (18%) в сумме 100 521811,69 руб.

В соответствии с пунктом 3.1. договора подряда №1710212/0418Д стоимость работ, выполняемых по настоящему Договору, определяется Протоколом соглашения о договорной цене (Приложение № 1) и составляет 187 385 837,50 руб., в том числе НДС (18%) в сумме 

28 584 280,30 руб., в том числе:

3.1.1. стоимость строительно-монтажных работ (с учетом стоимости материалов, приобретаемых «Подрядчиком» самостоятельно у поставщиков), которая ориентировочно составляет 186 906 552,99 руб., в т.ч. НДС в сумме 28 511169,10 руб. 

3.1.2 стоимость материалов, приобретаемых «Подрядчиком» у «Заказчика» по договорам   купли-продажи, которая ориентировочно составляет 479 284,51 руб., в том числе НДС в сумме 73 111,20 руб.

Стоимость материалов, приобретаемых «Подрядчиком» у «Заказчика»   по договорам купли-продажи, подлежит уточнению в соответствии с п. 9.5. Договора.

В соответствии с пунктом 3.1. договора  подряда №1710212/0092Д от 08.02.2012 стоимость работ, выполняемых по настоящему договору, определяется Протоколом соглашения о договорной цене (Приложение №1) и составляет 476 632 897,35 руб., в том числе НДС (18%) в сумме 72 706 713,15 руб., в том числе:

3.1.1. стоимость строительно-монтажных работ (с учетом стоимости материалов, приобретаемых «Подрядчиком» самостоятельно у поставщиков), которая ориентировочно составляет 443 422 687,31 руб., в том числе НДС (18%) в сумме 67 640 748,91 руб.

3.1.2 стоимость материалов, приобретаемых «Подрядчиком» у «Заказчика» по договорам купли-продажи, которая ориентировочно составляет 33 210 210,04 руб., в том числе НДС (18%) в сумме 5 065 964,24 руб.

Стоимость материалов, приобретаемых «Подрядчиком» у «Заказчика»   по договорам купли-продажи, подлежит уточнению в соответствии с п. 9.5. Договора.

Пунктом 3.3 договоров подряда предусмотрено, что расчет стоимости работ представляется с обязательным приложением Разделительной ведомости поставки товарно-материальных ценностей между заказчиком и подрядчиком (Приложение №3).

Согласно пункту 3.4. договоров подряда стоимость Договора является ориентировочной и может быть изменена в следующих случаях: в соответствии с корректировками проектно-сметной документации; на основании изменений, внесенных в задание; в части стоимости материалов, приобретаемых подрядчиком у заказчика по договорам купли-продажи, в части разницы в стоимости электроэнергии, в случае ее увеличения энергоснабжающей организацией, а также в иных случаях, когда возникает необходимость в проведении дополнительных работ.

В соответствии с пунктом 4.1. договора подряда №1710212/0865Д от 20.04.2012 календарные сроки выполнения работ по строительству объекта по настоящему Договору:  начало работ  01.05.2012, окончание работ 31.03.2013, общая продолжительность строительства составляет 335 дней. Сроки начала и окончания отдельных этапов работ определяются поэтапным Графиком производства строительно-монтажных работ по законченным этапам (Приложение №4) и Детализированным графиком производства работ по законченным этапам (порядок формирования излагается в п. 5.1.32).

Календарные сроки выполнения работ по строительству объекта по договору № 1710211/0206Д от 16.02.2011: начало работ 10.03.2011, окончание работ 25.07.2011. Общая продолжительность строительства составляет 137 дней. Сроки начала и окончания отдельных этапов работ определяются поэтапным Графиком производства строительно-монтажных работ по законченным этапам (Приложение №4) и Детализированным графиком производства работ по законченным этапам (порядок формирования излагается в п. 5.1.32) (пункт 4.1. договора).

Согласно пункту 4.1. договора подряда №1710212/0114Д от 16.02.2012 календарные сроки выполнения работ по строительству Объекта по настоящему договору: начало работ 01.04.2012, окончание работ 30.11.2012. Общая продолжительность строительства составляет 244 дня. Сроки начала и окончания отдельных этапов работ определяются поэтапным Графиком производства строительно-монтажных работ по законченным этапам (Приложение №4) и Детализированным графиком производства работ по законченным этапам (порядок формирования излагается в п. 5.1.32).

В соответствии с пунктом 4.1. договора подряда №1710212/0418Д календарные сроки выполнения работ по строительству Объекта по настоящему Договору: начало работ    01.03.2012, окончание работ 30.11.2012. Общая продолжительность строительства составляет 275 дней. Сроки начала и окончания отдельных этапов работ определяются поэтапным Графиком производства строительно-монтажных работ по законченным этапам (Приложение №4) и Детализированным графиком производства работ по законченным этапам (порядок формирования излагается в п. 5.1.32).

Пунктом 4.1. договора подряда №1710212/0092Д от 08.02.2012, установлено, что календарные сроки выполнения работ по строительству объекта по настоящему Договору:     начало работ 01.03.2012, окончание работ 30.11.2012. Общая продолжительность строительства составляет   275 дней. Сроки начала и окончания отдельных этапов работ определяются поэтапным Графиком производства строительно-монтажных работ по законченным этапам (Приложение №4) и Детализированным графиком производства работ по законченным этапам (порядок формирования излагается в п. 5.1.32).

Пунктом 5.1.4 договоров подряда установлена обязанность подрядчика закупить и доставить на Объект материалы и оборудование, приобретаемые подрядчиком самостоятельно у поставщиков, в соответствии с разделительной ведомостью (Приложение №3).

В соответствии с пунктом 5.1.32 договора подряда №1710212/0865Д от 20.04.2012 в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Договора разработать и представить на утверждение «Заказчику» Детализированный график производства работ по настоящему Договору, включая изготовление и поставку оборудования, пуско-наладочные работы, работы по доставке материалов, прочие затраты по законченным этапам, с указанием стоимости каждого этапа. «Заказчик» в 10-дневный срок согласует Детализированный график производства работ по этапам или направляет мотивированный отказ.

Пунктом 5.1.32.1. договора подряда №1710212/0865Д от 20.04.2012 предусмотрено, что  в течение 15 рабочих дней от даты подписания Договора «Подрядчик» представляет на согласование «Заказчику» Детализированную разделительную ведомость. Представленная Детализированная разделительная ведомость заменяет Приложение №3 к Договору с момента её согласования и подписания обеими сторонами. В случае невыполнения «Подрядчиком» условия о предоставлении Детализированной разделительной ведомости в указанный срок, или в случае несогласования сторонами Детализированной разделительной   ведомости, материалы   и  оборудование, не указанные в Приложении№3, приобретаются Подрядчиком самостоятельно у поставщиков.

5.1.33. Разрабатывать и предоставлять «Заказчику» до 25 числа каждого месяца ежемесячные планы-задания (наборы работ) с указанием численности персонала и единиц техники на выполнение работ в соответствии с Графиком производства строительно-монтажных работ по законченным этапам (Приложение №4), учитывающие текущее состояние работ на объекте (с учетом восполнения отставаний, если требуется). Планы-задания включают все виды работ, планируемых к выполнению в данный период. В плане-задании должны указываться физические объемы по каждой работе, а также объемы и сроки поставки в будущем месяце материалов и оборудования в соответствии с Разделительной ведомостью (Приложение №3).

В соответствии с пунктом 5.1.32. договора № 1710211/0206Д от 16.02.2011 подрядчик обязан в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания договора разработать и представить на утверждение заказчику Детализированный график производства работ по настоящему договору, включая изготовление и поставку оборудования, пуско-наладочные работы, работы по доставке материалов, прочие затраты по законченным этапам, с указанием стоимости каждого этапа. Заказчик в 10-дневный срок согласует Детализированный график производства работ по этапам или направляет мотивированный отказ.

Пунктом 5.1.33.1. договора № 1710211/0206Д от 16.02.2011 установлено, что в течение 15 рабочих дней от даты подписания договора подрядчик представляет на согласование заказчику Детализированную разделительную ведомость. Представленная Детализированная разделительная ведомость заменяет Приложение №3 к Договору с момента её согласования и подписания обеими сторонами. В случае невыполнения подрядчиком условия о предоставлении Детализированной разделительной ведомости в указанный срок, или в случае несогласования сторонами Детализированной разделительной ведомости, материалы и оборудование, не указанные в Приложении №3, считаются поставкой подрядчика.

Согласно пункту 5.1.33. договора № 1710211/0206Д от 16.02.2011 подрядчик обязан разрабатывать и предоставлять заказчику до 25 числа каждого месяца ежемесячные планы-задания (наборы работ) с указанием численности персонала и единиц техники на выполнение работ в соответствии с Графиком производства строительно-монтажных  работ  по  законченным  этапам  (Приложение  №4),  учитывающие  текущее состояние   работ   на   объекте   (с   учетом      восполнения  отставаний,  если  требуется). Планы-задания включают все виды работ, планируемых к выполнению в данный период. В плане-задании должны указываться физические объемы по каждой работе, а также объемы и сроки поставки в будущем месяце материалов и оборудования в соответствии с Разделительной ведомостью (Приложение №3).

Подрядчик также обязан представлять отчет по исполнению графиков производства строительно-монтажных работ (еженедельно) и планов-заданий (ежедневно) (пункт 5.1.34. договора № 1710211/0206Д от 16.02.2011).

Пунктом 5.1.32 договора подряда №1710212/0114Д от 16.02.2012 предусмотрено, что подрядчик обязан в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Договора разработать и представить на утверждение «Заказчику» Детализированный график производства работ по настоящему Договору, включая изготовление и поставку оборудования, пуско-наладочные работы, работы по доставке материалов, прочие затраты по законченным этапам, с указанием стоимости каждого этапа. «Заказчик» в 10-дневный срок согласует Детализированный график производства работ по этапам или направляет мотивированный отказ.

В соответствии с пунктом 5.1.32.1. договора подряда №1710212/0114Д от 16.02.2012 подрядчик обязан в течение 15 рабочих дней от даты подписания Договора «Подрядчик» представляет на согласование «Заказчику» Детализированную разделительную ведомость. Представленная Детализированная разделительная ведомость заменяет Приложение №3 к Договору с момента её согласования и подписания обеими сторонами. В случае невыполнения «Подрядчиком» условия о предоставлении Детализированной разделительной ведомости в указанный срок, или в случае несогласования сторонами Детализированной разделительной ведомости, материалы и оборудование, не указанные в Приложении №3, приобретаются Подрядчиком самостоятельно у поставщиков.

5.1.33. Разрабатывать и предоставлять «Заказчику» до 25 числа каждого месяца ежемесячные планы-задания (наборы работ) с указанием численности персонала и единиц техники на выполнение работ в соответствии с Графиком производства строительно-монтажных работ по законченным этапам (Приложение №4), учитывающие текущее состояние работ на объекте (с учетом восполнения отставаний, если требуется). Планы-задания включают все виды работ, планируемых к выполнению в данный период. В плане-задании должны указываться физические объемы по каждой работе, а также объемы и сроки поставки в будущем месяце материалов и оборудования в соответствии с Разделительной ведомостью (Приложение №3).

В соответствии с пунктом 5.1.32 договора подряда №1710212/0418Д подрядчик обязан в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Договора разработать и представить на утверждение «Заказчику» Детализированный график производства работ по настоящему Договору, включая изготовление и поставку оборудования, пуско-наладочные работы, работы по доставке материалов, прочие затраты по законченным этапам, с указанием стоимости каждого этапа. «Заказчик» в 10-дневный срок согласует Детализированный график производства работ по этапам или направляет мотивированный отказ.

Пунктом 5.1.32.1. договора подряда №1710212/0418Д предусмотрено, что в течение 15 рабочих дней от даты подписания Договора «Подрядчик» представляет на согласование «Заказчику» Детализированную разделительную ведомость. Представленная Детализированная разделительная ведомость заменяет Приложение №3 к Договору с момента   её   согласования   и     подписания  обеими  сторонами.  В  случае невыполнения «Подрядчиком» условия о предоставлении Детализированной разделительной ведомости в  указанный срок, или в случае несогласования сторонами Детализированной разделительной ведомости, материалы и оборудование, не указанные в Приложении №3, приобретаются Подрядчиком самостоятельно у поставщиков.

5.1.33. Разрабатывать и предоставлять «Заказчику» до 25 числа каждого месяца ежемесячные планы-задания (наборы работ) с указанием численности персонала и единиц техники на выполнение работ в соответствии с Графиком производства строительно-монтажных работ по законченным этапам (Приложение №4), учитывающие текущее состояние работ на объекте (с учетом восполнения отставаний, если требуется). Планы-задания включают все виды работ, планируемых к выполнению в данный период. В плане-задании должны указываться физические объемы по каждой работе, а также объемы и сроки поставки в будущем месяце материалов и оборудования в соответствии с Разделительной ведомостью (Приложение №3).

В соответствии с пунктом 5.1.32 договора подряда №1710212/0092Д от 08.02.2012 подрядчик обязан в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Договора разработать и представить на утверждение «Заказчику» Детализированный график производства работ по настоящему Договору, включая изготовление и поставку оборудования, пуско-наладочные работы, работы по доставке материалов, прочие затраты по законченным этапам, с указанием стоимости каждого этапа. «Заказчик» в 10-дневный срок согласует Детализированный график производства работ по этапам или направляет мотивированный отказ.

5.1.32.1. В течение 15 рабочих дней от даты подписания договора «Подрядчик»представляет на согласование «Заказчику» детализированную разделительную ведомость. Представленная детализированная разделительная ведомость заменяет Приложение №3 к Договору с момента её согласования и подписания обеими сторонами. В случае невыполнения «Подрядчиком» условия о предоставлении Детализированной разделительной ведомости в указанный срок, или в случае несогласования сторонами Детализированной разделительной ведомости, материалы и оборудование, не указанные в Приложении №3, приобретаются Подрядчиком самостоятельно у поставщиков.

5.1.33. Разрабатывать и предоставлять «Заказчику» до 25 числа каждого месяца ежемесячные планы-задания (наборы работ) с указанием численности персонала и единиц техники на выполнение работ в соответствии с Графиком производства строительно-монтажных работ по законченным этапам (Приложение №4), учитывающие текущее состояние работ на объекте (с учетом восполнения отставаний, если требуется). Планы-задания включают все виды работ, планируемых к выполнению в данный период. В плане-задании должны указываться физические объемы по каждой работе, а также объемы и сроки поставки в будущем месяце материалов и оборудования в соответствии с Разделительной ведомостью (Приложение №3).

Порядок оплаты выполненных этапов работ и иных затрат подрядчика установлен разделом 6 договоров подряда.

Заказчик в течение 30 банковских дней с даты подписания соответствующихактов о приемке выполненных работ по законченным этапам (при условии представленияподрядчиком документов, указанных в п.5.1.15.) оплачивает подрядчику стоимостьфактически завершенных этапов работ в соответствии с Графиком сдачи-приемкивыполненных строительно-монтажных работ по законченным этапам (Приложение №6) всоответствии с положениями настоящего Раздела перечислением денежных средств нарасчетный счет подрядчика, указанный в договоре, на основании оригиналов подписаннойформы КС-3, КС-2 и счета-фактуры, передаваемых заказчику в 3 экземплярах (пункт 6.1. договоров подряда).

Пунктом 6.2. договоров предусмотрена выплата аванса подрядчику на приобретение материалов и оборудования, что составляет не более 70% от сметной стоимости поставляемых материалов и оборудования подрядчика, при условии письменного согласования заказчиком номенклатуры и стоимости, в течение 20 (двадцати) банковских дней с даты предоставления оригиналов следующих подтверждающих документов:

1.Счёта на аванс, подписанного уполномоченным лицом и скрепленного печатью подрядчика;

2.Безусловной безотзывной банковской гарантии возврата авансового платежа, сроком действия до полного погашения аванса плюс 30 дней, по форме, согласованной Сторонами.

При этом банковская гарантия является мерой обеспечения исполнения подрядчиком обязательств по возврату аванса. Банк, выпускающий Банковскую гарантию, и текст гарантии предварительно письменно согласовывается с заказчиком. Расходы по получению и обслуживанию Банковской гарантии несет Подрядчик.

Пунктом 6.2.2. предусмотрено, что возврат аванса осуществляется посредством удержания заказчиком сумм аванса из каждого платежа, причитающегося подрядчику за выполненные работы в части стоимости использованных материалов и оборудования, приобретенных в счет авансовых платежей, либо посредством возврата подрядчиком ранее полученных сумм аванса/части аванса заказчику, а именно:

Удержание аванса производится заказчиком согласно графику финансирования работ (Приложение №5), являющемуся неотъемлемой частью договора. Подрядчик представляет заказчику отчет по законченному этапу работ об использовании авансовых средств с приложением подтверждающих документов.

В соответствии с пунктом 6.5 договоров окончательный расчет за выполненные работы производится заказчиком не позднее 30 банковских дней после полного окончания работ, включая устранение дефектов, выявленных при приемке завершенного строительством системы при условии предоставления подрядчиком Гарантий в соответствии с разделом 8 настоящего договора, на    основании    оригиналов    первичных    документов,  подписанных    полномочными представителями Сторон и скрепленных печатями Сторон.

Разделом 9 урегулирован порядок обеспечения строительства объектов строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и разделительной ведомостью поставки (Приложение №3).

Пунктом 9.2. установлен перечень оборудования и материалов, необходимых для обеспечения строительства, оформляется с выделением разделов на:

1. Материалы и оборудование, приобретаемые подрядчиком самостоятельно (пункт 9.2.1);

2. Материалы и оборудование, приобретаемые подрядчиком самостоятельно, у поставщиков, по согласованию с заказчиком (Управлением материально-технических ресурсов заказчика), и материалы, приобретаемые подрядчиком у заказчика по договорам купли-продажи (пункт 9.2.2.);

3. Оборудование поставки Заказчика, передаваемое Подрядчику на основании акта приемки - передачи оборудования в монтаж (типовая форма ОС-15). Подрядчик отвечает за сохранность переданного ему в монтаж от Заказчика оборудования (по акту ОС-15) и несет риск гибели, утраты или повреждения данного оборудования до подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством Объекта (КС-11 ) (пункт 9.2.3).

В соответствии с пунктом 9.3. договоров подрядчик самостоятельно приобретает материалы и оборудование, указанные в пункте 9.2.1. договоров, в пределах стоимости, указанной в пункте 3.1.1. договора. Заказчик возмещает расходы на приобретение материалов и оборудования, указанных в пункте 9.2.1., в составе выполненных работ при условии надлежащего оформления актов формы КС-2. В случае превышения фактической стоимости закупленных подрядчиком материалов и оборудования над стоимостью, указанной в пункте 3.1.1. договора, не связанной с корректировкой ПСД либо изменениями задания (статья 3.4 настоящего Договора), Подрядчик оплачивает суммы превышения самостоятельно.

Пунктом 9.4. договоров установлено, что подрядчик приобретает материалы и оборудование, указанные в п. 9.2.2., в следующем порядке:

9.4.1. Подрядчик приобретает материалы и оборудование у поставщиков по стоимости и номенклатуре по объектам строительства, согласованных Заказчиком. Стороны подписывают соответствующие Дополнительные соглашения к настоящему Договору, закрепляющие стоимость и номенклатуру данных материалов и оборудования, оформленных в виде отдельных спецификаций, либо

9.4.2. Подрядчик приобретает материалы, напрямую у Заказчика, на основании отдельно заключаемых договоров между Сторонами. Продажа данных материалов (с обязательным оформлением заявки на получение ТМЦ - Приложение № 15) оформляется товарной накладной с приложенным счетом-фактурой.

9.5. При сдаче-приемке выполненных работ Заказчик вправе затребовать у Подрядчика копии документов, подтверждающих стоимость использованных материалов и оборудования (копий счетов-фактур поставщиков (изготовителей), договоров на закупку/изготовление материалов и оборудования, договоров перевозки, товарных накладных ТОРГ-12, актов приемки-передачи от поставщика (изготовителя) «Подрядчику», актов выполненных работ, услуг). Стоимость материалов (за исключением материалов, приобретаемых «Подрядчиком» у «Заказчика» по договорам купли-продажи) включается в стоимость выполненных работ (КС-2) по цене фактического приобретения с учетом транспортных расходов в пределах стоимости, указанной в п.3.1.1. Договора. Стоимость материалов, приобретаемых «Подрядчиком» у «Заказчика» по договорам купли-продажи, включается в стоимость выполненных работ (КС-2) по цене фактического приобретения с учетом транспортных расходов.

9.6. Материалы и оборудование, оговоренные в Приложении №3, как приобретаемые «Подрядчиком» самостоятельно у поставщиков, доставляются непосредственно на Объект «Подрядчиком». «Заказчик» может оказать «Подрядчику» услуги по доставке материалов и оборудования от станции назначения до строительной площадки по отдельно заключаемому договору. Материалы и оборудование, оговоренные в Приложении №3, как приобретаемые «Подрядчиком» у «Заказчика» по договорам купли-продажи, доставляются непосредственно на склад «Заказчика». «Заказчик» может оказать «Подрядчику» услуги по доставке материалов и оборудования от склада «Заказчика» до строительной площадки по отдельно заключаемому договору. 

В соответствии с пунктом 9.7. договоров поставка материалов и оборудования осуществляется в сроки, согласованные сторонами.

Сторона, ответственная за поставку материалов и оборудование по разделительной ведомости (Приложение №3), должна обеспечить доставку материалов и оборудования в таре и упаковке, которая способна обеспечить, при условии надлежащего обращения с грузом, сохранность материалов и оборудования во время транспортировки и хранения. «Подрядчик» за свой счет погашает все убытки, возникшие от порчи, повреждения или поломки материалов и оборудования вследствие их ненадлежащей или некачественной упаковки (пункт 9.8. договоров).

Согласно пункту 24.5 договоров подряда установлено, если настоящий Договор расторгается по вине подрядчика, заказчик оплачивает подрядчику только сумму выполненных Работ, стоимость имеющихся на объекте материалов и оборудования, поставленных подрядчиком по состоянию на дату расторжения Договора, за вычетом понесенных в связи с расторжением убытков заказчика, связанных со срывом подрядчиком Графика работ и необходимостью привлечения другого подрядчика, штрафных санкций и других затрат, в соответствии с условиями Договора. 

Согласно пункту 24.6. договоров подряда, если договор расторгается по инициативе заказчика, подрядчику выплачивается стоимость выполненных работ, полученных от подрядчика материалов и оборудования, обоснованных затрат на вывоз строительной техники и персонала подрядчика, занятого на строительстве объекта, а также стоимость заказанных оборудования и материалов при условии предоставления оригиналов подписанных договоров на их поставку в соответствии с условиями Договора.

Согласно пояснениям истца, подрядчик во исполнение условий договоров подряда  произвел закупку материалов и оборудования у своего субподрядчика ООО «Газкомплектавтоматика» в соответствии с представленными в дело товарными накладными, платежными поручениями на оплату аванса для закупки материалов и оборудования.

Уведомлениями АО «Ванкорнефть» от 21.07.2015 исх. №26719, от 29.06.2015 г. исх. №23860, от 29.06.2015 г. исх. №23859, от 22.04.2015 исх. № 14846 сообщило о расторжении договоров №№1710212/0865Д от 20.04.2012, №1710212/0418Д от 27.02.2012, №1710212/0092Д от 08.02.2012, №1710212/0114Д от 16.02.2012 соответственно.

ОАО «НПО «Промавтоматика» исх. №1241 от 04.08.2015 направило уведомление об отказе от исполнения договоров подряда, в т.ч. № 1710211/0206Д от 16.02.2011, 1710212/0865Д от 20.04.2012, №1710212/0418Д от 27.02.2012, №1710212/0092Д от 08.02.2012.

Письмом от 03.09.2015 г. АО «Ванкорнефть» сообщило об отсутствии оснований для расторжения договора № 1710211/0206Д от 16.02.2011.

Уведомлением от 16.10.2015 г. исх.№39953 АО «Ванкорнефть» сообщило о расторжении договора № 1710211/0206Д от 16.02.2011.

Письмом исх. №1250 от 06.08.2015 ОАО «НПО «Промавтоматика» сообщило о готовности передать МТР (материально-технические ресурсы) согласно ведомостям, находящиеся на складе подрядчика, указало на обязанность заказчика принять их и оплатить.

Письмом от 14.09.2015 исх. №1448 ОАО «НПО «Промавтоматика» в ответ на письмо АО «Ванкорнефть» исх. № 33164 от 27.08.2015 направило в адрес АО «Ванкорнефть» документы, подтверждающие право собственности на предлагаемые  к передаче в рамках процедуры расторжения договоров подряда МТР (акты приема-передачи ТМЦ №1-68) и реестры соответствия МТР остаткам по договорам подряда в формате Excel с требованием организации совместного совещания, сообщило о введении в отношении него процедуры несостоятельности - наблюдения.

Согласно протоколу совещания АО «Ванкорнефть» от 22.09.2015 (г. Красноярск) по теме «Решение проблемных вопросов с подрядной организацией ОАО «НПО «Промавтоматика»  стороны пришли к соглашению о необходимости проведения силами подрядчика инвентаризации остатков материалов в срок до 16.10.2015 (п.5),  АО «Ванкорнефть» обязалось до 30.09.2015 выдать предложения по приемке МТР у ОАО «НПО «Промавтоматика» и срокам его оплаты (п.6).

29.06.2016 Решением Арбитражного суда Краснодарского края по делу А32-14882/2015 ОАО «НПО «Промавтоматика» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него введено конкурсное производство. 

12.12.2017 конкурсным управляющим в рамках процедуры конкурсного производства завершены мероприятия по инвентаризации имущества ОАО «НПО «Промавтоматика», находящегося на складе Карьер 15 на территории Ванкорского месторождения, а именно, закупленных истцом МТР в рамках договоров подряда с АО «Ванкорнефть», составлена Инвентаризационная опись от 12.12.2017. В соответствии с данными инвентаризации на складе ОАО «НПО «Промавтоматика» находится МТР на общую сумму 294 099 908,84 рублей.

Согласно Ведомости (реестра) материально-технических ресурсов ОАО «НПО «Промавтоматика», закупленных в рамках договоров подряда с ЗАО «Ванкорнефть», спорные материально-технические ресурсы общей стоимостью 30 810 820,66 рублей  находятся на складе карьер 15 на территории Ванкорского месторождения.

В связи с проведением инвентаризации ОАО «НПО «Промавтоматика» в лице конкурсного управляющего обратилось с требованием исх. №645/318.15.5.8/2017 от 27.12.2017 о выкупе (возмещении стоимости) материалов и оборудования, приобретенных подрядчиком.

Рассмотрев требование ОАО «НПО «Промавтоматика»,  ответчик  письмом   исх. РНВ-1538 от 18.01.2018 просил представить надлежащим образом  заверенные   копии документов,  подтверждающие  стоимость   материалов  и  оборудования, после  предоставления истцом  которых (исх.52/318.15.4.2/2018  от  15.03.2018)  письмом  от  20.04.2018 (исх. РНВ-16023)  со  ссылкой на  отсутствие   надлежащих оформленных  актов по форме  КС-2 отказал в возмещении  стоимости самостоятельно приобретенных подрядчиком для  выполнения  работ оборудования и материалов, полагая, что возмещение расходов может  осуществляться  только  в составе  выполненных работ.

Ссылаясь на то обстоятельство, что расторжение заключенных договоров до сдачи-приемки  выполненных работ повлекло  возникновение на стороне истца убытков в виде расходов на приобретение материалов и оборудования, фактически находящегося  на охраняемой территории Ванкорского месторождения, состав и стоимость материалов  и оборудования были  согласованы с ответчиком,  однако от приемки  и возмещения расходов ответчик неправомерно отказался, ОАО «НПО «Промавтоматика» обратилось в арбитражный суд Красноярского края с  иском  о взыскании 30 810 820,66 руб. стоимости материалов и оборудования. 

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданское законодательство в Российской Федерации основывается на признании равенства участников регулируемых им отношений, неприкосновенности собственности, свободы договора.

Гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, в том числе из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему (статьи 8, 307 Гражданского кодекса Российской Федерации). Согласно статьям 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательств и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

Судом установлено, что спорные договоры № 1710212/0865Д от 20.04.2012, № 1710211/0206Д от 16.02.2011, № 1710212/0114Д от 16.02.2012, № 1710212/0418Д от 27.02.2012 и № 1710212/0092Д от 08.02.2012 по своей правовой природе являются договорами подряда, отношения по которым регулируются главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В силу статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. 

Пунктом 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). 

В соответствии с пунктом 1 статьи 709 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения. 

Согласно статье 711 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Материалами дела подтверждается, что ответчик отказался от исполнения договоров, направив истцу соответствующие письма и уведомления. Данный отказ не противоречит положениям статьи 717 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии со статьей 453 Гражданского кодекса Российской Федерации при расторжении договора обязательства сторон прекращаются, если иное не предусмотрено законом, договором или не вытекает из существа обязательства.

Согласно статье 729 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае прекращения договора подряда по основаниям, предусмотренным законом или договором, до приемки заказчиком результата работы, выполненной подрядчиком (пункт 1 статьи 720), заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенной работы с компенсацией подрядчику произведенных затрат.

Разделом 24 договоров подряда предусмотрено право сторон на односторонний отказ. 

В силу пункта 24.4 договоров в случае изменения или расторжения договора обязательства считаются соответственно измененными или прекращенными:

- в случае изменения договора по соглашению сторон – с момента, определенного соглашением сторон об изменении договора;

- в случае изменения или расторжения договора по решению суда – с момента вступления в законную силу решения суда;

- в случае одностороннего отказа от исполнения договора по инициативе любой из сторон – с момента истечения тридцатидневного срока уведомления о расторжении договора.

Факт расторжения спорных договоров до окончания выполнения работ судом установлен и сторонами не  оспаривается.

Согласно пункту 24.5 договоров подряда, если настоящий договор расторгается по вине подрядчика, заказчик оплачивает подрядчику только сумму выполненных работ, стоимость имеющихся на объекте материалов и оборудования, поставленных подрядчиком по состоянию на дату расторжения договора, за вычетом понесенных в связи с расторжением убытков заказчика, связанных со срывом подрядчиком Графика работ и необходимостью привлечения другого подрядчика, штрафных санкций и других затрат, в соответствии с условиями Договора. 

Согласно пункту 24.6. договоров подряда, если договор расторгается по инициативе заказчика, подрядчику выплачивается стоимость выполненных работ, полученных от подрядчика материалов и оборудования, обоснованных затрат на вывоз строительной техники и персонала подрядчика, занятого на строительстве объекта, а также стоимость заказанных оборудования и материалов при условии предоставления оригиналов подписанных договоров на их поставку в соответствии с условиями Договора.

Вышеприведённые условия договора позволяют сделать вывод о наличии у заказчика обязанности по возмещению стоимости имеющихся на объекте материалов, но при условии соблюдения согласованных сторонами договора условий. 

Оценив представленные  доказательства,  арбитражный суд не усматривает оснований для удовлетворения требований истца о взыскании с ответчика 30 810 820,66 руб. стоимости материалов и оборудования исходя из следующего. 

Из пояснений истца следует, что им во исполнение условий договоров подряда  произведена закупка материалов и оборудования у своего субподрядчика ООО «Газкомплектавтоматика», что, по его мнению, подтверждается представленными в материалы дела товарными накладными, платежными поручениями на оплату аванса для закупки материалов и оборудования, составленными в рамках договоров подряда № 11/6-ГКА  от 21.12.2011, № 12/7-ГКА от 21.02.2012, № 19/9-ГКА от 21.02.2012, № 12/9-ГКА-2 от 12.03.2012 и № 12/18-ГКА от 28.04.2012.

 Согласно проведенным конкурсным управляющим истца мероприятиям по инвентаризации имущества ОАО «НПО «Промавтоматика», находящегося на складе Карьер 15 на территории Ванкорского месторождения, составлена Инвентаризационная опись от 12.12.2017, в соответствии с которой на складе ОАО «НПО «Промавтоматика» находится МТР на общую сумму 294 099 908,84 рублей., которые по утверждению истца были закупленных рамках договоров подряда с АО «Ванкорнефть».

При этом согласно пояснениям истца факт приобретения спорных материально-технических ресурсов общей стоимостью 30 810 820,66 руб., закупленных в рамках спорных договоров подряда с ЗАО «Ванкорнефть», подтверждаются ведомостью (реестром) материально-технических ресурсов ОАО «НПО «Промавтоматика».

Разделом 9 спорных договоров урегулирован порядок обеспечения строительства объектов строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и разделительной ведомостью поставки (Приложение №3).

Пунктом 9.2. установлен перечень оборудования и материалов, необходимых для обеспечения строительства, который оформляется с выделением разделов на:

- Материалы и оборудование, приобретаемые подрядчиком самостоятельно (пункт 9.2.1);

- Материалы и оборудование, приобретаемые подрядчиком самостоятельно, у поставщиков, по согласованию с заказчиком (Управлением материально-технических ресурсов заказчика), и материалы, приобретаемые подрядчиком у заказчика по договорам купли-продажи (пункт 9.2.2.);

- Оборудование поставки Заказчика, передаваемое Подрядчику на основании акта приемки передачи оборудования в монтаж (типовая форма ОС-15). Подрядчик отвечает за сохранность переданного ему в монтаж от Заказчика оборудования (по акту ОС-15) и несет риск гибели, утраты или повреждения данного оборудования до подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством Объекта (КС-11 ) (пункт 9.2.3).

В соответствии с пунктом 9.3. договоров подрядчик самостоятельно приобретает материалы и оборудование, указанные в пункте 9.2.1. договоров, в пределах стоимости, указанной в пункте 3.1.1. договора. Заказчик возмещает расходы на приобретение материалов и оборудования, указанных в пункте 9.2.1. в составе выполненных работ при условии надлежащего оформления актов формы КС-2. В случае превышения фактической стоимости закупленных подрядчиком материалов и оборудования над стоимостью, указанной в пункте 3.1.1. договора, не связанной с корректировкой ПСД либо изменениями задания (статья 3.4 настоящего Договора), Подрядчик оплачивает суммы превышения самостоятельно.

Пунктом 9.4. договоров установлено, что подрядчик приобретает материалы и оборудование, указанные в п. 9.2.2., в следующем порядке:

9.4.1. Подрядчик приобретает материалы и оборудование у поставщиков по стоимости и номенклатуре по объектам строительства, согласованных Заказчиком. Стороны подписывают соответствующие Дополнительные соглашения к настоящему Договору, закрепляющие стоимость и номенклатуру данных материалов и оборудования, оформленных в виде отдельных спецификаций, либо

9.4.2. Подрядчик приобретает материалы, напрямую у Заказчика, на основании отдельно заключаемых договоров между Сторонами. Продажа данных материалов (с обязательным оформлением заявки на получение ТМЦ - Приложение № 15) оформляется товарной накладной с приложенным счетом-фактурой.

9.7. При сдаче-приемке выполненных работ Заказчик вправе затребовать у Подрядчика копии документов, подтверждающих стоимость использованных материалов и оборудования (копий счетов-фактур поставщиков (изготовителей), договоров на закупку/изготовление материалов и оборудования, договоров перевозки, товарных накладных ТОРГ-12, актов приемки-передачи от поставщика (изготовителя) «Подрядчику», актов выполненных работ, услуг). Стоимость материалов (за исключением материалов, приобретаемых «Подрядчиком» у «Заказчика» по договорам купли-продажи) включается в стоимость выполненных работ (КС-2) по цене фактического приобретения с учетом транспортных расходов в пределах стоимости, указанной в п.3.1.1. Договора. Стоимость материалов, приобретаемых «Подрядчиком» у «Заказчика» по договорам купли-продажи, включается в стоимость выполненных работ (КС-2) по цене фактического приобретения с учетом транспортных расходов.

9.8. Материалы и оборудование, оговоренные в Приложении №3, как приобретаемые «Подрядчиком» самостоятельно у поставщиков, доставляются непосредственно на объект «Подрядчиком». «Заказчик» может оказать «Подрядчику» услуги по доставке материалов и оборудования от станции назначения до строительной площадки по отдельно заключаемому договору. Материалы и оборудование, оговоренные в Приложении №3, как приобретаемые «Подрядчиком» у «Заказчика» по договорам купли-продажи, доставляются непосредственно на склад «Заказчика». «Заказчик» может оказать «Подрядчику» услуги по доставке материалов и оборудования от склада «Заказчика» до строительной площадки по отдельно заключаемому договору. 

В соответствии с пунктом 9.7. договоров поставка материалов и оборудования осуществляется в сроки, согласованные Сторонами.

Сторона, ответственная за поставку материалов и оборудование по разделительной ведомости (Приложение №3), должна обеспечить доставку материалов и оборудования в таре и упаковке, которая способна обеспечить, при условии надлежащего обращения с грузом, сохранность материалов и оборудования во время транспортировки и хранения. «Подрядчик» за свой счет погашает все убытки, возникшие от порчи, повреждения или поломки материалов и оборудования вследствие их ненадлежащей или некачественной упаковки (пункт 9.8. договоров).

В силу положений статей 10, 71, 162, 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд при разбирательстве дела обязан оценить имеющиеся в деле доказательства во взаимосвязи и совокупности по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном их исследовании. Согласно статьям 307, 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства, возникшие из договоров, должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. 

Как следует из вышеизложенных условий спорных договоров подряда, совместным волеизъявлением стороны предусмотрели определенные условия по закупке и доставке на объект материалов и оборудования, приобретаемых подрядчиком самостоятельно у поставщиков, в соответствии с разделительной ведомостью (пункт 5.1.3.), порядке передачи подрядчиком приобретенного в рамках спорных договоров МТР, а также условий его принятия заказчиком (пункты 5.1.32, 5.1.33, 9.4 и 9.7 договоров).

Согласно статье 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

Исследовав материалы дела, суд установил, что какие-либо документальные доказательства, определенно подтверждающие факт того, что МТР были закуплены истцом у ООО «Газкомплектавтоматика» в рамках исполнения спорных договоров подряда № 1710212/0865Д от 20.04.2012, № 1710211/0206Д от 16.02.2011, № 1710212/0114Д от 16.02.2012, № 1710212/0418Д от 27.02.2012 и № 1710212/0092Д от 08.02.2012 истцом в материалы дела не представлены.

Доказательств соблюдения установленного пунктом 9.4.1 договоров подряда порядка, в том числе заключения с заказчиком соответствующих дополнительных соглашений о стоимости материалов и их видов, истцом в материалы дела не представлено. 

В нарушение условий пункта 9.7 спорных договоров подряда истцом не согласован с ответчиком срок поставки МРТ.

Кроме того,  пунктом 9.8 договоров установлено, что материалы и оборудование, оговоренные в Приложении №3 как приобретаемые «Подрядчиком» самостоятельно у поставщиков, доставляются непосредственно на объект «Подрядчиком». «Заказчик» может оказать «Подрядчику» услуги по доставке материалов и оборудования от станции назначения до строительной площадки по отдельно заключаемому договору.

Доказательств, подтверждающих факт того, что МРТ поставлялись на объект именно подрядчиком, истцом в материалы дела не представлено.

В соответствии со статьей 717 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

В судебном заседании  10.07.2019 истец пояснил, что  просит суд взыскать 30 810 820,66 руб. стоимости материалов и оборудования, которые являются убытками истца, понесенными в связи с исполнением договоров. 

В соответствии со статьей 15 ГК РФ под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

В пункте 12 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 25 от 23.06.2015 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление Пленума ВС РФ N 25) разъяснено, что по делам о возмещении убытков истец обязан доказать, что ответчик является лицом, в результате действий (бездействия) которого возник ущерб, а также факты нарушения обязательства или причинения вреда, наличие убытков (пункт 2 статьи 15 ГК РФ).

Размер подлежащих возмещению убытков должен быть установлен с разумной степенью достоверности. По смыслу пункта 1 статьи 15 ГК РФ в удовлетворении требования о возмещении убытков не может быть отказано только на том основании, что их точный размер невозможно установить. В этом случае размер подлежащих возмещению убытков определяется судом с учетом всех обстоятельств дела, исходя из принципов справедливости и соразмерности ответственности допущенному нарушению.

Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство (пункт 2 статьи 401 ГК РФ). По общему правилу лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине (пункт 2 статьи 1064 ГК РФ). Бремя доказывания своей невиновности лежит на лице, нарушившем обязательство или причинившем вред. Вина в нарушении обязательства или в причинении вреда предполагается, пока не доказано обратное.

Если лицо несет ответственность за нарушение обязательства или за причинение вреда независимо от вины, то на него возлагается бремя доказывания обстоятельств, являющихся основанием для освобождения от такой ответственности (например, пункт 3 статьи 401, пункт 1 статьи 1079 ГК РФ).

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 5 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств", по смыслу статей 15 и 393 ГК РФ, кредитор представляет доказательства, подтверждающие наличие у него убытков, а также обосновывающие с разумной степенью достоверности их размер и причинную связь между неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства должником и названными убытками. Должник вправе предъявить возражения относительно размера причиненных кредитору убытков, и представить доказательства, что кредитор мог уменьшить такие убытки, но не принял для этого разумных мер (статья 404 ГК РФ).

При установлении причинной связи между нарушением обязательства и убытками необходимо учитывать, в частности, то, к каким последствиям в обычных условиях гражданского оборота могло привести подобное нарушение. Если возникновение убытков, возмещения которых требует кредитор, является обычным последствием допущенного должником нарушения обязательства, то наличие причинной связи между нарушением и доказанными кредитором убытками предполагается.

Должник, опровергающий доводы кредитора относительно причинной связи между своим поведением и убытками кредитора, не лишен возможности представить доказательства существования иной причины возникновения этих убытков.

Вина должника в нарушении обязательства предполагается, пока не доказано обратное. Отсутствие вины в неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательства доказывается должником (пункт 2 статьи 401 ГК РФ).

Если должник несет ответственность за нарушение обязательства или за причинение вреда независимо от вины, то на него возлагается бремя доказывания обстоятельств, являющихся основанием для освобождения от такой ответственности, например, обстоятельств непреодолимой силы (пункт 3 статьи 401 ГК РФ).

Таким образом, применение такой меры гражданско-правовой ответственности как возмещение убытков (вреда) возможно при доказанности совокупности условий: наличия убытков (вреда), противоправности действий причинителя убытков, причинной связи между противоправными действиями и возникшими убытками, размера понесенных убытков.

При этом отсутствие хотя бы одного из совокупности указанных элементов свидетельствует об отсутствии состава и, следовательно, оснований для привлечения лица к ответственности.

Истец в нарушение требований статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не представил в материалы дела  доказательства приобретения  МТР в рамках исполнения спорных договоров подряда, соблюдения условий, предусмотренных договорами для выплаты заказчиком подрядчику стоимости заказанных МТР (соответствующие  дополнительные соглашения к договорам, закрепляющие стоимость и номенклатуру данных материалов и оборудования, оформленных в виде отдельных спецификаций, не представлены), а также виновных действий ответчика, повлекших причинение убытков,  наличия причинной связи между действиями (бездействием) ответчика и возникшими у истца убытками.

Кроме того, ответчиком заявлено об истечении сроков исковой давности в отношении требований по договору подряда № 1710212/01414Д от 16.02.2012, с учетом того, что спорный договор расторгнут с подрядчиком 22.05.2015, трехлетний срок давности по предъявлению требований истек 06.06.2018, при этом с настоящим иском истец обратился в суд 08.06.2018.

Исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено (статья 195 ГК РФ). Исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения. Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске (статья 199 ГК РФ).

В соответствии со статьей 196 ГК РФ общий срок исковой давности установлен в три года.

В соответствии с пунктом 1 статьи 200 ГК РФ течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.

Довод ответчика относительно пропуска срока исковой давности судом отклонен в силу следующего. 

Из условий спорного договора не следует, что стороны определили срок исполнения обязательств, возникающих в связи с расторжением договора (пункты 2.5. и 2.6 договора). Согласно представленным в материалы дела документам, письмом с исх. № 1250 от 06.08.2018 истец сообщил о готовности передачи МТР согласно ведомостям, находящимся на складе подрядчика и указал на обязанность их принять и оплатить. Следовательно, заказчику в соответствии с частью 2 статьи 314 Гражданского кодекса Российской Федерации следовало произвести приемку материалов и оборудования в семидневный срок.

Учитывая вышеизложенное, исковые требования удовлетворению не подлежат.

Государственная пошлина за рассмотрение арбитражным судом настоящего заявления составляет 177 054 рублей. В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. Платежным поручением № 5 от 31.05.2018 истец уплатил 177 054 рублей государственной пошлины. 

Принимая во внимание изложенное, по итогам рассмотрения дела по существу судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 177 054 рублей подлежат отнесению на истца.

Настоящее  решение  выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа (код доступа -  ). 

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

РЕШИЛ:

в удовлетворении исковых  требований открытого акционерного общества "НПО "Промавтоматика" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) отказать.

Настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия путем подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.

Судья

Е.А. Куликовская