243/2018-117829(2) 

Арбитражный суд Хабаровского края  г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е

дело № А73-9820/2018

г. Хабаровск

29 августа 2018 года

Резолютивная часть решения объявлена 22 августа 2018  Арбитражный суд в составе судьи Л.А. Збарацкой  

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1 

рассмотрев в заседании суда дело по иску Краевого государственного  казенного учреждения «Хабаровское управление автомобильных дорог»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, местонахождения: 680011,  

<

...>, литер А)  

к индивидуальному предпринимателю ФИО2  (ОГРНИП 306272012500015)  

о взыскании 1 283 050 руб. 32 коп., при участии в судебном заседании: 

от истца – ФИО3, действующего по доверенности от 09.01.2018 б/н,  от ответчика – не явился, извещен надлежащим образом.  

 Краевое государственное казенное учреждение «Хабаровское управление  автомобильных дорог» обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением  к индивидуальному предпринимателю ФИО2 о  взыскании неустойки за просрочку выполнения работ в размере 1 283 050  руб. 32 коп. за периоды с 01.10.2017 по 20.11.2017.  

 Истец, как следует из искового заявления, объяснений представителя в  судебном заседании, просил исковые требования удовлетворить, в качестве  

обстоятельств, на которых основаны исковые требования, указал на наличие  между сторонами обязательственных отношений, возникших из контракта от  21.06.2017 № 197, нарушение Подрядчиком срока выполнения работ, право  на взыскание неустойки в размере 1 283 050 руб. 32 коп. за периоды с  01.10.2017 по 20.11.2017.  

 Ответчик в судебное заседание не явился, отзыва и возражений на иск не  представил.  

 Дело подлежит рассмотрению в порядке ч.3 ст. 156 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации.  

 Рассмотрев материалы дела, заслушав представителя истца, суд 

УСТАНОВИЛ:

21.06.2017 между Краевым государственным казённым учреждением  «Хабаровское управление автомобильных дорог», Заказчик, и  индивидуальным предпринимателем ФИО2,  Подрядчик, заключен контракт № 197, предметом которого является:  выполнение работ по ремонту объекта «Мост на км 3+844 автомобильной  дороги «Подъезд к п. Морской» (I этап) (далее - Работы). Заказчик поручает,  а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить Работы в  соответствии с Технической частью (Приложение 1), являющейся  неотъемлемой частью контракта, а Заказчик обязуется принять выполненные  Работы и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных  контрактом.  

 В силу пункта 1.2. дополнительного соглашения от 27.12.2017 № 1 к  контракту от 21.06.2017 № 197 стороны подтверждают, что в связи с  удержанием возвратных сумм, предусмотренных сметной документацией,  общая стоимость выполненных работ составила 21 854 568 руб.  

 В соответствии с пунктом 5.1. контракта срок выполнения (завершения)  работ: с момента заключения контракта по 30.09.2017.  

 В соответствии с пунктом 9.3.1. контракта пеня начисляется за каждый  день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного  контрактом (в том числе гарантийного, если таковое установлено) начиная со  дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока  исполнения обязательства, и устанавливается в размере не менее чем одна  трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования  Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной  на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных  контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, и определяется по  формуле:  

П=(Ц-В) х С, где: Ц - цена контракта; 

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок  Подрядчиком обязательства по контракту, определяемая на основании  документа о приемке Работ; С - размер ставки.  

Размер ставки определяется по формуле: С=Сцб х ДП, где: 

Сцб - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным  банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом  коэффициента К;  

 ДП - количество дней просрочки. 

 Коэффициент К определяется по формуле: К=ДП/ДКх 100%, где: ДП -  количество дней просрочки;  

 ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней). 

 При К, равном 0-50 процентам, размер ставки определяется за каждый  день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования,  установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты  пени.  

 При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый  день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования,  установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты  пени.  

 При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за  каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки  рефинансирования, установленной Центральным банком Российской  Федерации на дату уплаты пени.  

 В соответствии с актом о приемке выполненных работ от 08.12.12.2017 №  4 и справке о стоимости выполненных работ и затрат от 08.12.2017 № 2  работы на сумму 17 350 241 руб. переданы Заказчику 20.11.2017.  

 Заказчик направил Подрядчику претензию от 30.05.2018 № 3205-3 с  требованием оплатить неустойку в размере 1 283 050 руб. 32 коп.  

 Рассматриваемые отношения основаны на обязательствах строительного  подряда.  

 В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской  Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в  соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.  

 В силу пункта 1 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации  по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный  договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо  выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать  подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их  результат и уплатить обусловленную цену.  

 В силу статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, не  исполнившее обязательство, либо исполнившее его ненадлежащим образом,  несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности),  кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания  ответственности.  

 Статьей 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой  (пеней, штрафом) признается определенная законом или договором денежная  сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения  или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае  просрочки исполнения.  

 Пунктом 7 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О  контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных и муниципальных нужд» пеня начисляется за каждый день  просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего  после дня истечения установленного контрактом срока исполнения  обязательства, и устанавливается контрактом в размере, определенном в  порядке, установленном Правительством Российской Федерации, но не менее  чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки  Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной  на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных  контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,  исполнителем).  

 Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 N 1063 утверждены  Правила, устанавливающие порядок определения в контракте  фиксированного размера штрафа, начисляемого за ненадлежащее исполнение  заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, в том  числе гарантийного обязательства (за исключением просрочки исполнения  обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), а  также размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения  поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства,  предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня  истечения установленного контрактом срока исполнения указанного  обязательства (далее соответственно - штраф, пеня).  

 В соответствии с пунктом 6 Правил, пеня начисляется за каждый день  просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком)  обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере  не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки  рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены  контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств,  

предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком  (подрядчиком, исполнителем), и определяется по формуле: П = (Ц - В) x С,  где: Ц - цена контракта; В - стоимость фактически исполненного в  установленный срок поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  обязательства по контракту, определяемая на основании документа о  приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе  отдельных этапов исполнения контрактов; С - размер ставки.  

 В соответствии с пунктом 7 Правил размер ставки определяется по  формуле: С = Сцб x ДП, где: Сцб - размер ставки рефинансирования,  установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты  пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП - количество дней  просрочки.  

 В силу пункта 8 Правил коэффициент К определяется по формуле: К = ДП  / ДК x 100%, где: ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения  обязательства по контракту (количество дней).  

 При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый  день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования,  установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты  пени.  

 Периоды просрочки Подрядчиком выполнения работ по контракту  составляет 51 день (с 01.10.2017 по 20.11.2017).  

 Представленный истцом расчет неустойки на сумму 1 283 050 руб. 32 коп.  судом проверен, является верным.  

 Исковое требование о взыскании неустойки в размере 1 283 050 руб. 32  коп. подлежит удовлетворению.  

 Судебные расходы в виде государственной пошлины в размере 25 831 руб.  подлежат взысканию с ответчика в доход федерального бюджета в порядке  статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

 Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса РФ, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л 

 Иск удовлетворить. 

 Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРНИП 306272012500015) в пользу Краевого  государственного казенного учреждения «Хабаровское управление  автомобильных дорог» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>,  местонахождения: 680011, 

<

...>, литер А) неустойку в размере 1 283 050 руб. 32 коп.  

 Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРНИП 306272012500015) в доход федерального бюджета  государственную пошлину в размере 25 831 руб.  

 Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня  его принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана  апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение,  если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня  принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.  

 Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой  арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия  решения.  

 Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной  инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края.  

Судья Л.А. Збарацкая