Арбитражный суд Хабаровского края

<

...>, www.khabarovsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

дело № А73-3586/2025

г. Хабаровск

23 июня 2025 года

Резолютивная  часть  решения  объявлена  10 июня 2025  

Арбитражный суд в составе судьи Л.А. Збарацкой

при ведении протокола судебного заседания секретарем  О.Г. Лисичкиной

рассмотрев в заседании суда дело по иску акционерного общества «Хабаровская ремонтно-монтажная компания» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 680033, 

<

...>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Спецконструктивстрой» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 680014, 

<

...>)

о взыскании 17 188 465 руб.

при участии в судебном заседании:

от истца – ФИО1, действующего по доверенности от 18.12.2024 № 935-25,

от ответчика – не явился, извещен надлежащим образом.

Акционерное общество «Хабаровская ремонтно-монтажная компания» обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Спецконструктивстрой» о взыскании по договорам от 09.10.2023 № СП-0935с/65/ХТ-3-23, от 10.11.2023 № СП-1033с/65/ХТ-3-23, от 10.11.2023 № СП-1034с/65/ХТ-3-23 всего 17 188 465 руб., составляющих неосновательное обогащение  в размере 5 618 707 руб. 37 коп., пени в размере 10 631 182 руб. 18 коп. за периоды   с 08.12.2023 по 11.02.2024, с 30.03.2024 по 17.06.2024, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 938 575 руб. 45 коп. за периоды с 26.01.2024 по 10.02.2025.

Определением от 21 мая 2025 судом принято увеличение размера иска до 17 943 902 руб. 70 коп., составляющих по договору от 09.10.2023 № СП-0935с/65/ХТ-3-23 неосновательное обогащение  в размере 1 443 880 руб. 98 коп., пени в размере 7 751 409 руб. 16 коп. за периоды   с 08.12.2023 по 11.02.2024, с 30.03.2024 по 25.06.2024, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 258 088 руб. 29 коп. за периоды с 26.06.2024 по 21.05.2025, по договору от 10.11.2023 № СП-1033с/65/ХТ-3-23 неосновательное обогащение  в размере 2 031 996 руб. 23 коп., пени в размере 2 162 315 руб. 26 коп. за периоды с 30.03.2024 по 25.06.2024, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 363 211 руб. 68 коп. за периоды с 26.06.2024 по 21.05.2025, по договору от  10.11.2023 № СП-1034с/65/ХТ-3-23 неосновательное обогащение  в размере 2 142 830 руб. 16 коп., пени в размере 1 345 322 руб. 19 коп. за периоды с 30.03.2024 по 20.04.2024, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 444 848 руб. 75 коп. за периоды с 21.04.2024 по 21.05.2025.

Истец, как следует из искового заявления, объяснений представителя в судебном заседании, просил исковые требования удовлетворить, в качестве обстоятельств, на которых они основаны, указал на наличие обязательственных отношений, возникших из договоров от 09.10.2023 № СП-0935с/65/ХТ-3-23, от 10.11.2023 № СП-1033с/65/ХТ-3-23, от 10.11.2023 № СП-1034с/65/ХТ-3-23, факт безосновательного удержания ответчиком денежных средств в размере 5 618 707 руб. 37 коп.., право на взыскание пени по договору от 09.10.2023 № СП-0935с/65/ХТ-3-23 в размере 7 751 409 руб. 16 коп. за периоды   с 08.12.2023 по 11.02.2024, с 30.03.2024 по 25.06.2024, по договору от 10.11.2023 № СП-1033с/65/ХТ-3-23 в размере 2 162 315 руб. 26 коп. за периоды с 30.03.2024 по 25.06.2024, по договору от  10.11.2023 № СП-1034с/65/ХТ-3-23 в размере 1 345 322 руб. 19 коп. за периоды с 30.03.2024 по 20.04.2024, процентов за пользование чужими денежными средствами по договору от 09.10.2023 № СП-0935с/65/ХТ-3-23 в размере 258 088 руб. 29 коп. за периоды с 26.06.2024 по 21.05.2025, по договору от 10.11.2023 № СП-1033с/65/ХТ-3-23 в размере 363 211 руб. 68 коп. за периоды с 26.06.2024 по 21.05.2025, по договору от  10.11.2023 № СП-1034с/65/ХТ-3-23 в размере 444 848 руб. 75 коп. за периоды с 21.04.2024 по 21.05.2025.

Ответчик в судебное заседание не явился, отзыва и возражений не представил.

Дело подлежит рассмотрению в порядке ч.3 ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Рассмотрев материалы дела, заслушав представителя истца, арбитражный суд

УСТАНОВИЛ:

09.10.2023 между акционерным обществом «Хабаровская ремонтно-монтажная компания», генподрядчик и обществом с ограниченной ответственностью «Спецконструктивстрой», субподрядчик, заключен договор № СП-0935с/65/ХТ-3-23, в соответствии с которым субподрядчик обязуется по заданию генподрядчика в соответствии с техническим требованием (приложение №1 к договору) выполнить «Выполнение работ по выносу сетей канализации и водопровода на объекте «Техперевооружение Хабаровской ТЭЦ-3 для обеспечения выдачи тепловой энергии в магистраль ТМ-35», а также сдать результат работ генподрядчику, а генподрядчик обязуется создать субподрядчику указанные в договоре условия для выполнения работ, принять результат работ и уплатить цену договора.

В соответствии с пунктом 1.5.2. договора в редакции дополнительного соглашения от 12.02.2024 №2 окончание выполнения работ: 29.03.2024.

В силу пункта 3.1. договора в редакции дополнительного соглашения от 16.02.2024 №3 цена договора в соответствии со сводным сметным расчетом (приложение №4 (изм.1 к дополнительному соглашению №1 к договору) с приложениями (приложения №4.1.-4.4.) является предельной и составляет 22 486 302 руб. 25 коп., без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 Налогового кодекса РФ.

В соответствии со сводным сметным расчетом цена договора с учетом НДС составляет 26 983 562 руб. 70 коп.

Как указано в пункте 3.5.1. договора в редакции дополнительного соглашения от 13.10.2023 №1, авансовые платежи в счет стоимости работ по договору в размере 30% от стоимости договора без учета НДС, кроме того НДС по ставке, установленной статьей 164 НК РФ на дату выплаты авансового платежа, выплачиваются в течение 30 календарных дней с даты получения заказчика счета, выставленного субподрядчиком, но не ранее чем за 30 календарных дней до даты его начала, определенной в соответствии с календарным графиком выполнения работ (приложение №3 к договору), и с учетом пунктов 3.5.2. договора. Последующие платежи в размере 70% от стоимости работ по договору выплачиваются в течение 7 рабочих дней с даты подписания сторонами документов, указанных в пункте 4.1. договора, на основании счета, выставленного субподрядчиком, и с учетом пункта 3.5.2. договора.

В пунктах 6.3.-.6.3.1. договора стороны согласовали, что в случае нарушения субподрядчиком обязательств по выполнению работ, в том числе сроков выполнения работ, установленных календарным графиком выполнения работ (приложение №3 к договору), генподрядчик вправе требовать уплаты субподрядчиком штрафной неустойки в размере 0,2% от цены договора за каждый день просрочки – в случае, когда нарушение привело или неизбежно приведет к изменению срока выполнения работ в целом по договору.

Истцом ответчику перечислен аванс в размере 19 375 657 руб. 38 коп., что подтверждается платежными поручениями от 10.10.2023 №12232 на сумму 2 274 471 руб. 30 коп., от 13.10.2023 №12475 на сумму 4 548 942 руб. 60 коп., от 25.01.2024 №771 на сумму 3 581 891 руб. 46 коп., от 19.01.2024 №586 на сумму 8 357 746 руб. 74 коп.

Кроме того, истцом оплачены работы, выполненные субсубподрядчиком ООО «ДВК Водострой в сумме 612 605 руб. 28 коп., что подтверждается платежным поручением от 15.04.2024 №4437, в назначении платежа указано: «оплата части договора подряда №1-01 от 06.02.2024 за ООО «СКС»».

Субподрядчиком выполнены работы на сумму 17 931 776 руб. 40 коп., что подтверждается справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 31.12.2023 №1 на сумму 17 056 626 руб., от 29.03.2024 №2 на сумму 875 150 руб. 40 коп., актами о приемке выполненных работ от 31.12.2023 №1, от 31.12.2023 №2, от31.12.2023 №3, от 31.12.2023 №4, от 29.03.2024 №2, подписанными сторонами и скрепленными печатями.

10.11.2023 между акционерным обществом «Хабаровская ремонтно-монтажная компания», генподрядчик и обществом с ограниченной ответственностью «Спецконструктивстрой», субподрядчик, заключен договор № СП-1033с/65/ХТ-3-23, в соответствии с которым субподрядчик обязуется по заданию генподрядчика в соответствии с техническим требованием (приложение №1 к договору) выполнить устройство фундамента насосной станции второго подъема на объекте «Техперевооружение Хабаровской ТЭЦ-3 для обеспечения выдачи тепловой энергии в магистраль ТМ-35», а также сдать результат работ генподрядчику, а генподрядчик обязуется создать субподрядчику указанные в договоре условия для выполнения работ, принять результат работ и уплатить цену договора.

В соответствии с пунктом 1.5.2. договора в редакции дополнительного соглашения от 12.02.2024 №1 окончание выполнения работ: 29.03.2024.

В силу пункта 3.1. договора цена в соответствии со сводным сметным расчетом (приложение №4 к договору) с приложениями (приложения №4.1.-4.5.) является предельной и составляет 6 930 497 руб. 64 коп., НДС не облагается по причине действия УСНО.

Как указано в пункте 3.5.1. договора в редакции дополнительного соглашения от 22.04.2024 №2, авансовые платежи в счет стоимости работ по договору в размере 30% от стоимости договора без учета НДС, кроме того НДС по ставке, установленной статьей 164 НК РФ на дату выплаты авансового платежа, выплачиваются в течение 30 календарных дней с даты получения заказчика счета, выставленного субподрядчиком, но не ранее чем за 30 календарных дней до даты его начала, определенной в соответствии с календарным графиком выполнения работ (приложение №3 к договору), и с учетом пунктов 3.5.2. договора. Последующие платежи в размере 70% от стоимости работ по договору выплачиваются в течение 7 рабочих дней с даты подписания сторонами документов, указанных в пункте 4.1. договора, на основании счета, выставленного субподрядчиком, и с учетом пункта 3.5.2. договора.

В пунктах 6.3.-.6.3.1. договора стороны согласовали, что в случае нарушения субподрядчиком обязательств по выполнению работ, в том числе сроков выполнения работ, установленных календарным графиком выполнения работ (приложение №3 к договору), генподрядчик вправе требовать уплаты субподрядчиком штрафной неустойки в размере 0,2% от цены договора за каждый день просрочки – в случае, когда нарушение привело или неизбежно приведет к изменению срока выполнения работ в целом по договору.

Истцом ответчику перечислен аванс в размере 3 796 376 руб. 63 коп., что подтверждается платежными поручениями от 27.02.2024 №2099 на сумму 298 490 руб. 40 коп., от 22.03.2024 №3580 на сумму 1 002 907 руб. 08 коп., от 22.02.2024 №1919 на сумму 1 663 319 руб. 43 коп., от 15.11.2023 №14058 на сумму 831 659 руб. 72 коп.

Субподрядчиком выполнены работы на сумму 1 764 380 руб. руб. 40 коп., что подтверждается справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 31.01.2024 №1 на сумму 331 656 руб., от 29.02.2024 №2 на сумму 1 432 724 руб. 40 коп., актами о приемке выполненных работ от 29.02.2024 №2, от 31.01.2024 №1, подписанными сторонами и скрепленными печатями.

10.11.2023 между акционерным обществом «Хабаровская ремонтно-монтажная компания», генподрядчик и обществом с ограниченной ответственностью «Спецконструктивстрой», субподрядчик, заключен договор № СП-1034с/65/ХТ-3-23, в соответствии с которым субподрядчик обязуется по заданию генподрядчика в соответствии с техническим требованием (приложение №1 к договору) выполнить «Устройство фундаментов опор эстакады и здания РУ-6кВ на объекте «Техперевооружение Хабаровской ТЭЦ-3 для обеспечения выдачи тепловой энергии в магистраль ТМ-35», а также сдать результат работ генподрядчику, а генподрядчик обязуется создать субподрядчику указанные в договоре условия для выполнения работ, принять результат работ и уплатить цену договора.

В соответствии с пунктом 1.5.2. договора в редакции дополнительного соглашения от 12.02.2024 №1 окончание выполнения работ: 29.03.2024.

В силу пункта 3.1. договора цена в соответствии со сводным сметным расчетом (приложение №4 к договору) с приложениями (приложения №4.1.-4.5.) является предельной и составляет 8 758 608 руб. 01 коп., без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 Налогового кодекса РФ.

Как указано в пункте 3.5.1. договора в редакции дополнительного соглашения от 22.02.2024 №2, авансовые платежи в счет стоимости работ по договору в размере 30% от стоимости договора без учета НДС, кроме того НДС по ставке, установленной статьей 164 НК РФ на дату выплаты авансового платежа, выплачиваются в течение 30 календарных дней с даты получения заказчика счета, выставленного субподрядчиком, но не ранее чем за 30 календарных дней до даты его начала, определенной в соответствии с календарным графиком выполнения работ (приложение №3 к договору), и с учетом пунктов 3.5.2. договора. Последующие платежи в размере 70% от стоимости работ по договору выплачиваются в течение 7 рабочих дней с даты подписания сторонами документов, указанных в пункте 4.1. договора, на основании счета, выставленного субподрядчиком, и с учетом пункта 3.5.2. договора.

В пунктах 6.3.-.6.3.1. договора стороны согласовали, что в случае нарушения субподрядчиком обязательств по выполнению работ, в том числе сроков выполнения работ, установленных календарным графиком выполнения работ (приложение №3 к договору), генподрядчик вправе требовать уплаты субподрядчиком штрафной неустойки в размере 0,2% от цены договора за каждый день просрочки – в случае, когда нарушение привело или неизбежно приведет к изменению срока выполнения работ в целом по договору.

Истцом ответчику перечислен аванс в размере 3 280 822 руб. 56 коп., что подтверждается платежными поручениями от 22.03.2024 №3579 на сумму 127 723 руб. 68 коп., от 15.11.2023 №14057 на сумму 1 051 032 руб. 96 коп., от 22.02.2024 №1920 на сумму 2 102 065 руб. 92 коп.

Субподрядчиком выполнены работы на сумму 1 137 992 руб. руб. 40 коп., что подтверждается справками о стоимости выполненных работ и затрат от 29.02.2024 №1 на сумму 182 462 руб. 40 коп., от 29.03.2024 № 2 на сумму 955 530 руб., актами о приемке выполненных работ от 29.02.2024 №1, от 29.03.2024 №2, подписанными сторонами и скрепленными печатями.

Истцом ответчику направлены претензии от 17.04.2024 №1305/17, от 17.06.2024 №2097/17, от 17.06.2024 №2096/17 с требованием о возврате суммы неотработанного аванса, уплаты пени и процентов за пользование чужими денежными средствами, содержащие уведомление о расторжении договоров в одностороннем порядке.

В силу пункта 1 статьи 450.1 ГК РФ предоставленное настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.

Из разъяснений, содержащихся в пункте 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2016 №54 «О некоторых вопросах применения общих положений ГК РФ об обязательствах и их исполнении», следует, что в случае правомерного одностороннего отказа от исполнения договорного обязательства полностью или частично договор считается соответственно расторгнутым или измененным (пункт 2 статьи 450.1ГК РФ).

Претензии от 17.04.2024 №1305/17, от 17.06.2024 №2097/17, от 17.06.2024 №2096/17  возвращены отправителю за истечением срока хранения.

В соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 165.1 ГК РФ, сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

В силу пункта 67 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», сообщение считается доставленным, если адресат уклонился от получения корреспонденции в отделении связи, в связи с чем она была возвращена по истечении срока хранения.

Риск неполучения поступившей корреспонденции несет адресат. Если в юридически значимом сообщении содержится информация об односторонней сделке, то при невручении сообщения по обстоятельствам, зависящим от адресата, считается, что содержание сообщения было им воспринято, и сделка повлекла соответствующие последствия (например, договор считается расторгнутым вследствие одностороннего отказа от его исполнения).

В соответствии с пунктом 11.4. договора покупатель имеет право в любое расторгнуть договор в одностороннем внесудебном порядке, после письменного предупреждения поставщика, направленного за 15 календарных дней до предполагаемой даты расторжения.

Судом установлено, что договор от 09.10.2023 № СП-0935с/65/ХТ-3-23 расторгнут в одностороннем порядке с 26 июня 2024, договор от 10.11.2023 № СП-1033с/65/ХТ-3-23 расторгнут в одностороннем порядке с 26 июня 2024, договор от 10.11.2023 № СП-1034с/65/ХТ-3-2 расторгнут в одностороннем порядке с 21 апреля 2024.

Истцом ответчику направлена претензия от 12.02.2025 №435/17 с требованием об оплате пени и процентов за пользование чужими денежными средствами.

Безосновательное удержание ответчиком денежных средств явилось для истца основанием для обращения в арбитражный суд с настоящим иском.

Отношения сторон основаны на обязательствах подряда и регулируются нормами главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), а также общими положениями гражданского законодательства об исполнении обязательств.

В силу пункта 1 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В силу статьи 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Вопрос оценки доказательств в силу части 1 статьи 71 АПК РФ является компетенцией суда, рассматривающего дело.

Истец объяснил, что в пункте 3.1. договора от 10.11.2023 № СП-1033с/65/ХТ-3-23 допущена опечатка в части указания на не применение НДС. В обоснование данной позиции истец указал на следующее:

1.    Договоры № Сп-0935с/65/ХТ-3-2В и № Сп-1034с/65/ХТ-3-23, заключенные в тот же период времени, указывают на применение сторонами ОСН (общей системы налогообложения).

2.    В платежных поручениях от 27.02.2024 №2099, от 22.03.2024 №3580, от 22.02.2024 №1919, от 15.11.2023 №14058 в назначении платежа указано: оплата по договору № Сп-1033с/65/ХТ-3-23, сумма платежа, в том числе НДС (20%).

3.    В информации Федеральной налоговой службы РФ, размещенной на официальном сайте https://pb.nalog.ru/index.html на сервисе «Прозрачный бизнес», указано, что ООО «СКС» и АО «ХРМК» специальные налоговые режимы не применяют.

При изложенных обстоятельствах стороны не могли применить УСН без начисления НДС. В противном случае в отношении общества органами налогового контроля принимались бы меры административного воздействия

Судом установлено, что в пункте 3.5.1. дополнительного соглашения от 22.02.2024 №2 к договору от 10.11.2023 №Сп-1033с/65/ХТ-3-23 стороны согласовали условие о выплате аванса с учетом НДС 20%.

Исследовав в совокупности представленные доказательства, судом установлено, что договором от 10.11.2023 №Сп-1033с/65/ХТ-3-23 стороны предусмотрели применение НДС 20%.

Доказательств выполнения работ по договору от 09.10.2023 № СП-0935с/65/ХТ-3-23 на сумму 1 443 880 руб. 98 коп., по договору от 10.11.2023 № СП-1033с/65/ХТ-3-23 на сумму 2 031 996 руб. 23 коп., по договору от  10.11.2023 № СП-1034с/65/ХТ-3-23 на сумму 2 142 830 руб. 16 коп. ответчиком не представлено.

Исковое требование о взыскании авансовых платежей в указанной суммеподлежит удовлетворению по правилам о неосновательном обогащении.      В соответствии с пунктом 1 статьи 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 ГК РФ.

При этом указанные правила применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли (часть 2 статьи 1102 ГК РФ).

Поскольку ответчиком не представлено доказательств возврата денежных средств в заявленном размере, оснований для их удержания после расторжения договора не имеется.

Исковое требование истца о взыскании неосновательного обогащения подлежит удовлетворению.

Истцом заявлено требование о взыскании пени по договору от 09.10.2023 № СП-0935с/65/ХТ-3-23 в размере 7 751 409 руб. 16 коп. за периоды   с 08.12.2023 по 11.02.2024, с 30.03.2024 по 25.06.2024, по договору от 10.11.2023 № СП-1033с/65/ХТ-3-23 в размере 2 162 315 руб. 26 коп. за периоды с 30.03.2024 по 25.06.2024, по договору от  10.11.2023 № СП-1034с/65/ХТ-3-23 в размере 1 345 322 руб. 19 коп. за периоды с 30.03.2024 по 20.04.2024.

Статьей 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (пеней, штрафом) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

В пунктах 6.3.-.6.3.1. договоров стороны согласовали, что в случае нарушения субподрядчиком обязательств по выполнению работ, в том числе сроков выполнения работ, установленных календарным графиком выполнения работ (приложение №3 к договору), генподрядчик вправе требовать уплаты субподрядчиком штрафной неустойки в размере 0,2% от цены договора за каждый день просрочки – в случае, когда нарушение привело или неизбежно приведет к изменению срока выполнения работ в целом по договору.

Расчет пени произведен истцом, исходя из условий договоров, количества дней просрочки (начисление за периоды с 08.12.2023 по 11.02.2024, с 30.03.2024 по 25.06.2024 по договору от 09.10.2023 № СП-0935с/65/ХТ-3-23, с 01.01.2024 по 11.02.2024, с 30.03.2024 по 25.06.2024 по договору от 10.11.2023 № СП-1033с/65/ХТ-3-23, с 01.01.2024 по 11.02.2024, с 30.03.2024 по 20.04.2024 по договору от 10.11.2023 № СП-1034с/65/ХТ-3-23) в размере 0,2% от цены договора за каждый день просрочки, что составляет:

- по договору от 09.10.2023 № СП-0935с/65/ХТ-3-23 - 7 751 409 руб. 16 коп;

- по договору от 10.11.2023 № СП-1033с/65/ХТ-3-23 в размере 2 162 315 руб. 26 коп.;

- по договору от  10.11.2023 № СП-1034с/65/ХТ-3-23 в размере 1 345 322 руб. 19 коп.

Расчет судом признан обоснованным, юридически и математически верным.

Исковое требование о взыскании пени подлежит удовлетворению в заявленном размере. 

Истцом заявлено требование о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами процентов за пользование чужими денежными средствами по договору от 09.10.2023 № СП-0935с/65/ХТ-3-23 в размере 258 088 руб. 29 коп. за периоды с 26.06.2024 по 21.05.2025, по договору от 10.11.2023 № СП-1033с/65/ХТ-3-23 в размере 363 211 руб. 68 коп. за периоды с 26.06.2024 по 21.05.2025, по договору от  10.11.2023 № СП-1034с/65/ХТ-3-23 в размере 444 848 руб. 75 коп. за периоды с 21.04.2024 по 21.05.2025.

Пунктом 1 статьи 395 ГК РФ предусмотрено, что в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, еслииной размер процентов не установлен законом или договором.

Расчет процентов за пользование чужими денежными средствами произведен истцом, исходя из количества дней просрочки (периоды начисления с 26.06.2024 по 21.05.2025 по договору от 09.10.2023 № СП-0935с/65/ХТ-3-23, с 26.06.2024 по 21.05.2025 по договору от 10.11.2023 № СП-1033с/65/ХТ-3-23, с 21.04.2024 по 21.05.2025 по договору от 21.05.2025, по договору от 10.11.2023 № СП-1034с/65/ХТ-3-23), суммы неосновательного обогащения в зависимости от договора., ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды, составляет:

- по договору от 09.10.2023 № СП-0935с/65/ХТ-3-23 в размере 258 088 руб. 29 коп.;

- по договору от 10.11.2023 № СП-1033с/65/ХТ-3-23 в размере 363 211 руб. 68 коп.;

- по договору от  10.11.2023 № СП-1034с/65/ХТ-3-23 в размере 444 848 руб. 75 коп.

Исковое требование истца о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами подлежит удовлетворению в заявленном размере.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ судебные расходы в виде уплаченной государственной пошлины в размере 396 885 руб. подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

Государственная пошлина в  размере 7 554 руб. подлежит взысканию с ответчика в доход федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л

Иск удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Спецконструктивстрой» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 680014, 

<

...>) в пользу акционерного общества «Хабаровская ремонтно-монтажная компания» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 680033, 

<

...>) 17 943 902 руб. 70 коп., составляющих по договору от 09.10.2023 № СП-0935с/65/ХТ-3-23 неосновательное обогащение  в размере 1 443 880 руб. 98 коп., пени в размере 7 751 409 руб. 16 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 258 088 руб. 29 коп., по договору от 10.11.2023 № СП-1033с/65/ХТ-3-23 неосновательное обогащение  в размере 2 031 996 руб. 23 коп., пени в размере 2 162 315 руб. 26 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 363 211 руб. 68 коп., по договору от  10.11.2023 № СП-1034с/65/ХТ-3-23 неосновательное обогащение  в размере 2 142 830 руб. 16 коп., пени в размере 1 345 322 руб. 19 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 444 848 руб. 75 коп., а также судебные расходы в виде уплаченной государственной пошлины в размере  396 885 руб.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Спецконструктивстрой» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 7 554 руб.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

    Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения.

     Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края.

Судья                                                                                                               Л.А. Збарацкая