АРБИТРАЖНЫЙ СУД КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Курск, ул. К. Маркса, д. 25

http://www.kursk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А35-1730/2020

21 октября 2020 года

г. Курск

Резолютивная часть решения объявлена 19.10.2020.

Решение в полном объеме изготовлено 21.10.2020

 

Арбитражный суд Курской области в составе судьи Бесединой А.Ю., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрел в открытом судебном заседании материалы дела по иску

общества с ограниченной ответственностью «Строй Альянс» 

к обществу с ограниченной ответственностью «АКВЕЛКУРСК» 

о взыскании задолженности в размере 7 354 361 руб. 93 коп., расходов по оплате госпошлины. 

В судебном заседании участвуют представители: 

от истца: не явился, извещен надлежащим образом, 

от ответчика: не явился, извещен надлежащим образом.

Общество с ограниченной ответственностью «Строй Альянс» обратилось в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью «АКВЕЛКУРСК» о взыскании задолженности в размере 7 354 361 руб. 93 коп., расходов по оплате госпошлины.

Через канцелярию суда от истца поступило ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие его представителя. Ходатайство судом удовлетворено.

Через канцелярию суда от истца поступило письменное мнение на отзыв ответчик и ходатайство об истребовании доказательств. Документы приобщены к материалам дела.

Согласно части 4 статьи 66 АПК РФ лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.

В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения.

Таким образом, нормы статьи 66 АПК РФ закрепляют процессуальный порядок, при котором возможно удовлетворение ходатайства об истребовании доказательств.

Согласно части 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Указанная норма АПК РФ закрепляет общее правило о бремени доказывания. Содержание данного правила определяется действием принципа состязательности в арбитражном процессе.

Последствием неисполнения этой юридической обязанности (непредставление доказательств) может стать принятие судом решения, которое не будет соответствовать интересам стороны, не представившей доказательства в полном объеме.

Заявителем ходатайства не доказано, что им приняты все возможные меры для получения истребуемых доказательств, кроме того, не указано, какие существенные обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения настоящего дела, будут подтверждены данными доказательствами, на основании чего, руководствуясь ст.67-68 АПК РФ, в удовлетворении ходатайства отказано в связи с его необоснованностью и отсутствием правовых обоснований.

Представители лиц, участвующих в деле в судебное заседание не явились.

Дело рассмотрено в соответствии со ст.156 АПК РФ, в отсутствие представителей сторон, надлежаще извещенных о времени и месте судебного заседания.

Изучив материалы дела, заслушав представителей сторон, арбитражный суд

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «Строй Альянс», ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, адрес – 305000, 

<

...>, дата регистрации в качестве юридического лица - 12.12.2014.

Общество с  ограниченной ответственностью «АКВЕЛКУРСК»,ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>, юридический адрес: 305004, 

<

...>, дата регистрации в качестве юридического лица - 30.10.2008.

Фондом капитального ремонта в порядке, установленном постановлением постановления Администрации Курской области от 11.07.2014 № 419-па «Об утверждении Порядка привлечения Фондом «Региональный оператор фонда капитального ремонта многоквартирных домов Курской области» подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме» был объявлен конкурс по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, по адресам: 

<

...> Ленина д.23, 

<

...>.

Решением конкурсной комиссии от 18 декабря 2015г. по конкурсу 26.КР.2016 на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества (кровель, фасадов, внутридомовых инженерных систем, фундаментов) многоквартирного дома №88 по ул. Дзержинского в г. Курске Курской области, включенного в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Курской области на 2014-2016г.г. победителем признан ООО «АквелКурск».

На основании результатов проведенного открытого конкурса между Фондом «Региональный оператор фонда капитального ремонта многоквартирных домов Курской области» и обществом с ограниченной ответственностью «АквелКурск», заключен договор № КР-005/2016 от 12.01.2016г. строительного подряда на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов.

Согласно договору, Подрядчик обязуется выполнить Работы по Договору в соответствии с Графиком производства работ (Приложение №4 к настоящему договору). Сроки начала и окончания работ по этапам «Строительно-монтажные работы», на каждом Объекте являются исходными для определения имущественных санкций в случае нарушения ПОДРЯДЧИКОМ сроков производства Работ (пункт 2.1. Договора).

Сдача законченного ремонта оформляется Актами выполненных работ (по форме № КС-2) (далее - акт по форме КС-2), справками о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3) (далее - справка по форме КС-3).

Между Обществом с ограниченной ответственностью «АквелКурск» (Подрядчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Ситисервис» (Субподрядчик) 14 марта 2016 года заключен договор субподряда №1403/16 на выполнение работ по капитальному ремонту кровли, фасадов жилого фонда.

Согласно п. 1.1. договора, субподрядчик обязуется выполнить по заданию Подрядчику своими силами и из своих материалов комплекс работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (кровель, фасадов) согласно адресному перечню, указанному в Приложении № 1 (далее именуется - «Объект»), в соответствии с техническими требованиями и сметой документацией, прилагаемыми к настоящему договору и сдать результат выполненных работ Подрядчику, а Подрядчик обязуется принять результат выполненной работы и оплатить его в соответствии с условиями настоящего о Договора.

Субподрядчик обязан приступить к выполнению работ по настоящему Договору (далее -«начальный срок выполнения pa6oт») с момента подписания.

Срок окончания выполнения работ (далее - «конечный срок выполнения работ») -Субподрядчик обязан выполнить все работы предусмотренные настоящим договором в течение 60 (шестидесяти) дней после подписания договора (п.2.1-2.2).

Пунктом 3.1, договора предусмотрено, что цена договора составляет 12 943 988 (Двенадцать миллионов девятьсот сорок три тысячи девятьсот восемьдесят восемь) рублей 11 копеек.

В разделе 4 договора стороны согласовали порядок оплаты и приемки-сдачи работ.

4.2. Оплата но настоящему договору производится Подрядчиком на основании выставленного Субподрядчиком счета в течение 18 (Восемнадцати) банковских дней с даты подписания акта приемки выполненных работ Подрядчиком.

4.3. С целью осуществления расчетов по настоящему Договору Субподрядчик после завершения работ по Объекту представляет Подрядчику отчеты, составленные по формам Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) не менее, чем в 2 (двух) экземплярах. Отчеты Субподрядчика по формам КС-2 и КС-3 должны быть оформлены в строгом соответствии с действующими требованиями к оформлению указанных документов; пометки, исправления, подчистки не допускаются, такие документы юридической силы не имеют. Отчеты по форме КС-2, КС-3. подписанные обеими сторонами, являются допустимым доказательством объема фактически выполненных работ за отчетный период, при условии отсутствия Акта выверки объемов работ, оформленного в порядке, установленным настоящим договором, за тот же период. При этом указанные отчеты не являются доказательством надлежащего качества принятых по ним работ.

4.4 Расчет за работы производится в соответствии с выполнением Субподрядчиком работ на основании предоставляемых Подрядчиком счета счета-фактуры в соответствии с подписанными сторонами договора актами приемки выполненных работ по форме КС-2 и справками о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3

4.5 При наличии обоснованных претензий Подрядчика к результатам работ оплата осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Сторонами акта, подтверждающего устранение Субподрядчиком выявленных недоделок. При этом общая сумма перечисляемых Субподрядчику денежных средств не может превышать цену работ, указанную в пункте 3.1, настоящего Договора. В случае противоречия условий настоящего Договора и актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 (далее - акт по форме КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (далее - справка по форме КС-3) юридическую силу имеют условия настоящего Договора, если иное не будет предусмотрено дополнительным соглашением.

4.8. Приемка выполненных работ производится Подрядчиком по объектам, совместно с Заказчиком. Субподрядчик обязан письменно известить Подрядчика о готовности результата выполненных работ к сдаче.

4.9. Подрядчик принимает выполненные работы после их осмотра на основании следующих оформленных Субподрядчиком документов:

акта по форме №КС-2;

справки по форме №КС-3;

актов приемки скрытых работ (при наличии скрытых работ);

актов об устранении недоделок, отмеченных представителем Подрядчика (если такие недоделки были отмечены):

сертификатов, паспортов на материалы и оборудование.

Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предъявления вышеуказанных приемо-сдаточных документов обязан направить Субподрядчику подписанные акты и справку. Датой выполнения всего объема работ, предусмотренных настоящим Договором, является день подписания Субподрядчиком акта но форме КС-2, если работы были приняты Подрядчиком. Если работы не были приняты Подрядчиком, датой выполнения всего объема работ является день подписания Субподрядчиком акта по форме КС-2 после устранения им всех недостатков.

Датой приемки всего объема выполненных Субподрядчиком работ является день подписания акта но форме КС-2 Подрядчиком либо, при не подписании данного акта в срок и отсутствии мотивированного отказа, 6-й рабочий день со дня получения вышеуказанных приемо-сдаточных документов Подрядчиком.

4.10. Подрядчик имеет право отказать в приемке выполненных работ с предоставлением Субподрядчику письменного отказа с указанием его причин (мотивированного отказа), а именно:

- несоответствие выполненных работ условиям настоящего Договора и приложений к нему, утвержденной технической документации;

- несоблюдение СНиП производства и качества работ.

Отказ от приемки выполненных работ без указания причин считается немотивированным.

4.11. В случае мотивированного отказа Подрядчика от приемки выполненных работ. Сторонами составляйся двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроками их выполнения (с согласия Подрядчика Стороны вправе установить срок выполнения доработок, отличный от срока указанного в пункте 5.3.7. настоящею Договора), при этом полученные Подрядчиком документы, указанные в пункте 4.9. настоящего Договора, возвращаются Подрядчиком Субподрядчику, и предоставляются Субподрядчиком Подрядчику повторно, в исправленном виде, одновременно с актом, подтверждающим устранение Субподрядчиком выявленных недостатков. При этом указанные документы по перечню пункта 4.9. настоящего Договора, должны быть датированы днем предъявления Субподрядчиком к приемке исправленных работ. В случае неподписания (несоставления) Субподрядчиком двустороннего акта в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Подрядчика мотивированного отказа от приемки работ, документом, подтверждающим наличие недостатков, перечень и сроки выполнения Субподрядчиком необходимых доработок, обязательным для исполнения Субподрядчиком, является мотивированный отказ Подрядчика от приемки работ.

4.12. В случае немотивированного отказа или задержки подписания Подрядчиком акта по форме КС-2 более чем на 5 (пять) рабочих дней, работы считаются выполненными Субподрядчиком с должным качеством, в объеме согласно акту по форме КС-2 и подлежат оплате.

01 августа 2016 года права и обязанности субподрядчика но договору № 1403/16 от 14 марта 2016 года были переданы Обществом с ограниченной ответственностью «Ситисервис» Обществу с ограниченной ответственностью «Строй Альянс» (Истец), о чем сторонами было подписано трехстороннее соглашение об уступке договора, которое также было подписано со стороны ООО «АквелКурск».

02 марта 2017 года Истец направил в адрес Ответчика документы по форме КС-2. КС-3, подтверждающие факт выполнения работ по договору, для принятия результата работ в установленном законом и договором порядке, Данный факт подтверждается исходящим письмом № 5 от 02 марта 2017 года, направленным с описью вложения, почтовой квитанцией и уведомлением о вручении от 21.03,2017 г. Однако работы не были приняты Ответчиком, документы в установленном законом и договором порядке не были подписаны.

До настоящего времени Ответчиком не приняты и не оплачены выполненные Истцом работы на общую сумму 7 354 361 (Семь миллионов триста пятьдесят четыре тысячи триста шестьдесят один) руб. 93 коп.

На основании п. 4 ст. 753 ГК РФ в актах о приемке выполненных работ №1 от 01.03.2017 г., № 2 от 01.03.2017 г., № 3 от 01.03,2017 г., № 4 от 01.03.2017 г.. № 5 от 01.03.2017 г.. № 6 от 01.03.2017 г., № 7 от 01.03.2017 г.. № 8 от 01.03.2017 г. Истцом была сделана соответствующая отметка об отказе от подписи ООО «АквелКурск».

10.12.2019 в адрес Ответчика была направлена досудебная претензия с требованием рассчитаться за работы и погасить возникшую задолженность в срок до 30 декабря 2019 года, ответа на которую не последовало. 

Так как оплаты выполненных работ от ответчика не поступило, истец обратился в суд с настоящим иском.

Ответчик в письменном отзыве заявленные требования отклонил, ссылаясь на тот факт, что истец не приступил к выполнению работ по договору, в виду чего ООО «АквелКурск» пришлось своими силами завершать работы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов.

Арбитражный суд считает исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном настоящим кодексом. 

В соответствии со статьей 8 ГК РФ гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. 

В силу части 1 статьи 11 ГК РФ арбитражные суды осуществляют защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав.

Статьей 12 ГК РФ предусмотрены определенные способы защиты гражданских прав.

Условиями предоставления судебной защиты лицу, обратившемуся в суд с рассматриваемым требованием, являются установление наличия у истца принадлежащего ему субъективного материального права потребовать исполнения определенного обязательства от ответчика, наличия у ответчика обязанности исполнить это обязательство и факта его неисполнения последним.

Согласно статье 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

В соответствии со статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом, в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов; односторонний отказ от исполнения обязательств и одностороннее изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В силу пункта 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Статьей 708 ГК РФ предусмотрено, что в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). 

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы (пункт 1). 

Указанные в договоре подряда начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работы могут быть изменены в случаях и в порядке, предусмотренных договором (пункт 2). 

Частью 1 статьи 709 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения. 

Оплата выполненных подрядчиком работ, в соответствии со ст. 746 ГК РФ, производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.

На основании части 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

Согласно разъяснениям, данным в пунктах 8 и 14 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 №51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда», статья 753 ГК РФ предусматривает возможность составления одностороннего акта. Названная норма защищает интересы подрядчика, если заказчик необоснованно отказался от надлежащего оформления документов, удостоверяющих приемку. Оформленный в порядке, установленном пунктом 4 статьи 753 ГК РФ, акт является доказательством исполнения подрядчиком обязательства по договору и при отказе заказчика от оплаты на суд возлагается обязанность рассмотреть доводы заказчика, обосновывающие его отказ от подписания акта приемки результата работ. Основанием для признания судом одностороннего акта сдачи или приемки результата работ недействительным является признание обоснованными мотивов отказа заказчика от подписания акта.

Обоснованными мотивами для отказа от подписания акта могут быть: отрицательные результаты испытаний при приемке; нарушение процедуры приемки работ, предусмотренной договором или установленной нормативно-правовыми актами для отдельных объектов строительства; обнаружение недостатков, которые исключают возможность использования объекта строительства для указанной в договоре строительного подряда цели и не могут быть устранены (существенные недостатки).

По смыслу норм ГК РФ обязанность доказывания обоснованности мотивов отказа от подписания актов о приемке выполненных работ возложена на заказчика.

В соответствии с п. 4.12 Договора, в случае немотивированного отказа или задержки подписания Подрядчиком акта по форме КС-2 более чем на 5 (пять) рабочих дней, работы считаются выполненными Субподрядчиком с должным качеством, в объеме согласно акту по форме КС-2 и подлежат оплате.

ООО «Строй Альянс» выполнило работы на сумму 7 354 361 руб. 93 коп., в связи с чем, направило в адрес ООО «АКВЕЛКУРСК» в порядке ст. 753 ГК РФ для подписания соответствующие Акты о приемке выполненных работ на сумму 7 354 361 руб. 93 коп. от 01.03.2019 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Справка формы КС-3) №1 на сумму 7 354 361 руб. 93 коп. от 01.03.2019, что подтверждается представленными в материалы дела актами с отметкой об отказе от подписания ООО «АКВЕЛКУРСК».

Поскольку в установленный законом и Договором срок полученные ООО «АКВЕЛКУРСК» Акты формы КС-2 и Справки формы КС-3не подписали и не был дан мотивированный отказ от их подписания, на основании н. 4 ст. 753 ГК РФ они были подписаны ООО «Строй Альянс» в одностороннем порядке, о чём в актах сделана соответствующая отметка. 

Применительно к п. 4 ст. 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и его приемка заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами, который может быть подписан в одностороннем порядке подрядчиком. 

21.05.2020 судом был сделан запрос в Фонд «Региональный оператор фонда капитального ремонта многоквартирных домов Курской области» о предоставлении сведений о выполнении работ по капитальному ремонту МКЖД, расположенных по адресу 

<

...>, г.Курск, ул. Дзержинского, д.88, 

<

...>, 

<

...>, 

<

...>; о принятии работ по капитальному ремонту указанных МКЖД от подрядных организаций и об их оплате.

В письменном ответе на запрос Фонд «Региональный оператор фонда капитального ремонта многоквартирных домов Курской области» сообщил, что выполненные работы приняты у ООО «АКВЕЛКУРСК» без замечаний. В доказательство к ответу на запрос приложены копии Актов по форме КС-2, Справок по форме КС-3.

Довод ответчика о выполнении работ своими силами судом не принимаются, так как ответчиком не представлены документальные доказательства.

Факт выполнения истцом соответствующих работ подтверждается представленными в материалы дела доказательствами.

Основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику (пункт 8 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 №51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда»).

Таким образом, оценив представленные документы, суд приходит к выводу о том, что поскольку ответчик своевременно не оплатил задолженность, исковые требования о взыскании стоимости выполненных работ по договору субподряда №1403/16 от 14.03.2016 в размере 7 354 361 руб. 93 коп. являются законными, обоснованными и подлежат удовлетворению в полном объеме.

На основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а так же в силу предоставления истцу отсрочки в уплате госпошлины по настоящему делу, обязанность по уплате государственной пошлины в федеральный бюджет возлагается на ответчика.

Руководствуясь статьями 6 - 10, 65, 70, 110, 167-170, 176, 177, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л :

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Строй Альянс» удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью ««АКВЕЛКУРСК» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строй Альянс» задолженность в размере 7 354 361 руб. 93 коп.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «АКВЕЛКУРСК» в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 59 772 руб. 00 коп.

Настоящее решение может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Курской области в срок, не превышающий месяца со дня его принятия.

Судья                                                                                                                 А.Ю. Беседина