АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Учебная, д. 51, г. Омск, 644024; тел./факс (3812) 31-56-51/53-02-05; http://omsk.arbitr.ru, http://my.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

№ дела

А46-16577/2019

29 октября 2019 года

город Омск

 

Резолютивная часть решения объявлена 22 октября 2019 года.

Решение в полном объеме изготовлено 29 октября 2019 года.

 

Арбитражный суд Омской области в составе судьи Луговика С.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к Администрации Крутинского муниципального района Омской области (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании 1 948 907 руб. 62 коп.,

при участии в судебном заседании:

от истца – ФИО3 по доверенности от 05.09.2018 (паспорт), ФИО4 (паспорт);

от ответчика – ФИО5 по доверенности от 10.01.2019 № 32 (паспорт);

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель ФИО2 (далее – ИП Абель В.Р., истец) обратился в Арбитражный суд Омской области с исковым заявлением к Администрации Крутинского муниципального района Омской области о взыскании 1 948 907 руб. 62 коп. задолженности по муниципальному контракту от 19.04.2019 № Ф.2019.182447.

Поскольку присутствовавшие в предварительном судебном заседании представители сторон соответствующих возражений не заявили, суд в порядке части 4 статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации завершил подготовку дела к судебному разбирательству и открыл судебное заседание в первой инстанции.

В судебном заседании, состоявшемся 22.10.2019 г., представитель истца исковые требования поддержал в полном объёме.

Ответчик заявил о признании исковых требований.

Рассмотрев материалы дела, заслушав представителей сторон, суд установил следующее.

Из материалов дела следует, что 19.04.2019 Администрация Крутинского муниципального района Омской области (муниципальный заказчик) и индивидуальный предприниматель ФИО2 (подрядчик) заключили муниципальный контракт № Ф.2019.182447, согласно которому муниципальный заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению всех работ, предусмотренных настоящим контрактом, собственными силами и силами привлечённых субподрядных организаций в соответствии с утверждённой сметной документацией (пункт 1.2 контракта).

В силу пункта 2.1 муниципального контракта от 19.04.2019 № Ф.2019.182447 общая стоимость контракта в ценах на дату сдачи объекта в эксплуатацию составляет 1 903 596 руб. 45 коп., НДС не облагается согласно статьям 346.12 и 346.13 главы 26.2 Налогового кодекса, с учётом всех затрат подрядчика при выполнении работ.

В пункте 4.1 муниципального контракта от 19.04.2019 № Ф.2019.182447 стороны определили календарные сроки выполнения работ: начало работ – дата заключения контракта; окончание работ – в течение 30 дней с даты заключения контракта, но не позднее 01.06.2019.

В дату заключения контракта сторонами согласован локальный сметный расчёт.

Приступив к работам, подрядчик установил, что фактический объём работ превышает объём работ, согласованный сторонами в локальном сметном расчёте к муниципальному контракту и для достижения результата на который рассчитывал муниципальный заказчик, заключая контракт, необходимо выполнить дополнительные работы, а именно:

- произвести выемку грунта (жижи);

- отсыпать глиняный замок с уширением полотна до 5,5 метров;

- сформировать места для проезда встречных машин;

- устроить разворотную площадку для машин у испарителей.

Кроме того, сметным расчётом к муниципальному контракту предусмотрен ремонт дороги 272 метра, фактически длина дороги составила 460 метров.

Дополнительный объём работ был устно согласован сторонами муниципального контракта, о чём свидетельствует утверждённый заказчиком 13.05.2019 локальный сметный расчёт и фактически выполнен подрядчиком.

Стоимость дополнительных работ, не предусмотренных муниципальным контрактом, составила 1 948 907 руб. 62 коп.

27.05.2019 сторонами подписан акт о приёмке выполненных работ по муниципальному контракту на сумму 1 903 596 руб. 44 коп. (основные работы), стоимость работ оплачена муниципальным заказчиком.

Письмом от 13.05.2019 исх. № 7/1 (вх. № 2657 от 02.08.2019) Администрация Крутинского муниципального района была уведомлена о выполненных дополнительных работах и необходимости их оплаты в соответствии с локальным сметным расчётом, прилагаем к письму, наряду с актами по форме КС-2, КС-3.

Дополнительные работы приняты заказчиком без замечаний относительно их объёма и качества, о чём свидетельствуют подписанные заказчиком акты по форме КС-2, КС-3.

Кроме того, письмом от 02.08.2019 исх. № 1454-А заказчик сообщил, о том что выполнение дополнительных работ, действительно, необходимо и гарантировал их оплату до 15.08.2019.

Пунктом 3.2.1 муниципального контракта от 19.04.2019 № Ф.2019.182447 установлено, что расчёты по контракту осуществляются муниципальным заказчиком в пределах доведённых лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных по объекту на текущий финансовый год (КБК 50204090250119990244225), в следующем порядке: муниципальный заказчик перечисляет денежные средства подрядчику на основании подписанных сторонами форм № КС-2, № КС-3 и выставленного подрядчиком счёта-фактуры (счёта) в течение 15 рабочих дней.

С учётом того, что акты по форме КС-2, КС-3 подписаны стороной заказчика 02.08.2019, оплата выполненных подрядчиком дополнительных работ должна быть осуществлена, не позднее 23.08.2019. Однако, в указанные сроки оплата работ ответчиком не произведена.

26.08.2019 ИП Абель В.Р. направил в адрес Администрации Крутинского муниципального района Омской области претензию, в которой ссылаясь на пп. 14.3, 14.4 муниципального контракта от 19.04.2019 № Ф.2019.182447 просил оплатить стоимость дополнительных работ в течение 15-ти (календарных) дней с момента её получения.

Ответа на претензию не последовало, стоимость дополнительных работ до настоящего времени не оплачена, что послужило основанием для обращения в Арбитражный суд Омской области с настоящим иском.

Ответчик в судебном заседании иск признал.

Это признание не противоречит закону, не нарушает права других лиц (ч. 5 ст. 49 АПК РФ), сделано уполномоченным лицом, поэтому принято судом.

В соответствии с ч. 3 ст. 70 АПК РФ признание стороной обстоятельств, на которых другая сторона основывает свои требования или возражения, освобождает другую сторону от необходимости доказывания таких обстоятельств. Факт признания сторонами обстоятельств заносится арбитражным судом в протокол судебного заседания и удостоверяется подписями сторон. Признание, изложенное в письменной форме, приобщается к материалам дела.

Требования приведённой процессуальной нормы соблюдены, признание ответчиком иска в письменной форме приобщено к материалам дела.

В соответствии с ч. 4 ст. 170 АПК РФ в случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения может быть указано только на признание иска ответчиком и принятие его судом.

В связи с чем иск судом удовлетворён.

Учитывая изложенное и руководствуясь 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с Администрации Крутинского муниципального района Омской области (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 1 948 907 руб. 62 коп. задолженности по муниципальному контракту от 19.04.2019 № Ф.2019.182447, а также 32 489 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

В соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.

Арбитражный суд Омской области разъясняет, что в соответствии со статьей 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.

По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия и может быть обжаловано в этот же срок путем подачи апелляционной жалобы в Восьмой арбитражный апелляционный суд.

Информация о движении дела может быть получена путём использования сервиса «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 

Судья                                                                                                         С.В. Луговик